문서번호	산지방재과-12615
결재일자	2019.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		사면정비팀장	산지방재과장
협 조
	주무관

『19년 산사태예방사업 시공품질 향상 및 안전성 확보』를 위한

2019년 산사태 예방사업 현장점검(하반기) 계획

2019. 11.

푸른도시국

(산지방재과)

『19년 산사태예방사업 시공품질 향상 및 안전성 확보를 위한』

2019년 산사태예방사업 현장점검(하반기) 계획

’19년 하반기 산사태 예방사업의 시공품질 향상과 안전사고 예방을 위해

하반기 사방사업 공사장 안전 관리 실태 및 공사 추진현황 등을 점검하여

공사현장 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검개요

추진목적

❍ ’19년 하반기 산사태예방사업 시행중인 공사현장에 대한 현장점검

❍ 시공품질 향상 및 공사현장 안전성 확보

❍ 사방사업 추진 및 시설물 관리실태 점검

추진경위

❍ ’19.08 ~ ‘19.11  : 계약심사 및 공사발주

❍ ’19.09 ~ ‘19.12  : 공사착공 및 시행

Ⅱ		사업추진 현황

하반기 사업개요

❍ 사업위치 : 종로구 편창동 산6-78번지 등 24개소

❍ 사업기간 : 2019. 08. ~ 2019. 12.

❍ 사업대상 : 자치구(10개구) 25개소

❍ 사 업 비 : 1,366백만원(산지사방 및 계류보전 등)

❍ 추진방법 : 사업비 재배정 시행

사업추진 현황

❍ 기관별 정비대상

계	종로	광진	도봉	노원	은평	서대문	양천	관악	강동	금천
25개소	1	1	1	7	6	1	4	1	2	1

❍ 공사추진 현황                                   (’19.11.27. 기준)

구 분	계	설계중	공사중	공사완료	비 고
개 소	25	1 (금천)	21	3	공정율 75%

Ⅲ		현장 점검계획

점검방향

❍ 사업규모별 구분

- 서울시, 외부전문가(2인) 합동점검 : 사업비 1억원 이상

- 자치구 자체점검 : 사업비 1억원 이하

❍ 자치구 자체점검 대상 중 서울시 점검을 요청(희망)하는 사업

❍ 현장점검 시 설계심의위원(외부전문가 2명) 참여

점검개요

❍ 점검기간 : ’19.12.02(월)~12.13.(금) 기간중 3일

❍ 점검대상 : 25개소

- 서울시 점검대상 : 광진구 구의동 34-2번지 등 5개소

- 자치구 점검대상 : 종로구 평창동 산6-78 등 20개소

❍ 점검방법 : 사면정비팀(3명) 및 외부전문가(2인) 현장 순회점검

주요 점검내용

❍ 주요 공정 등 사업내용 적정 여부

❍ 사방시설물 시공의 적정성 및 안전성 확보 여부

❍ 예산집행의 타당성(집행잔액, 낙찰액 사용 내역 등)

❍ 공사로 인한 시민 불편사항 발생여부 등

시 점검 세부내용

❍ 점검대상 : 5개소

❍ 점검자(5명) : 사면정비팀장등 3명, 전문가 2명(산림기술자등)

구 분	계	광진	노원	관악	금천
점검대상	5개소	1	2	1	1

- 금천구 : 실시설계 도서 검토

Ⅳ		행정사항

자치구 협조사항

❍ 자치구 점검대상 중 서울시 점검을 희망하는 대상은 점검요청

❍ 자체 점검반을 구성하여 점검

❍ 자체점검 실시 후 점검결과 등 조치계획 제출(12.20까지)

❍ 점검자료 준비 및 공사장 위치 안내(사업소 포함)

❍ 점검일시·장소 등 세부사항은 점검전 별도 협의

점검결과 조치

❍ 현장조치 가능한 경미한 지적사항은 현장 시정조치

❍ 시일이 필요한 지적사항은 공사완료 전까지 시정조치

❍ 장기적 검토가 필요한 사항은 별도 조치계획 수립 추진

외부전문가 수당 지급(시 점검)

❍ 소요예산 : 3일×282천원×2인 = 1,692천원

(1일 특급기술자 노임단가 적용)

❍ 예산과목 : 산림안전관리, 산림내 사면정비, 사무관리비(100-201-01)

Ⅴ		향후 추진일정

❍ ’19. 11. 27.           : 점검계획 통보(시→자치구, 사업소)

❍ ’19. 12. 02.~ 12.13. : 합동점검 시행

❍ ’19. 12. 20            : 점검결과 및 조치계획 제출(자치구→시)

❍ ’19. 12.23            : 점검결과 보고(시)

붙 임  1. 공사장 점검표 제출양식 1부.

2. 점검대상 1부.  끝.