문서번호	자연생태과-629
결재일자	2019.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	생태복원팀장	자연생태과장	푸른도시국장

2019년 소규모 생물서식공간조성 추진계획

2019. 1.

푸른도시국

(자연생태과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	관련자치구
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019.  소규모 생물서식공간 조성 추진계획

도시 녹지지역 내 습지 등 수자원을 이용하여 소규모 생물서식공간을 조성함으로써 도시생태계 회복 등에 기여코자 함.

Ⅰ		추진방향

소규모 연못, 웅덩이 등 지속적으로 물 유지가 가능한 서식처 조성

지속적인 모니터링 실시로 조성지의 환경 상태와 변화를 체계적으로

관리하고 보완함으로써 생물다양성 증진

도시민의 생태학습 및 환경교육의 장소로 적극 활용

Ⅱ		사업개요

위    치 : 서대문구 안산도시자연공원 등 4개소

사업내용 : 연못 조성, 초화류 및 수생식물 식재 등

사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 10.

총사업비 : 553.8백만원

연도별 추진현황

구 분	계	2004 ~2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
소규모 생물 서식공간 조성	89개소 160,242	51개소 128,617㎡	9개소 6,575㎡	8개소 14,100㎡	7개소 1,650㎡	3개소 1,300㎡	6개소 4,250㎡	5개소 3,750㎡
예산액(백만원)	12,015	6,390	1,608	1,261	820	570	692	674

Ⅲ		세부 추진계획

사업 대상지

(단위:백만원)

위 치	사업규모	예산액	주요 사업내용	추진부서
계	3,800㎡	553.8
① 서대문 안산도시자연공원내	500	200	논습지 2개소, 수목식재 등	서대문구
② 성산동 성미산내	1,000	100	연못1개소, 수목식재 등	마포구
③ 개봉동 산59-7 일대	1,500	120	연못1개소, 수목식재 등	구로구
④ 우면산 자연생태공원내	800	100	논습지 1개소, 수목식재 등	서초구
⑤ 시설부대비, 사무관리비		33.8		자연생태과

추진일정 및 방법

사업추진 계획 수립․통보(자연생태과 ⇨ 자치구)     : ’19. 1.

용역 타당성심사(자치구 ⇨ 기술심사담당관)       : ’19. 2.

설계용역(자치구)                                : ’19. 2. ~ 3.

설계심의(자치구 ⇨ 자연생태과)                  : ’19. 3. ~ 4.

- 설계심의는 설계 공정 70% 정도 진행시 요청

- 도면, 내역서, 설명PPT 등 10부 내외

- 사업 대상지별  2~3월 현황사진 촬영 자료

계약심사(자치구 ⇨ 계약심사과)                  : ’19. 3. ~ 4.

- 계약심사 : 조경공사 금액 3억 이상은 계약심사과,

조경공사 금액 3억 미만은 기관 자체 일상감사 실시

공사시행(자치구)                               : ’18. 4. ~ 10.

공사 착․준공 보고 : 발주는 4월 이전, 준공은 10월말까지 완료

사업 추진시 유의사항

사업대상지에 대한 모니터링 실시

- 생태현황(식물, 동물 등)을 사전 조사하여 자료 확보

- 사업으로 인한 생태변화를 확인할 수 있도록 현황사진 확보

설계단계부터 주민 및 유관기관의 의견을 적극적으로 수렴하여

사업이 지연되는 사례가 없도록 추진

별첨 ‘공원 색채디자인 가이드라인’ 에 맞게 자연과 조화되는 색채와

디자인 반영

- 시설물의 재료는 자연친화적(목재, 흙, 자연석재) 소재 사용

- 번쩍거리는 광택 스테인레스나 철재 재료 사용 자제

- 시설물의 색채 선정시 자연과의 조화성을 고려하고 색상의 통일성 유지

- 현란한 원색 사용은 금하고 자연경관의 배경색채로 선택

과도한 시설물 설치 지양 및 사후 유지관리까지 고려

- 연못조성 시 가급적 친자연 소재 사용 및 경계부는 자연지반을 토대로 초화류 식재

- 인공시설물 과다 설치 및 설계도면과 상이하게 시공되지 않도록

공사현장을 지속적으로 관리 감독

여름철 우기를 고려한 설계용역 및 공사 시행

따로붙임  1. 사업대상지 위치도 및 현황사진 1부.

2. 공원시설 설치 및 관리 지침 1부.  끝.