“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 시립서울노인복지센터 기능보강사업 계획 변경 승인

1. 종로구청 복지지지원과-18408('19.5.10.)호와 관련입니다.

2. 2019년 시립서울노인복지센터 기능보강사업 일부 변경에 대하여 아래와 같이 승인하고자 합니다.

가. 변경내역 : 개보수사업 변경(화장실 공사)

(단위: 천원)

구 분	변경 전	변경 후	증 감	비고
건 축	138,935	107,430	-31,505	∙건축 공정 축소, 제경비 조정
기 계	6,960	81,370	74,410	∙배관교체공사 추가 ∙기계설비 추가(팬코일유닛, 천장형 전기온풍기)
전 기	24,732	33,220	8,488	∙배관공사 추가에 따른 공사 범위 확대
설계,감리	12,810	11,417	-1,393	∙설계 및 감리용역 이윤등 조정
합 계	183,437	233,437	50,000

나. 검토의견

○ 서울노인복지센터는 1961년 준공된 건축물로서 화장실 누수 및 악취로 인하여 민원이 빈번하게 발생하여 보수가 필요한 사항으로 복지센터에서 산정한 사업비(183,437천원)에 대하여 종로구청의 실시설계를 통한 공사내역서를 검토한 바,

○ 배관 전면 교체 및 팬코일유닛·천장형 전기온풍기 추가 등 공사범위 및 공사물량이 증가되어 사업비 50백만원의 증액 필요하다고 판단되어 화장실 기능보강사업계획을 변경 승인코자함

붙임  원가계산서 및 설계내역서 1부.  끝.

주무관			인생이모작시설팀장			인생이모작지원과장
협조자
시행	인생이모작지원과-6024	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 3층 인생이모작지원과 (태평로1가)	/
전화	02-2133-7809	/전송	02-2133-0863	/		/	부분공개(5)