【2019년도】

철도안전종합시행계획

2018. 09.

서울교통공사

전기분야

2019년 철도안전 시행계획

2-1-가			노후 전차선로 개량
담당자	전기처 박원주 부장/ 박재우 과장			전화번호	02-6311-9741

□ 추진배경

ㅇ 장기간 사용으로 부식 및 마모가 심한 지상부 전차선로 시설물을 사전 교체, 보강하여 열차 안전운행 확보

□ 추진계획

ㅇ 노후 전차선로 및 부속설비 개량

- 추진기간: ‘19.01.01.~ ‘20.12.31.

- 사업물량: 전차선로 2km(차량기지 V빔 112본)

- 소요예산: 3,306백만원(세출 1,900백만원, 채무 1,406백만원)

- 사업내용: 1~4호선 노후 전차선로 및 부속설비 개량

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                          (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	1,900	1,900	570	665	665	0
노후 전차선로 개량	1,900	1,900	570	665	665	-

□ 기대효과

ㅇ 장애발생 시 열차 운행중단으로 이어질 우려가 높은 노후설비에 대해, 전면 교체를 시행하여 장애요인을 사전에 제거

2-1-나			노후 콘크리트전주 교체
담당자	전기처 박원주 부장/ 박재우 과장			전화번호	02-6311-9741

□ 추진배경

ㅇ 장기간 사용으로 균열되어 도괴의 위험성이 있는 콘크리트전주를 강도 및 안전성이 높은 철탑형 철주로 교체하여 안전사고를 미연에 방지하고 열차안전운행에 기여

□ 추진계획

ㅇ 노후 콘크리트전주 교체

- 추진기간: ‘19.01.01.~ ‘19.12.31.

- 사업물량: 콘크리트전주 176본

- 소요예산: 1,822백만원(세출 1,822백만원)

- 사업내용: 1~4호선 노후 콘크리트전주 및 부속설비 개량

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                          (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	1,822	1,822	546.6	637.7	637.7	0
노후 콘크리트전주 교체	1,822	1,822	546.6	637.7	637.7	-

□ 기대효과

ㅇ 노후된 전차선로 지지물의 교체로 전차선로 설비에 대한 안전성 및 기대수명 향상

2-1-다			노후 강체전차선 개량
담당자	전기처 박원주 부장/ 박재우 과장			전화번호	02-6311-9741

□ 추진배경

ㅇ 강체전차선을 지지하는 노후된 지지철물을 높이 조정이 불가능한 고정식에서 조정식으로 교체하여 전차선 높이 균등조정으로 전차선 부분마모 등을 예방하고 장애요인 사전제거

□ 추진계획

ㅇ 노후 강체전차선로 개량

- 추진기간: ‘19.01.01.~ ‘19.12.31.

- 사업물량: 강체전차선 지지철물 9,641개소

- 소요예산: 4,523백만원(세출 4,523백만원)

- 사업내용: 1~4호선 강체전차선로 및 부속설비 개량

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                          (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	4,523	4,523	1,356.9	1,583.05	1,583.05	0
강체 전차선로 개량	4,523	4,523	1,356.9	1,583.05	1,583.05	-

□ 기대효과

ㅇ 전차선 높이 균등조정으로 전차선 부분마모를 예방하고 기대수명 향상으로 유지보수비용 절감

2-1-라			1~4호선 송배전설비 개량
담당자	전기처 김성담 부장/ 오영철 과장			전화번호	02-6311-9746/9747

□ 추진배경

ㅇ 장기 사용으로 노후된 송배전선로 전력케이블 및 보호관로를 저독성 난연 및 수밀형 색상 전력케이블과 친환경 파스콘 트로프로 개량하여 안정적인 전력계통 운영과 열차 안전운행을 확보고자 함

□ 추진계획

ㅇ 1~4호선 노후 송배전설비 개량 공사

- 추진기간: '19.01.01.~'19.12.31.

- 사업물량: 송배전선로 75.458km

- 소요예산: 4,380백만원

- 사업내용:

· 일반형 케이블을 저독성 난연 및 수밀형 색상 전력케이블로 교체

· 케이블 보호관로를 콘크리트에서 친환경 파스콘 트로프 교체

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                        (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	0	4,380	1,314	1,533	1,533	0
1∼4호선 노후 송배전설비 개량	금액기재	4,380	1,314	1,533	1,533	-

□ 기대효과

ㅇ 노후된 일반형 전력케이블을 저독성 난연 및 수밀형 색상 전력케이블로 개량하여 장애 사전 예방 및 신뢰성 확보, 안정된 전력공급 계통 구축

2-1-마			5~8호선 송배전설비 개량
담당자	전기처 김성담 부장/ 오영철 과장			전화번호	02-6311-9746/9747

□ 추진배경

ㅇ 장기 사용으로 노후된 송배전선로 전력케이블 및 보호관로를 저독성 난연 및 수밀형 색상 전력케이블과 친환경 파스콘 트로프로 개량하여 안정적인 전력계통 운영과 열차 안전운행을 확보고자 함

□ 추진계획

ㅇ 5~8호선 노후 송배전설비 개량 공사

- 추진기간: '19.01.01.~'19.12.31.

- 사업물량: 송배전선로 56km

- 소요예산: 3,200백만원

- 사업내용:

· 일반형 케이블을 저독성 난연 및 수밀형 색상 전력케이블로 교체

· 케이블 보호관로를 콘크리트에서 친환경 파스콘 트로프 교체

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                        (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	0	3,200	0	0	3,200	0
1∼4호선 노후 송배전설비 개량	금액기재	3,200			3,200	-

□ 기대효과

ㅇ 노후된 일반형 전력케이블을 저독성 난연 및 수밀형 색상 전력케이블로 개량하여 장애 사전 예방 및 신뢰성 확보, 안정된 전력공급 계통 구축

2-1-바			5~8호선 노후 전기실 개량
담당자	전기처 최양규 부장/ 박상천 과장			전화번호	02-6311-9742/9748

□ 추진배경

ㅇ장기사용으로 노후된 전기실 설비를 교체하여 역사, 신호 및 환기설비 등에 안정된 전력공급계통 확보로 승객서비스 향상 및 열차안전운행에 기여

□ 추진계획

ㅇ 5~8호선 노후 전기실 개량 공사

- 추진기간: '19.01.01.~'19.12.31.

- 사업물량: 전기실 2개소

- 소요예산: 2,700백만원

- 사업내용:

· 고압차단기, 변압기, 저압배전반, 충전기반 등 교체

· 전력감시시스템 설치로 상시 감시회로 구성

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                        (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	0	2,700			2,700	0
5∼8호선 노후 전기실 개량	금액기재	2,700			2,700	-

□ 기대효과

ㅇ 전기실 설비 노후도 해소로 승객서비스 향상, 열차안전운행 확보 및 시설물 안전도 향상

2-1-사			5~8호선 노후 전기실, 일반전기시설물 개량
담당자	전기처 최양규 부장/ 박상천 과장			전화번호	02-6311-9742/9748

□ 추진배경

ㅇ장기사용으로 노후된 전기실 및 일반전기시설에 대한 체계적인 전면 개,보수를 시행하여 역사 및 차량기지 시설물에 안정된 전력공급계통 확보로 승객서비스 향상 및 열차안전운행에 기여

□ 추진계획

ㅇ 5~8호선 노후 전기실, 일반전기시설물 개량 공사

- 추진기간: '19.01.01.~'19.12.31.

- 사업물량: 2역

- 소요예산: 10,400백만원

- 사업내용:

· 전기실 고압차단기, 변압기, 저압배전반, 충전기반 등 교체

· 역사 및 차량기지 전력간선 배관 배선(저독난연케이블) 교체

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                        (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	0	10,400			10,400	0
5∼8호선 노후 전기실 개량	금액기재	10,400			10,400	-

□ 기대효과

ㅇ 전기실 설비 노후도 해소로 열차안전운행 확보, 시설물 안전도 향상 및 전력간선 케이블 교체로 화재예방에 기여

2-1-아		1~4호선 노후 전력설비 개량

담당자	전기처 송한규 부장/ 이기성 차장	전화번호	6311-9737

□ 추진배경

ㅇ 기대수명이 경과한 노후 전기시설물을 교체하여 안정적으로 전력을 공급하고 열차 안전운행을 확보하고자 함.

□ 추진계획

ㅇ 1~4호선 노후 전력설비 개량

- 추진기간 : ‘19.1월 ~ ’19.12월

- 사업물량 :

* 1호선: 3개소(시청, 종로5가변전소(2018년도 물량), 제기)

* 2호선: 1개소(신정기지 변전소)

* 3호선: 4개소(고속터미널변전소(2018년도 물량), 압구정, 매봉, 대청)

* 4호선: 4개소(동대문역사문화공원, 미아사거리 변전소(2018년도 물량),이촌, 회현)

< 2019년 예산집행 계획 >

(단위 : 백만원)

구 분	계	국비	지방비	자체	민자 기타
계	27,700	6,420	10,639	10,641	0
1호선 노후 전력설비 개량	11,870	3561	4154	4155	0
2호선 노후 전력설비 개량	6,299	0	3,149	3,150	0
3호선 노후 전력설비 개량	5,068	1520	1774	1774	0
4호선 노후 전력설비 개량	4,463	1339	1562	1562	0

□ 기대효과

ㅇ 기대수명이 경과한 노후 전기시설물을 교체하여 안정적으로 전력을 공급하고 열차 안전운행 확보

2-1-자		5~8호선 노후 전력설비 개량

담당자	전기처 송한규 부장/ 권순홍 차장	전화번호	6311-9736

□ 추진배경

○ 기대수명(20년) 초과사용으로 기기성능 저하 등 장애발생 요인이 상존하고 있어 전력설비를 적기에 개량하여 안정된 전력계통 확보가 필요

- 변전소 기대수명 초과 개소 : 총 56개소 중 30개소 (53.6%)

* 법적근거 : 지방공기업시행규칙 제19조(유형자산 내용연수 감가상각)

□ 추진계획

ㅇ 2018년 변전소 물품 제작구매 및 공사 채무예산 발주 후 2019년

개량공사 시행

ㅇ 2019년 추진계획

- 추진기간 : 2018. 12. 01. ~ 2019. 12. 31

- 소요예산 : 10,000백만원

- 사업대상 : 5호선 변전소 2개소(개화산, 고덕)

- 사업내용 : 변전소 교류차단기반, 직류차단기반, 변압기, 정류기,

충전기반, 축전지반 등 교체 및 통신, 기계, 소방, 건축

공사

< 2018년 예산집행 계획 >

(단위 : 백만원)

구 분	계	국비	지방비	자체	민자 기타
계	10,000	0	0	10,000	0
노후 전력설비 개량	10,000	0	0	10,000	0

□ 기대효과

ㅇ 노후시설 및 자연재난·사고 등에 취약한 시설물의 적기 개량으로 철도 안전운행 확보 및 철도사고 예방에 기여

2-1-차		변전소 고압배전용 변압기 교체

담당자	전기2사업소 이상섭 P/L / 강현중 과장	전화번호	6110-5108

□ 추진배경

ㅇ 개통후 장기사용으로 노후화된 5호선 고압배전용변압기를 정밀안전

진단을 통해 우선순위를 선정하고 계획교체 함으로써, 지하철 운영

시스템 10대 개선방안 이행 및 안정적인 전력계통을 확보코자 함

□ 추진계획

ㅇ 변전소 고압배전용 변압기 교체

- 기 간 : 2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31

- 사업물량: 5대(5호선 변전소 고압배전용 변압기)

- 소요예산: 700백만원

- 사업내용

* 2019. 1월 ~ 2월 : 변압기 특별점검

* 2019. 3월 ~ 12월: 변압기 제작 설치

□ 예산집행 계획                                         (단위: 백만원)

구 분	계획	계
		계	국비	지방비	자체	기타
고압배전용 변압기 교체	700	0		0	700	0

□ 기대효과

ㅇ 5호선 노후 몰드변압기 특별점검 결과에 따라 노후 정도가 심한 변전소 고압배전용 변압기를 우선 계획교체 실시하여 전력계통 안정을 확보하고자 함.

2-1-카		변전소 정류기용 변압기 계획교체

담당자	전기2사업소 이상섭 P/L / 강현중 과장	전화번호	6110-5108

□ 추진배경

ㅇ 노후화로 인한 절연열화로 소손사고 발생 빈도가 높은 정류기용 변압기에 대한 안정성 확보를 위해 사전 정밀진단 시행 후 연차별 계획교체

- 5호선 개통시 스위스 고넬라제품으로 하자 다수 발생하여 이화전기에서 부분 보수 : 1차코일(이화전기), 2,3차코일(고넬라)

□ 추진계획

ㅇ 변전소 정류기용 변압기 교체

- 기 간 : 2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31

- 사업물량: 10대

- 소요예산: 1,300백만원

- 사업내용

* 2019. 1월 ~ 2월 : 변압기 특별점검

* 2019. 3월 ~ 12월: 변압기 제작 설치

□ 예산집행 계획                                         (단위: 백만원)

구 분	계획	계
		계	국비	지방비	자체	기타
정류기용 변압기 교체	1,300	0		0	1,300	0

□ 기대효과

ㅇ 고장발생 우려가 높은 노후 정류기요 변압기를 교체하여 열차 전력공급계통 안정화에 기여

ㅇ 정류기용 변압기 소손 긴급장애 시 단가계약에 의한 신속한 복구 가능

2-1-타			전기기능실 출입자 통제장치 구축
담당자	전기처 최양규 부장/ 박상천 과장			전화번호	02-6311-9742/9748

□ 추진배경

ㅇ『서울시 정보통신 보안업무 처리규칙』에 따라 정보통신기반시설로 지정, 관리하는 전기기능실에 대한 출입자 통제가 가능토록 시스템을 구축하여 보안강화대책 마련

□ 추진계획

ㅇ 전기기능실 출입자 통제장치 구축 공사

- 추진기간: '19.01.01.~'19.12.31.

- 사업물량: 97개소(변전소, 전기실)

- 소요예산: 520백만원

- 사업내용:

· 변전소 및 전기실에 실시간 출입자 통제시스템 구축

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                        (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	0	520			520	0
전기기능실 출입자 통제장치 구축	금액기재	520			520	-

□ 기대효과

ㅇ 전기기능실 보안강화로 이례사항 발생 사전예방 및 법적보안기준 충족으로 시설 적법성 향상

2-1-파			1~4호선 노후 전기실 개량
담당자	전기처 최양규 부장/ 김문성 과장			전화번호	02-6311-9742/9745

□ 추진배경

ㅇ 장기 사용으로 노후된 지하역 전기실 설비를 교체하여 역사, 신호 및 환기설비 등에 안정된 전력공급계통 확보로 승객서비스 향상 및 열차안전운행에 기여

□ 추진계획

ㅇ 1~4호선 노후 전기실 개량 공사

- 추진기간: '19.01.01.~'19.12.31.

- 사업물량: 전기실 6개소

- 소요예산: 7,284백만원

- 사업내용:

· 고압차단기, 변압기, 저압배전반, 충전기반 등 교체

· 전력감시시스템 설치로 상시 감시회로 구성

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                           (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	7,284	7,284	2,186	2,549	2,549	0
1~4호선 노후 전기실 개량	7,284	7,284	2,186	2,549	2,549	-

□ 기대효과

ㅇ 전기실 설비 노후도 해소로 승객서비스 향상, 열차안전운행 확보 및 시설물 안전도 향상

2-1-하		변전소 고압배전용 변압기 교체

담당자	전기2사업소 이상섭 P/L / 강현중 과장	전화번호	6110-5108

□ 추진배경

ㅇ 개통후 장기사용으로 노후화된 5호선 고압배전용변압기를 정밀안전

진단을 통해 우선순위를 선정하고 계획교체 함으로써, 지하철 운영

시스템 10대 개선방안 이행 및 안정적인 전력계통을 확보코자 함

□ 추진계획

ㅇ 변전소 고압배전용 변압기 교체

- 기 간 : 2019. 1. 1~2019. 12. 31

- 사업물량: 5대(5호선 변전소 고압배전용 변압기)

- 소요예산: 700백만원

- 사업내용

* 2019. 1월 ~ 2월 : 변압기 특별점검

* 2019. 3월 ~ 12월: 변압기 제작 설치

□ 예산집행 계획                                         (단위: 백만원)

구 분	계획	계
		계	국비	지방비	자체	기타
고압배전용 변압기 교체	700	700	0	0	700	0

※ 자재관리센터 예산으로 추진예정

□ 기대효과

ㅇ 5호선 노후 몰드변압기 특별점검 결과에 따라 노후 정도가 심한 변전소 고압배전용 변압기를 우선 계획교체 실시하여 전력계통 안정을 확보하고자 함.

2-1-갸			5-8호선 노후 전차선로 개량 공사
담당자	전기2사업소 이만용 소장/ 김주진 과장			전화번호	02-6110-5118

□ 추진배경

ㅇ 2014년 이후 계속사업으로 추진중인 외부전문기관의 전차선설비 정밀안전점검 결과를 종합검토하여 노후 전차선 설비의 교체

ㅇ 노후화에 따른 순차적 전차선 설비교체로 열차운행 안전성 확보

- 건설년도별 노후화 상태평가 및 사고사례를 통한 우선교체 대상   선정 및 설계 반영

□ 추진계획

ㅇ 사업명 기재

- 추진기간: '19.01.01.~12.31.

- 사업물량: 합성전차선 20km

- 소요예산: 4,000백만원

- 사업내용: 지상부(130km) 및 지하부(344km)의 전차선시설물의

상태평가에 의한 체계적 교체공사 시행

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                            (단위 : 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
5∼8호선 노후 전차선로 개량	4000	4000	0	0	4000	-

□ 기대효과

ㅇ 전차선로 시설물의 노후화 정도 및 시급성 등 종합 검토 후 효율적 교체 수행으로 예산 절감 및 시설물 안정성 증대

ㅇ 노후 시설물 상태변화 분석을 통한 전차선시설물 사고예측자료

구축 및 유지관리 능력 향상

2-1-냐			5-8호선 전차선로 콘크리트전주 교체 공사
담당자	전기2사업소 이만용 소장/ 심은철 과장			전화번호	02-6110-5118

□ 추진배경

ㅇ 지상부 전차선로 콘크리트전주의 균열로 인한 노후화 지속

ㅇ 전주수량 및 노후화 정도의 분석에 따른 안정성 향상 대책 요구

- 중장기관리계획에 의한 매년 콘크리트전주 상태평가를 실시하고,  우선교체 대상선정 및 설계 반영

- H형 강주 및 가공전차선 지지밴드 교체, 전차선로의 안정성 확보

□ 추진계획

ㅇ 사업명 기재

- 추진기간: '19.01.01.~12.31.

- 사업물량: 60본

- 소요예산: 492백만원

- 사업내용: 6개 차량기지 콘크리트전주 상태 전수조사, 노후판단            기준에 따라 등급화하고, 교체 우선순위 선정

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                            (단위 : 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
5∼8호선 전차선로 콘크리트전주 개량	492	492	0	0	492	0

□ 기대효과

ㅇ 노후 콘크리트전주의 반영구적 H형강주 교체로 철도시설물 전력공급 안정성 확보

ㅇ 내구성이 강하고, 유지관리가 편리한 설비적용으로 경제적이고,

자체관리 효율화 증대

2-1-댜			5~8호선 전기실 충전기반 교체
담당자	전기2사업소 이만용 소장/ 임대환 주임			전화번호	02-6110-5100/5133

□ 추진배경

ㅇ 5~8호선 전기실 충전기반 노후개소를 파악, 교체공사를 실시하여 전력계통 안정화로 안전사고 예방에 기여

ㅇ 노후화 정도에 따른 순차적인 설비교체로 열차운행 안전성 확보

□ 추진계획

ㅇ 5~8호선 전기실 충전기반 교체

- 추진기간: `19.01.01. ~ `19.12.31.

- 사업물량: 전기실 15개소(15면)

- 소요예산: 360백만원

- 사업내용:

·특별점검에 따른 시급개소 파악 후 교체 계획 수립

·충전기반 제작구매설치 발주 및 납품·설치 시행

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                        (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	360	360			360	0
5~8호선 전기실 충전기반 교체	360	360			360	-

□ 기대효과

ㅇ 시설물의 노후화 정도 및 시급성 등 종합 검토 후 효율적 시행으로 비상전력 안정화 기여

2-1-랴			5~8호선 전기실 배전반 개선
담당자	전기2사업소 이만용 소장/ 임대환 주임			전화번호	02-6110-5100/5133

□ 추진배경

ㅇ 6호선 및 7호선 2단계 비상전원장치 부하배전반 및 축전지 배전반교체로 전력계통 안정화 및 안전사고 예방에 기여

ㅇ 노후화 정도에 따른 순차적인 설비교체로 열차운행 안전성 확보

□ 추진계획

ㅇ 5~8호선 전기실 배전반 개선

- 추진기간: `19.01.01. ~ `19.12.31.

- 사업물량: 전기실 15개소(30면)

- 소요예산: 360백만원

- 사업내용:

·노후 UPS특별점검에 따른 시급개소 선정 후 교체 계획 수립

·저압배전반 및 축전지반 제작구매설치 발주 및 납품·설치 진행

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                        (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	360	360	0	0	360	0
5~8호선 전기실 배전반 개선	360	360			360	-

□ 기대효과

ㅇ 비상조명 전원설비 개량으로 예산절감 및 시스템 장애율 감소 기여

2-1-먀			전기실 자동절환 스위치(ATS) 교체
담당자	전기2사업소 이만용 소장/ 임대환 주임			전화번호	02-6110-5100/5133

□ 추진배경

ㅇ 장기사용 및 내구연한 도래한 전기실 노후 자동절환스위치(ATS)급전장애 방지를 위한 계획교체가 필요함

ㅇ 5~8호선 전기실 노후 ATS를 연차적 계획교체로 안전사고 예방

□ 추진계획

ㅇ 전기실 자동절환스위치[ATS] 교체

- 추진기간: `19.01.01. ~ `19.12.31.

- 사업물량: 노후 ATS 15개소 교체

- 소요예산: 전로설비 82백만원

- 사업내용:

·노후 ATS특별점검에 따른 시급개소 선정 후 교체 계획 수립

·ATS물품제작구매 후 교체 전기공사 시행

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                        (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	82	82	0	0	82	0
전기실 자동절환스위치 구매	41	41	-	-	41	-
전기실 자동절환스위치 교체	41	41	-	-	41	-

□ 기대효과

ㅇ 노후시설물 교체로 열차안전운행 및 장애예방에 기여

ㅇ ATS교체사업으로 시설물 수명연장 및 노후화에 따른 비상전력 및 상시전력 급전장애 예방으로 열차운행관련 장애감소 기여

2-4-가			지상부 급전선 점검보수 용역
담당자	전기처 윤재국 처장/ 박원주 부장			전화번호	02-6311-9738

□ 추진배경

ㅇ 지상부 전차선로 고가개소(8~18m)에 위치하여 점검 및 보수가 어려운 급전선로를 전문업체 외주용역화로 관리하여 취약시설물의 안전도를 향상하고, 효율적 인력운용에 따른 예산절감으로 경영개선에 기여

□ 추진계획

ㅇ 지상부 급전선 점검보수 용역

- 추진기간: ‘19.01.01.~ ‘19.12.31.

- 사업물량: 지상부 급전선로 180.3km

- 소요예산: 503백만원(세출 503백만원)

- 사업내용: 1~4호선 급전선로 및 부속설비 유지보수

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                          (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	503	503	0	0	503	0
지상부 급전선 점검보수 용역	503	503	-	-	503	-

□ 기대효과

ㅇ 전문업체의 용역을 통한 점검으로 시설물 안전확보를 도모하고 정원감축으로 경제성 및 효율성 확보

2-4-나			선로시설 검측시스템 구축
담당자	전기처 윤재국 처장/ 박원주 부장			전화번호	02-6311-9738

□ 추진배경

ㅇ 열차운행 종료 후 점검시간 부족과 육안점검에 의한 휴먼에러 방지를 위하여 영업 중 과학화 시스템을 이용한 선로시설물 주․야간 상시 검측 환경 구축으로 유지보수 효율화 및 장애예방에 기여하고자 함

□ 추진계획

ㅇ 선로시설 검측시스템 구축

- 추진기간: ‘19.01.01.~ ‘19.12.31.

- 사업물량: 1편성(2018년 구축분) 보완

- 소요예산: 1,000백만원(세출 1,000백만원)

- 사업내용: 2호선 전동차 1편성 검측대상 확대

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                          (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	1,000	1,000	0	0	1,000	0
선로시설 검측시스템 구축	1,000	1,000	-	-	1,000	-

□ 기대효과

ㅇ 사고예방을 위한 유지보수 체계 지원

ㅇ 안전한 지하철 운행환경 확보로 이용시민의 만족도 향상

2-4-다			AL T-Bar 애자 세척 공사
담당자	전기1사업소 정홍영 소장/ 이봉기 부장			전화번호	02-6110-5085

□ 추진배경

ㅇ 목적: 시설물 노후화 및 스크린도어 설치에 따른 오염물질 축적 심화로 강체전차선로 및 지지애자에 대한 세척공사 추진을 통해 전도성 분진 등 오염물질을 제거하여 양호한 급전시스템 구축

ㅇ 근거

- 설비처-4271(2015.5.18.)호 “1~4호선 전차선로 AL T-Bar 및 애자세척 시행(안)”

- 2018년 서울교통공사 철도안전관리체계 정기검사 시정명령 사항

* 강체전차선 지지애자에 대한 세척 적기 시행 할 것

□ 추진계획

ㅇ 1~4호선 강체전차선 AL T-Bar 및 애자세척공사

- 추진기간: ‘19.01.01.~12.31.

- 사업물량: 강체전차선 238km, 애자 61,797개

- 소요예산: 556백만원

- 사업내용: 강체전차선 AL T-Bar 및 애자 세척

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                            (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	556	556	0	0	556	0
1~4호선 강체전차선 AL T-Bar 및 애자세척공사	556	556	-	-	556	-

□ 기대효과

ㅇ 도전성 오염물질 제거를 통한 양질의 급전시스템 구축

2-4-라			전차선로 철주 빔 도장 공사
담당자	전기1사업소 정홍영 소장/ 이봉기 부장			전화번호	02-6110-5085

□ 추진배경

ㅇ 목적: 장기사용과 대기오염으로 인한 부식이 심한 전차선로 철주 및 빔에 대하여 녹 제거 및 부식방지 도장을 시행, 부식 환경으로부터 보호하고 내구연한 연장을 통한 시설물 안정화 구축

ㅇ 근거

- 전기처-350호(2012.01.13.) “지상부 전차선로 철주, 빔 부식방지 시행안”

* 도장기준: 설치 후 15년 이상 경과, 부식이 심한 철주, 빔 선정

□ 추진계획

ㅇ 전차선로 철주 빔 도장 공사

- 추진기간: ‘19.01.01.~12.31.

- 사업물량: 철주 154본, 빔 46본

- 소요예산: 406백만원

- 사업내용: 철주, 빔 녹 제거 및 에폭시 도장

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                          (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	406	406	0	0	406	0
전차선로 철주 빔 도장 공사	406	406	-	-	406	-

□ 기대효과

ㅇ 녹 제거 및 에폭시도장을 통한 철주 및 빔 보호 및 내구연한 연장으로 시설물 안정화 구축

2-4-마			터널전기실 ATS 감시장치 설치
담당자	전기1사업소 정홍영 소장/ 엄현희 부장			전화번호	02-6110-5030

□ 추진배경

ㅇ 목적 : 중요 부하에 무정전 전력을 공급하고 있는 터널전기실 ATS에 감시장치를 설치하여 전력공급 안정화 구축

ㅇ 근거

- 전기1사업소-25958호(2018.09.04.) “터널전기실 ATS 감시장치 설치 검토(안)”

□ 추진계획

ㅇ 터널전기실 ATS 감시장치 설치

- 추진기간: ‘19.06.01.~12.31.

- 사업물량: 전기실 2개소

* 0k380(양천구청~신정네거리), 45k450(신촌~이대)

- 소요예산: 155백만원

- 사업내용: 터널 배수펌프용 ATS에 전력감시 장치를 설치하여 전력공급 중단 시 신속 대처

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                          (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	155	155	0	0	155	0
터널전기실 ATS감시장치 설치	155	155	-	-	155	-

□ 기대효과

ㅇ 물 유입량이 많은 터널 배수펌프실 전원공급용 ATS에 전력 감시 장치를 설치함으로써 전력공급 안정화에 기여

2-4-바			시설물 유지보수 전문화 관리
담당자	전기1사업소 정홍영 소장/ 권남흥 부장/ 김만곤 부장			전화번호	02-6110-5061/5025

□ 추진배경

ㅇ 유지보수 품질 확보를 위하여 전문성이 요구되는 분야에 전문 업체의 유지관리 용역 등 전문화된 관리로 시설물 안전 및 효율성 확보

□ 추진계획

ㅇ 차단기 정밀점검 보수용역

- 추진기간: ‘19.01.01.~12.31.

- 사업물량: 90대

- 소요예산: 160백만원

- 사업내용: 1~4호선 변전소 차단기 정밀점검 보수 시행

ㅇ 정류기 유지관리 용역

- 추진기간: ‘19.01.01.~12.31.

- 사업물량: 39대

- 소요예산: 145백만원

- 사업내용: 1~4호선 변전소 정류기 점검 보수 시행

ㅇ 수전맨홀 청소 및 보수공사

- 추진기간: ‘19.01.01.~12.31.

- 사업물량: 1~4호선 수전선로 단독맨홀 62개소

- 소요예산: 24백만원

- 사업내용: 1~4호선 수전맨홀 청소 및 보수 시행

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                          (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	329	329	0	0	329	0
차단기 정밀점검 보수용역	160	160	-	-	160	-
정류기 유지관리 용역	145	145	-	-	145	-
수전맨홀 청소 및 보수공사	24	24	-	-	24	-

□ 기대효과

ㅇ 전문 기술과 장비를 보유한 외부 전문 업체의 용역(시공)을 통한 점검 및 보수로 시설물 안전 및 효율성 확보

2-9-가			전기기능실 출입자 통제장치 구축
담당자	전기1사업소 정홍영 소장/ 박동식 부장			전화번호	02-6110-5075

□ 추진배경

ㅇ 서울시 도시철도 안전 및 유지관리 실태 감사 결과 처분 요구에 따라 전력관제에서 역사 전기실 실내 출입자 감시가 가능한 감시설비를 구축하여 전기실 보완을 강화

□ 추진계획

ㅇ 전기기능실 출입자 통제장치 설치

- 추진기간: ‘19.06.01.~12.31.

- 사업물량: 119개소

- 소요예산: 150백만원

- 사업내용: 1~4호선 전기실 119개소 출입자 통제장치 구축

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                          (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	150	150	0	0	150	0
기능실 출입문 감시장치 설치	150	150	-	-	150	-

□ 기대효과

ㅇ 전기기능실에 대한 출입자 통제 시스템 구축으로 보안강화 대책 마련

6-7-나			전기기능실 냉방기 설치 전기공사
담당자	전기2사업소 이 만 용 소장/ 조 승 희 과장			전화번호	02-6110-5100/5127

□ 추진배경

ㅇ 지구 온난화, 지열 축적 등으로 매년 여름철 변전소 및 전기실 온도가 상승되고 있어 노후화된 전력시설물 열화를 가속 시킴에 따라 안정적인 전력계통 운영을 위하여 냉방기를 설치하여 운전환경을 개선코자 함.

□ 추진계획

ㅇ 전기기능실 냉방기 설치 전기공사

- 추진기간: '19.01.01.~12.31.

- 사업물량: 전기기능실 5개소

- 소요예산: 150백만 원

- 사업내용:

* 냉방기 설치 전기공사 : 60백만원

* 냉방기 물품 구매설치 : 90백만원

□ 예산집행 계획

< 2019년 예산집행 계획 >                          (단위: 백만원)

구 분	계획	계 획
		계	국비	지방비	자체	기타
계	150	150	0	0	150	0
전기기능실 냉방기 설치 전기공사	150	150	-	-	150	-

□ 기대효과

ㅇ 전기기능실 온도 저감으로 시설물 안정적인 유지관리

- 기능실 적정온도 유지로 각종 기기 오동작 방지로 열차안전운행 확보