2019년 친환경 도로포장 추진 실적

(2019. 7월 말 기준)

구분	사 업 명	예산 (백만원)	추진 현황	공사 개요	비 고 (미시행 사유 등)
남 부	중온포장	333	공사 미시행	⦁구 간 : 약수맨션사거리~국사봉터널(양녕로) ⦁규 모 : 12m ×550m = 66a (t=5㎝) ⦁사업비 : 333백만 원	8월말 자재발주예정
	배수성·저소음 포장	300	공사 미시행	⦁구 간 : 한강대교남단~한강철교하부(노들로) ⦁규 모 : 6.4m ×1,300m = 83.2a (t=5㎝) ⦁사업비 : 300백만 원
	고내구성 칼라포장	500	자재선정완료	⦁구 간 : 시흥대로 시흥사거리~금천고등학교(버스중앙차로) ⦁규 모 : 6.4m ×1,300m = 83.2a (t=5㎝) ⦁사업비 : 500백만 원	9월 공사예정

구분	사업명	예 산 (백만원)	대상지 선정 (추진상황)	자재 구매 (추진상황)	공사(예정) 시기	비 고
남부	중온포장	333	양녕로	발주 준비중	10월 중
	배수성·저소음 포장	300	노들로	발주 준비중	10월 중
	고내구성 칼라포장	500	시흥대로 (버스전용차로)	수의계약 준비중	9월 중