1-1		강변북로 도로시설물 태양광 설치

□ 추진부서 : 안전총괄실 도로시설과

□ 대상시설 현황 : 총 7개소

연번	시 설 명	설치구간(m)	부지형태	설비용량(kW)	설치(예정)
계	7개소	5,910		1,408
1	하늘공원 앞	30등주	가로등	15	‘18.12.
2	자양고가	600	교량	98	‘19.3.
3	성수동 2가	350	옹벽	220	‘19.3.
4	서빙고동	60	사면	64	‘19.12.
5	천호대교 진입램프	220	옹벽	213	‘19.12.
6	서호교	3,880	교량	651	‘20.12.
7	아차산대교	800	교량	147	‘20.12.

□ 설치목표 : 1,408kW

○ 완 료 : 3개소 333kW

○ 예 정 : 4개소 1,075kW

□ 추진현황 : 3개소(자양고가 방호벽, 성수동 옹벽)

○ 18. 12 : 1개소(하늘공원앞) 설치완료

○ ‘19. 3 : 2개소(성수동2가, 자양고가) 설치완료

□ 향후일정 : 4개소

○ ‘19. 12. : 2개소(서빙고동, 천호대교 진입램프) 설치

○ ‘20. 12 : 2개소(서호교, 아차산대교) 설치

작성자	도로시설과장: 김진효 ☎ 2133-1650 기전시설팀장: 김호성 ☎1676 담당: 임현우☎1669