쾌적하고 안전한 지하철을 위한 역사 환경개선

건축처

홍진수(9895)

□ 추진배경

○ 현  황

- 지하역사 254개 중 30년 이상 경과하여 개선이 필요한 지하역사가 37개이며, 역사 시설물 노후화로 시민 불안감 증가 및 도시 이미지 저하

- 29개 역사에 냉방설비가 미설치 되어 역사 내부온도 상승에 따른 시민불편 가중

○ 목  적

- 지하철 역사 노후화에 대한 사회적 관심과 개선요구 증대에 따라 노후 역사를 개선하여 깨끗한 지하 공간조성 및 문화예술을 향유하는 도시환경 구축

- 냉방신설을 통한 쾌적한 환경조성으로 지하철 이용고객 만족도 향상 도모

□ 추진계획

○ 사업대상 : 지역 균형발전 및 역사 노후도, 특성 등을 고려하여 선정

- 1호선(종로5가, 동대문, 신설동), 2호선(잠실새내), 4호선(미아, 쌍문, 한성대입구, 서울역)

○ 사업개요

호선	대상	사업내용	사업기간	사업예산 (백만 원)
1	종로4가, 동대문, 신설동	∙외장(천장,벽체,바닥)마감재 교체 위주 리모델링 ∙문화예술철도 조성	’19. 1. ~ ’20. 12.	29,636 (시비:19,513 공사:10,123)
2	잠실새내	∙냉방설비설치 및 노후역사 전면 리모델링 ∙문화예술철도 조성	’19. 1. ~ ’20. 12.	38,333 (국비30%,시비35%,자체35%)
4	미아	∙냉방설비설치 및 노후역사 전면 리모델링 ∙테마역사 조성	’19. 1. ~ ’21. 3.	29,870 (시비:16,935 공사:12,935)
	쌍문, 한성대입구, 서울역	∙중앙투자심사심의 결과에 따라 공사 시행	’19. 1. ~ ’21. 6.	133,506 (시비:72,753 공사:60,753)

○ 재원조달 방안

- 전시 및 공연장 조성부분(문화예술 철도) : 시비 100% 적용

- 노후역사 환경개선 및 리모델링 : 시비 50%, 공사 50% 적용

- 잠실새내 환경 개선공사(냉방) : 국비30%, 시비 35%, 공사 35% 적용

□ ’19년 상반기 추진실적

○ 1호선 리모델링(종로5가, 동대문, 신설동)공사 실시설계 중(‘19.4.1 ～ ’19.8.29)

- 역무기능실 상세도면 작성

- 안내표지판 등 현황도면 작성

- 신설 캐노피 교체 실시설계

○ 2호선 잠실새내 환경개선 공사 실시설계 중(‘19.3.29 ～ ‘19.9.24)

- 보완설계용역 TF팀 구성

- 기본도면 작성 및 내역산출

○ 4호선 노후역사(쌍문, 한성대입구, 미아, 서울역) 환경개선 공사 제안설계공모

- 참여업체 제안서 제출(‘19.7.11 ~ 7.15)

- 제안서 검토 및 제안서 사전송부(심사위원)

- 심사위원회 준비

□ 소요예산

연 도	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
소요예산(천원)	29,661,000	201,934,000	-	-	-

□ 기대효과

○ 노후시설 전반개량(리모델링)으로 미세먼지 방지 및 시설물 수명 연장

- 역사 상주직원 및 지하철 이용고객의 미세먼지 피해 최소화 및 건강 증진 기여

○ 개통 당시 냉방설치 미설치로 하절기 실내온도 고온으로 인한 승객불편해소

- 쾌적한 환경조성을 통해 역사 상주직원 및 지하철 이용고객 만족도 재고

○ 노후시설개량으로 화재 확산 방지 및 시설물 피해 최소화

○ 역사 제연설비 보완으로 화재 발생 시 신속 연기 배출로 인명 피해 최소화 등

○ 노후역사를 보유한 타 지하철 기관에 역사 환경개선 공사 사례 제공

- 추진절차, 소요예산, 개선공사 문제점 및 현안사항 등 공유

□ 관련 사진

대합실 환경개선 전	대합실 환경개선 후
승강장 환경개선 전	대합실 환경개선 전

□ 향후 추진일정
○ 2019년 분기별 추진일정

구 분	추 진 시 기
	1/4	2/4	3/4		4/4
•1호선 리모델링 공사(3역) - 종로5가, 동대문, 신설동역
		실시설계용역			발주 및 계약
•2호선 리모델링 공사(1역) - 잠실새내역
		실시설계용역			발주 및 계약
•4호선 리모델링 공사(4역) - 쌍문, 미아, 한성대입구, 서울역
	설계공모			실시설계용역

○ 연간 추진일정

구 분	추 진 시 기
	’19		’20	’21
•1호선 리모델링 공사(3역) - 종로5가, 동대문, 신설동역
		설계	공사시행
•2호선 리모델링 공사(1역) - 잠실새내역
		설계	공사시행
•4호선 리모델링 공사(4역) - 쌍문, 미아, 한성대입구, 서울역
	설계		공사시행