전동차 객실내 CCTV 설치

관리번호	2-7
추진부서	차량운영처
협조부서	-

【추진계획】

▣ 총 괄                                                           (단위 : 칸수)

구 분	계	2012		2013 ~2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025
사업물량 (1단계)	939 (완료)	939		-
사업물량 (2단계)	2,612	-			200 (완료)		100 (추진중)		716		530		98		410		260		298
사업비	74.3억 원(자체설치 844칸 / 2020~2021년 설치비용)
공정률	100%		26.4%		32.1%		34.9%		55.1%		70.0%		72.7%		84.3%		91.6%		100%

※ 2단계 사업물량 2,612칸 중 ‘18년 200칸 완료, 2,412칸 설치 추진중

(844칸은 자체 설치, 1,568칸은 신조전동차 설치반입)

▣ 추진 현황

- 1단계(939칸, 26.4%): 완료(2012년)

- 2단계(2,612칸, 73.6%): 진행중(2018년~)

도시철도 종합안전대책 과제 추진실적			관 리 번 호		국토교통부 2-7
과 제 명	전동차 객실내 CCTV 설치(부분완료)	부서명 (담당자)		차량운영처 (박남철)
현 황	○ 지하철 전동차내 교통약자 보호와 무질서 행위(잡상인, 구걸 등) 발생시 이용시민의 불편 ․ 불안 증대
추진계획	○ 1단계(2012년): 전체 차량중 혼잡도와 범죄사건이 가장 많은 2, 7호선 우선시행 - 추진일정( ’11.11월 ~ ’12.06월 : 설치완료) ○ 2단계(2018년 이후) - 재정여건을 감안하여, 신조전동차 도입(’18~’25년)과 자체설치(‘19~’21년) 병행 ․ 자체설치: 운전실 CCTV(’19~‘20년), 객실 CCTV(‘20~’21년)
추진내용	▣ 1단계_ 완료(111개 편성, 939칸) ○ 「전동차내 CCTV 카메라 제작 구매」 - 공사용 자재 직접구매 대상 품목(중소기업청고시 제2011-24호)으로 「2호선 신형 VVVF 전동차 CCTV 카메라 설치공사」와 분리 발주 - CCTV 카메라 구매완료 : 검수 2.29. ○ 2호선 신형 VVVF 전동차 CCTV 카메라 설치 공사 - 2호선 신형 VVVF 전동차 38편성 356칸에 712대(칸당2대) 카메라 설치 - 계약체결: ‘11.12.20 ․ 계약금액 : 199백만원 ․ 계약기간 : ’11.12.29~’12.06.25 - 세부추진사항 ․ 초도 1편성(231편성) 시범 설치 : '12.03. ․ 38편성 356량 712대 카메라 설치 완료 : '12.06.21 ․ 준공검사일 : ‘12.06.22 / 준공금액 : 174,325,000원 ○ 5~8호선 전동차 각 1개편성(4개편성, 30칸) 객실 CCTV 시범설치(2011년) ○ 7호선 전동차 69개편성 553칸 객실 CCTV 설치(2012년) ▣ 2단계(2012년 이후) _ 진행중 ○ 전동차 영상기록장치(CCTV) 설치 업무조정(’17. 10월) ․ 방침수립 및 예산심사: 차량분야 ․ 설치 세부계획 수립 및 발주, 설치 공사관리: 정보통신처 ○ 사장방침-163(2018.02.22.)『전동차 실시간 모니터링 시스템 구축을 위한 영상기록장치(CCTV) 설치 방안』 - 공사 재정여건을 고려, 신조전동차 도입(’18~‘24년)과 자체설치 병행추진 ※ 자체설치 계획 ․ 운전실: ’19~’20년(철도안전법 준수사항), 객실: ’20~‘21년

추진내용	○ 객실 CCTV 설치 - ‘18년~ ’19년2월: 200칸 설치완료(신조 전동차 도입설치) • 2019년 신조전동차 설치예정: 100칸 - 2020~2021년 자체설치 예산(74.3억 원)배정요청 ○ 운전실 CCTV 설치(정보통신1사업소) - 정보통신1사업소-2730(’19.3.27)『전동차 영상기록장치 제작 구매설치 방침수립』 서울시 계약심사 결과수신: ‘19.4.5일 - 전동차 운전실 영상기록장치 제작구매 설치 계약체결 ․ 계약기간: ’19.6.20.~‘20.5.15. ․ 계약업체: ㈜글로벌텔레콤 ․ 계약금액: 891,508,320원 - CCTV 제작규격서 승인 : ‘19.8.27.(정보통신1사업소) - 5~8호선 전동차 영상기록장치 제작구매 시범설치 ․ 설치편성: 708편성(7108호, 7008호) ․ 기 간: ‘19.10.02~10.31 ․ 설치일자: ‘19.10.02 ․ 작업내용: 전방 카메라 및 Poe 인젝터설치, 기존 NVR 프로그램 추가설치 및 저장 영상확인 등
향후조치계획	▣ 전동차 객실 CCTV 설치계획 ○ 신조전동차 도입설치: ‘19~’25년 ○ 자체 설치: ‘20~’21년 - 자체 설치물량 : 844칸(설치대수 1,688대) ▣ 1~4호선 전동차 운전실 CCTV 시범설치 - 편 성 수: 11개편성(차종별 1개편성) - 설치기간: ‘19.10.15.~10.29. - 시범적용기간: 설치일로부터 1개월 ※ 시범적용 문제 없으래 경우 확대설치 예정

추진상황	공정	32.1%(객실 CCTV 기준)	평가	2단계 추진중