109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 서울시에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
수상레포츠 통합센터 조성	15,725	633	50	4,173	10,869	2022	18.3	15
한강교량과 한강공원 접근시설(E/V) 설치	12,013	1,800	2,400	3,000	4,813	2023	2017	50
한강몽땅 여름축제	1,287		1,267	532			2016	100
한강 함상공원 조성사업	12,713	11,647	1,066	1,151	계속	계속	2016	100

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

수상레포츠 통합센터 조성

담당자

수상기획과 김영주(☎3780-0819)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한강내 최초의 중소형선박 공용계류장 조성을 통한 친수기반 시설 수요 충족

○ 수상레포츠 교육·훈련·체험 활동 등 수상레저 저변 확대를 통한 한강 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘15. 8월 ~ ’22. 12월

○ 위 치 : 서울특별시 마포구 한강난지로 162인근(상암동 482-479 주변)

○ 규 모

구분	규모	주요기능	시설 배치
수상계류장	523㎡/70척	계류 및 체험훈련	선박, 수상레저기구 등 정박・계류 및 체험
육상계류장	5,000㎡/ 150척	선박 보관	보관장 1(2,260㎡), 보관장 2(2,740㎡)
통합지원센터 (부유식 수상구조물)	1층, 611.4㎡	교육장, 편의시설	교육장, 탈의실, 샤워장, 휴게실, 화장실 등
	2층, 615.5㎡	휴게공간	커뮤니티룸(휴게공간), 창고

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,625백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
시 도 비	15,725	583	50	4,173	10,919

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   15%)

○‘15. 8~’17.12 : 타당성 조사(B/C 1.06) 및 투자심사(2단계), 설계공모 실시

○‘18. 1. ~ 12. : 투자심사(재상정), 공유재산관리계획 의결

○‘19. 1. ~ 12. : 특정제품선정심사, 추가 지반조사 기술용역 실시

○‘20. 1. ~  6 : 실시설계 및 공사비(단가) 적정성 검토 실시

□ 향후계획

○‘20. 8. ~ 9. : 공정계획 및 건설사업관리(감독권한 대행) 계획 수립 추진

○‘20. 9~     : 입찰공고 및 착공

□ 사업변경 내역

구 분	내 역
	투자심사 (‘18.3.)	변 경
총사업비	123억원	157.25억원
공사비	115.9억원	145억원
변경사유	구조안정성 검토 결과 수상부 및 물량 증가 (강관말뚝 규격 및 물량, 콘크리트 방파제 폭 등 증가) - 각 공종별(토목, 건축, 기계, 소방 등) 감리비용 증가

※실시설계 및 공사비 적정성 검토 추진(수상기획과-2652)

사업명

한강교량과 한강공원 접근시설(E/V) 설치

담당자

기반시설과 김일문(☎3780-0674)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한강교량과 한강공원간 연결이 부족한곳에 대하여 승강기를 설치하여

한강공원 접근성 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.2 ~ 2023.12

○ 위 치 : 가양대교남단외13개소

○ 규 모 : 승강기 및 비상계단설치 14개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,013백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비
시 도 비		1,800	2,400	3,000	4,813
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

○총 14개소중 가양대교남단,올림픽대교남단 설치완료

성수대교북단,동작대교북단,성수대교남단 공사중(20.12 완료예정)

양화대교북단,서강대교북단,동호대교남단 설계완료(21년설치예정)

□ 향후계획

○ 잔여 6개소에 대하여 년차적 추진

○

□ 사업변경 내역(해당시)

사업명

한강몽땅 여름축제

담당자

총무과 안주희(☎3780-0710)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여름철 멀리 휴가를 떠나지 못하는 시민들에게 가까운 한강에서 여름휴가를 보낼 수 있도록 다양한 프로그램 제공

○ 천만 시민이 함께하는 서울의 대표 여름축제로서 다양한 문화예술 체험행사를 수준 높은 문화공간으로서의 한강 인식 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 7.19~8.18(31일간)

○ 위 치 : 한강수상 및 11개 한강공원 일대

○ 규 모 : 3개 테마, 77개 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,287백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비
시 도 비			1,287
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019 한강몽땅 여름축제 개최완료

□ 향후계획

○ 2021 한강몽땅 여름축제 추진

(2020년 한강몽땅 코로나 19 확산방지를 위해 개최 취소, 2020. 7월)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

한강 함상공원 조성사업

담당자

한강관광사업과 정영상(☎02-3780-0737)

□ 사업목적 및 필요성

○ 퇴역군함을 도입, 함상공원을 조성하여 한강역사·안보·평화 홍보의 장 활용

○ 한강에 특징있는 구경거리를 만들어 관광명소화와 함께 외래관광객 유치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. 1. ~

○ 위 치 : 망원한강공원(마포구 마포나루길 407)

○ 규 모 : 면적 8,275㎡, 안내센터(2층) 485㎡, 함정 3척, 정박시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,713백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,713	11,647	1,066	1,151	계속
국 비
시 도 비	12,713	11,647	1,066	1,151	계속
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 함상공원 조성관련 시장방침 수립 : 기본계획(‘15.4.22.), 변경계획(‘15.12.10.)

○ 시 투자심사 통과(조건부 적정) : ’16. 3. 25.

○ 함상시설물 설계 및 제작·설치 용역 : ‘16. 12. ~ ’17. 11.

○ 함상공원 조성공사 발주 및 시행 : ‘17. 5. ~ ’17. 11.

○ 서울함 공원 민간위탁 시행 : ‘17. 11. 1. ~ ’20. 10. 31.(3년)

□ 향후계획

○ 서울함 공원에 대한 민간위탁 기간이 ‘20. 10. 31. 만료됨에 따라 시설물

관리와 운영 분야에 전문성을 갖춘 단체에 재위탁