[1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축]

성과관리계획 변경 시행

○ 1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축 설계용역 계약기간을 연장 추진 하고자 함.

□ 관련근거

○ 통합관제 시스템구축 설계용역 계약

- ERP계약번호-제4500062568호(2019.07.31.) 『계약체결 통보』

○  설계경제성(VE) 심사 신청

- 신호처-1344호(2019.03.16.) 『설계경제성(VE) 심사 신청』

○ 설계경제성(VE) 검토 일정 잠정 연기

- 서울시 기술심사담당관-6336(2020.03.24.) 『설계경제성(VE) 검토         일정 연기 알림』

○  제11차 설계경제성(VE) 검토 회의 개최

- 서울시 기술심사담당관-7185(2020.04.07.) 『제 11차 설계경제성(VE)     검토 회의 개최 통보』

○  통합관제 시스템구축 기술검토 보고회(2차) 개최

- 신호처-2264호(2020.05.12.) 『1~9호선 지능형 SMART 통합관제         시스템구축 기술검토 보고회(2차) 참석 요청』

○  통합관제 시스템구축 설계용역 설계변경(계약기간 연장) 시행 보고

- 본부장-111호(2020.05.22.) 『1~9호선 지능형 SMART 통합관제          시스템구축 설계용역 설계변경(계약기간 연장) 시행 보고

□ 변경내용

○ 요청사항 : 시스템구축 설계용역 계약기간 연장

변경 전	ㅇ 용역과업기간 : 2019.08.05.~2020.05.30.	용역기간 300일
변경 후	ㅇ 용역과업기간 : 2019.08.05.~2020.08.28.	용역기간 390일

○ 변경사유(설계용역 계약기간 연장)

- 설계 경제성(VE) 심사 지연

· 예정 : ‘20.03.16. ~ ‘20.04.30. (44일)

· 진행 : ‘20.03.16 ~ 現)5월 중순 진행중 (미정)

※ COVID-19 감염병 지역 확산 차단을 위한 고강도 사회적 거리두기

캠페인 국가적 시행 (3.22.~5.5. 45일간)

- 설계VE 제안 채택안건의 검토 및 보완

VE 안건 구분	안건 내용	검토 및 보완 (추진예정)
채택아이디어	개별 네트워크 구성을 통합관제구축 조건에 맞게 통합네트워크로 구축	▶ 분야별 설계내용 변경 ▶ 보안성 심사 진행
설계보완	통합관제시스템 구축 발주 시, RAMS 적용 여부 및 목표 SIL 수정 할당 필요하며, 이를 수행할 수 있는 역량이 있는 업체를 확인 할 조건 등이 설계서에 제시 필요	▶ 통합관제 시스템 안전성 및 신뢰성 검증 방법 검토 ▶ 독립안전성평가(ISA) 시행방 식 분석 및 설계에 적용
발주처 검토	전력관제 LDP와 운전관제 LDP를 효율적으로 축소하여 구성 요망	▶ 내·외부 회의 및 자문 시행 ▶ 최적안 도출 및 의사결정

- 대형표시반(LDP) 규모 및 시스템 운용 조직/인력 산정 기준 검토

※ 경영부서와 사용부서의 의견 상충 → 임원진 의사결정 필요

월별 세부계획 변경내역

월	변경 전			변경 후
	계획(%) (공정율)	추진내용		계획(%) (공정율)	추진내용
1월	10	⋅시스템분야 설계 용역		10	⋅시스템분야 설계 용역
2월	10	⋅시스템분야 설계 용역		10	⋅시스템분야 설계 용역
3월	10	⋅시스템분야 설계 용역		10	⋅시스템분야 설계 용역
4월	10	⋅시스템분야 설계 용역 ⋅설계VE 준비		10	⋅시스템분야 설계 용역 ⋅설계VE 준비 및 설계심의 요청
5월	10	⋅시스템분야 설계 용역 ⋅설계경제성(VE) 설계심의 요청 및 완료		10	⋅시스템분야 설계 용역
6월	5	⋅시스템분야 공사 발주 준비		5	⋅시스템분야 설계 용역 ⋅설계경제성(VE) 설계심의 완료
7월	5	⋅시스템분야 공사 발주 준비		5	⋅시스템분야 설계 용역
8월	10	⋅시스템분야 공사 발주 준비		10	⋅시스템분야 설계 용역
9월	10	⋅시스템분야 공사 발주 준비		10	⋅시스템분야 공사 발주 준비
10월	10	⋅시스템분야 공사 발주 준비		10	⋅시스템분야 공사 발주 준비
11월	5	⋅시스템분야 공사 발주 준비		5	⋅시스템분야 공사 발주 준비
12월	5	⋅시스템분야 공사 발주 준비		5	⋅시스템분야 공사 발주 준비

□ 별첨: 성과관리계획서(조정)

				1~9호선 지능형 SMART 통합관제 구축

□ 사업개요

○ 호선별, 운영기관별 분산 설치되어 운영 중인 서울지하철(1~9호선) 관제설비를 공간적·기능적 통합으로 지능형 SMART 통합관제 구축

□ 추진내용

○ 사업대상: 1~9호선(신호, 전력, 통신, 기계, PSD, 검수) 관제설비

○ 추진내용

- 1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템 구축 설계용역 완료

- 1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템 공사 발주 준비

○ 사업비 : 19,067백만원(시스템 구축 3,269백만원 / 건물 신축 15,798백만원)

자본적지출,유형자산(전로설비),시설비 및 부대비	지하철 통합관제시스템 구축

□ 월별 추진계획

구 분	월별 추진계획
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
시스템 구축 설계용역
시스템공사 발주 준비

□ 연도별 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
물 량	설계용역	공사발주	공사시행	공사시행	공사시행
금 액	3,396	19,067	47,837	64,755	81,406

부서명	처장 강봉완 ☏ 6311-9780 팀장 오구식 ☏ 6470 담당 장현철 ☏ 6471