[서식 7]

국고보조금 교부신청서

신 청 자	성 명	서울특별시장				전화번호		02-2133-3772
	주 소	서울시 중구 덕수궁 길15
사업명	세부사업명 (내부기준사업명)
	세부단위사업명		응봉유수지 CSOs 저류조 설치
사업목적	강우시 발생되는 CSOs의 적정 관리를 위해 응봉유수지 지하에 CSOs 저류조 설치
사업기간	착공일 : 2018. 4. 준공예정일 : 2021. 12.
2020년도 사 업 비	구 분			계	기교부액		금 회		잔액
	국 비(천원)			2,169,000	-		2,169,000		0
	지 방 비(천원)			2,033,000	-		-		-
	기 타
사업계획	붙임 참조
보조금 관리에 관한 법률 제16조 및 동법시행령 제7조의 규정에 의거 위와 같이 국고보조금 교부를 신청합니다.
2020년 3월 일 서 울 특 별 시 장 (관인) 한 강 유 역 (지 방) 환 경 청 장 귀하

【서식 7의 붙임서식】

사 업 추 진 계 획 서

세부사업명 (내부기준사업명)	비점오염저감시설 국고보조사업	기관명
세부단위사업명	응봉 유수지 CSOs 저류조 설치	서울특별시

1. 사업개요

□ 사업내용

ㅇ 시설용량 : 4,000㎥

ㅇ 사업기간 : 2018. 4 ~ 2021. 12

ㅇ 사업비 분담율 : 국고보조 50%, 지방비 50%

□ 연차별 투자실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분		총사업비 (A)	기 투자실적	‘20예산	향후 투자계획
계		10,130	323	4,202	5,605
국고	소계	5,065	0	2,169	2,896
	보조금	5,065	0	2,169	2,896
지방비	소계	5,065	323	2,033	2,709
	시․도비	5,065	323	2,033	2,709
	시․군비
기 타

2. 사업추진현황

◦ 기본/실시설계 계약: ‘18.04.26

◦ 기본/실시설계 완료: ‘19.12.12

◦ 설계 환경부 승인 요청: ‘20.01.03

◦ 공사 발주: ‘20.07.예정

▶ ‘20년 3월 현재 사업진도 : 공정 40%(실시설계 100%, 공사 7월 착공예정)

3. ‘20년도 사업추진 계획 세부내역

(단위 : 백만원)

사업비 구분	'20 예산현액			주요 추진내역	추진일정 (연월)
	계	전년도 이월액	'20 예산
합 계	4,202	0	4,202
공사비	3,870	0	3,870	가시설 및 골조공사	7월
감리비	324	0	324	가시설 및 골조공사 등 감리	7월
시설부대비	8	0	8		7월

※ 사업비 구분은 타당성 조사비, 기본ㆍ실시설계비, 감리비 용지보상비,

시설공사비, 기타부대비, 융자금원리금상환 등으로 구분

4. 지방비 확보여부 : 확보