등록번호	도로시설과-9605		주무관		도로굴착팀장		도로시설과장		생활도시친화국장
등록일자	2020.9.17.
결재일자	2020.9.17.
공개구분	비공개(5)
			협조
「2020년 도로굴착복구공사(연간단가)」 설계변경(제1회) 검토 보고
생활도시친화국 [도 로 시 설 과]

「2020년 도로굴착복구공사(연간단가)」

설계변경(제1회) 검토 보고

「2020년 도로굴착복구공사(연간단가)」의 시공물량 변경(증·감)에 따른 설계변경 요인이 발생하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2020년 도로굴착복구공사(연간단가)

□ 공사기간 : 2020.03.20. ~ 2020.12.31.

□ 도 급 액 : 금695,066,400원 (도로굴착복구기금)

□ 도 급 자 : 풍요산업개발㈜ 대표 손수길

□ 공사개요 : 아스팔트포장 72a, 보도포장 45a, 콘크리트포장 12a

Ⅱ		보 고 내 용

□ 설계변경 사유 : 잦은 굴착으로 인한 노후도로 정비 및 관리청 복구물량 변동에 따른 시공물량 증․감

□ 주요공종 변경 현황

구 분	규 격	단위	당 초	변 경	증‧감		비고
소형고압블록포장	T=6~8cm	a	5	1	(감)	4
화강판석포장	야간	㎡	150	17	(감)	133
아스팔트 표층	T=5cm, 인력	a	10	62	(증)	52
아스팔트 표층(야간)	T=5cm, 인력	a	10	60	(증)	50

□ 공사비 변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감		사유
총공사비	1,200,998,400	1,200,998,400		-	공종별 단순 증감
도급비	695,066,400	695,066,400		-
관급비	314,797,370	314,797,370		-
이전비	191,134,630	191,134,630		-

Ⅳ		조 치 계 획

□ 상기 보고와 같이 시공물량 증․감 발생분을 반영하여 설계 변경을 시행하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 검증확인서 1부. 끝.