무궁화 동산 조성ㆍ관리 실태점검 결과보고

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2020.10.26 ∼ 2020.11.06.

❍ 점검대상 : 무궁화동산 조성지 17개소

❍ 점검기관 : 산림청 소속기관 및 지방자치단체

❍ 점 검 자

- (산림청) 도시숲경관과 무궁화 담당사무관 등 2명

- (지자체) 기관 실정에 맞게 자체 편성·점검

❍ 점검내용

- 2020년 무궁화 동산 조성 사업(17개) 사업추진 현황 점검

- 무궁화 동산 조성·관리 우수사례 및 개선사항 파악 등

□ 점검결과

< 점검총평 및 공통사항 >

❍ 무궁화동산 사업지는 유동인구가 많은 도심생활권 또는 상징성 있는 기념지, 관광지 등에 조성하고, 안내시설(안내판 및 수목표찰)을 설치하여 일반국민의 무궁화 경험확대 및 이용편의 제고에 기여 할 것으로 판단

❍ 대체로 무궁화동산 조성 및 관리상태 양호하며, 지속적인 유지관리(추가식재 등)를 위한 자체예산 확보와 조성·관리 매뉴얼에 따른 관리필요

❍ 일부 무궁화 전지·전정 미흡, 주변수목으로 인한 그늘짐 현상, 생육공간 확보(이식 등) 등 지속적인 보완사업 필요

❍ 품종확보가 어려운 큰 규격의 무궁화의 경우 실생묘로 식재한 경우가 많았으며, 향후 적정규격의 품종묘 우선 식재를 권장

❍ 무궁화 식재공사비 비율은 최소 40%이상 되도록 요청하였으나 안동시의 경우 기존공원 리모델링에 따른 기반조성 비중아 높아 식재 비율이 낮음(18%)

⇒ 일정규격 이상의 품종묘 추가 식재 등 보완지시(안동)

* 식재공사비율이 기준 이하인 경우 해당도 차년도 사업선정 배제 등 검토

< 우수사례 >

❍ (인제군) 동산조성 후 민간(인제스피디움) 조경팀에서 전담관리(민관협력)

❍ (의성군) 다양한 품종식재와 규모 확장을 위한 자체예산편성(2천만원)

❍ (세종시) 무궁화도시 기반조성 및 무궁화 키우기 문화 확산을 위한 무궁화 묘목 무상배부(시민, 단체, 학교 등 46개소, 5천주)

❍ (북부청) 남북협력센터의 의미를 상징한 식재설계로 통일한반도를 표현

< 애로사항 >

❍ 일부품종의 경우 전국적인 무궁화 수급이 어려워 시공단계에서 변경(품종에서 계통으로) 하는 등 다양한 품종식재에 어려움이 있음

□ 향후계획

❍ 2021년 무궁화 동산 조성 실무담당자 회의 개최

- 무궁화 조성사업 기준제시, 당부사항 및 질의응답 등

❍ 올바른 무궁화 식재 ‧관리를 위한 실무자 교육 운영

- 산림교육원 교육(2∼3월 예정) 및 사이버학습(2∼11월 예정)운영

❍ 무궁화 동산 조성사업지에 대한 지속적인 모니터링 추진

붙임  무궁화동산 조성사업 점검결과 1부.

붙임		2020년 무궁화 동산 조성사업 점검결과

구분	소 재 지	무궁화 식재비 (%)	보완 및 특이사항	점검 주체
북부청	경기.파주.탄현.성동 산5 *남북산림협력센터	43	-	산림청
휴양림	전북 순창 구림 안정리 산3-1외 *회문산자연휴양림	54	전지ㆍ전정 필요	산림청
서울	중랑구 망우동 산57-1 일대 *망우리공원	92	-	자체
	동대문구 이문동 352-2 *중량천변	84	해가림 방지를 위한 주변정리 필요	산림청
인천	서구 오류동 1551번지 *경인아라뱃길	59	-	자체
세종	세종시 고운동 1709번지	30	-	자체
경기	안양시 동안구 비산동 1100 *학운공원	55	-	자체
	광주시 곤지암읍 수양리 86번지 외	45	안내판 설치 필요	자체
	여주시 연양동 91	50	-	자체
강원	강원도 인제군 상하답로 130 *인제스피디움	42	-	자체
충남	부여군 부여읍 동남리 106일원 *서동공원	46	무궁화특성안내 필요	산림청
전북	완주군 용진읍 신지리 170외	73	덩굴류 제거 등 지속적인 하층관리 필요	자체
전남	영암군 영암읍 교동리 94 *낭산 김준연 기념관	87	-	자체
	보성군 벌교읍 칠동리 140 *홍암 나철선생 기념관	96	-	자체
경북	의성군 비얀면 서부리 산4외1 *3.1운동 기념공원	88	생육에 따른 생육공간 조절필요	산림청
	안동시 성곡동 816-1 외7 *안동댐 보조댐 주변	18	일정규격 이상의 무궁화 추가 식재 필요	산림청
경남	산청군 단성면 묵곡리 959번지 *단성 생태숲	70	-	자체