2020년도 도로시설물 세척용역 시방서

2020. 2.

동부도로사업소

(시 설 보 수 과)

일 반 시 방 서

□ 용역개요

○ 용역대상

- 터    널(3개소) : 일원, 매봉, 위례터널

- 지하차도(4개소) : 석촌, 장지, 청계산, 신원 지하차도

- 램    프(4개소) : 헌릉로 연결도로(A,B,C,F램프)

○ 세척물량 : 지하차도 106,826㎡, 터널 356,184㎡

○ 세척횟수 : 지하차도 4~6회, 터널 6회

○ 용역기간 : 착수일로부터~ 2020.12.30일

Ⅰ. 적용범위

본 시방서는 서울특별시 동부도로사업소에서 시행하는 『2020년 도로시설물 세척용역(연간단가)-동부』에 적용한다.

Ⅱ. 법규의 적용

본 용역은 아래 법령 및 규정(이하 관련법규라 함)과 용역계약문서(이하 설계서라 함)에 의거 시공한다.

1. 공중위생법

2. 기타 관련법규 및 조례, 고시내용

Ⅲ. 유관기관과의 협조

계약상대자(이하 도급자라 함)는 본 용역 시행과 관련되는 제반 서류를 갖추어(필요시 감독원을 경유)유관기관과의 사전 협의가 완료된 후 시행한다.

1. 교통신호 및 교통통제에 관한 사항 : 관할경찰서(이하 초소, 파출소)교통통제 및 현장 안전조치 계획을 수립하여 감독원 경유 협의 후 시행

2. 교통방송본부에 홍보 : 감독원과 협의 후 교통방송에 명확히 홍보될 수 있도록 확인하고 시행

Ⅳ. 시공상 이행하여야 할 사항

1. 본 세척용역은 동부도로사업소 관내 도로시설물에 대하여 연간단가 계약의 형태로 시행한다.

2. 본 세척용역 계약기간은 착수일로부터 2020. 12. 30까지로 하며 차수별 작업지시서에 의거 시행한다.

3. 도급자는 본 용역 착공 전에 아래 사항을 작성하여 용역 감독원의 승인을 받아야 한다.

가. 인력 투입계획서

나. 예정공정표

다. 장비투입계획서

라. 감독원이 요구하는 자료 등

4. 본 용역의 도급자는 세척작업 동안 현장 대리인(도급업체 소속직원 1인이상)을 현장에 상주시켜야 하고 감독원의 사전 승인 없이 현장을 이탈하는 일이 없어야 한다.

5. 도급자는 작업지시서 수령 후 3일 이내에 작업계획서를 제출하여 감독원의  승인을 받은 후 세척작업을 실시하여야 한다.

6. 본 용역에 반입 사용되는 모든 장비 및 물품은 목록을 작성하여 제출하고 감독원에게 제품의 성능, 규격, 수량 등의 확인을 득한 후 사용하여야 한다.

7. 본 설계서에 명기되지 않은 경미한 사항은 감독원의 지시를 받아 도급자의 부담으로 한다.

8. 본 용역의 계약금액은 원칙적으로 증감되지 않는다. 다만 다음과 같은 사유가 발생하였을 때 감독원이 인정할 수 있는 범위 내에서 설계변경 및 정산을 할 수 있다.

가. 본 용역 시행중 설계 내용과 상이하여 용역 물량의 증감이 있는 경우

나. 본 용역사항이 설계서 내용과 상이한 경우

다. 기타 발주처의 신설 공정이 발생되어 추가로 작업지시를 받아 시행하거나 용역방법의 변경에 따른 용역비 증감이 있는 경우

9. 도급자는 본 세척작업 개시 30분전까지 안전표지판 및 차량통제 요원을 감독원이 지정하는 장소에 배치하여 차량통제를 할 수 있도록 하고 감독원으로부터 최종 검토를 득한 후 세척을 실시하여야 한다.

10. 본 세척작업은 감독원이 지정한 시간 내에 반드시 작업을 완료하고 작업완료 후 즉시 차량통행이 가능하도록 조치하여야 한다.

11. 세척작업은 안전장구류(고무장갑, 장화 등)를 착용한 후 시행하고 안전사고 발생시는 신속히 응급조치를 취하고 감독원에게 즉시 보고하여 감독원의 지시에 따라 후속 조치토록 한다.

12. 차도 및 고소 작업시는 감독원이 요구하는 안전조치 시설을 충분하게 갖추고, 현장에서 발생되는 안전사고에 대해서는 도급자가 민,형사상의 모든 책임을 진다.

13. 본 용역을 시행 중 부주의로 공공시설물 및 사유재산에 손상을 입혔을 경우에는 도급자 부담으로 원상복구 또는 변상조치 한다.

14. 도급자는 본 용역 차수별 작업완료 보고시 주요 세척 공정 전, 중, 후 장면이 촬영된 사진 2부씩을 제출한다.

15. 도급자는 본 용역을 시행시 교통통제에 따른 사전 홍보함에 있어 용역수행 3일 전에 안내간판(통제시간, 통제방법, 통제방향 명기)을 감독원이 지정하는 장소에  정확히 취부 및 설치하여 대민홍보에 철저를 기하여야 하며, 당해 시설물 세척이 끝나는 즉시 철거하여 정상적인 교통소통이 될 수 있도록  하여야 한다.

16. 기타 본 시방서에 명기하지 않은 문제점이 발생시는 감독원의 해석에 따라 적의 처리 또는 쌍방 협의에 의하여 결정하되 명확한 규정과 근거에 의한다.

17. 본 용역은 특성상 야간작업시행 및 작업시간이 제한되어 있으므로 세척대상 시설이

수개소로 분산되어 있을 경우에는 도급자는 이를 동시에 작업완료가 가능하도록 충분한

인원 및 장비를 투입하여야 한다.

18. 세척할 시설물에 설치되어 있는 기기들을 충분히 비닐커버 등으로 방수조치하고 세척을

실시하여야 하며, 시설물 손괴시 도급자 부담으로 원상복구 하여야 한다.

19. 본 용역은 교통통제 등 특수한 여건에 의거 작업물량이 증 ․ 감되거나 도급자가 필요한

시간에 적정인원과 장비투입이 곤란하여 세척작업 시행이 불가능하다고 판단될 경우

일부 물량을 타업체에게 계약하여도 도급자는 이의를 제기할 수 없다

20. 도급자는 발주처의 세척계획 일정에 부득이한 사정으로 인하여 변경요구가 있을시 이에 따라야 한다.

21. 귀책사유로 인한 추가비용은 미지급 함을 원칙으로 한다

22. 출․퇴근 시간대(오전6시~9시, 오후 5시~9시) 세척시행 원칙적 금지

※교통통제가 필요 없는 작업, 점용허가 구간내 작업, 긴급(응급)복구 작업은 가능

□ 세부 작업순서

○ 야간작업

순번	작업계획내용	시간대별	비 고
1	현장 집결	22:30	점검 : 감독자
2	인원 및 장비 점검	22:30 ～ 23:00
3	작업원 안전교육 실시	23:00 ～ 23:10
4	차량통제용 교통안전시설 설치	23:10 ～ 24:00
5	차량통제 완료후 작업시작	24:00 ～ 02:00
6	휴식	02:00 ～ 02:30
7	작업진행 및 완료	02:30 ～ 04:00
8	작업상태 점검 및 보완	04:00 ～ 04:30
9	교통안전시설 철거 및 통제해제	04:30 ～ 05:00
10	자재정리 및 해산	05:00 ～ 05:30

※ 교통 소통에 지장이 없도록 필요시 발주처 및 경찰서와 협의 후 시간 조정 가능

○ 주간작업

순번	작업계획내용	시간대별	비 고
1	현장 집결	09:30	점검 : 감독자
2	인원 및 장비 점검	09:30 ～ 10:00
3	작업원 안전교육 실시	10:00 ～ 10:10
4	차량통제용 교통안전시설 설치	10:10 ～ 11:00
5	차량통제 완료후 작업시작	11:00 ～ 13:00
6	휴식	13:00 ～ 13:30
7	작업진행 및 완료	13:30 ～ 1400
8	작업상태 점검 및 보완	14:00 ～ 14:30
9	교통안전시설 철거 및 통제해제	14:30 ～ 15:00
10	자재정리 및 해산	15:00 ～ 15:30

특 별 시 방 서

본 시방서는 서울특별시 동부도로사업소에서 시행하는 『2020년 도로시설물세척용역(연간단가)-동부』에 적용한다.

1. 천정콘크리드 세척

가. 도급자는 천정세척시 분사기를 표면에 비스듬히 분사하여 노폐물의 번짐을 방지하고 분사압력을 조절하여 표면처리제가 벗겨지지 않도록 하여야  하며 만일 세척 작업으로 인하여 표면 처리제가 손상되거나 기타 시설물이  훼손 될 경우 원상 복구토록 하여야 한다.

※ 기타 시설물 : 조명기구, 닥트, 재방송선로, CC카메라 등

나. 도급자는 시설물의 천정세척시 세척기 15L/min 출수량을 기준하여 세척수가 10ℓ/㎡당의 분사량으로 1회(세척기 1m 이내 분사)함을 원칙으로 하며, 천정면이 깨끗하게 세척 될 수 있도록 세척수 분사에 철저를 기하여야 한다.

다. 세척 작업시 고압분사기를 다루는 작업자는 신체 건강한 장정이어야 하며 2인 이상을 한조로 편성하여 작업하여야 한다.

라. 차량에 탑재된 물탱크의 용량은 5,500ℓ로 하되 작업규모에 따라 변경이 필요할 경우에는 감독원과 협의하여 결정토록 하여야 한다.

마. 세척작업 진행시 감독원으로부터 재 세척 작업지시를 받았을 경우 즉각 차량의 진행을 후진하여 재 세척토록 하여야 한다.

2. 벽체콘크리트 세척

가. 도급자는 벽면 세척시 분사기를 표면에 비스듬히 분사하여 노폐물의 번 짐을 방지하고 분사압력을 조절하여 표면처리제가 벗겨지지 않도록 하여야 하며, 만일 세척 작업으로 인하여 표면 처리제가 손상되거나 기타 시설물이  훼손 될 경우 원상 복구토록 하여야 한다.

※ 기타 시설물 : 소화기함, 소화기 표시등, 배관 배선재, 내장재 등

나. 도급자는 시설물의 벽면세척시 세척기 15L/min 출수량을 기준하여 세척수가 20ℓ/㎡당의 분사량 시행함을 원칙으로 하며 세척수 분사량을 2회로 적절히 조절하여 1회(1차)세척시는 천정분사와 동일하게 시행하여 1차적으로 노폐물을 제거하고 벽면이 충분하게 물기에  젖도록 하여 부분적인 노폐물(찌든떼)을 고압세척기 및 기타 청소기로 제거 될 수 있도록 하고 2회(2차) 세척시는 잔류 노폐물이 완전하게 제거 될 수 있도록 시행하여야 한다.

다. 세척 작업시 고압분사기를 다루는 작업자는 신체 건강한 장정이어야 하며,차량에 탑재된 물탱크의 용량은 5,500ℓ로 하고 작업규모에 따라 변경이 필요할 경우에는 감독과 협의하여 결정토록 하여야 한다.

라. 세척작업 진행시 감독원으로부터 재 세척 작업지시를 받았을 경우 즉각 차량의 진행을 후진하여 재 세척토록 하여야 한다.

3. 벽체타일 세척

가.  타일세척은 1차와 2차 세척 중간에 걸레나 마포 기타 브러시 솔을 사용하여 타일 면 전체의 찌든 떼를 제거한 후 2차 세척으로 마무리 하여야 한다.

※ 기타 시설물 : 소화기함, 소화기 표시등, 배관 배선재, 내장재 등

나. 도급자는 시설물의 벽면세척시 세척기 15L/min 출수량을 기준하여 세척수가 25ℓ/㎡당의 분사량 시행함을 원칙으로 하며 타일 면이 깨끗하게 세척 될 수 있도록 세척수 분사에 철저를 기하여야 한다.

다. 세척 작업시 고압분사기를 다루는 작업자는 신체 건강한 장정이어야 하며,차량에 탑재된 물탱크의 용량은 5,500ℓ로 하고 작업규모에 따라 변경이 필요할 경우에는 감독과 협의하여 결정토록 하여야 한다.

라. 세척작업 진행시 감독원으로부터 재 세척 작업지시를 받았을 경우 즉각 차량의 진행을 후진하여 재 세척토록 하여야 한다.

4. 바닥세척

가. 바닥세척은 천장세척과 동일하게 시행하되 청소용비나 브러시를 사용하여 바닥의 찌든 떼를 문질러 제거하는 공정을 추가한다.

5. 교량난간 세척

가. 교량난간은 세척시 분사기를 표면에 비스듬히 분사하여 노폐물의 번 짐을 방지하고 분사압력을 조절하여 표면처리제가 벗겨지지 않도록 하여야 하며, 만일 세척 작업으로 인하여 표면 처리제가 손상되거나 기타 시설물이  훼손 될 경우 원상 복구토록 하여야 한다

※ 기타 시설물 : 교통안전시설(표지판,데리네이터,차광망,난간용반사지 등)

나. 교량난간세척은 1차와 2차 세척 중간에 걸레나 마포 기타 브러시 솔을 사용하여 타일 면 전체의 찌든 떼를 제거한 후 2차 세척으로 마무리 하여야 한다.

다. 도급자는 시설물의 교량난간세척시 세척기 15L/min 출수량을 기준하여 세척수가 10ℓ/㎡당의 분사량으로 1회 함을 원칙으로 하며, 교량난간이 깨끗하게 세척 될 수 있도록 세척수 분사에 철저를 기하여야 한다.

다. 세척 작업시 고압분사기를 다루는 작업자는 신체 건강한 장정이어야 하며 2인 이상을 한조로 편성하여 작업하여야 한다.

라. 차량에 탑재된 물탱크의 용량은 5,500ℓ로 하되 작업규모에 따라 변경이 필요할 경우에는 감독원과 협의하여 결정토록 하여야 한다.

마. 세척작업 진행시 감독원으로부터 재 세척 작업지시를 받았을 경우 즉각 차량의 진행을 후진하여 재 세척토록 하여야 한다.

6. 방음벽 세척

가. 방음벽세척은 세척시 분사기를 표면에 비스듬히 분사하여 노폐물의 번 짐을 방지하고 분사압력을 조절하여 방음판(폴리카보네이트)가 깨지지 않도록 하여야 하며, 만일 세척 작업으로 인하여 방음판이 손상되거나 기타 시설물이  훼손 될 경우 원상 복구토록 하여야 한다

※ 기타 시설물 : 교통안전시설(표지판, 데리네이터,등)

나. 방음벽은 1차와 2차 세척 중간에 걸레나 마포 기타 브러시 솔을 사용하여 하부(알루미늄방음판 및 목재방음벽), 상부(폴리카보네이트)면 전체의 찌든 떼를 제거한 후 2차 세척으로 마무리 하여야 한다.

다. 도급자는 시설물의 벽면세척시 세척기 15L/min 출수량을 기준하여 세척수가 25ℓ/㎡당의 분사량 시행함을 원칙으로 하며, 방음벽이 깨끗하게 세척 될 수 있도록 세척수 분사에 철저를 기하여야 한다.

라. 도급자는 방음벽 상부등 신체보다 높은 곳을 세척시 시설물 보수작업용 작업대를 설치한 차량을 이용하여 세척하여야 하며 인접 주택에 세척수가 영향이 최소화 되도록 작업하여야 한다.

마. 세척 작업시 고압분사기를 다루는 작업자는 신체 건강한 장정이어야 하며 2인 이상을 한조로 편성하여 작업하여야 한다.

바. 차량에 탑재된 물탱크의 용량은 5,500ℓ로 하되 작업규모에 따라 변경이 필요할 경우에는 감독원과 협의하여 결정토록 하여야 한다.

사. 세척작업 진행시 감독원으로부터 재 세척 작업지시를 받았을 경우 즉각 차량의 진행을 후진하여 재 세척토록 하여야 한다.

6. 교통안전시설 설치

가. 세척안내간판의 규격은 0.9×1.8M×평철판(0.2t)의 직립식이어야 하며, 감독원이 제시한 내용으로 제작하여 차량통행에 지장이 없고 운전자가 잘 볼 수 있도록 감독원이 지정하는 장소에 정확하게 배치하고 강풍에 움직이지 않도록 견고하게 고정하여야 한다.(만일 안내간판이 통행차량에 위해를 가해 손배상에 대한 민원이 발생할 경우 도급자 부담으로 처리하여야 한다.)

나. 세척안내현수막의 규격은 7m×90㎝×지지용bar(1.2m이상)로 하며, 감독원의 지시에 따라 설치 현장 여건에 맞게 가로형 및 세로형으로 제작하여야 한다.

다. 세척안내현수막 설치는 감독원이 지정한 장소에 설치하며 3인을 1조로 편성하여 설치하도록 하고 세척 작업 종료 후 즉시 철거하여 청결하게 보관하였다가 다음 차수 세척 작업시에 재활용토록 한다.

라. 공사안내표지판의 규격은 적립식 삼각대이어야 하며, 당일작업 전에 현장시설물 차선통제선 시발지점 앞뒤로 1개씩 설치하여야 한다.

마. 안전휀스는 1800×1450으로 현장에 차선변경 및 차량 통제선에 견고하게 설치하여야 한다.

바. 라바콘은 높이 60㎝이상이며 겉면에 야광페인트가 칠하여진 것 또는 발광지가 붙여진

것으로 사용하고, 차량 통제선에 최소 5m 이하 간격으로 배치하여야 한다.

사. 교통유도원은 터널 및 지하차도 세척구간 입출구에 배치하고 안전장구(안전모, X밴드, 호루라기, 지시봉, 안전화 등)를 필히 착용하여 현 교통통제에 임한다.

7. 기타 본 세척용역을 시행함에 있어 작업의 총지휘는 감독원의 지시에 의거 진행함을 원칙으로 하는 만큼 작업의 원만한 진행 및 각종 안전사고가 발생치 않도록 감독관의 지시에 철저하게 따르도록 한다. 단. 감독관의 지시에 따를 수 없거나 의견을 달리 할 시는 관계규정에 근거하여 결정토록 한다.