문서번호	기술진단과-1839
결재일자	2020.2.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	기술진단과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
협 조

에너지의 효율적 사용을 위한

2020년 에너지 진단 계획

2020.  2.

상수도사업본부

(기술진단과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

에너지의 효율적 사용을 위한

2020년 에너지 진단 계획

아리수정수센터 등 에너지다소비시설에 대한 에너지 사용시설 전반에 에너지 손실요인 및 개선방안을 찾아내어 에너지 이용효율 향상에 기여하고자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 추진배경

❍ 에너지진단 외부용역으로 과다한 비용 지출(’11년~’14년 총 68천만원)

❍ 에너지진단 전문기관 지정:′14. 9. 25.(산업통상자원부 제14-2086호)

- 수도시설 기술진단으로 축적된 능력을 활용하여 자체 진단 수행

□ 관련근거

❍「에너지이용 합리화법」제32조 및 같은법 시행령 제37조

- 에너지 다소비 사업자(2,000 TOE¹⁾/년 이상) 5년 주기 의무 진단

- 에너지 진단내용의 이행실태 확인 및 이행에 필요한 기술지도

□ ’19년 추진실적

❍ 암사아리수정수센터 진단 시행 : 201백만원 절감[붙임 1 참조]

구 분	에너지 절감량 (TOE/년)	절 감 금 액(백만원)			비 고
		계	에너지절감	용역비
진단결과	220.69	201	108	93

1) TOE(Ton of Oil Equivalent) : 원유 1톤에 해당하는 열량으로 약 10⁷kcal를 말함.(즉 1kg = 10,000kcal로 환산)

Ⅱ		추진계획

	< 추 진 방 향 >
◆ 최적의 시설 운영방안 마련으로 예산 절감 - 건축, 기계, 전기설비 등 분야별 운영실태 조사 분석 - 설비별 정밀진단을 통한 맞춤형 개선안 도출 ◆ 에너지진단 결과에 따른 개선안 이행 실태 점검 - 개선방안 이행 확인 및 기술지도로 에너지 이용 효율 향상

① 에너지진단

□ 기    간 : ’20. 3월 ~ 10월(8개월)

□ 대상기관 : 구의아리수정수센터

적용분야	2019년 에너지사용량(TOE)				비 고
	계	전 기	도시가스	기 타
산업부문	6,647	6,644	2	1

※ 기타 : 휘발유, 경유 및 부탄가스

□ 추진방법 : 자체인력 진단(8명)

❍ 진단절차

∙ 기초자료 조사

∙ 시설운용 파악

∙ 수행계획서 제출

∙ 운영현황 조사

∙ 운전상태 등 조사

∙ 개선방안 도출

∙ 문제점 분석

∙ 개선방안 제시

∙ 보고서 작성

① 사전 조사

② 현장 진단

③ 분석 보고

❍ 주요 진단범위 : 세부진단 범위 [붙임 2] 참조

- 건축분야 : 구조체 열관류율 및 냉·난방부하 산출 등

- 기계분야 : 펌프류 관리상태 및 실부하 성능 비교 분석 등

- 전기분야 : 전력공급 설비 효율 분석 및 조명설비 개선

- 기타사항 : 절전장치의 적용, 중장기 에너지 절약 대책 수립 등

<주요설비현황>

분 야	설 비 명	용 량	수량	비고
전 기	변 압 기	9,000kVA	2대
	비상발전설비	600kW(1), 85kW(1)	2대
기 계	펌프(송수)	870kW(2), 450kW(2), 640kW(4), 315kW(4)	12대

❍ 진단인력 : 8명(자문위원 10명)

구 분	계	기계분야	전기분야	화공분야	비 고
자체인력	8 명	3	3	2
자문위원	10 명	7	3	-	[붙임 3] 참조

❍ 진단일정

구 분	월 별 일 정											비 고
	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
추진사항
		사전준비	에 너 지 진 단					분 석 보 고

《규정최소 진단일수》

정 수 센 터	기준(TOE)	소요일수			소요인력 (인)	총 일수․인력
		계	현장진단	보고서
구의정수센터	5천이상~ 1만 미만	19	11	8	3	57

※ 법정 최소 소요일수: 19일(진단 11, 보고서 8) × 3인/일, 년 57인 소요

❍ 진단결과 조치 : 진단년도 이후 3년간 개선안 이행실태 확인

② 에너지진단 이행실태 확인

□ 기    간 : `20. 4월 ~ 6월(3개월)

□ 대상기관 : 7개 기관(완료 다음해부터 3년간)

❍ 2017년 ~ 2019년 에너지 진단 완료 기관

□ 확인절차

계획수립		계획제출 (한국에너지공단)		이행실태 현장확인		결과보고 (한국에너지공단)

□ 방    법 : 현장방문

□ 내    용 : 개선방안의 이행실태 확인 및 이행에 필요한 기술지도

연번	사 업 장 명	진단 년도	설비명	개 선 안	이행실태
1	뚝도아리수정수센터	2017	펌 프	전기히트펌프를 지열열원 히트펌프로 개선	개선완료
				저효율 펌프 성능 개선	“
				유도전동기 역률 개선	“
2	영등포아리수정수센터	2017	펌 프	저효율 펌프 성능 개선	“
			조명설비	고효율 조명으로 교체	“
3	구의아리수정수센터	2017	냉동설비	공기조화기 운전방법 개선	개선완료
			변압기	통합운전으로 운영방법 개선	“
4	강북아리수정수센터	2017	펌 프	고효율 펌프로 교체(4대) (2대 교체완료, 2대 `20년 교체예정)	개 선 중
5	노 량 진 배 수 지	2018	펌 프	저효율 펌프 성능 개선	개선완료
6	풍 납 취 수 장	2018	펌 프	저효율 펌프 성능 개선(4대) (2대 개선완료, 2대 `20년 개선예정)	개 선 중
7	암사아리수정수센터	2019	펌 프	고효율 펌프로 교체(4대 : 송수2, 취수2) (송수펌프 2대 `20년 교체예정)	“

※ 암사 취수펌프 2대는 광암정수센터 취수원 이중화 사업과 연계하여 교체 추진

Ⅲ		행정사항

□ 에너지 진단 관련 자료 제출

❍ 제출기관 : 한국에너지공단

❍ 제출자료

- 기술인력의 상근 및 장비의 기능 유지여부(2월말)

- 에너지 진단 이행실태 확인 및 기술지도 일정 등 계획 제출(3월말)

- 이행실태 확인 및 기술지도 실적 제출(7월말)

□ 에너지 진단 수행계획 통보

❍ 시    기 : 진단 개시 3일전까지

❍ 통보기관 : 구의아리수정수센터 및 한국에너지공단

붙 임 : 1. 예산절감 산출내역 1부.

2. 세부진단 범위와 방법 1부.

3. 에너지진단 자문위원 명단 1부.

4. 에너지진단 이행실태 확인 및 기술지도 계획표 1부. 끝.