2020년 정수처리시설 청소 세부추진일정(안)

시설명			4월			5월		6~8월	10월		11월
			3주	4주	5주	1주	2주		4주	5주	1주	2주	3주	4주
착수정		#1-1,2	4.16~17					~ (침전지 트라프 : 8월 하순)
		#2-1,2				5.4~7
응집침전지	#1	1지		4.20					10.23
		2지		4.21						10.26
		3지		4.22						10.27
		4지		4.23						10.28
		5지		4.24						10.29
		6지			4.27					10.30
	#2	1지				5.8					11.2
		2지					5.11				11.3
		3지					5.12				11.4
		4지					5.13				11.5
		5지					5.14				11.6
		6지					5.15					11.9
여과지	#1	1~2지	4.17						10.23
		3~4지		4.20						10.26
		5~6지		4.21						10.27
		7~8지		4.23						10.28
		9~10지		4.24						10.29
		11~12지			4.27					10.30
	#2	1~2지				5.8					11.2
		3~4지					5.11				11.3
		5~6지					5.12				11.4
		7~8지					5.14				11.5
		9~10지					5.15				11.6
활성탄흡착지		1~2지										11.9
		3~4지										11.12
		5~6지										11.13
		7~8지											11.16
		9~10지											11.19
		11~12지											11.20
		13~14지												11.23
		15~16지												11.24
		통로바닥				5.6								11.25
정수지		1,2지										11.10~11
		3,4지											11.17~18
배출 수지		1지			4.28
		2지			4.29
배슬러지		1지			4.28
		2지			4.29
1차 농축조		A지			4.29
		B지					5.13
2차 농축조		A지		4.22
		B지				5.6

※ 침전지 트라프 청소는 8월 하순 포함 총 3회 실시