별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(2공구)

◦ 요청번호 : 2020-11호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유			감리비 부담여부	비고
작업일 : 2020.02.08. 시 간 : 09:00～05:00	휴 일	도봉지하차도 육상구간	시공사			X
			발주청	○
			감리사
작업내용	- 시점부 기존 수로암거 깨기 - 시점부 주형보 설치 - 11BL 터파기 - 바이패스갱 토사 상차 - 21BL 기초 철근 조립 - 32BL 기초 철근 및 트랜치 거푸집 설치 - 33BL 버림 방수 - 34BL 버림 방수				- 34BL-1 기초 거푸집 설치 - 외부대피계단#4 소일시멘트 포설 - BH06LC 1대, BH06W 3대, 크람샤 1대, 카고크레인 3대, D/T15t 3대 목공 16명, 철근공 22명, 방수공 4명, 가시설공 6명, 보통인부 8명

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2020. 02. 03

현장대리인  정 우 석 (인)

※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

-----------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2020-11호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명
작업일 : 2020.02.08 시 간 : 09:00～05:00	공정계획에 의거 야간작업 필요함	감리원	연인권
			박천일

2020. 02. 03

책임감리원  안 진 섭 (인)

도시기반시설본부장 귀하

별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(2공구)

◦ 요청번호 : 2020-12호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유			감리비 부담여부	비고
작업일 : 2020.02.09. 시 간 : 09:00～05:00	휴 일	도봉지하차도 육상구간	시공사			X
			발주청	○
			감리사
작업내용	- 시점부 기존 수로암거 깨기 - 시점부 우회로 포장 - 11BL 터파기 - 바이패스갱 토사 상차 - 21BL 기초 철근 조립				- BH06LC 1대, BH06W 2대, 크람샤 1대, 카고크레인 1대, D/T15t 3대, 포장장비세트 1 철근공 11명, 특공 3명, 보통인부 3명

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2020. 02. 03

현장대리인  정 우 석 (인)

※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

-----------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2020-12호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명
작업일 : 2020.02.09 시 간 : 09:00～05:00	공정계획에 의거 야간작업 필요함	감리원	박판영
			김 현

2020. 02. 03

책임감리원  안 진 섭 (인)

도시기반시설본부장 귀하

별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(2공구)

◦ 요청번호 : 2020-13호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
2020.02.07.~02.13. 시 간 : 18:00~05:00	야간 및 철야	도봉지하차도 육상구간	시공사		X
			발주청	○
			감리사
작업내용	- 일자 : 02/07 ~ 02/13 / 작업 시간 : (18:00~05:00) 작업 내용 : 시점부 주형보 설치 및 아스콘 포장, 바이패스갱 토사 상차 및 띠장 설치, 21BL 기초 철근 조립, 녹천교사거리 토사 상차, 토류판 설치 및 띠장 설치, 29BL 브라켓 철근 조립, 32BL 기초 철근 및 트랜치 거푸집 설치, 34BL-1 버팀보 설치 투입 : BH06LC 4대, D/T15t 6대, BH06W 1대, BH03LC 2대, 크람샤 2대, 카고크레인 5대 철근공 44명, 가시설공 22명, 목공 8명, 보통인부 5명

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2020. 02. 03

현장대리인  정 우 석 (인)

※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

-----------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2020-13호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명
2020.02.07.~02.13. 시 간 : 18:00～05:00	공정계획에 의거 야간작업 필요함	감리원	김 현

2020. 02. 03

책임감리원  안 진 섭 (인)

도시기반시설본부장 귀하

별첨서식 #1】

<작업장별 감리원 및 현장책임자 배치현황>

구 분		1구역	2구역	3구역	4구역	5구역		비고
연 장		240m	40m	270m	210m	120m
공사내용 (공정률)		토공,가시설작업 구조물작업	가시설작업,구조물작업	토공,가시설작업구조물작업	토공,가시설작업	토공작업,가시설작업
평일	작업장
	현 장 책임관	공사 과장
	감리원	감리원 2명 순회근무
휴일	작업장
	현 장 책임관	공사 과장
	안 전	안전관리자
	감리원	감리원 1명 순회근무

- 작업장 개소가 많은 경우 (동부간선도로확장공사 2공구)

범례

작업구간