문서번호	시설운영팀-4530			★담당자	부장		팀장		건설안전본부장
보존기간	년									12/06
				김장식	양동준		신종철		임창수
결재일자	2021.12.06.
공개여부	공개
				협 조
					차장			우재수
				감 사
2021년 가락시장 하수준설토 운반처리 용역 설계변경 시행

2021. 12.

	서울특별시농수산식품공사
시설운영팀

	『2021년 가락시장 하수준설토 운반처리 용역』 설 계 변 경 시 행

『2021년 가락시장 하수준설토 운반처리 용역』와 관련하여 폐기물 운반조건 및 처리물량 변경이 발생되어 설계변경을 시행하고자 함

추 진 배 경

Ⅰ		공사 개요

○ 공 사 명 : 2021년 가락시장 하수준설토 운반처리 용역

○ 계약금액 : 16,400,000원

○ 공사기간 : 2021.04.21. ~ 2021.12.15.

○ 계 약 자 : ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ 대표자 ㅇㅇㅇ

(서울특별시 ㅇㅇ구 ㅇㅇ동 0-0 ☎ 02-000-0000)

Ⅱ		추진 경과

○ ′21.04.16. 시행방침 수립(시설운영팀-1436,21.04.16)

○ ′21.04.21. 계약체결(계약번호 20210*******00,2021.04.21.)

○ ′21.04.29. 하수준설토 폐기물 가락시장 반출 및 운반 ․ 처리 시행

Ⅲ		관련 규정

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

: 설계변경으로 인한 계약금액의 조정

○ 행정안전부 예규 제114호(2020.6.10) 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준

: 제14장 용역계약 일반조건 제6절 과업내용의 변경과 계약금액 조정

Ⅳ		설계변경 주요내용

□ 설계변경 사유

○ 운반차량 변경사유: 계약 1톤트럭 ➜ 변경 5톤 트럭크레인

※ 신규단가(운반비): 낙찰률 97.76% 적용

○ 폐기물량 변경사유: 반출 실제 물량 정산(북문 계근대 자료)

□ 설계변경 내역                                                                  (단위 : 천원)

구 분	용역비
	당초	변경	증ㆍ감
① 직접공사비	14,909	12,291	감)	2,618
② 부가세	1,491	1,229	감)	262
③ 합 계	16,400	13,520	감)	2,880

Ⅴ		행정 사항

□ 계약금액 및 계약기간 변경                           (단위 : 천원)

구분	당초계약(A)	변경계약(B)	증감(B-A)
계약금액	16,400	13,520	감) 2,880
계약기간	′21.04.21.~′21.12.15.	′21.04.21.~′21.12.15.	증감없음

□ 소요 예산 : 감액변경으로 예산조치

□ 향후 추진계획 : 계약변경 추진(재무팀 협조)

붙임  1. 설계변경 세부내역 .................................1부.

2. 신규단가(운반비) 산정근거 ........................1부.

3. 물량정산 근거 ......................................1부.

4. 계약변경 합의서 ..................................1부.

5. 설계변경 내역서(당초,변경) ...................1부. 끝.