교통사고다발 어린이보호구역 등

관계기관 합동 현장점검 결과 세부 정비계획

2020. 11.

	서울특별시 (보행정책과)

- 교통사고 다발 어린이보호구역 등-

관계기관 합동 현장점검 결과 세부 정비계획

-  -

Ⅰ		정비계획 총괄

연번	위치			조치내용	소요금액	완료(예정)
	시도	시군구	어린이 보호구역
1	서울시	구로구	개봉초	사랑방영어교습소 앞 ‣ 과속방지턱 설치 및 볼라드 2개소 대광교회 앞 ‣ 과속방지턱 설치 및 노면표시 이설 ‣ 화단 낮추기 (교회협의 필요)	26백만원	’22. 5월
2	서울시	광진구	광진초	대광교회 앞 ‣ 과속방지턱 설치 및 노면표시 이설 ‣ 화단 낮추기 (교회협의 필요)	35백만원	’22. 6월

Ⅱ		어린이 보호구역별 세부 정비계획

1	개봉 초등학교

ㅇ 시설 개요

연 번	1	대상학교	개봉초등학교
주 소	구로구 개봉로 16길 30-11				관리기관	구로구청
						구로경찰서
시설규모	49학급				수용 인원	1,024명
점검일자	2021. 9. 27.			어린이사고 발생현황		발생	사망	부상
점 검 자	구로구청 조용상, 도로교통공단 곽기영, 서울시남부교육지원청, 서울시 보행정책과 김종민					2	0	2

ㅇ 지적사항 정비계획

[ 사랑방영어교습소앞 ]

개선안 집계표	계	도로구조	도로안전시설	교통안전시설
개선안 (개소)	3	2	1
소요예산 (백만원)	11	1.0	10

[ 대광교회 앞 ]

개선안 집계표	계	도로구조	도로안전시설	교통안전시설
개선안 (개소)	3	1	1	1
소요예산 (백만원)	15	4	10	1

ㅇ 세부 조치내용

연번	문제점 요지	위치	정비계획
1-1	보도턱이 낮아 차량이 보도를 침범하여 보차 사고 발생	사랑방영어교습소앞	볼라드 신설(2개소) 이미지험프→볼록형과속방지턱 변경(1개소)
1-2	대광교회 모퉁이 화단(사유지)이 높아 시야확 보 곤란으로 보차사고 발생	대광교회 앞	모퉁이 화단 높이를 낮추도록 대광교회측과 협의 권유(1개소) 과속방지턱 신설(1개소) 노면표시(#538;진행방향) 이설(1개소)

ㅇ 소요금액 :  26백만원

- 산출근거

□과속방지턱 2개소 : 20백만원

□볼라드 2개소 및 노면표시 등 : 2백만원

□화단정리 : 4백만원

- 재원조달방안 : 특교세 지원

ㅇ 추진일정

- ‘22. 3. :  설계

- ‘22. 4. ~ 5월 : 공사

- ‘22. 5월. : 완료(예정)

ㅇ 지연사유 (연내 정비가 불가능한 경우 기재)

- 연말 자치구별 회계마감 도래, 동절기 굴착공사 제한 등

2	광진 초등학교

ㅇ 시설 개요

연 번	1	대상학교	광진초등학교
주 소	광진구 자양로 40길 41				관리기관	구로구청
						구로경찰서
시설규모	30학급				수용 인원	582명
점검일자	2021. 9. 27.			어린이사고 발생현황		발생	사망	부상
점 검 자	광진구청 박정수, 도로교통공단 박기수, 서울시성동교육지원청 신지혜, 서울시 보행정책과 김종민, 광진경찰서 임구억					2	0	2

ㅇ 지적사항 정비계획

[ 정문 앞 ]

개선안 집계표	계	도로구조	도로안전시설	교통안전시설
개선안 (개소)	1	1
소요예산 (백만원)	35	35

[ 레미안아파트 접속도로 앞 ] - 기 조치

개선안 집계표	계	도로구조	도로안전시설	교통안전시설
개선안 (개소)	3	1	1	1
소요예산 (백만원)

[ 자양로 교차부 ] - 기 조치

개선안 집계표	계	도로구조	도로안전시설	교통안전시설
개선안 (개소)	2	1		1
소요예산 (백만원)

ㅇ 세부 조치내용

연번	문제점 요지	위치	정비계획
1-1	불법주정차량 만연으로 어린이 교통사고 우려	정문 앞	(단기안) 시간제 차량통행 제한 (장기안) 불법주정차 단속장비 신설 검토 ※ 2020년 보행로 정비사업 이후 불법주정차 크게 감소, 카메라 설치 관련 자치구 협의 등을 통해 진행
1-2	불법주정차량 만연으로 어린이 교통사고 우려	레미안아파트 앞	차량 및 보행자 차량 통제용 차단문 설치(기설치)
1-3	자양로 교차부 횡단보도 주 통학로이며, 신호위반 및 무단횡단로 인한 사고 우려 상존	자양로 교차부	무인단속장비 설치 (기설치) 보행신호 음성안내 보조장치 설치 (기설치)

ㅇ 소요금액 :  35백만원

- 산출근거

□불법주정차 단속카메라 1개소

- 재원조달방안 : 특교세 지원

ㅇ 추진일정

- ‘22. 3. :  설계

- ‘22. 4. ~ 5월 : 공사

- ‘22. 5월. : 완료(예정)

ㅇ 지연사유 (연내 정비가 불가능한 경우 기재)

- 연말 자치구별 회계마감 도래, 동절기 굴착공사 제한 등