	예산서 P.
밤섬생태관찰데크 조성사업

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	일반회계
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2021.01. ~ 2023.12.
사업성격	□신규		☑계속		□ 경상		☑ 투자
사업내용
	○	한강공원~당인리발전소간 보행연결로 신설
사업위치	마포구 당인동 312일대(당인리발전소앞 한강변)
총사업비	총 10,000,000천원			[국비]5,000,000천원		[시비]5,000,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	1,800,000천원			[국비]900,000천원		[시비]900,000천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
☑	□	☑	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
한강사업본부	한강관광사업과	기봉호 3780-0706	김호규 3780-0733	김종철 3780-0735

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2020년			2021예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			(x-) 0	(x-) 0		(x-) 1,800,000	(x-) 1,800,000	(x-) 0
시설비			(x-) 0	(x-) 0		(x-) 1,800,000	(x-) 1,800,000	(x-) 0

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2020년 본예산		2021년 예산(안)
시설비			○	보행연결로 신설(L=153m, B=3m) 강관지주 22개소, 그레이팅 1.400개 10,522,876원*153m = 1,610,000천원
			○ ○	조명시설 설치(벽부형 110개소) 636,364원*110개소 = 70,000천원 조경식재(관목 및 초화류) 60,000원*2,000㎡ = 120,000천원
	증감사유
	한강공원을 즐겨찾는 시민들의 이용편의와 관광활성화를 위한 보행연결로 신설

□ 연차별 투자계획                                          (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2019)	2020	2021	2022 이후
계	(x-) 2,800	(x-)	(x-)	(x-) 1,800	(x-) 600
시설비	(x-) 2,400	(x-)	(x-)	(x-) 1,800	(x-) 600
설계비	(x-) 400	(x-) 400	(x-)	(x-)	(x-)

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	서울화력발전소 지상부의 공원화사업이 완료(2020. 6. 30.)됨에 따라 한강공원으로 연결되는 보행연결로를 신설하여 먼 거리를 우회해야하는 이용시민들의 불편사항을 해소하고 관광활성화를 유도하고자 함.

□ 사업근거
○	관광진흥법 제76조(재정지원)
○	한강 차관급 TF회의(’14.9.~’15.8. 7회)
○	한강 자연성회복 및 관광자원화 추진방안 : 정부-서울시공동발표(’15.8.24.)

□ 추진경위
○	밤섬생태관찰데크 조성사업 기본 및 실시설계(’18.12.31.)
○	시의회 공유재산심의 안전삭제 등으로 사업보류
○	서울화력발전소 지상부 공원화사업 완료(’20.6.30.)

□ 사업내용
○	위 치
-		마포구 당인동 312일대(당인리발전소앞 한강변)
○	공사기간 : 2021. 1. ~ 2023. 06.
○	사업내용
-		생태관찰데크 276m(폭 5.0m), 인공식물섬 1,000㎡ 보행연결로 ① 153m(폭 3.0m), 보행연결로 ② 180m(폭 4.0m),
○	총사업비:10,000백만원(국고 5,000/ 지방비 5,000)

□ 사업계획
○	기본 및 실시설계 용역 : ’18. 12. 31
○	보행연결로 ① : ’21. 1.~10.
○	보행연결로 ② : ’23. 1.~12.(’22년 문화창작발전소 준공이후)
○	생태관관찰데크 : 보류(신곡수중보 처리결과에 따라 추진)
○	인공식물섬 : 보류(신곡수중보 처리결과에 따라 추진)

□ 2021년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		1,800,000		보행연결로 ①
사업계획 수립	2020.01~2020.01			사업계획 수립
공사설계 및 발주	2020.02~2020.03			설계시행 및 발주
공사착공 및 준공	2020.03~2020.10	1,800,000		공사 시행(보행연결로 1)

□ 2023년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		600,000		보행연결로 ②
사업계획 수립	2023.01~2023.01			사업계획 수립
공사설계 및 발주	2023.02~2023.03			설계시행 및 발주
공사착공 및 준공	2023.03~2023.12	600,000		공사 시행(보행연결로 2)

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

○	기본 및 실시설계 (’18.12.31.)
○	수리검토용역 시행 (’20.7.10.) : 보행연결로 ①, ②
○	하천점용허가 승인 (’20.9.15.) : 보행연결로 ①, ②

□   향후 기대효과

○	서울화력발전소 공원을 이용하는 시민들의 한강공원접근 용이
○	홍대, 합정지역의 관광객을 한강공원(밤섬)으로 유입하는 효과