★

문서번호	도로과-22336
결재일자	2021.12.15.
공개여부	비공개(5)

담 당	보도관리담당	도로과장		건설교통국장
협 조

2021년 포장도로 유지보수공사(연간단가)

설계변경(정산) 시행계획 보고

2021. 12.

건설교통국

도  로  과

2021년 포장도로 유지보수공사(연간단가)

설계변경(정산) 시행계획 보고

「2021년 포장도로 유지보수공사(연간단가)」가 완료되어 정비물량 증․감 반영, 제경비 정산에 따른 설계변경(정산)을 시행하고자 함.

□ 추진근거

○ 포장도로 유지보수공사(연간단가) 시행 --------(도로과-2666,2021.02.19.)

○ 포장도로 유지보수공사(연간단가) 설계변경(1회) 시행 --(도로과-11001,2021.06.24.)

○ 낙찰차액 등 집행잔액 사용계획 보고 -----------(도로과-16049,2021.09.08.)

○ 포장도로 유지보수공사(연간단가) 설계변경(2회) 시행 --(도로과-16232,2021.09.10.)

○ 추경예산 집행계획 보고 -----------------------(도로과-16752,2021.09.23.)

○ 포장도로 작업지시 시행

작업지시	합 계	1 차	2 차	3 차	4 차	5 차	6 차	7 차	8차	9차
건 수	71	9	3	3	10	10	9	10	7	10

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 포장도로 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2021. 3. 17. ~ 2021. 12. 31.

○ 공사위치 : 성북구 관내

○ 공사내용 : 보도블록 정비 6a, 아스팔트 포장 209a

○ 도 급 비 : 659,400,000원

○ 도 급 자 : 엔앰건설㈜ 대표 강민수

□ 설계변경 내용

○ 변경사유 : 추경예산 집행으로 현장여건에 따른 단순 물량변경 및 신규공종 반영

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총사업비	1,179,450,000	2,106,000,000	증	926,550,000
도 급 비	659,400,000	1,158,300,000	증	498,900,000
관 급 비	440,000,000	820,000,000	증	380,000,000
이전비	80,050,000	127,700,000	증	47,650,000

○ 신규공정 및 주요물량 변경내용

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비고
보도블록포장	4a	18a	증)	14a
절삭 후 아스팔트 덧씌우기	65a	88a	증)	23a
도로 경계석 설치(150㎜)	200m	740m	증)	540m
보차도경계석 설치(200㎜)	140m	661m	증)	521m
흄관접합 및 부설	0m	21m	증)	21m	신규
수목보호판 설치	0개	50개	증)	50개	신규

○ 주요 제경비 정산 내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
건강보험료	5,916,557	214,520	감)	5,702,037
연금보험료	7,762,247	82,120	감)	7,680,127
노인장기요양보험료	681,587	24,680	감)	656,907
건설기계대여대금지급 수수료	1,994,948	440,580	감)	1,554,368
산업안전관리비	4,678,113	2,422,800	감)	2,255,313
환경보전비	3,094,158	-	감)	3,094,158

○ 예산과목

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리, 포장도로 유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비-금2,006,000,000원

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리, 횡단보도(턱낮춤) 개선 정비 공사, 시설비 및 부대비, 시설비-금100,000,000원

□ 조치계획

○ 상기 주요 설계변경 내용을 반영하여 설계변경(정산)을 시행하고 준공처리하고자 함.

붙임  1. 관련근거 2부.

2. 설계변경(정산) 내역서 1부.

3. 제경비 검증확인서 1부.  끝.