명시이월사업조서

(단위:천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시이월 사유
					총 계	14,585,824 국 274,250 특세 1,888,000 시 1,998,889 특금 8,157,850 구 2,266,835	9,766,378 국 35,250 특세 1,701,577 시 185,514 특금 7,699,607 구 144,430
문화관광과
	문화예술진흥 (문화및관광/문화예술)
		지역문화예술활성화
			문화공간 조성 및 운영			200,000	47,000
				시설비 및 부대비 (시설비)	∘사업명 : 인현동 문화창작공간 조성 ∘위 치 : 인현동2가 181-43번지 외 1필지 ∘규 모 : 196,57㎡ 중 3층 ∘사업기간 : `22.1.~’22.2. ∘총사업비 : 35,000천원 ∘추진사항 -19.4.22. : 서울시-중구 협약 -20.8월.: 착공	170,000	35,000	∘문화창작공간 준공일자 지연 (21.12.13→22.1월) 으로 인한 문화공간(3층) 실내인테리어 공사가 지연되어 명시이월 하고자 함
				자산취득비 (자산 및 물품취득비)		30,000	12,000
	주민과 함께하는 책읽는 마을 조성
		책읽는 학습문화조성
			도서관 시설 확충 및 개선			477,000 특세 400,000 구 77,000	444,000 특세 400,000 구 44,000
				시설비 및 부대비 (시설비)	∘사업명 : 작은도서관 시설 개선 사업 ∘위 치 : 필동, 동화동 ∘규 모 : 187m2, 112㎡ ∘사업기간 : `22.3.~’22.8. ∘총사업비 : 444,000천원 ∘추진사항 -2021. 7. : 특교세 확보 -2021.9.~11.: 동화동 작은도서관 시설개선 디자인 협의 진행	477,000 특교세 400,000 구 77,000	444,000 특교세 400,000 구 44,000	∘ 익년도 착공 및 준공 예정인 관계로 명시이월
공원녹지과
	환경이 살아있는 “생태중구”실현
		쾌적한 공원조성
			노후 어린이공원 환경개선
						특금 400,000	특금 400,000
				시설비및부대비	∘사 업 명 : 노후어린이공원 환경개선 ∘위 치 : 청구동 842-1 외1 ∘규 모 : 2,423㎡ ∘사업기간 : ‘21.12.~‘22. 6. ∘총사업비 : 400,000천원 ∘추진사항 - 실시설계용역 진행 - 주민설명회(1차) 실시	특교금 400,000	특교금 400,000	∘ 회계연도 내 예산 집행이 어려우므로 (특교금 교부일: 11.25.) 원활한 사업추진 및 예산 집행을 위해 명시이월 하고자 함
민원여권과
	주민 행정 편의 도모
		민원 편의 제공
			코로나19 바이러스 확산방지			593,400 국 115,000 특세 157,000 특금 321,400	88,745 특세 15,000 특금 73,745
				일반운영비 (사무관리비)	∘사 업 명 : 코로나19 서울역 임시선별검사소 운영 ∘위 치 : 중구 한강대로 405 ∘규 모 : 479.10㎡ ∘사업기간 : 2020.12.14. ~ ∘총사업비 : 593,400천원 ∘추진사항 - 서울역 임시선별검사소 운영 일평균 1,500명 검사, 확진자 1,258명 조기 진단	593,400 국 115,000 특세 157,000 특금 321,400	88,745 특세 15,000 특금 73,745	∘ 한파대책비 10.29. 교부로 지출기한이 촉박하여 회계연도 내 예산집행이 어려움. ∘ 코로나19 임시선별검사소 종료기한 미정 및 운영 장기화에 따라 원활한 ‘22년도 임시선별검사소 운영을 위하여 명시이월하고자 함
교육아동청소년과
	국제적인교육환경 조성
		공교육 활성화 지원
			서울형 혁신교육지구 운영			583,000 시 420,000 구 163,000	100,000 시 100,000
				일반운영비 (행사운영비)	∘사 업 명 : 지역사회 연계 교육회복지원사업 ∘사업기간 : `21.8월~`22.2월 ∘총사업비 : 433,000천원 ∘추진사항 - 코로나19로 인한 교육 결손 극복을 위한 방과후 학교 프로그램 운영	583,000 시 420,000 구 163,000	100,000 시 100,000	∘ 교육부 교육회복 지원사업 특별교부금으로써 간주처리 등에 따른 집행기간 부족 ∘ `22년 예산이월을 통한 효율적 예산집행 도모
환경과
	맑고푸른중구건설 (환경/대기)
		쾌적한 대기환경
			전기자동차 충전시설 설치			특금 500,000	특금 500,000
				시설비 및 부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 전기자동차 충전시설 설치 ∘위 치 : 버티공영주차장 외 7개소 ∘사업기간 : 2022.1.~7. ∘총사업비 : 500,000,000원 ∘추진사항 - 2021.9.: 전기차 충전시설 설치지원 수요조사 (대상: 총 주차면수 50면 이상인 시설 중 구청 및 중구시설관리 공단에서 운영중인 주차장) 2021.9.~10.: 설치 대상시설 선정 (버티공영주차장 외 7개소) 2021.11.: 특별조정교부금 교부 및 간주처리	특교금 500,000	특교금 500,000	∘ 기축 시설인 점을 감안하여, 전기인입 등 공사연건에 따라 설치대상지 수정 및 전기차 충전기 수량 조정 가능성 발생. ∘ 2021.11월에 예산교부를 받아, 공사 사업자 미선정 및 동절기 도로굴착 공사 금지 등으로 원활한 사업추진 및 예산집행을 위해 명시이월하고자 함.
치수과
	하수시설관리
		하수시설정비
			을지로 35 주변 하수사각형거 보수			특세 400,000	특세 400,000
				시설비 및 부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 을지로 35 주변 하수사각형거 보수 ∘위 치 : 을지로 35 일대 ∘규 모 : □ 2.8×2.0m, 단면보수 A=482㎡ ∘사업기간 : ‘21.12.~’22.7. ∘총사업비 : 400,000천원 ∘추진사항 - □19.12. 정밀안전점검 시행 - □21.12. 특별교부세 교부	특교세 400,000	특교세 400,000	∘ 하수사각형거 보수를 위한 특별교부세가 2021년 12월에 교부됨에 따라 회계연도 내 예산집행이 어려운 실정으로 원활한 사업추진 및 예산 집행을 위해 명시이월
			서애로5길 12-21 외 1개소 하수사각형거 보수			특세 400,000	특세 400,000
				시설비및부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 서애로5길12-21 외 1개소 하수사각형거 보수 ∘위 치 : 서애로5길 12-21 외 1개소 ∘규 모 : □1.4×1.0m, 단면보수 A=928㎡ ∘사업기간 : ‘21.12. ~ ’22.07. ∘총사업비 : 400,000천원 ∘추진사항 - □19.12. 정밀안전점검 시행 - □21.12. 특별교부세 교부	특세 400,000	특세 400,000	∘ 하수사각형거 보수를 위한 특별교부세가 2021년 12월에 교부됨에 따라 회계연도 내 예산집행이 어려운 실정으로 원활한 사업추진 및 예산 집행을 위해 명시이월
			삼각동 30-1~청계천 하수사각형거 보수			특세 200,000	특세 200,000
				시설비및부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 삼각동30-1~ 청계천 하수사각형거 보수 ∘위 치 : 삼각동30-1 주변 ∘규 모 : □ 2.8×2.2m, 단면보수 A=282㎡ ∘사업기간 : ‘21.12.~’22.6. ∘총사업비 : 200,000천원 ∘추진사항 - □19.12. 정밀안전점검 시행 - □21.12. 특별교부세 교부	특세 200,000	특세 200,000	∘ 하수사각형거 보수를 위한 특별교부세가 2021년 12월에 교부됨에 따라 회계연도 내 예산집행이 어려운 실정으로 원활한 사업추진 및 예산 집행을 위해 명시이월
토지관리과
	지적민원서비스 제공
		지적행정 최적관리
			코로나19 바이러스 확산방지			121,000 국 21,000 특세 87,000 특금 13,000	특세 43,577
				인건비 (기간제근로자등 보수)	∘사 업 명 : 코로나19 바이러스 확산방지 ∘설치위치 : 서울시청 동측 서울광장 ∘추진기간 : 21. 7. 6. ~ ∘총사업비 : 124,000천원 ∘추진사항 - 서울광장 임시선별검사소 운영 - 기간제근로자 보수 등 지급	특교세 42,000	특교세 21,577	∘’21.10.29. 한파대책비 교부로 지출기한이 촉박하여 회계연도내 예산집행 어려움 ∘코로나19 임시선별검사소 운영 장기화 및 종료 기한 미정에 따라 2022년도 서울광장 임시선별검사소의 원할한 운영을 위하여 명시이월 하고자 함
				일반운영비 (사무관리비)		79,000 국 21,000 특세 45,000 특금 13,000	22,000 특세 22,000
도심산업과
	서민생활 안정을 위한 일자리 창출
		지속가능한 지역 일자리 창출
			지역주도형 청년일자리 사업 (디지털 프린팅 전문가 양성 프로젝트)			127,500 국 38,250 시 38,625 구 50,625	117,500 국 35,250 시 35,250 구 47,000
				일반운영비 (사무관리비)	∘사 업 명 : 2021년 지역주도형 청년일자리사업 - 디지털 프린팅 전문가 양성 프로젝트 ∘사업기간 : 2021.08~2021.12. ∘총사업비 : 127,500천원 ∘추진사항 - 참여자 선발 및 매칭 - 이론 및 실습교육 실시 참여자 근무 시작	7,500 국 2,250 시 2,625 구 2,625	5,200 국 1,560 시 1,820 구 1,820	∘ 예산 확보 및 참여자 선발 지연으로 금년 사업추진 기간 부족 - 구비 추경 편성 (2021.7.) 및 국·시비 보조금 교부(2021.8.) - 참여자 지원 미달로 재공고에 따른 참여자 선발 ∘ 미집행 예산을 차기년도로 이월하여 내실있는 디지털 프린팅 전문가 양성
				민간이전 (민간경상사업보조)		120,000 국 36,000 시 36,000 구 48,000	112,300 국 33,690 시 33,690 구 44,920
전통시장과
	지역경제 활성화
		지역산업 진흥
			청계천공구상가 주변환경 개선사업			특세 100,000	특세 100,000
				시설비및부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 청계천공구상가 주변환경 개선사업 ∘위 치 : 충무로 75 일대 ∘사업기간 : ‘22.1~’22.12 ∘총사업비 : 100,000천원 ∘추진사항 - 공구상가 안내시설물 설치 - 공구상가 홍보조형물 설치	특세 100,000	특세 100,000	∘ 특별교부세 교부 일정이 지연됨에 따라 사업비를 다음연도로 이월하고자 함
			골목상권 안심방역단운영			특세 100,000	특세 100,000
				일반운영비 (사무관리비)	∘사 업 명 : 골목상권 안심 방역단 운영 ∘위 치 : 골목상권 ∘사업기간 : ‘22.1.~’22.12. ∘총사업비 : 100,000천원 ∘추진사항 - 방역단 모집홍보 방역물품 구비 정기방역 활동	특세 100,000	특세 100,000	∘ 특별교부세 교부 일정이 지연됨에 따라 사업비를 다음연도로 이월하고자 함
			모바일 서울중구사랑 상품권 발행			9,499,264 국 100,000 시 1,525,264 특 6,670,000 구 1,204,000	6,710,264 시 50,264 특 6,660,000
				일반운영비 (사무관리비)	∘사 업 명 : 모바일 서울중구 사랑상품권 발행 ∘사업내용 - 상권회복특별지원상품권 발행 (총600억원) - e-서울사랑상품권(총8.24억원) ∘사업기간 : 21.11.30. ~ 소진시 ∘총사업비 : 9,499,264천원 ∘추진사항 - ’21.11.30. : 상권회복특별 지원상품권 발행 - ’21.12.20. : e-서울사랑상품권 발행(예정)	9,499,264 국 100,000 시 1,525,264 특 6,670,000 구 1,204,000	6,710,264 시 50,264 특 6,660,000	∘ 상품권 판매대금 지급방식은 선판매 후지급으로 사업비 지급시기가 도래하지 않아 다음연도로 사업비를 이월하여 지급하고자 함
감염병관리과
	구민의 건강수준 향상
		감염병 예방관리 사업
			신종 코로나 바이러스 확산 방지 지원			653,110 시 15,000 특금 175,950 구 462,160	65,862 특금 65,862
				인건비 (기간제근로자등보수)	∘사 업 명 : 코로나19 대응 역학조사관 인력 인건비 ∘인 원 : 4명 ∘사업기간 : 21. 8.12.~ ∘총사업비 : 160,950천원 ∘추진사항 한시적 역학조사관 인건비 집행	653,110 시 15,000 특교금 175,950 구 462,160	65,862 특교금 65,862	∘ 위드코로나 이후 코로나19 확진자 폭증으로 기존 긴급 채용한 한시적 역학조사관 인력 지속 지원 필요
건강관리과
	구민의건강수준향상
		예방접종관리
			코로나19백신 예방접종 지원			225,120 특세 44,000 특금 77,500 구 103,620	43,000 특세 43,000
				인건비 (기간제근로자 등 보수)	∘사 업 명 - 코로나19 백신 예방접종 지원 ∘사업기간 : 21.1월 ~ 상황종료 시 ∘총사업비 : 226,120천원 ∘추진사항 - 코로나19 백신 보건소 및 출장방문 예방접종시행, 위탁의료기관 예방접종 지원 및 관리 -코로나19 예방접종 안내 및 접종 후, 이상반응 지속관찰 모니터링 등 콜센터 운영	189,120 특교세 38,000 특교금 77,500 구 73,620	38,000 특교세 38,000	∘ 재난안전관리 특별교부세 교부결정 (행안부, `21.11.29.)에 따라 감염취약시설 방문접종 및 예방접종 콜센터 운영지원 등 추가접종률 향상을 위한 사업추진 및 예산집행을 위해 명시이월을 하고자 함
				일반운영비 (사무관리비)		36,000 특교세 6,000 구 30,000	5,000 특교세 5,000
		건강검진사업
			척추측만증검진			6,430	6,430
				일반운영비 (사무관리비)	∘사 업 명 - 척추측만증검진 ∘사업기간 : 21. 12. ~ 22. 2. ∘총사업비 : 6,430천원 ∘추진사항 - 21.12. 척추측만증 검진기관 선정, 관내 중학교 검진희망자 선정 22. 1. ~ 2. 척추측만증 검진 22. 3. 검진비용 지급	760	760	∘ 코로나19 확산으로 학교방문출장검진이 불가능하여 `22년도에 사업추진 예정이었으나 대상자중 `21년도 중학교 1학년의 검진이 불가하여 성장기 청소년의 검진 기회를 제공하고자 명시이월이 필요함
				민간이전 (의료및구료비)		5,670	5,670