명시이월사업조서

(단위:천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시이월 사유
					총 계	32,894,711 국 16,595,940 특 400,000 기 200,000 균 200,000 시 8,299,090 구 7,199,681	22,473,479 국 11,734,700 특 200,000 기 200,000 균 200,000 시 4,676,964 구 5,461,815
동정부과
	동행정 내실화
		동행정 강화
			코로나 국민 상생지원금 지원			22,473,500 국 15,731,450 시 4,045,230 구 2,696,820	15,636,132 국 10,945,293 시 2,814,504 구 1,876,335
				이주및재해보상금 (민간인재해및복구 활동보상금)	∘사 업 명 - 코로나 상생 국민지원금 지급 ∘지원대상 : 89,894명 추산 ∘신청기간 : 21. 9. 6. ~ 10. 29. ∘사용기한 : 21. 12. 31. 한. ∘이의신청 : 21. 9. 6. ~ 11. 12. - 처리기한 : 21. 12. 3. ∘총사업비 : 22,618,143천원 ∘추진사항 : 국민지원금 예산집행 및 정산	22,473,500 국 15,731,450 시 4,045,230 구 2,696,820	15,636,132 국 10,945,293 시 2,814,504 구 1,876,335	∘ 코로나 상생 국민지원금 사용기한(21.12.31.)에 따라 카드사 청구 등 회계연도 내 예산 집행이 어려워 원활한 사업추진 및 예산 집행을 위해 명시이월을 하고자 함
문화관광과
	주민과 함께하는 책읽는 마을 조성
		책읽는 학습문화조성
			도서관 시설 확충 및 개선			477,000 특 400,000 구 77,000	225,000 특 200,000 구 25,000
				시설비 및 부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 필동 작은도서관 시설개선사업 ∘위 치 : 필동로 11, 3~4층 ∘규 모 : 187m2 ∘사업기간 : `22.3.~’22.6. ∘총사업비 : 225,000,000원 ∘추진사항 -2021. 7. : 특교확보	477,000 특교세 400,000 구 77,000	225,000 특교세 200,000 구 25,000	∘ 익년도 착공 및 준공 예정인 관계로 명시이월
	문화재 보존관리
		문화유산 보전
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(서울 구 러시아 공사관 망루보수)			508,000 국 355,600 시 152,400	400,739 국 280,517 시 120,222
				시설비및부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 구러시아공사관 보수공사 ∘위 치 : 정동 구러시아공사관 ∘규 모 : ∘사업기간 : 2019.12.~2022.12. ∘총사업비 : 638,597,700원 ∘추진사항 - 2021.02. 국가지정문화재 보수공사 국시비 보조금 교부 2021.9. 문화재청 자문회의(6차)	508,000 국 355,600 시 152,400	400,739 국 280,517 시 120,222	∘ 국가지정문화재의 특성상 문화재청 위원회의 의견수렴을 위해 충분한 전문가 자문 및 심의를 거치고자 함
	새로운관광기반확충
		관광특구지원
			관광명소 활성화 및 관광편의 개선			50,000	50,000
				연구개발비 (연구용역비)	∘사 업 명 : 중구 공정관광 육성 및 지원방안 수립 용역 ∘총사업비 : 50,000,000원	50,000	50,000	∘ 코로나19 이후 상황변화에 효율적으로 대응하기 위해 이월하고자 함
교육아동청소년과
	국제적인교육환경조성
		중구교육지원센터 운영
			중구진학상담센터 운영
						101,500	16,500
				사무관리비	∘사 업 명 : 중구진학상담센터 1:1맞춤진학컨설팅 ∘사업기간 : 21. 2. 27~22.1.31 ∘총사업비 : 99,000천원 ∘추진사항 - 2021. 2. 27 : 2021년 1:1맞 춤진학컨설팅 용역 체결 - 2021. 3월~ 익월초 : 기성금 지급	101,500	16,500	∘ 1:1맞춤진학컨설팅 용역의 경우 매월 기성분에 대해 익월초 지급이 되고 있어 2021.12월~2022.1월 기성금에 대해 명시이월코자 함.
사회복지과
	장애인을 위한 실질적인 자립 지원
		장애인 복지시설 지원
			발달장애인 평생교육센터 설치 운영			시 200,000	시 200,000
				시설비및부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 발달장애인 평생교육 센터 설치 운영 ∘위 치 : 중구종합복지센터내 (퇴계로460) ∘규 모 : 500㎡ ∘사업기간 : 2021.1.~2022.12. ∘총사업비 : 9억원 ∘추진사항 - 설치예정지 검토 및 결정 - 서울시 공모사업 신청·선정 - 기존 시설 (유락복지관) 재배치 관련 부서 협의	시 200,000	시 200,000	∘ 우리 구 발달장애인평생 교육센터의 신규 설치를 위해 구립건물인 ‘중구종합 복지센터 (퇴계로460)’내 설치를 결정하고 관련부서와 협의 중에 있으나, ∘ 기존 시설인 유락종합사회 복지관의 민간위탁만료 및 기능 재배치 등 선결 과제가 선행되어야 함에 따라, 시비 지원으로 확보된 신규조성비 2억원의 회계연도 내 집행이 어려워 명시이월
여성보육과
	보육.가족 및 여성복지 증진
		보육서비스 수준 제고
			어린이집 그린리모델링(보조)			636,132 국 508,890 시 63,621 구 63,621	508,890 국 508,890
				시설비및부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 어린이집 그린리모델링(보조) ∘위 치 : 충무, 청구어린이집 ∘사업기간 : 2022.1.~12. ∘총사업비 : 1,017,779천원 ∘추진사항 - 노후어린이집 에너지효율 향상을 위한 개보수 실시	636,132 국 508,890 시 63,621 구 63,621	508,890 국 508,890	∘ 시비예산이 22년 본예산 편성‧교부될 예정으로 국비를 명시이월하고 2022년 본예산으로 편성된 시‧구비와 함께 사업 추진
주택과
	도심형생활SOC구축
		생활SOC확충
			신당사거리 공영주차장 복합화 (문체부)			기 200,000	기 200,000
				시설비및부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 신당사거리 공영주차장 복합화(문체부) ∘위 치 : 퇴계로 408 ∘규 모 : 6,997㎡ ∘사업기간 : 2020.03 ~ 2024.12 ∘총사업비 : 22,335,386(천원) ∘추진사항 - 생활SOC공모 국비 확보 - 중앙투자심사 1차 통과 - 공유재산관리계획 3회 요청 및 미승인	기 200,000	기 200,000	∘ 공유재산관리계획 미승인으로 사업추진 지연
			신당사거리 공영주차장 복합화			균 200,000	균 200,000
				시설비및부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 신당사거리 공영주차장복합화 ∘위 치 : 퇴계로 408 ∘규 모 : 6,997㎡ ∘사업기간 : 2020.03 ~ 2024.12 ∘총사업비 : 22,335,386(천원) ∘추진사항 - 생활SOC공모 국비 확보 - 중앙투자심사 1차 통과 - 공유재산관리계획 3회 요청 및 미승인	균 200,000	균 200,000	∘ 공유재산관리계획 미승인으로 사업추진 지연
	도시재생
		도시재생
			타운매니지먼트			시 40,000	시 40,000
			일반운영비 (사무관리비)		∘사 업 명 : 타운매니지먼트 ∘대 상 지 - 다동‧무교동(120,000㎡) - 명동1가 일원(50,000㎡) ∘사업기간 : 2016.01 ~ 2022.06. ∘총사업비 : 300,000(천원) ∘추진사항 -TM 거점공간 조성 용역 시행	시 40,000	시 40,000	∘ 코로나19 상황으로 인한 사업의 공론화 부족 및 설치협의 난항 등으로 금년 내 착수 불가
			동화동 골목길재생사업			시 400,000	시 400,000
				시설비 및 부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 동화동 골목길재생사업 ∘대 상 지 : 다산로36나길 19 일원 ∘규 모 : 연장 약 680m ∘사업기간 : 2020.09. ~ 2023.12. ∘총사업비 : 1,100,000(천원) ∘추진사항 -골목환경개선 공사 등 골목길재생사업 추진	시 400,000	시 400,000	∘ ‘22년 03월 실시설계 완료 이후 공사 시행에 따른 예산집행 가능
			신당5동 서울형 도시재생사업			60,000	3,000
				일반운영비 (사무관리비)	∘사 업 명 : 신당5동 서울형 도시재생사업 ∘대 상 지 : 신당5동 144-11번지 일원 ∘규 모 : 150,000㎡ ∘사업기간 : 2020.09. ~ 2025.12. ∘총사업비 : 10,000,000(천원) ∘추진사항 -신당5동 도시재생활성화 계획수립에 따른 계획(안) 공고 : 일간신문 2개사 게재	60,000	3,000	∘ 정책 변화에 따른 대응방안 마련과 코로나19로 인한 주민 의견수렴의 어려움 등 계획 수립 지연으로, 사무관리비 일부 (신문공고료) 집행 불가
			다산동 골목길재생사업			시 260,000	시 260,000
				연구개발비 (연구용역비)	∘사 업 명 : 다산동 골목길재생사업 ∘대 상 지 : 동호로11길 일원 ∘규 모 : 연장 약 600m ∘사업기간 : 2021.10. ~ 2024.12. ∘총사업비 : 1,100,000(천원) ∘추진사항 -골목길재생 실행계획 및 실시설계 -소규모 마중물사업 시행 등	시 180,000	시 180,000	∘ 금년 내 실행계획 수립을 위한 협의 및 용역발주 행정절차 이행 및 소규모 마중물 사업 추진에 어려움이 있음
				시설비 및 부대비 (시설비)		시 80,000	시 80,000
도로시설과
	도시기반시설 확충
		도로유지관리
			신중앙시장 중앙통로 바닥정비공사			1,375,000 시 1,100,000 구 275,000	454,238 시 179,238 구 275,000
				시설비 및 부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 신중앙시장 중앙통로 바닥정비공사 ∘위 치 : 퇴계로85길 ∘규 모 : B=14m, L=230m ∘사업기간 : 21.08.12.~21.11.30. ∘총사업비 : 1,375,000천원 시 1,100,000천원 구 275,000천원 ∘추진사항 - ‘21. 2. : 추경 편성(구비) - ‘21. 5. : 서울시 보조금 교부 - ‘21. 8. : 공사발주 - ‘21.10. : 현장실정에 따른 사업변경	1,375,000 시 1,100,000 구 275,000	454,238 시 179,238 구 275,000	∘ ‘21.09. 공사착공 후 신당지하도상가 슬래브 파손으로 공사중지 ∘ 구조물 관리기관으로부터 공사중 충격·진동·중차량 통과 제한 요청 ∘ 구조물 안정성 저해로 사업변경 중 (서울시 소상공인정책담당관)
전통시장과
	지역경제활성화
		지역산업진흥
			전통시장 시설현대화지원 (보조)(전환사업)			1,380,891 시 1,254,779 구 126,112	구 50,000
				시설비및부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 신중앙시장 고객편의시설 공사 ∘위 치 : 신중앙시장 ∘규 모 : 아케이드 내 고객 편의시설 등 설치 ∘사업기간 : 22.6. ~ 22.9. ∘총사업비 : 50,000 ∘추진사항 - 신중앙시장 고객편의시설 설치 및 유지보수 시장입구 고객쉼터 설치 등	1,380,891 시 1,254,779 구 126,112	50,000 시 0 구 50,000	∘ 신당지하상가 연결추진(2022.1. ~ 2022.7.)동안 시장 일부구간 공사지원 공간으로 점유예정이므로 금년도 공사추진 불가
			제일평화시장 시설 개선 사업 (2019년 특별조정교부금)			1,308,000	1,260,193
				시설비및부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 제일평화시장 시설개선사업 ∘위 치 : 제일평화시장 (마장로 13) ∘규 모 : 지하1층~지상3층 ∘사업기간 : 2021.1.~2021.12. ∘총사업비 : 1,308,000,000원 ∘추진사항 - 1층 화장실 리모델링 외 8개 사업	1,308,000	1,260,193	∘ 1층 화장실 리모델링, 카리프트 설치 등 총 9개 사업을 추진 중으로 사업내용이 건축, 기계, 전기, 통신 등 다양하고 복잡하여 금년에 착공이 불가함
			방산시장 내 화장실 시설개선 사업 (2018년 특별조정교부금)			79,000	79,000
				시설비및부대비 (시설비)	∘사업명 - 방산시장 내 화장실 시설개선 ∘위치 : 을지로27가길 24 [舊을지어린이집] ∘총사업비 : 79,000 ∘추진사항 - 사업비 명시이월 계획수립 ∘향후계획 - `22. 1. ~ 3. : 공사 발주 및 계약, 착공 - `22. 4. ~ 7. : 공사 및 시공	79,000	79,000	∘ 도심산업과에서 진행하는 도심산업디자인지원센터(가칭)[舊을지어린이집] 리모델링 사업의 일부이며, 현재 기본 및 실시설계 용역 중이고 공사시기가 미도래하여 부득이 사업비 이월
			전통시장 방역부스 설치			시 558,000	시 503,000
				시설비및부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 방역부스 설치 ∘사업내용 : 전통시장 내 에어 샤워 방역부스 설치 ∘총사업비 : 558,000천원 ∘추진사항 : 방역부스 2개소 설치 ∘향후계획 - `21. 11.~12. : 설치대상지 재선정 - `2.2. 1.~ 2. : 입찰 및 추가 설치	시 558,000	시 503,000	∘ 시에서 선정한 설치장소 실측 결과, 공간 협소, 도로 점용 등으로 실제 설치가 부적합하여 사업 대상지 재조사 필요
기획조정과
	중장기적 비전제시
		민관 협업강화
			지역사회혁신계획 추진			시 225,060	시 160,000
				인건비 (기간제근로자등보수)	∘사업명 : 지역사회혁신계획 ∘추진기간 : 2021.3.~2022.12. ∘사업내용 - 민·관 협치구조를 통한 지역사회 문제 해결 및 공동 의사결정구조 마련 - 민·관 협치에 대한 인식 개선 및 공직사회 내외 협치문화 확산	시 84,000	시 44,000	- 7월부터 이어진 고강도 사회적거리두기 4단계 방역조치로 인해 주요 사업내용인 주민참여 의제 공론장, 주민협치교육 등 대다수 참여기반사업의 정상추진 곤란 - 필수적인 일부 활동을 온라인으로 강행하였으나, 주민참여 기반사업에 대한 비대면 방식의 운영 효과가 낮아, 미집행 예산을 차기년도로 이월하여 내실있는 민관협치체계 운영
				일반운영비 (사무관리비)		시 56,000	시 48,000
				일반운영비 (행사운영비)		시 76,060	시 60,000
				일반보전금 (행사실비지원금)		시 3,000	시 2,000
				포상금 (포상금)		시 6,000	시 6,000
장충동
	안전한 생활환경
		생활안전관리
			비산먼지 제거 클린로드 설치			200,000	200,000
				시설비및부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 비산먼지제거 및 클린로드 설치 ∘위 치 : 장충단로168-210 ∘규 모 : L=430 ∘사업기간 : 2021.1~12 ∘총사업비 : 200,000천원 ∘추진사항 - 기초설계서 작성	200,000	200,000	∘ 클린로드 설치구간 (430m)중 2020년 장충동 교육 연구시설 신축공사 (2022.12월 준공예정)로 인하여 약80m 구간(공사 차량 통행, 보도공사 등)에 배관설비 및 상수도 연결공사 등을 하지 못해 클린로드 설치가 어려워 당해 예산을 명시이월하고 2022년에 추진
			장충단로노후보도블럭 정비			300,000	300,000
				시설비및부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 장충단로 노후보도블럭정비 ∘위 치 : 장충단로168-210 ∘규 모 : L=430 ∘사업기간 : 2021.1~12 ∘총사업비 : 300,000천원 ∘추진사항 : 기초설계서 작성	300,000	300,000	상동
광희동
	생활환경정비
		공원조성관리 및 녹화사업
			진양상가 공중보행로 꽃길조성			20,000	20,000
				시설비및부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 진양상가 공중보행로 꽃길조성 ∘위 치 : 진양상가 ∘사업기간 : 2022.3.~4. ∘총사업비 : 20,000 ∘추진사항 - 진양상가 공중보행로 조성 공사 진행 중	20,000	20,000	∘ 진양상가 공중보행로 조성 공사 준공 지연 (2021.12.완료예정)
을지로동
	주민생활환경조성
		을지로생활환경개선
			을지로동 작은도서관 조성			245,913	245,913
				인건비 (기간제근로자등보수)	∘사 업 명 : 을지로동 작은도서관 조성 ∘위 치 : 을지로27가길 24 (방산시장 내 구을지어린이집) ∘설치규모 : 지상1층(139.09㎡) ∘사업기간 : 2022. 1~12 ∘총사업비 : 245,913천원 (시설비, 집기 및 도서구입비 등) ∘추진사항 - 기본 및 실시설계용역 발주 및 계약 기본계획(안) 설계 및 검토	16,193	16,193	∘ 도심산업과에서 추진 중인 「도심산업디자인지원센터 조성」사업과 통합발주할 계획이었으나 구청 예산 미확보로 당해연도 시행이 불가능한 사업비를 차기년도로 명시이월하고자 함.
				일반운영비 (사무관리비)		9,100	9,100
				일반운영비 (공공운영비)		3,700	3,700
				일반운영비 (행사운영비)		1,600	1,600
				일반보전금 (기타보상금)		320	320
				시설비및부대비 (시설비)		160,000	160,000
				자산취득비 (자산및물품취득비)		40,000	40,000
				자산취득비 (도서구입비)		15,000	15,000
다산동
	주민 생활환경 조성
		주민 생활환경 조성
			안전한 보행환경 조성			401,900	24,500
				시설비 및 부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 장충초앞 보도블럭정비 ∘위 치 : 청구로17길 장충초 앞 (연장 70m, 폭 1.5m) ∘사업기간 : ’22.6 ~ 22.11 ∘총사업비 : 24,500 ∘향후계획 - ‘22.6~22.11 : 장충초 앞 보도 블럭 공사시행	401,900	24,500	∘ 사업구간 내 가공배전선로 지중화 사업 공모 신청 (도로시설과) ⇒ 신청 : 2021.7. 발표 : 2021.12. ∘ 지중화사업 공모결과 및 추진 일정에 따라 보도블럭 정비공사 시행
약수동
	동행정운영
		주민자치운영활성화
			주민중심 자치회관 지원			795,053	775,053
				인건비 (기간제근로자등 보수)	∘사 업 명 : 남산타운A 주민공동시설 조성 ∘위 치 : 중구 다산로 32 (남산타운임대아파트 관리동 2~3층) ∘규 모 : 2층 (528㎡) 3층 (108㎡) ∘사업기간 : 2021. 1~12 ∘총사업비 : 1,172,845천원 (시설조성비용, 운영비 별도) ∘추진사항 - 주민공동시설 위탁운영 업무협약 체결 - 설계용역 완료	150,655	150,655	∘ 당초 남산타운 임대아파트 관리동 2층(528㎡)을 대상으로 설계용역을 진행하였으나, 3층 도서관 조성 추가 등 설계용역결과 추가 사업비 확보 필요로 2021년 공간조성 공사비 및 조성 후 운영비를 명시 이월하고 사업비 확보 후 추진
				일반운영비 (사무관리비)		11,200	4,800
				일반운영비 (공공운영비)		45,600	40,000
				일반운영비 (행사운영비)		4,000	2,000
				시설비및부대비 (시설비)		450,000	447,000
				시설비및부대비 (감리비)		7,358	7,358
				시설비및부대비 (부대비)		3,240	3,240
				자산취득비 (자산및물품취득비)		123,000	120,000
청구동
	생활환경
		쾌적하고 깨끗한 청구마을
			깨끗한 생활환경 유지관리			399,762	261,321
				시설비및부대비 (시설비)	∘사 업 명 : 청구어린이공원 환경개선 ∘위 치 : 신당동 842-1 ∘규 모 : 1,656㎡ ∘사업기간 : 2021.9 ~ 2022.5. ∘총사업비 : 280,000천원 ∘추진사항 - ’21.7. : 추경 확정(구비 2억) - ’21.7.~8. : 실무자, 전문가, 동호회원 면담 - ’21.9. : 주민대상 의견수렴 및 역량교육실시	399,762	261,321	∘ 2021년 7월 추경예산을 확보하여 실시설계 중 ∘ 공사발주 및 착공시기가 내년 상반기로 조정됨에 따라 2022년 회계연도로 명시이월하여 사업추진 하고자 함