붙 임 1

2022년 품질관리계획 적절성확인 점검현황

□ 품질관리계획 적절성 확인 점검(2022.2.~2022.12.) : 123개 현장 1,300건 지적

연번	기 관 명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	지적 건수
1	강남구 재건축 사업과	개나리4차아파트 주택재건축 정비사업	◦ 품질관리계획의 적절성 및 효과성을 실증하고 개선사항을 도출할 수 있도록 필요한 데이터를 수집, 분석하고 데이터분석보고서를 작성하여 관리하시기 바람. ◦ 옥상 벽체 천공부위는 방수를 고려하여 작업 요망 ◦ 철골기둥 하부 철판 제거 바람 ◦ 계단참 단부측은 면처리를 실시하여 마감면을 확보 할 것 ◦ 계단실 배연창 부위 상부코킹 누락 및 punch 구멍 아래 보완바람 ◦ 지하주차장 천정 마감재의 일부분이 젖어 있으니 원인을 파악하여 제거하고 마감재 부착력을 확인바람 ◦ 필로티 바닥 마감재 중 석재와 인조블럭이 만나는 부위에 재료 분리대를 설치 바람 ◦ 화단 경계석이 낮고 화단 내 흙 마감레벨이 높아서 우천 시 넘칠 수 있으니 대책 수립 바람	2.25~2.28	8
2	도기본 도시철도 사업부	신림선 도시철도민간투자사업 건설공사(1공구)	◦ 환경담당은 일일환경점검을 실시하고 주간단위로 환경영향조사 보고서를 작성하여 감리원의 확인을 받으시기 바람 ◦ 레미콘의 현장반입 시 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록 인수자와 감리원은 레미콘 송장에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람 ◦ 자재가 특셩별로 취급되고 적절한 환경에서 보관될 수 있도록 보관자재 점검표를 작성하여 월1회 이상 점검하시고 기록유지 하기 바람 ◦ 균열 및 누수구간 보수보강 부위 마무리가 미흡하므로 잔여 지수제 제거 후 씰링제 등으로 도포 바람 ◦ 가스관 되메우기 시 편심하중으로 인한 균열 발생이 우려되므로 균형있게 되메우기 공사 바람 ◦ 하수도관 하부 콘크리트 지지대가 미설치 되어 접합부 균열 또는 이탈로 누수가 우려되므로 콘크리트 또는 그라우팅으로 보강 바람 ◦ 노면 복구 시 지장물 하부구간 다짐도 관리계획을 수립하여 침하량이 허용값을 초과하지 않도록 관리하고 병무청역 여의도방향 노면 침하구간을 조속히 복구하기 바람 ◦ 대방역 승강장과 환승통로 접속부 경사로 구간은 논슬립 등 설치하여 미끄럼 사고가 발생하지 않도록 조치바람 ◦ 외부 돌붙임 가공작업은 가림막 설치 공간 내에서 실시하기 바람	3.3~3.4	9
3	도기본 도시철도 사업부	신림선 도시철도민간투자사업 건설공사(2공구)	◦ 보도에서 E/L진입부 연결구간 장애인 점자블록 일부 누락된 구간 보완바람 ◦ 비상탈출구 구조물 구간 난간기둥 하부 보완 바람 ◦ 인접건물 접속구간 보도블록 단차 수정 바람 ◦ 도로(보도블록 포장) 토공 정지(잡석제거) 및 다짐 후 보도블록 포설 바람 ◦ 공원 내 공사용 작업로 훼손구간 커팅 후 표층 포설 전 하부지반 연약부위는 노상면을 다짐 정지 후 기층 및 포층 포설 바람 ◦ 지하철 환기구 안전유리 설치용 포스트를 견고하게 설치바람	3.10~ 3.11	6
4	도기본 도시철도 사업부	신림선 도시철도민간투자사업 건설공사(3공구)	◦ 금년도 마지막 건설공사 운영성과 검토보고서에는 건설공사 운영분석을 토대로 개선대책과 종합평가를 포함하여 세밀하게 작성바람 ◦ 정거장 일부구간 부분함몰, 단차 등 보수바람 ◦ 110정거장 경계석 이음부 처리 미흡 구간 보수바람 ◦ 111정거장 경계부 보도부 처짐 보수바람 ◦ 111정거장 경계 단부 보도부 처짐 보수바람 ◦ 111정거장 보도부 처짐 발생한 구간 충분한 다짐을 통해 보수바람	3.15~ 3.16	6
5	구로구 건축과	고려대학교 구로병원 외래센터동 신축공사	◦ 2021년 10월 품질관리 적절성확인 점검결과 준수 필요 ◦ 2021년 10월 품질관리 적절성확인 점검결과 및 금회 점검결과를 반영하여 품질관리계획서 개정 필요 ◦ 사업기간내 공장검사계획 및 공장검사 결과를 누적하여 관리 필요 ◦ 균열관리대장 작성 필요(2021년 9월 이후 관리현황 없음) ◦ 현장내 균열발생 부위에 대해 균열관리표를 부착하여 관리 필요 ◦ 품질검사대장은 법정서식(건설기술 진흥법 시행규칙 별지 제42호)을 이용하여 작성필요 ◦ 내화 뿜칠 손상부위 보수 필요 ◦ 커튼월 단열재 충진보완 및 고정PIN으로 보완하기 바람 ◦ DRY WALL 경량철골(러너, 스터드)이 실못으로 고정되어 있는데, 피스못 시공을 통해 보완하기 바람 ◦ STEEL DOOR FRAME 용접으로 인해, 단열재 손상이 있는바, 용접시 보양 철판 등을 사용하여 훼손을 방지하기 바람 ◦ 외벽 마감용 하부 철물 용접이 미비함. 균질한 용접 작업이 필요 ◦ 옥상층 공조실 벽체내 철근이 노출되어 있음. 바탕청소 후 에폭시 충전을 실시하기 바람 ◦ 기 발생된 콘크리트 균열부위를 지속적으로 점검하고, 균열관리 대장을 작성하기 바람	3.22~ 3.23	13
6	종로구 건축과	숭인동 1425번지 오피스텔 신축공사	◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 보완하시기 바람. ◦ 품질관리계획의 적절성, 효과성 등을 실증하고 개선사항을 도출하기 위하여 건설공사 운영성과를 연1회 이상 검토하고 보고서를 작성하여야 하나, 2021년도 건설공사 운영성과 검토보고서가 미작성되어 있으므로 조치하시기 바람. ◦ 최상층 하부 단열재 오염 및 이음부위 충진이 미흡하니 단열재 하부 이물질 제거 및 이음부위 충진 바람. ◦ 단열재 파손 및 단면결손부위 보수조치 요함. ◦ 지하층 철골보 하부 배관부위 뿜칠 두께가 부족하니 배관 상부 뿜칠 보수 조치 요함. ◦ 지하층 외벽 상부 모서리 할석이 미비하니 지하2층 남측 모서리 잔손 보기 요함. ◦ 지상부 sleeve 관통부위 내화충진이 미흡하니 sleeve 관통부위 내화충진 보수조치 요함. ◦ 레미탈 보관조치가 미흡하니 레미탈 보관시 지면과 이격조치 요함.	3.22~ 3.23	8
7	도기본 도시철도 토목뷰	하남선(5호선연장)1-1공구 건설공사	◦ 중점품질관리 대상 공종(포장공)에 사용되는 장비에 대하여 명확한 기준을 설정할 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완하여 작성하시기 바람. ◦ 조경공사(벌말공원) 부지 경사가 일방향으로 되어 있어 집중호우시 유입수가 한곳으로 유입되어 차도 또는 인도로 범람할 우려가 있으므로 낮은곳에 집수시설(침사지 기능 포함) 설치와 배수구 청소가 필요함. ◦ ＃1번 엘리베이터 보도블록 경계부 단차 발생부분 보수조치 요망. ◦ 경계석 돌출시공된 부분 보행자 전도사고 발생되는 관계로 전체적인 조사 정비 요망.	3.24~ 3.25	4
8	서대문구 도시 재정비과	모래내 서중, 양대시장 정비사업	◦ 균열관리 대장 관리 철저 - 균열관리계획서 상의 조사주기에 따라 관리하고, 일부 대장에 누락된 부분은 보완하여 관리하기 바람 ◦ 감압밸브와 배관 체결용 볼트 길이가 부족하니, 적절 길이의 볼트로 재시공하기 바람 ◦ 배관 절단면 내부의 이물질(칩)을 완전히 제거 후, 배관을 설치할 것 ◦ 기계실 피트내에 물이 고여 있으니, 기계실 트렌치로 고인 물이 배수 되도록 하기 바람 ◦ 저수조 주위 보온시공 배관이 훼손되지 않도록 워크웨이 설치를 검토하기 바람 ◦ 건축물 옥상 루프드레인 뚜껑하부에 거름망(내식성 재료) 설치바람 ◦ 건축물 외벽 석재 붙이기 최하단에 석재고정용 꽂음촉 설치바람 ◦ 지하 경사로 지붕 프레임 각관 접합부 용접부위에 광명단 제거 후 용접하기 바람	3.24~ 3.25	8
9	영등포구 도시재생과	신실3재정비촉진구역 주택재개발정비사업	◦ 품질관리계획서에 대한 개정일자는 발주자 승인일자로 표기하여 작성하고, 개정차수는 개정된 항목에만 표시하여 관리하기 바람 ◦ 기자재 수급계획은 주요 자재가 모두 포함될 수 있도록 감리의 검토를 받아 작성 바람 ◦ 일부 옥상 무근레이턴스 발생부분은 제거후 표면처리 바람 ◦ 다용도실 상부 파이프 관통 부위 주변은 몰탈 사춤 조치 바람 ◦ 계단실 외부창호 연결부 미세틈새는 투명 코킹으로 밀실하게 처리 요망 ◦ 대형목 특히, 소나무 식재시 뿌리부분이 필요이상 덮여 수목이 고사되지 않토록 식재 레벨을 조정하기 바람 ◦ 건물 외벽 특히 남측면의 경우, 교목의 식재위치를 건물로부터 최대한 이격하여 저층부 주민의 민원을 예방하기 바람	11.23~ 11.24	7
10	강동구 도시계획과	힐데스하임 천호 아파트 신축공사	◦ 개인별 업무분장은 직원 변동이 발생될 때마다 전 직원들의 업무분장을 재작성 후, 시행 일자에 맞추어 최종 결재권자의 승인을 득하고 문서번호, 결재일자를 기재하여 문서등록대장에 기록하고 누적관리 하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 보완하시기 바람. ◦ 품질관리계획의 적절성, 효과성 등을 실증하고 개선사항을 도출하기 위하여 건설공사 운영성과를 연1회 이상 검토하고 보고서를 작성하여야 하나, 2021년도 건설공사 운영성과 검토보고서가 미작성되어 있으므로 조치하시기 바람. ◦ 주방가구 하부장 밥솥선반레일 고정용 pis홀(hole) 당 1개소 이상 고정할 것. ◦ 주차장 Ramp 상하 open 벽체(주차구간과 차량주행구간 사이 open벽체) 구간 안전지대 설치(안전난간 등) ◦ 옥상난간 안전망 파손부위 보수 ◦ 방수턱 우레탄 치켜 올림부 보호판 설치후 코킹 마감하여 탈락 방지 ◦ 천정과 연결부위 들뜸 부분 putty처리후 도배처리 ◦ 지하주차장 전등은 본선 등 조기 활용하여 지하층 조도유지	3.29~ 3.30	10
11	서울주택 도시공사 위례사업부	서울위례지구 택지개발 사업단지 조성공사(3공구)	◦ 인사이동 및 품질관리자 변경사항을 반영하여, 업무분장표를 작성하기 바람(현장소장 결재) ◦ 준공기한까지 기자재 수급계획서를 작성하기 바람 ◦ 기자재의 추적관리 및 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수자(시공사)와 감리원 모두 레미콘 송장에 성명을 기재하기 바람. ◦ 2022년도 자체품질점검계획서(서류점검, 현장점검)를 작성하기 바람 ◦ 2021년도 건설공사 운영성과 검토 보고서를 작성하기 바람 ◦ 복정역 임시출입구 설치공사에 대해, 품질관리 계획서를 승인 받은 후 착공요망 ◦ 복정역 출입구 가시설공사 전에, 인력 줄파기 및 GPR TEST를 실시하여 지장물 등 안전사고 예방관리를 하기 바람 ◦ 복정역 연결통로 공사구간내 보행자 통로확보(주야간) 등 민원 예방관리 요망 ◦ 저소음 절삭포장 구간에 대해, 시방기준 대비 시공 후 소음 저감효과 분석에 대한 측정자료를 관리하기 바람 ◦ 복정역 출입구공사 : 운행선 구간이므로 진동/소음/비산먼지 저감대책을 수립하고, 지상구간의 단계별 교통처리 계획을 수립 후 착공바람 ◦ 저소음 포장에 대한 품질관리기준, 시방, 효과에 대한 대책을 수립 후 시공하기 바람	4.7~4.8	11
12	서울주택 도시공사 도시조성부	서울고덕강일 공공주택지구 택지조성공사	◦ 품질목표 달성을 위한 2022년도 추진계획을 공정을 참고하여 수립하고 품질목표 달성도를 주기적(분기별)으로 확인하고 실적 관리하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 유지 관리될 수 있도록 기반구조관리상태점검표를 작성하여 분기별 1회 이상 점검하고 기록을 유지하시기 바람. ◦ 설계상의 성,절토 기준에 맞추어 토공 규준틀을 설치하고 준공 시 까지 보호조치 바람 ◦ 추락방지시설을 설치하여 중대재해를 예방하기 바람 ◦ 기존 오수관 누수 처리가 미흡하므로 보수보강 하기 바람 ◦ 디장 이음상태가 설계와 상이하므로 시공상세도 변경 바람 ◦ 스트러트 띠장부 스티프너 일부 시공 미흡한 구간 조치 바람	4.7~4.8	8
13	동대문구 주거정비과	용두제6구역 주택재개발 정비사업	◦ 품질관리계획의 적절성 및 효과성을 실증하고 개선사항을 도출할 수 있도록 필요한 데이터를 수집, 분석하고 데이터분석보고서를 작성하여 관리하시기 바람(2021년도 하반기 데이터분석보고서 미작성). ◦ 정화주 관리층 맨홀에 악취방지용 고무패드를 설치 바람 ◦ 옥외 조경 수변공산 외기온도 상승 시 레지오넬라균이 발생할 수 있으므로 살균장치를 설치 바람 ◦ 지하주차장 옥내소화전이 차량에 의해 손상될 수 있으므로 보호장치를 설치하기 바람 ◦ 화장실 타일과 본체 사이에 공간이 있을 때 작은 충격에도 파손될 수 있으므로 시멘트 가루를 공간에 충진하기 바람	4.12~ 4.13	5
14	광진구 주택과	자양1구역 주택재건축 정비사업	◦ 균열관리대장 작성시 콘트리트 타설온도는 해당 구조물에 대한 콘크리트 타설대장을 확인하여 수정 보완하기 바람 ◦ 검교정 관리대장 작성은 장비의 반출일자 및 반출사유를 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하기 바람 ◦ SLAB 바닥 평활도 기준 준수요망(기준 3m당 ±7㎜) ◦ 동절기 타설로 인한 Conc 표면 기포과다(바이브레이터로 충실히 다지고 슬럼프 관리 철저) ◦ 계단실 철근배근상태 개선요망(건축구조도면의 계단배근 표준상세도에 따라 상하에 상호 적착필요) ◦ 근린생활시설 외부 벽체 컨스트럭션조인트 부위 면처리 후(커팅 및 그라인딩 무수축 몰탈보강) 후속공종 진행하기 바람 ◦ 주차장 출입램프 천정 콘크리트 재료분리 및 이질재(핀) 제거 및 면처리 후 후속공종 진행(도장공종 전에)하기 바람 ◦ 전기실 내부 바닥기초 철근 노출부위는 콘크리트 파취 후, 구체 콘크리트 단면이 확보될 수 있도록 무수축 몰탈로 보완하기 바람 ◦ 세대내 천정 단열재 파손부위 제거후, 원 단열재 두께가 확보될 수 있도록 시공하기 바람	4.12~ 4.13	9
15	용산구 도시계획과	용사의 집 재건립 위탁개발사업	◦ 품질방침 및 품질목표에 대한 교육이 금년도에 누락되어 있으므로 이에 대한 교육계획을 수립하고 실시하여 전 직원이 품질방침 및 품질목표를 이해할 수 있도록 조치 바람 ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 품질관리계획의 적절성, 효과성 등을 실증하고 개선사항을 도출하기 위하여 건설공사 운영성과를 연1회 이상 검토하고 보고서를 작성하여야 하나, 2021년도 건설공사 운영성과 검토보고서가 미작성되어 있으므로 조치하시기 바람. ◦ 옥탑층 수직철근용 앙카철근이 누락되었으므로 케미컬 앙카 시공 후 감리단의 확인 바람 ◦ 방화문 고정 용접 시 단열재가 손상된 부분을 보수하고 용접용 철근에 녹막이 도장 바람 ◦ 철골 연결부 용접 목두께 부족 부분 보완시공 바람 ◦ 배관보온재 체결용 AL밴드 간격이 넓어 비닐테이프 품질저하가 우려되므로 밴드간격을 적절하게 보완 바람 ◦ 배관 절단 내면에 이물질이 있으니 이를 제거 후 배관연결 바람 ◦ 구조물 천정 도장작업 등으로 헤드에 이물질 부착이 우려되므로 커버 설치하여 이를 예방하기 바람 ◦ 기계실 옆 피트에 물이 고여 있으니 기계장비류에 습기가 유입되지 않도록 바닥 통로 부위에 드레인을 설치하여 고인물을 배제하기 바람	4.14~ 4.15	10
16	서대문구 주택과	홍제동 제1주택 재건축 정비사업 신축공사	◦ 설계도서 배포대장을 작성하기 바람(수령자 및 회수결과 등을 기록) ◦ 공장검사 계획 및 결과를 누적하여 관리하기 바람 ◦ 옥상 ROOF드레인 내부, 이물질 방지망 캡 씌우기 바람 ◦ 측면 외부 창호 하부면 마감철저히 할 것 ◦ 옥상층 및 계단실 하부 경사면 면처리 불량(표면 샌딩 후 면처리 보완할 것) ◦ DD 내부 전선 케이블 오픈부위 폐쇄할 것 ◦ 지하층 방화문 재설치할 것(제품 재주문 후 설치, 방화구획 부위는 모체강도의 별도 재질로 막아서는 않됨) ◦ 급수용 부스터 펌프의 콘트롤판넬과 배관을 이격시켜 유지보수가 용이하도록 조치하기 바람 ◦ 기계실, 전기실, 발전기실 방화관통부위 내화충진마감 철저히 하기 바람 ◦ 주민공동시설 급배기덕트 빗물투입 및 역풍방치 대책 강구하기 바람 ◦ 각 세대 전열교환기 1차측 급배기 덕트와 2차측 급배기 덕트와 동일 재질로 시공하여 결로방지대책을 강구하기 바람	4.14~ 4.15	11
17	마포구 주택과	아현2구역 주택재건축 정비사업 건설공사(현산)	◦ 환경관리담당자가 업무분장 문서에 지정되어 있지 않으므로 보완하시기 바라며, 개인별 업무분장은 직원 변동이 발생될 때마다 전 직원들의 업무분장을 재작성 후, 시행 일자에 맞추어 최종 결재권자의 승인을 득하고 문서번호, 결재일자를 기재하여 문서등록대장에 기록하고 누적관리 하시기 바람. ◦ 2022년도 교육훈련계획에 따라 협력업체 공종별 사전교육을 실시하고, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 조합과 자재선정에 대한 협의가 완료되면 품질시험계획에 보도블록, 천연무늬목 치장마루판에 대한 품질시험 항목을 추가하고 실시하기 바람. ◦ 비상차도 보조기층 재료분리 된 곳은 입도조정 후 다짐비에 맞게 다짐 요함 ◦ Pit층 덕트구간 틈새 채움 바람 ◦ 자동문 상부 앙카를 사용하여 고정, 사용중 흔들림 방지 요함 ◦ 코어홀 조적 수직줄눈이 넓은 곳은 미장 전 채움을 실시바람 ◦ 골조면 표면처리 일부 표면 박리 된 곳 수정 바람 ◦ 외부석재 촉 시공이 미비한 곳 보완 바람 ◦ 옥상 누름콘크리트 일부 균열 발생한 곳 보수 바람 ◦ 옥상 태양광판넬 하부 베이스플레이트 채움이 미흡하므로 무수축 몰탈 등으로 보완 바람 ◦ 지하주차장 누름콘크리트 일부 균열 발생한 곳 보완 바람 ◦ 기계실 콘크리트 벽체 면처리 일부 미흡한 곳은 그라우팅 등 보완 바람 ◦ 세대 실외기실 문 열림 시 거실유리 파손이 우려되므로 도어범퍼 등으로 보완 바람 ◦ 옥탑 외벽 콘센트 누수가 우려되므로 방수조치 하기 바람	4.19~ 4.20	15
18	마포구 주택과	아현2구역 주택재건축 정비사업 건설공사(SK)	◦ 품질관리계획서 폐기 및 배포현황을 관리하시기 바람 ◦ 품질관리자(이○○)는 건설기술입협회에 당해현장에서 맡은 직무에 대해 건설기술인 경력신고를 하시기 바람 ◦ 납품업체별로 공장검사계획 및 점검실적을, 준공시까지 누적관리하기 바람 ◦ 관로 부설 후, 되메우기 다짐시험을 하고, 구조물 되메우기 층다짐 관리를 하기 바람 ◦ 관로와 맨홀접합 부위 정밀시공하기 바람 ◦ 건축공사 표준시방서에 의거 수위계를 설치하기 바람(영구배수공사 후 수위를 측정할 수 있는 장치를 설치해야 함) ◦ 계단 바닥타일 하부 마구리면 몰탈마감시, 일정두께(10㎜) 확보를 위해 치핑을 하고, 몰탈접착증강제를 사용하여 탈락이 발생하지 않도록 조치 필요 ◦ 포켓도어 프래임 여유공간이 과다한바, 1차적으로 조적을 시공 하고, 몰탈로 사춤 후 미장시 균열이 발생하지 않도록 조치하기 바람 ◦ 최대한 균열 발생(세대 내) 후, 균열보수를 실시하고, 습기 테스트 이후 Flooring 시공하기 바람	4.19~ 4.20	9
19	강서구 도시계획과	화곡1주택재건축 정비사업	◦ 품질관리계획서 폐기 및 배포현황을 관리하시기 바람. (인허가청, 발주자, 협력업체 등) ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조(필요 공간, 장비, 지원 서비스 등)와 작업환경이 확보, 유지 관리될 수 있도록, 기반구조관리상태점검(반기별 1회이상 점검)을 실시하시기 바람. ◦ 공장검사가 필요한 건설자재(전기, 설비)에 대해, 준공시까지 공장검사계획을 수립하기 바람. ◦ 기자재의 추적관리 및 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수자(시공사)와 감리원 모두 레미콘 송장에 성명을 기재하기 바람. ◦ 콘크리트 타설대장에 설계물량을 기재하기 바람. ◦ 옥상슬라브바닥에 발생한 균열은 정지상태 여부 관찰 후, 보수조치하기 바람 ◦ 지하층 블록벽체 개구부(출입문) 상부의 인방블럭, 처짐과 균열 예방 차원에서 보완시공 필요 ◦ 지하PIT층 집수정 양수(배수) 필요(주기적으로 지하수를 배수처리 하기바람) ◦ 지하층 천정 단열재 누락 및 파손부위 밀실처리 바람 ◦ 유사시 안전하게 대피가 이루어질수 있도록, 지하층 작업장내 유도표지를 설치하기 바람 ◦ 옥상 무근 콘크리트 타설부위내, 노출된 시멘트 페이스트 제거하기 바람 ◦ 최상층 공용홀내 알류미늄창호 수직·수평 조인트 부위 틈새 방수코킹으로 처리하기 바람 ◦ 화장실 벽체 상부와 천정 슬라브 사이 틈새, 사춤처리하기 바람 ◦ 화장실(주민공동이용시설) 벽체하부에 설치된 배관 부위는 Metal Lath 또는 Wire Fabric으로 커버후, 몰탈 또는 후속작업을 하기 바람	4.21~ 4.22	14
20	영등포구 주택과	영등포 당산동2가 기업형 임대주택 건립공사	◦ 2022년도 품질방침 및 목표에 대한 계획을 수립하여 현장 전직원에게 교육하기 바람. ◦ 보관문서에 대한 기록 목록표에 문서관리 책임자, 보관장소를 지정하여 관리하기 바람 ◦ 준공 전 까지 기반구조관리상태 점검표를 활용하여 적절한 작업환경을 유지하기 바람 ◦ 준공 전 까지 보관자재 점검표를 활용하여 자재를 적정한 주기로 점검, 관리하기 바람 ◦ 지하 집수정 주위 안전난간 보완 바람 ◦ 계단실 가설 안전난간 보완 바람 ◦ 스프링클러 헤드 막힘으로 인한 시공불량을 방지하기 위해 헤드 캡 설치 바람 ◦ 세대 내 통신단자함 내부 청소 철저 ◦ 세대 내 장비반입구 주위 우레탄 방수 보강으로 누수를 방지하기 바람 ◦ 세대 외부 창호 SILL 하부(외벽쪽) 면처리 후 도장하기 바람	4.21~ 4.22	10
21	은평구 건축과	대조동 역세권 청년주택 신축공사	◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업 환경이 확보 및 유지될 수 있도록 기반구조관리상태 점검 시 일자를 표시하고 점검 사진을 첨부하기 바람 ◦ 방화문 등 공장검사 계획을 수립하고 아직 실시하지 않은 항목에 대해 공장검사를 실시하고 실적을 관리하기 바람 ◦ 옥상 지붕층 세대 천정 단열재 틈새가 일부 과다하므로 충진용 폼으로 틈이 발생치 않도록 조치 바람 ◦ 옥상 지붕층 천정 단열재 사이로 누출된 시멘트 페이스는 해당부위 전체 제거 후 천정마감 실시 바람 ◦ 피난계단 AL창호 상,하부 앵커 고정 시공 바람 ◦ E/L hall 테라스 발코니 AL창호 하부 보강이 미흡하므로 처짐 방 지를 위한 전용 철물로 고정 바람 ◦ 욕실 조적 벽체 배관주위 천정과 인접부위 밀실하게 사춤바람 ◦ 매입BOX내 케이블 인출 및 접속 시 내부 이물질 및 케이블 석고몰탈을 제거하고 접속부위 시공을 철저히 하기 바람 ◦ 각 실 및 층간 cable tray 관통부는 방화구역으로 fire stop등으로 완벽하게 차폐시공(케이블포설 후) 하여 화염이나 연소가스가 전달되지 않도록 시공하기 바람 ◦ 전기실 접지단자함의 cable 및 단자대에는 분기회로별 상세 회로표시를 취부하여 향후 점검 및 유지관리가 용이하도록 시공하기 바람	4.26~ 4.27	10
22	서대문구 주택과	e편한세상 홍제 가든플라츠 현장(홍은1주택)	◦ 품질관리계획서 폐기 및 배포현황을 관리하시기 바람. (인허가청, 발주자, 협력업체 등) ◦ 기자재의 추적관리 및 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수자(시공사)와 감리원 모두 레미콘 송장에 성명을 기재하기 바람. ◦ 데이터 분석 결과보고서를 작성하기 바람. ◦ 엘리베이터 벽체내, 장비반입을 위한 오픈부위는 마감계획을 수립하고 SHOP DAWGING을 작성하여 감리단 승인 후 최종 마감처리하시기 바람 ◦ 계단실(옥탑층 천정), 벽체 조인트 등 콘크리트 불량부위(재료분리, 물곰보, 이물질(철선))는 적정재료(시멘트페이스트 + 접착재 등)로 보완시공 하고, 후속 마감처리를 하기 바람 ◦ 옥상 P/H 점검용사다리의 고정용 볼트 - 캡 씌우기 바람 ◦ 세대 바닥에 발생한 크랙 - 마루 시공전 보수 바람 ◦ 피로티(아파트) 1층 천정 단열구간 - 시멘트 페이스트 제거 후 마감작업 수행 ◦ 주차장 램프 상부 및 하부와 접한 주차공간 - 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설물(난간 등) 설치 ◦ 주차장 천정 흡음뿜칠 부위 - 철물 제거 후 보완마감 시행	4.26~ 4.27	10
23	도시기반 시설본부 토목부	신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)	◦ 환경관리담당자가 업무분장 문서에 미지정되어 있으니, 책임과 권한이 명확히 부여·운영되도록 보완하시기 바람. ◦ 2022년도 기자재수급계획이 미비하니 공정계획을 참고하여 기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 중점품질관리 대상공종의 사용장비와, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 락볼트용 자재를 받침대를 이용하여 정리 보관 요망. ◦ 전선과 급수관 및 배수관을 분리하여 정리할 것. ◦ 천공기 주변의 전선연결부를 물기 많은 바닥으로부터 이격하여 누전이 되지 않도록 할 것. ◦ 간이 침전지 역할을 할 수 있도록 슬라임과 침전수를 분리하고, 펌핑이 되도록 할 것. ◦ 전선열결부를 습기 많은 바닥으로부터 이격하여 관리할 것. ◦ 하향경사 터널굴진 작업이므로 굴착면 주변 배수관리 철저 요망. ◦ 숏크리트 손상발생 부위 보완 요망.	5.3~5.4	10
24	도시기반 시설본부 토목부	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	◦ 품질관리계획서 배포대장은, 수령자의 성명을 기재하여 관리하기 바람 ◦ 교육훈련운영기준표에 의거 실시하고 있는 정기 안전교육에 대해서도, 교육계획 및 교육실적을 누적하여 관리하기 바람 ◦ 라이닝 E/J부 기초, 사전 CUT을 실시할 것 ◦ 풍도슬래브와 라이닝 접속부의 시공이음부에서 유출된 몰탈 제거 후 면정리를 할 것 ◦ 터널내 공동구의 벽체철근 높이를 균일하게 조정 필요 ◦ 터널내 공동구 벽체콘크리트 훼손부위, 보수(고강도 몰탈 사용) 필요 ◦ 터널내 측구 수축이음 부위, 기능이 유지될 수 있도록 보수(몰탈 등) 필요	5.3~5.4	7
25	서초구 주거개선과	반포우성아파트 주택재건축 정비사업	◦ 연간 교육계획에 의거 교육을 실시 바람 ◦ 기자재의 추적관리 및 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수자(시공사)와 감리원 모두 레미콘 송장에 성명을 기재하기 바람 ◦ 건물옥상 방수치켜올림부위, 수평 누름고정판 틈으로 우수가 유입되지 않도록 밀실하게 코킹충전을 하기 바람 ◦ 건물외벽 건식석재 붙이기 최하부 부위, 꽂음촉(고정핀) 견고하게 시공하기 바람 ◦ 지하주차장 천장 뿜칠 부위(가설전기배관, 잭서포트설치, 단열재 부착부위), 평탄하게 뿜칠보완 필요 ◦ 지하외벽 방습판(배수관) 설치부위, 환기 타공판 추가설치를 검토하기 바람 ◦ Cable Tray 및 전기, 기계배관 층간, 실간 관통부는 방화구역으로 Fire Stop 등으로 완벽하게 차폐시공하여 화염이나, 연소가스가 전달되지 않도록 시공하기 바람 ◦ 기둥에 설치되어 있는 소화전 함은 위험, 식별표시로 발광 테이프를 부착하고 진입하는 자동차의 충격방지를 위하여 소화전 하단 볼라드 설치를 검토하기 바람 ◦ 매립 BOX내 케이블 인출 및 접속시 내부 이물질, 케이블 몰탈 및 도장을 제거하여 접속부위를 철저히 시공하기 바람 ◦ 각 분전반 Door 접지 및 도면함을 취부하여, 설계도를 수납하도록 시공하기 바람 ◦ 전기실 벽면 전체 계통도 현황판을 설치하여, 점검 및 유지관리가 용이하도록 시공하기 바람 ◦ 옥상 피뢰설비 및 피뢰도선은 적정하게 설치하도록 시공시 만전을 기하기 바람 ◦ Cable Tray end cover 및 접지 clamp 보완 설치하기 바람	5.10~ 5.11	13
26	서초구 주거개선과	신반포14차아파트 재건축 정비사업	◦ 수립된 공장검사 계획 중 아직 실시하지 않은 항목(방화문)에 대해 공장검사를 실시하고 실적을 관리하기 바람 ◦ 보유한 시험 장비에 대해 차기 검교정일을 최신화 하여 관리하기 바람 ◦ PC조립용 기초PAD 규격에 대한 도면 제출바람 ◦ 바닥 미장면에 균열이 발생하였으므로 보수공사에 방법에 대한 자료 제출 바람(사용재료, 시공순서 등) ◦ 계단실 창호 주위 콘크리트 깨진 부분과 골조면 수직 오차 발생부분에 대한 보수 바람 ◦ 방화문틀 설치 시 용접으로 인해 단열재가 손상되었으므로 보수 바람 ◦ 건축시방서에 PC공사에 대한 시방서가 누락되었으므로 작성자, 목록을 표시하여 접수 및 관리 바람 ◦ 최상층 세대 천정 단열재 손상 보수 후 마감벽체 단열재 밀실시공 바람 ◦ 바닥미장 균열 보수바람 ◦ PC기초 Dowel bar 레이턴스 제거 바람 ◦ 주차장 누름 콘크리트 균열 보수 바람 ◦ 가설계단 Block openning 커버 누락되었으므로 조치 바람	5.10~ 5.11	12
27	중랑구 건축과	KT&G 상봉동 주상복합 신축공사	◦ 품질관리자(김**) 의무교육 기간이(계속교육, 3년) 다음달 도래하므로 기간 만료 전 교육을 이수하여 품질관리 업무 단절 및 과태료 부과 사례가 발생하지 않도록 교육 이수 바람 ◦ 품질시험,검사성과 총괄표는 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제17호 서식에 따라 공정률을 기록하고 작성 관리 바람 ◦ 지하주차장 옹벽에 누수부위가 있으므로 균열보수 및 방수처리 바람 ◦ 지하층 슬래브 철근 이음에 부분적으로 커플러 누락부분이 있으므로 상층부 시공 시 정밀시공 바람 ◦ 코팅 합판면의 이물질 제거 및 박리제 도포를 적절히 하기 바람 ◦ 주차장 슬래브 형틀을 플라스틱재와(고재) 혼용함으로서 면상태가 불량하므로 보수 바람 ◦ 추락방지를 위해 작업반출구 주변 안전난간대 일부 미설치 된 부분을 보완 바람 ◦ 동바리 편심방지를 위해 U헤드 설치 시 수평재 중앙에 설치바람 ◦ 기둥 이음 시 소성힌지 구간의 이음을 추천하며 기계적 이음 시에는 두 이음간 75cm간격 유지 바람 ◦ 철근 중성화에 따른 부동태막 파괴를 방지하기 위해 철근 결속선을 내부로 매입 바람 ◦ 신구 콘크리트 타설 시 철근 부착강도 확보를 위해 철근 주변 콘크리트 제거 바람	5.12~ 5.13	10
28	중구 도심재생과	세운재정비촉진지구 3-1구역 재개발 사업 신축공사	◦ 기반구조관리상태점검은 해당 시설을 담당하는 담당자 또는 팀별로, 각각 실시하기 바람. ◦ 공장검사가 필요한 건설자재는, 납품회사별로 계획 및 실적을 누적하여 관리하기 바람. ◦ 기자재의 추적관리 및 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수자(시공사)와 감리원 모두 레미콘 송장에 성명을 기재하기 바람. ◦ 1층 탑다운 공법으로 시공한 CORE부위내, 신구 콘크리트 연결부 치핑 후 에폭시 주입 ◦ 외벽공사 SWC 시공부위, 상승전 공정싸이클 철저히 확인 (창호설치 - 도장 - 유리 - 외벽판넬 - 코킹) ◦ 계단타일 마감용 몰탈, 적정 두께(20㎜) 확보 필요 ◦ 세대내 우물천정 부위, 석고보드 시공시 코어부위내 붙임 시공하여 도배 들뜸 방지하기 바람 ◦ 화장실 조적시공부위, 줄눈 틈새가 보이지 않도록 사춤 철저히 하기바람 ◦ 세대별 감압밸브는 압력 측정이 가능한 포트가 달려있는 감압밸브로 설치하기 바람 ◦ 공조기에 덕트 연결시, 플렉시블 캔버스 없이, 함석덕트를 직접연결시켜 소음을 방지하고 결로를 방지하기 바람 ◦ 팬 연결시 토출구는 토출구와 같은 크기로 장변의 2.5배 이상 직선 덕트를 연결하고, 흡입구에는 흡입기류가 층류로 유입될 수 있도록, 터닝베인을 설치하여 팬 효율이 감소되지 않게 설치하기 바람	5.12~ 5.13	11
29	중구 도심재생과	세운재정비 촉진지구 3-4,5구역 재개발사업 신축공사	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원이 이해하고, 현장 내에서 의사소통 될 수 있도록 주기적인 교육을 실시하시기 바람.(점검일 현재 2022년도 품질방침 및 품질목표 교육 미실시) ◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 발생시 공사참여자가 변경된 요구사항을 인식할 수 있도록 설계변경 내용을 교육하시고, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 건설공사 품질관리 업무지침에 따라 레미콘 납품서에 인수자를 빠짐없이 기록하여 관리 바람 ◦ 시험실 내 시험장비에 대한 차기 검교정일자 기록을 최신화 하여 관리하기 바람 ◦ 거푸집 동바리를 연직방향에 수직 유지 바람 ◦ 시스템 비계는 구조적 안정성을 위해 고정핀이 hole구멍 하부에 튀어나오도록 설치 바람 ◦ 계단실 초벌 포장면이 불규칙한 면 손보기 바람 ◦ 화장실 상부 전선, 전등 연결부위 플렉시블 설치면이 불량하므로 조치 바람	5.17~ 5.18	8
30	중구 도심재생과	세운재정비촉진지구 6-3-4구역 재개발사업	◦ 공장검사가 필요한 건설자재는, 납품회사별로 계획 및 실적을 누적하여 관리하기 바람. ◦ 구조물내 주요균열은, 균열게이지 및 표찰을 부착하여 관리하기 바람. ◦ 보관자재 점검표는 현장조직도내 자재담당과 협력업체가 공동으로 작성하여 관리하기 바람. ◦ 현장점검계획을 포함하여, 2022년 자체품질점검계획을 수립하여 주시기 바람. ◦ 계단실, 벽체 및 천정 콘크리트면의 불량부위는 무수축 몰탈 등으로, 면처리 후, 후속공정을 진행하기 바람. ◦ 세대내 벽돌줄눈 사춤처리 미흡부위, 보완시공(몰탈마감 처리) 후 후속공종을 진행하기 바람. ◦ 외부기둥 Form Tie 절단부 노출부위, 제거(콘크리트 파취 후 제거) 및 무수축 몰탈 마감처리 후 후속공종을 진행하기 바람. ◦ 배관 내부의 이물질(칩 등)이 제거되지 않은 상태이니, 이물질을 완전히 제거 후 배관 접합작업을 하기 바람 ◦ 기계실 상부에 설치된 배관(급탕배관)의 고정상태가 미흡하니, 규정에 적합하도록 달대 볼트 등으로 고정하기 바람 ◦ 순환점프 바닥지지대를 고정하는 볼트가 미시공 되어 있으니, 보완공사하기 바람	5.17~ 5.18	10
31	도시기반 시설본부 토목부	월드컵대교 건설공사	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 볼 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 교각 기둥부에 탈형제가 남아 있으므로 탈형제 제거를 위한 면정리 필요 ◦ 비산먼지 방지를 위한 그린망이 덮개 기능을 잘 유지할 수 있도록 그린망 고정 바람 ◦ 거푸집, 가시설 자재의 보관 시 구획을 구분하고 자재 정리정돈 바람 ◦ 현장 내 폐기물은 빠른 시간 내 현장으로 배출하고 현장 내 보관시 구획을 구분하여 정리정돈 바람 ◦ 남단 IC Ramp 시점부에 백태가 발생하였으므로 원인 제거 바람 ◦ 남단IC-R/F 교각 거푸집 연결부 단차가 발생하지 않도록 베벨링 후 외측에서 용접 실시하여 거푸집 품질을 향상 시키기 바람 ◦ 남단IC-R/F 현장타설말뚝 두부정리 구간 굴착깊이가 깊고 매립토 구간으로 붕괴 시 안전사고 우려가 있으니 흙막이 등 적절한 조치를 하기 바람 ◦ 남단IC-R/F 도보측면 단차구간은 보도 높이에 맞추어 되메우기 하여 보행인 안전사고를 예방하기 바람 ◦ 남단IC-R/F RCD Casing 인발 구간은 작업자 외 출입을 통제하여 중량물 취급 시 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 바람	5.19~ 5.20	10
32	동대문구 주거정비과	청량리3 재정비촉진구역 주거복합사업 신축공사	◦ 당해 사업장 품질관리자의 계속교육(35시간 이상) 이수여부를 확인하기 바람 ◦ 2022년도 주요자재 공장점검계획과 점검결과 일정표를 작성하여 관리하기 바람. ◦ 기자재 반입계획 및 반입결과를 작성하여 관리하기 바람. ◦ 구조물내 주요균열은, 균열게이지 및 표찰을 부착하여 관리하기 바람. ◦ 보관자재 점검표는, 현장조직도내 자재담당 팀에서 협력업체측과 함께 관리하기 바람. ◦ 최상층 단열재 설치부위, 시멘트 paste 및 철물노출부 완전 제거 및 마감보완(방청처리 등) 후 후속작업을 진행할 것 ◦ 옥상 철골플레이트 고정용 앙카볼트, 높이 조절 후 마감 CAP 씌울 것 ◦ 최하층(1층 하부) 단열구간 이음부 틈사이 단열(우레탄폼) 처리 후 후속마감 진행할 것 ◦ 지하주차장 흡음뿜칠 전 페이스트 및 철물 제거, 녹막이처리, 바탕 M/T면 처리 후 후속마감 처리요망 ◦ 세대 온수분배기에 난방존을 표시하는 안내표지판 등을 부착하기 바람 ◦ 구조체 관통 배관 주위는, 마감시 충진을 밀실하게 하기 바람 ◦ 배관 마감 후, 배관의 종류 및 유체흐름을 표시하기 바람 ◦ 지하 주차장 소화전 위치를 식별할 수 있는 표시를 부착하기 바람 ◦ 기계실 집수정 펌프 설치 후 안전난간을 설치하기 바람	5.19~ 5.20	14
33	동대문구 주거정비과	동부청과시장 정비사업(청량리역 한양수자인)	◦ 기자재 수급계획서는 계획물량 대비 실적을 계속 관리하여 후속 공종 및 목적물에 영향이 최소화되도록 작성 바람 ◦ 검교정관리대장은 검사장비, 측정장비 시험장비의는 대장에 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리자의 확인을 받아 관리하기 바람 ◦ 옥상층 철골과 콘크리트 연결부위는 무수축 몰탈로 시공할 것 ◦ 용접부위는 녹방지를 위해 광명단을 도포할 것 ◦ 1층 천정에 부착한 단열재 측면부위 마감처리 요망 ◦ 기둥에 앙카볼트 체결 과정에서, 용접부위 발생시 광명단을 도포할 것 ◦ 상가동 천정내에 설치되는 FCM 냉난방기의 필터청소 등 유지관리를 위한 점검구는 최소 600*600 이상으로 설치할 것(기계설비법 참고) ◦ 냉각탑의 흡입측은 소음기가 설치되어 있으나, 토출측은 소음기가 없음. 향후 민원이 발생하지 않도록, 외부로 배출되는 소음치를 사전에 검토하기 바람 ◦ 옥내 소화전(지하주차장 통로변)은 차량에 의한 파손방지 차원에서 안전보호장치 또는 표시 등을 할 것 ◦ 국토교통부에서 발행한 환기설비 유지관리 매뉴얼 배포 등을 통해, 세대내 환기유니트가 적절히 사용될 수 있도록, 입주자 안내가 필요함	5.24~ 5.25	10
34	동대문구 주거정비과	청량리 제4구역 도시환경정비사업	◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. (점검일 현재 토목, 기계, 전기분야 기자재 보완 필요) ◦ 균열관리대장에 콘크리트 타설 시 온도를 기록 유지 하기 바람(건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지41호 서식 준수) ◦ 덕트하우스 추락방지 조치를 강구하기 바람 ◦ 옥탑의 우수드레인 유입구에 이물질이 들어가지 않도록 보강하기 바람 ◦ 전기 배선을 설치한 입상배관 보양 조치 필요 ◦ 배관 입상용 바닥 스리브 개구부막이 보양조치 필요 ◦ 화재 시 안전을 고려하여 고소작업과 용접 작업 시 간이 소화기 배치 바람 ◦ 슬래브 하부 단열재 이음부위 일부 충전이 누락된 부위에 충진 및 보수조치 바람 ◦ 벽체 결로방지 단열재 콘크리트 잔여물 오염물질 제거 바람 ◦ 피난 안전구역 내 피트 내부 단열재 파손부위 보수조치 바람 ◦ 데크 하부 일부 거푸집 핲판 및 오염물질 제거바람 ◦ 옥탑계단 난간 불연속 부위 조치바람	5.24~ 5.25	12
35	관악구 주택과	신림동 240-3일원 역세권 청년주택 신축공사	◦ 품질관리계획서를 관련업무 조직 및 담당에게 배포하고 기록관리 및 활용하기 바람 ◦ 품질관련 문서에 대해 관리책임자를 지정하여 관리하기 바람 ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 유지되도록 기반구조관리상태 점검표를 작성하여 활용하기 바람 ◦ 공장검사계획을 주요 자재별로 준공 시 까지 계획을 수립하고 양질의 자재가 반입되도록 적기에 시행바람 ◦ 시공에 사용될 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되도록 보관자재 점검표를 작성하여 월1회 점검하고 기록 유지 하기 바람 ◦ 원형강관 접합부 변위관리를 위한 점검로 설치를 검토할 것 ◦ 지하수위 측정은 굴착깊이 15m이상은 매일 측정바람 ◦ 복공용 post pile하부 근입장 부분(h=2m)은 그라우팅 하도록 되어있으므로 이에 대한 검토 바람 ◦ 피스브라켓 규격이 도면과 상이하므로 설계자 의견을 받아서 필요 시 도면 변경 바람 ◦ 3단 띠장 설치 위한 굴착깊이는 설계자 의견을 받아 규정화 하기 바람 ◦ 정문 gate우측 경계석과 포장사이가 벌어진 구간은 지속적인 관찰을 하기 바람 ◦ 2열띠장은 폐합단면으로 강결시켜 구조체의 강성을 증대하기 바람 ◦ 안전시공을 위한 계측기는 시건장치를 추가 바람 ◦ 인접한 신림봉천터널은 본 사업구간과 약 15m이격되어 있으므로 집중관리가 필요함	5.26~ 5.27	14
36	중구 도심재생과	봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업	◦ 품질관리계획서 배포현황(인허가청, 발주자, 감리단, 협력업체 등)을 관리하기 바람 ◦ 공장검사가 필요한 주요 건설자재(건축, 전기, 기계, 토목 등)는, 점검계획 및 점검실적을 준공시까지 누적하여 관리하기 바람 ◦ 기자재의 추적관리 및 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수자(시공사)와 감리원 모두 레미콘 송장에 성명을 기재하기 바람. ◦ 내력벽과 기둥 등 콘크리트 역타인 경우 수평이어치기 부위에 공극이 발생되지 않도록 실물모형(MOCK UP)을 제작하여 확인 후 시공하기 바람 ◦ 스터드는 용접검사 후 시공하기 바람 ◦ 콘크리트가 타설되는 철골면은 기준에 따라 청소 후 시공하기 바람 ◦ 슬래브 수직콘크리트 이어치기 부위내, 굽은 철근은 바르게 펼치고, 흘러나온 콘크리트와 쓰레기 등은 기준에 따라 청소 후 타설하기 바람 ◦ 지하6층 엄지말뚝(H-BEAM) 수직도 관리 미흡으로 합볍측 여굴 발생(800㎜ -> 1200㎜)한바, 철근보강 및 콘크리트 타설시 수화열 관리(벽체 두께 중간 부분) ◦ 바닥, 벽체, 기둥 조인트부위, 콘크리트 타설전에 청소실시 (KCS 14 20 10 : 2021 표준시방서 기준으로 시공할 것)	5.26~ 5.27	9
37	도시기반 시설본부 토목부	동부간선도로확장공사 (3공구)	◦ 품질목표 달성을 위한 추진계획을 공정을 참고하여 수립하고 품질목표 달성도를 주기적(분기별)으로 확인하고 실적 관리하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 공정계획을 참고하여 기자재수급계획을 수립하고 관리하시기 바람. ◦ 레미콘 송장에 타설완료시간 및 감리원 서명을 빠짐없이 기록하여 관리하시기 바람 ◦ 자체 품질점검 계획을 수립하여 체크리스트에 따른 점검을 실시하고 그 결과보고서를 작성 관리하기 바람 ◦ 방음벽 성능평가 관련하여 환경기준 만족여부를 밥드시 확인하시기 바람(설치전, 설치후 소음 평가 등) ◦ 방음벽 기초부 옹벽구조물 신축이음부 처리시 도면 NO.4004에 의거 실란트(B=20mm, H=25mm) 시공품질관리 철저 요망. ◦ 기초옹벽에 발생된 균열에 대하여 조사후 처리방안을 수립하여, 조치계획에 따라 처리하시기 바람. ◦ 배수로 설치공사는 집중호우에 따른 침수피해가 발생되지 않도록 일정계획을 수립하여 적기에 시공하시기 바람. ◦ 수축줄눈(균열유발줄눈) 처리가 미흡하니 sealing 처리 등 균열보수 및 단면결손부 채움 하시기 바람.	6.2~6.3	10
38	노원구 도시재생과	상계6구역 주택재개발 정비사업	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 입간판 및 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치하기 바람. ◦ 현장 조직도내 구성원 변경시, 업무분장을 변경(개정)하여 누적관리하기 바람. ◦ 품질관리계획서 배포현황(인허가청, 발주자, 감리단, 협력업체 등)을 관리하기 바람.(수령자 성함기재 필요) ◦ 기자재의 추적관리 및 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수자(시공사)와 감리원 모두 레미콘 송장에 성명을 기재하기 바람. ◦ 보관자재 점검표는, 현장조직도내 자재담당 팀에서 협력업체측과 함께 관리하기 바람. ◦ 구조내력 및 피복두께를 확보를 위해, 슬래브 하부근의 철근SPACER를 규정대로 설치할 것 ◦ 상부하중을 제대로 전달하여 구조 안정성을 확보하기 위해, 동바리 수직도를 확보할 것 ◦ 골조 구조 안정성 확보를 위해, 전기 배관 작업시 번들로 묶지 말고, 가능한 분산 배치할 것 ◦ 지하층 영구배수 집수정 주변 안전 난간에 안전망을 설치하여 안전사고를 예방하기 바람 ◦ 식탁위 전등의 높이를 머리 위로 조정하고, 입주 후 입주자가 높이를 조정할 수 있도록 하기 바람 ◦ 옥상 PR방수커버 상하부위, 코킹처리하여 틈새 빗물유입 방지철저 ◦ 강풍 대비, 옥상 태양광 기초용 앙커 인발력 구조체크 요망 ◦ 옥상 VENT PIPE 주위 우레탄방수 철저 ◦ 세대 발코니, 배수처리를 위해 드레인방향 및 구배 철저히 시공	6.2~6.3	14
39	양천구 주택과	신월4구역 주택재건축 정비사업 신축공사	◦ 품질목표 달성을 위한 추진계획을 공정을 참고하여 수립하고 품질목표 달성도를 주기적으로 확인하고 실적 관리하시기 바람. ◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표를 작성하여 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 하시기 바람. ◦ 교육훈련계획서는 공정계획을 반영하여 협력업체 공종별 교육이 반영되도록 보완하시기 바라며, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인 근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 균열관리대장은 ‘건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침’ 별지 제41조 양식에 따라 콘크리트 타설 시 온도 등을 추가로 작성 관리바람 ◦ 건설 자재가 최상의 품질로 시공될 수 있도록 보관자재 점검표를 작성 활용하여 월1회 이상 점검 실시 바람 ◦ 세대 내 전기BOX 하부 주름관을 빈틈없이 설치하여 콘크리트 타설 시 벽체에 공극이 발생하므로 두 개씩 묶어서 간격을 벌려 설치 바람 ◦ 슬래브 일부(계단참 천장) 재료 분리된 부분 치핑 후 깨끗이 청소하고 접착제를 바른 후 같은 강도의 모르타르로 보수 바람 ◦ 외부계단 연결부위 철근 일부가 오랜시간 외기에 의해 녹이 생겨 같은 철근으로 앵커링 하여 조립설치 바람 ◦ 지하실 누수부위는 균열관리 대장을 만들어 지속적인 관리 필요 ◦ 층간 콘크리트 이어치기(수평)부분 레이턴스 등 오물,쓰레기, 잔여 골재 제거 청소 후 콘크리트 타설 바람 ◦ 정착이 되지 않은 벽체 수직철근은 보강철근으로 보강 바람 ◦ 굽혀진 수평철근을 바르게 한 후 시공 바람	6.7~6.8	15
40	영등포구 주택과	여의도동31번지 복합시설신축공사	◦ 콘크리트타설대장 및 균열관리대장 상의 타설온도를 일치하게 기재하고, 대장상의 일부 누락내용을 보완하기 바람 ◦ 벽체 단부 U-BAR 부위 철근보강 필요(교차부에 철근 2EA 설치) ◦ 철근결속선은 내부로 매듭을 만들 것(결속선이 외부로 나올 경우 부동태막이 파손되어 균열 발생) ◦ 균열보수 부위 일부 들뜸(들뜸이 발생하지 않도록 보수할 것) ◦ 층별 외부측 안전난간 하부에, 폭목설치 또는 낙하물이 떨어지지 않도록 조치 필요 ◦ 계단철근, 주근폭 고정 및 스페이서(피복) 두께 유지 필요 ◦ 철근(벽체, 슬라브) 교차부 결속관리 철저(철근구조 일반사항 및 시방서 준수요망) ◦ 자재인양구의 슬라브 상하부 마감관리 철저(액체방수, 도막방수, 수평유지) 등 상세도 작성 필요 ◦ 시스템 비계핀(수평 연결재) 견고하게 고정 및 체결할 것 ◦ 고소작업대 과상승 방지봉 안전기준 준수하여 관리(4개소 50㎝ 이상)	6.7~6.8	10
41	강동구 주택재건축	강동성내 역세권 청년주택 신축공사	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 현수막으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치하기 바람 ◦ 당해 사업장 품질관리자의 계속교육(35시간 이상) 이수여부를 확인하기 바람 ◦ 공장검사가 필요한 주요 건설자재(건축, 전기, 기계, 토목 등)는, 점검계획 및 점검실적을 준공시까지 누적하여 관리하기 바람 ◦ 기자재 수급계획서는 계획물량 대비 실적을 계속 관리하여 후속 공종 및 목적물에 영향이 최소화되도록 작성 바람 ◦ 구조물내 주요균열은, 균열게이지 및 표찰을 부착하여 관리하기 바람 ◦ B동1층 수벽하부 콘크리트면 불량 부위 제거후 무수축 몰탈 등으로 보완 처리하시기 바람 ◦ 지하 5층 슬라브 크랙으로 인한 누수 부위는 크랙 보수계획을 수립하여 감리단 승인 후 보완 처리하시기 바람 ◦ 지하 7층 블록 벽체 마구리면, 마감품질 확보를 위해 코너블럭으로 교체 시공하시기 바람 ◦ 단위세대 자재 인양구 하부면은 조인트 표시가 없게 주변 콘크리트면과 일치하도록 전체 면처리 요망 ◦ 피트층 단열부 이음 부위는 밀실 시공으로 단열성능이 확보되도록 우레아폼으로 충진 요망	6.14~6.15	10
42	중랑구 주택관리과	양원지구 주거복합 신축공사	◦ 품질관리계획서가 현장 내에서 품질활동에 활용될 수 있도록 관련 업무 담당에게(협력업체, 공사참여부서 등) 배포된 일자, 서명을 받아 관리할 것 ◦ 보관문서 목록표에 문서관리 책임자를 지정 및 작성하여 기록관리 바람. ◦ 계단실 측면 슬라브 철근 앙카 배근 조립상태 보완 바람 ◦ 지하층 Roof 옥상방수시트 파손 이음부 보호조치 및 수정 바람 ◦ Elev.pit 내부 현장정리정돈 보완 바람 ◦ PCS 내부 개구부 open구간 추락방지 난간대 설치 바람	6.14~6.15	6
43	도시기반시설본부 토목부	강남순환도시고속도로 (8공구)건설공사	◦ 품질관리계획서 제정 및 개정날짜는 발주청 승인 날짜를 기준으로 관리하기 바람 ◦ 대모지하차도 시점부 횡줄파기 구간, 일부 침하가 발생하였으니 보수하기 바라고, 향후 포장시 다짐도 관리를 철저히 하기 바람 ◦ 버스 종점 앞 흄관 철거 후 되메우기 구간, 침하가 발생하지 않도록 성토두께 및 다짐도 관리하기 바람 ◦ 지하보도 출입구, 추락방지 덮개 견고하게 설치하여 추락사고 방지하기 바람 ◦ 대모지하차도 종단선형 최저점 구간, 집중호우시 침수우려가 있으니 배수시설 정비하기 바람 ◦ 흄관과 맨홀의 접속부(유입, 유출)를 고려하여 제작된 맨홀을 현장 내 반입하여 설치할 것 ◦ 임시 설치용 하수관 터파기시, 지장물 조사를 철저히 하여 손상이 없도록 하고, 깊이 2m 이상 터파기 후 관로 매설시 안전 판넬을 설치한 후 관로를 매설할 것 ◦ 통신주 철거후, 다짐을 철저히 할 것 ◦ 우기에 대비하여, 저지대 보조기층 포설구간내 임시 배수로 설치 ◦ 기존 포장면의 끝 부위, 커팅 후 아스콘 포장 시행	6.16~6.17	10
44	성북구 주거정비과	길음역세권 재정비촉진구역 주택재개발정비사업	◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 중점품질관리대상 공사 특성에 맞게 작업자의 자격기준을 작업 특성에 맞게 관리하기 바람 ◦ 건설 자재가 최상의 품질로 시공될 수 있도록 보관자재 점검표를 작성 활용하여 철근 뿐만 아니라 주요 자재에 대해서도 월 1회 이상 점검 실시 바람 ◦ Con’c 거푸집용 합판 등이 품질시험계획서에 누락되어 있으므로 품질시험검사성과 총괄표, 실적 보고서와 일치하게 보완 바람 ◦ 주차장 외벽 construction joint부위 BibLath 제거되지 않은 부분은 콘크리트 일체성 확보를 위해 제거 바람 ◦ 지붕층 지하주차장 PF단열재 파손 및 손상된 부분 보수 바람 (이음부 틈새 우레탄 폼 충진, 파손부 재시공) ◦ 지하주차장 Deck 하ㅂ와 철골보와 접합부 시멘트 페이스트 유출부분 뿜필 마감 시 페이스트 제거 철저히 하기 바람 ◦ 철근 이음부위에서 철근 사이의 간격은(150mm, 이음길이의 1/5 중 작은값) 이내는 이음으로 유효하므로 해당부분은 철근을 굽히지 말고 배근 바람 ◦ 벽체 역타부분에서 벽체의 상,하 연속부분의 Deck하부 철판은 제거한 후 콘크리트 타설 바람 ◦ 기둥 부분의 일부 늑근 갈고리는 135도 Hook를 만족하도록 조치하기 바람	6.16~6.17	10
45	동대문구 건축과	동대문구 전농동 620-60번지외 4필지 신축공사	◦ 가설재(동바리, 알폼, 갱폼) 공장점검은 감리원과 함께 실시하기 바람 ◦ 벽돌 및 블록 공장점검결과 보고서에, 참여 감리원 서명을 기재하기 바람 ◦ 구조물내 주요균열은, 균열게이지 및 표찰을 부착하여 관리하기 바람 ◦ 구조해석 Model에 고려되지 않은 수직벽체 개구부(제연덕트 등)는 별도 구조검토 후 시공하기 바람 ◦ 기준층 Con`c타설시 수직철근 피복두께 유지 및 이동에 유의하여 시공하고, 상하철근의 위치가 차이가 날 경우 철근이음 성능 확인 후 시공하기 바람(철근 굽힘시공 지양) ◦ 보 주철근 정착시, 주변 부재(기둥, 벽체)의 상황을 고려하여 90도 hook, 또는 연장배근 방법으로 시공하기 바람 ◦ 벽체내 설비용 주름관은 수직철근 이음부에 위치하지 않도록 유의하여 시공하기 바람(철근 이음 성능저하 요인이 될 수 있음) ◦ 비구조 요소(조적, 칸막이벽, 외부 석재마감 등)의 내진설계 대상여부를 확인 후, 내진설계를 실시하기 바람 ◦ 벽체 알루미늄폼 일부 플랫타이 설치 누락 ◦ 서포트와 상부슬래브 고정하여 흔들림 방지 필요 ◦ 벽체 수직철근 일부 결속 미흡 ◦ 벽체 철근 스페이서 및 폭고정근 설치 미흡 ◦ 호이스트 주변 오프닝 부위, 노출철근 보양 필요 ◦ 벽체 콘크리트면 일부 곰보 발생 ◦ 콘크리트 벽체와 조적벽간 조인트 처리 미흡 ◦ 장애물 제거 후 안전통로 확보요망	6.21~6.22	16
46	동대문구 건축과	장안동 366-7번지 오피스텔 신축공사	◦ 품질에 대한 중요성을 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 품질목표나 방침, 관련 표어를 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표를 작성하여 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 하시기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 쾌적하게 유지될 수 있도록 기반구조관리상태 점검표를 작성 및 활용하기 바람. ◦ 기자재 수급계획과 공장검사 계획서는 공정계획을 참고하여 준공 시 까지 각 공종별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 지하1층 합벽 누수 부분 보수 바람 ◦ 지하1층 벽체 크랙부위 크랙케이지 부착하여 관리 바람 ◦ 지하2층 슬래브 하부 작은보(철골) 향후 방청여부를 검토바람 ◦ 철골보 끝단 부위 방청되지 않은 곳은 그라인딩 및 방청 도료 조치 바람 ◦ 철골 기둥부위 스터드 볼트 용접살 보완 바람 ◦ 철골보 하부 플랜지 부위 흙묻은 부위 청소하기 바람 ◦ 지상1층 벽체 철근 피복두께 부족 및 피복두께 과다부위 수정바람 ◦ 지하1층에서 지하2층으로 내려가는 가설통로 부분 폭이 너무 협소하므로 가설통로 별도 추가확보 하는 방안에 대해 검토바람 ◦ 일부기둥 모서리 후프철근 갈고리 여장길이가 부족하므로 표준시방서 상 철근 직경, 구부림 각도에 따른 길이 확보 바람 ◦ 일부 기둥 주근과 후프근이 밀착되지 않고 떨어져 배근되면 주근이 압축 작용 시 좌굴 등으로 내력 저하가 발생할 수 있으므로 기둥과 후프근을 밀착 시공하기 바람	6.20~6.21	14
47	서초구 주거개선과	신반포13차아파트 주택재건축정비사업	◦ 공사 근로자를 위한 휴게공간을 기반구조관리상태점검표에 추가하여, 관리하기 바람 ◦ 자재뿐 아니라, 불일치 공사에 대해서도 부적합보고서를 작성하여 관리하기 바람 ◦ 계단실부 벽체 연결부(이어치기 부위) 청소를 철저히 할 것 ◦ 철근 스페이서의 간격을 좀 더 가깝게 조정하고, 층과 만나는 부분의 철근 결속을 철저히 할 것 ◦ 장마대비 수방계획을 수립하기 바람 ◦ 다발배관이 밀집된 WALL의 구조 내력을 검토하기 바람 ◦ 슬래브 코어부위에 슬래브 오프닝 부분과 외벽사이에 배근의 정착 때문에 한 방향으로만 경사배근되어 있는데, X자 형태로 배근하여 주기 바람	6.23~6.24	7
48	강남구 재건축사업과	개포주공4단지 재건축 현장(개포프레지던스자이)	◦ 건설 자재가 최상의 품질로 시공될 수 있도록 보관자재 점검표를 작성 활용하여 월 1회 이상 점검 실시 바람 ◦ 전기실 접지단자함 접지선 및 단자측 분기회로 별 식별이 용이토록 회로표시 테이프 취부하여 향후 유지관리가 용이하도록 시공 바람 ◦ 변전실 전기설비 현황판을 설치하여 관리가 용이하도록 하고 안전표찰 및 위험표시판을 취부하여 사고예방을 철저히 하도록 보완 바람 ◦ Acess Floor 내부전선 Cable tray에 수납되도록 정리하기 바람 ◦ 바닥배관 절단부분 부속 체결하여 철저 시공 바람 ◦ 옥상 벽면 노출된 Box취부 위치에 수분이나 빗물 투입이 되지 않도록 시공하기 바람 ◦ 차량 통로쪽에 설치된 소화전함은 충돌로 인한 사고를 예방하기 위해 방지Pole을 설치하기 바람 ◦ 옥상 태양광 제어반 빗물로 인한 손상을 예방하기 위해 제어반 상부대를 제어반 전면에 돌출시켜 시공하기 바람 ◦ 옥상 출입문용 계단 단높이 조정바람 ◦ 태양광 판넬용 하부 찬넬 마구리 캡 설치 바람 ◦ 태양광 판넬용 기둥 베이스 플레이트 하부 무수축 몰탈 충전 및 볼트캡 설치 바람 ◦ 화장실 내부 배관주위 폼 충전하기 바람 ◦ 방화문틀 용접 시 단열재 훼손부위 보수하기 바람	6.23~6.24	13
49	강남구 재건축사업과	대치동 제1지구 주택재건축정비사업	◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 발생시 공사참여자가 변경된 요구사항을 인식할 수 있도록 설계변경 내용을 교육하시고, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 품질시험계획서와 품질검사 실적 보고서에 철근 시험항목인 ‘무게’를 추가하여 양식을 일치시키기 바람 ◦ 품질시험 검사대장에도 철근 시험항목인 ‘무게’와 ‘치수’를 포함시켜 기록 관리 하기 바람 ◦ 지하층이 있는 지붕층과 건물1층 외벽 방수 치켜올림 높이는 마감면(포장, 화단 등)에서 20cm이상 높게 시공하고, 수직벽체 방수재료가 탈락되지 않도록 방수보호판 시공을 견고하게 조치바람 ◦ 건물 지상층 인방보 주근과 늑근 결속을 견고하게 시공하고 보, 기둥, 슬래브의 유효깊이를 검토하여 철근피복두께를 철저히 검측바람 ◦ 슬래브 거푸집 조기 해체를 위한 Filler 동바리는 절대 해체 후 지주바꾸어 세우기를 금지하고, 3개층 이상의 슬래브에 수직선상에 동바리를 설치바람 ◦ 보드형 단열재는 콜드브릿지 예방을 위해 일정기간 숙성 후 시공바람(ex) LH공사 : 6주) ◦ 외벽 수평 시공 이음 불량 구간 페인트 마감 전 탄산에폭시로 보수 바람 ◦ 외벽 수직이음 부분 표면처리된 부분 팽창지수재 시공으로 누수를 방지할 것 ◦ 외벽 파치 방수부분 Formtie Pin 제거 후 도막 방수을 철저히 할 것	6.28~6.29	11
50	구로구 건축과	힐스테이트 신도림역 센트럴 오피스텔 신축공사	◦ 기반구조관리상태점검표에 공사 근로자를 위한 휴게공간 점검항목에, “청결 및 시설물의 상태 등”을 추가하기 바람 ◦ 7월 중으로 골조공사 시공계획에 대해 협력업체 근로자 교육을 실시하고, 교육자료와 교육결과를 제출하기 바람 ◦ 공장검사가 필요한 주요 건설자재(건축, 전기, 기계, 토목 등)는 계획 및 실적을 준공시까지 누적하여 관리하기 바람 ◦ 구조물내 주요균열은, 균열게이지 및 표찰을 부착하여 관리하기 바람 ◦ 계단참 하부 콘크리트 수평이어치기 부위, 보수하기 바람 ◦ 벽체 콘크리트 수평이어치기 부위, 레이턴스 및 골재 등 제거 후 시공하기 바람 ◦ 절곡된 철근은 바르게 펴서 시공하기 바람 ◦ 철근배근 상세도와 SPS철골 상세도는 책임구조기술사가 확인 후 매장마다 서명하기 바람 ◦ 원구조계산서와 SPS 구조계산서를 총괄적으로 검토확인하기 바람 ◦ 슬래브 콘크리트 수직이어치기 부위, 흘러나온 콘크리트 제거 후 시공하기 바람 ◦ 시스템 동바리 상부 U헤드는 쐬기 목재 또는 각재로 보강하기 바람 ◦ 철근에 부착된 시멘트 잔재물 제거하기 바람 ◦ 지하층 콘크리트 미타설 구간에 빗물유입 방지용 모래주머니를 설치하고 펌핑하기 바람 ◦ 계단실 계단참 부위에 가설 H-BEAM 부위는 상부측 마감을 검토하여 시공하기 바람 ◦ POST + DECK 조인트 부위, 유출된 레이턴스 보수하기 바람 ◦ 위험구역 구간, 관리책임자 선임 및 시건장치하기 바람	6.28~6.29	16
51	도시기반시설본부 토목부	동부간선도로(창동~상계구간) 지하차도 건설공사	◦ 품질관리계획서 배포현황(발주청, 협력업체 등)을 관리하기 바람. ◦ 공사 근로자를 위한 휴게공간을 기반구조관리상태점검표에 추가하여, 관리하기 바람 ◦ 사업과 관련하여 생성된 자료를 활용하여 데이터분석 보고서를 작성하기 바람 ◦ CIP 철근망 결속선을 결속 후, 안쪽으로 넣어서 피복에 노출되지 않도록 할 것 ◦ 지장물 조사를 넓게 한 구간(약 4m) 천공장비 작업시, 발판으로 사용하는 철판을 횡으로 설치하여 전도위험을 방지하기 바람 ◦ CIP 주철근의 이음부를 강결시켜 강성을 증대시키고, 겹이음은 철근의 피복두께를 유지할 수 있도록 시공하기 바람 ◦ OX 구간은 매우 단단한 지반인 반면, U-TYPE 구간은 연약한 지층을 형성하고 잇음(시추 주상도 참고), 이에 따른 기초형식 검토가 요망됨	7.5~7.6	7
52	도시기반시설본부 방재시설부	국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사	◦ 중점품질관리 공종에 투입되는 인원에 대해 공사 작업자 자격부여 평가서를 활용하여 자격인정을 관리하기 바람 ◦ 이상강우 등 공사장 침수예방 대책으로 강우강도 100년 빈도 기준으로 침사조 및 현장 펌프 용량 계산 검토 바람 ◦ 신축이음부 관련하여 도면번호 S-348설치기준에 따라 현장 조치 바람(채움재 T=20mm+수팽창지수재+실런트) ◦ 위험물 저장소 소화기 미비치, 공병 수와 실 병수 상이 등 관리상태가 미흡하므로 조치바람 ◦ 복공 단차부 및 아스팔트 포장체 손상부 재포장 바람 ◦ 공동구 벽체 B4 표면결함 발생(녹물, 백태 등) 조치바람 ◦ 여의동 방향 적치된 폐기물 반출 바람 ◦ 중첩구간 TY-12위치에 버팀보 1단이 미설치된 구간이 있음. 전후 구간과의 버팀보 설치개념이 상이하며 해체 시 안정성이 우려되므로 미설치 사유 확인 및 필요 시 추가 보강 바람 ◦ 설계 시 기존 신월IC-경인 제2 지하차도의 기존 터널에 대한 계측계획이 없었으나 현장에서 계측계획을 수립한 상태임. 계측관리 체계상 기존 터널 관리주체와의 업무협력 방안을 수립할 필요가 있는 것으로 판단됨	7.5~7.6	9
53	도시기반시설본부 방재시설부	국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 건설공사(1공구)	◦ 현장내 인력변동에 따른 업무분장 개정시 내부결재(최종결재권자 확인)을 득하고 문서관리지침에 따라 문서번호 기입 후 문서등록대장에 기록하여 누적 관리 바람 ◦ 교육훈련운영계획서를 교육대상별로 구분하여 직무교육,공통교육, 협력업체 교육이 포함되도록 작성,관리 하기 바람 ◦ 공장검사계획서는 전체년도 계획을 년도별로 구분하여 주요 자재가 모두 포함되도록 공장별로 계획 수립 바람 ◦ 검교정관리대장은 반출일자, 반출사유를 기재하고 건설사업기술인의 확인을 받아 관리하기 바람 ◦ sta 1+750 구간, 토류판 배면 토사 다짐 및 구배를 정리하여 우수 침투를 방지하고, 작업자의 통로를 확보 ◦ 현장에 반입되는 토류판은, 규격 등 품질검사를 실시하여, 규격 미달품을 반출하기 바람 ◦ sta 1+325 구간, BOX 우측부 되메움 부위는 폭이 좁아 작업이 어려우므로, 되메움 계획에 따른 다짐을 실시하고 다짐이 가능한 상부층은 규정에 맞게 다짐을 하기 바람 ◦ sta 1+780 구간, 띠장 연결부가 단차가 발생할 경우에, 연결방법을 검토하고 샵드로잉을 작성하여 감리승인 후 시공하기 바람 ◦ 공구 시점부의 BOX, 상부 Conc 타설 미흡 - BOX 상부 타설시 다짐불량으로, 브레이딩 현상이 발생한 것으로 보이는바, 해당 부위를 고강도 몰탈 등으로 보강요망 ◦ H-PILE에 토류판을 정착시킬 것 ◦ H-PILE 및 스트럿 등 강구조물 안전시설 미흡 - 노출된 강구조물로 인해 작업자의 부상이 발생되지 않도록 안전시설 보강할 것	7.12~7.13	11
54	도시기반시설본부 방재시설부	국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 건설공사(2공구)	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 품질관리계획이 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 품질시험 장비가 반출되거나 검교정필증을 받을 때 이에 대한 내용을 검교정 관리대장에 기록하고 감리원의 서명을 받아 관리하기 바람 ◦ 폐기물 처리하는 현장 내 안전시설 조치 필요 ◦ 일부 손상된 부직포 보수하기 바람 ◦ 슬라임 건조부 분진발생 방지 대책과 먼지 등이 외부로 유출되지 않도록 방지 대책을 강구하기 바람 ◦ 시험장비 고정 등 유효성 확인 필요(저울, 자동다짐기 등) ◦ 시험실 항온 항습 및 양생수 폐기 방안 확인하기 바람 ◦ 복공판 미끄럼방지 포장은 추후 전구간 시공 바람 ◦ 토류판 품질 시험 의뢰 할 것 ◦ 선유고가 철거 중 코어홀 덮개 일부 파손된 부분 보완 바람 ◦ 고가 철거 절삭작업이 9~10월경 삼익아파트 부근에서 작업 예상되므로 소음, 민원대비 에어방음벽 등 설치 검토 바람	7.12~7.13	13
55	강남구 재건축사업과	개포1동 주공아파트 주택재건축정비사업(현대)	◦ 품질관리계획서 배포현황(인허가청, 발주자, 감리단, 협력업체 등)을 관리하기 바람(수령자의 서명 기재) ◦ 품질관리계획서 제정 및 개정날짜는 발주자(조합) 승인 날짜를 기준으로 관리하기 바람 ◦ 기반구조관리상태점검은 해당 시설을 담당하는 담당자 또는 담당팀별로, 각각 실시하고, 점검자의 서명을 기재하여 관리하기 바람 ◦ 공사 근로자를 위한 휴게공간을 기반구조관리상태점검표에 추가하여, 관리하기 바람 ◦ 기반구조관리상태점검은 시설별로 구체적인 점검내용을 기재하여(관리상태, 시설유무, 작동유무 등) 점검하기 바람 ◦ 선임된 품질관리자는 건설공사 품질관리와 관련된 본연의 업무만 수행하도록, 감리단이 지속적으로 지도점검을 실시하기 바람 ◦ 설계도서 배포현황(발주자, 감리단, 협력업체 등)을 관리하기 바람 ◦ 골조공사(철근배근 등) 시공계획에 대해 7월 중으로 시공사, 감리사, 협력업체 작업근로자 등 공사관계자 전체교육을 실시하고, 교육자료 및 교육결과보고서를 제출하기 바람 ◦ 시공사의 온라인 시스템(HPMS) 상 입력되어 있는 자료를 출력하여 2023년에 우리사업소 점검시 제시해주기 바람 - 공장점검계힉 및 점검결과 보고서, 부적합 보고서, 데이터분석 보고서, 건설공사 운영성과 보고서 등 품질관리계획 26개 항목과 관련된 사항 일체 ◦ 품질시험실내 구비되어 있는 검교정 장비 2세트는, 세트별로 날짜를 달리하여 검교정을 실시하기 바람 ◦ 슬라브 누수부위 보수보강 필요 ◦ 소화설비BOX와 조적벽체간 간섭으로, 재시공이 이루어지고 있는바, 건축, 전기, 설비 등 공종 간 사전협의하여 설계 확정 후 공사를 진행하기 바람 ◦ 조적벽체 줄눈부위, 밀실하게 시공하기 바람 ◦ 설비 파이프 주위 단열재 밀실하게 충진하기 바람 ◦ HOIST 작동불량 사항, 보수하기 바람 ◦ 건축물 내외 고여있는 다량의 빗물, 제거하기 바람 ◦ 기둥내 철근 적정 피복두께 확보할 것 ◦ 보의 전단 보강근 하부구간, 철근 결속작업 보완	7.14~7.15	18
56	강남구 재건축사업과	개포1동 주공아파트 주택재건축정비사업(현산)	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 발생시 공사참여자가 변경된 요구사항을 인식할 수 있도록 설계변경 내용을 교육하시고, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 방화문 공장점검에 대한 점검체크리스트의 점검결과가 누락되어 있으니, 보완조치 하시기 바람. ◦ 중점 품질관리 공종에 투입되는 작업자는 자격부여 평가서를 활용하여 자격 인정을 관리하기 바람 ◦ 건설 자재가 최상의 품질로 시공될 수 있도록 보관자재 점검표를 자재 특성별로 체크리스트를 작성하여 점검 실시 바람 ◦ 철근 결속선을 외부쪽이 아닌 내부쪽으로 접어 넣기 바람 ◦ 외부철근의 야적은 받침대 위에 적재되도록 조치 바람 ◦ 작성된 수방계획서는 금번 장마비를 감안하여 재점검 작성 바라며 특히 물의 유도 및 집수와 펌프 개수 재산정 바람 ◦ 건물 외부의 보호망에 적치된 적치물은 수시로 제거하기 바람 ◦ 현대건설과 인접된 전체 대지에 대해 호우대책을 함께 수립바람 ◦ 외곽에 위치한 기둥의 일부 보조띠철근은 90‘+135’, 135‘+90’갈고리를 번갈아 설치 바람 ◦ 지하주차장 램프가 외부도로보다 레벨이 낮고 인접해 있어 폭우시 우수유입이 우려되므로 램프 진입로에 트랜치 뿐만 아니라 험프를 두어 외부 우수 유입을 차단하는 등 방안을 마련하기 바람	7.14~7.15	11
57	강동구 도시계획과	천호1 도시환경 정비사업	◦ 품질관리계획서 제정 및 개정날짜는 발주자(조합) 승인 날짜를 기준으로 관리하기 바람 ◦ 공사 근로자를 위한 휴게공간을 기반구조관리상태점검표에 추가하여, 분기마다 관리하기 바람 ◦ 골조공사(철근배근 등) 시공계획에 대해 7~8월 중으로 시공사, 감리사, 협력업체 작업근로자(작업근로자는 매달 교육 실시) 등 공사관계자 전체교육을 실시하고, 교육자료 및 교육결과보고서를 제출하기 바람 ◦ 공장검사가 필요한 주요 건설자재(건축, 전기, 기계, 토목 등)는, 점검계획 및 점검실적을 준공시까지 누적하여 관리하기 바람 ◦ 기자재 수급계획서(건축, 전기, 기계, 토목 등)는 계획물량 대비 실적을 계속 관리하여 후속 공종 및 목적물에 영향이 최소화되도록 작성 바람 ◦ 서중콘크리트 타설현황은 레미콘 제조회사 및 규격을 기재하여 관리 ◦ 자재뿐 아니라, 불일치 공사에 대해서도 부적합보고서를 작성하여 관리하기 바람 ◦ 슬래브내 굽혀진 상부철근은 바르게 수정하여 시공하고, 제대로 펼쳐지지 않을 경우에는 별도조치를 실시 ◦ 슬래브 수직이어치기 부위에 흘러나온 콘크리트 제거 후 후속공정 진행 ◦ 벽체 수평 콘크리트 이어치기 부위는 시방서에 따라 청소 후, 레미콘을 타설하고, 타설전에 굽혀진 수평철근은 바르게 수정하기 바람. 제대로 펼쳐지지 않을 경우에는 별도조치를 실시 ◦ 지하5층 기초상부, 균열발생 등 콘크리트 보양관리가 미흡함. 부직포 덮개 위 습윤 보양 조치 ◦ 지하 각층 슬라브에 균열이 발생함. 균열관리대장에 발생균열 현황을 입력하여 관리하고, 조치방안을 강구 ◦ 지하층 잭서포트 설치 위치가 가시설 배치 도면관 상이함. 도면에 따라 잭서포트 위치를 조정 ◦ 계단 거푸집 공사, 레미콘 타설전 동바리 검사 실시. 계단 동바리가 멍에 모서리에 접합 부위는, 멍에 중심에 만나도록 조치	7.19~7.20	13
58	강동구 도시계획과	성내3구역 도시정비형 재개발사업	◦ 현장 조직도내 구성원 변경시, 업무분장을 변경(개정)하여 현장내 최종 결재권자 결재를 받아 누적관리하기 바람. ◦ 검교정관리대장은, 검사장비, 측정장비 등 시험장비의 반출일자, 반출사유 등을 기재하여 감리자의 확인을 받아 관리하기 바람 ◦ 오피스텔동의 보철근 2단 배근 중, 하단근과 상단근의 간격이 10cm 정도로, 설계규정(순간격 2.5cm)을 초과하고 있어 보의 강성저하가 우려됨. 하단 철근과 상단철근의 순간격을 2.5cm 정도로 유지되도록 하단철근을 재배근하기 바람 ◦ 캔틸레버보의 상단 철근 정착이 이루어지지 않아 처짐 등의 안전 문제가 발생할 수 있음. 상단 철근을 직각으로 교차하는 보의 중심선을 넘도록 정착길이를 확보하기 바람(필요시 Hook 설치) ◦ 기둥 모서리 주철근과 후프철근의 간격이 이격하여 배근되어 주철근 내력 저하 등의 문제가 발생할 수 있음. 기둥 규격에 맞도록 주철근의 위치를 조정하고, 후프철근이 모서리 기둥과 밀착될 수 있도록 수정하기 바람 ◦ 철근 피복 SPACER 설치 철저. 피복두께 확보로 구조체 내구성 및 중성화 방지 ◦ 단열재 이음 및 손상부위, 우레아 폼 등으로 보수 철저히하여 열교현상을 방지 ◦ 스프링클러 헤드캡 교체설치(종이컵 -> 플라스택캡)	7.19~7.20	8
59	농수산식품공사 건설공사팀	가락시장 현대화사업 채소2동 건립공사	◦ 기반구조관리상태점검은 월단위로 실시하여, 보고서 작성 후, 감리 승인을 받아 관리하기 바람 ◦ 연간 교육계획서를 작성하여, 계획서에 의거 교육을 실시하기 바람 ◦ 주간단위로 환경영향조사보고서를 작성한 후, 감리자 확인을 받기 바람 ◦ 보관자재 점검표는 월단위로 실시하여, 감리 승인을 받기 바람 ◦ 현장내 설치된 철근기둥은, 레미콘 타설 지연으로 인해, 장시간에 걸쳐 우수에 노출되어 있는바, 보양조치하기 바람 ◦ 현장내 배근된 상태로 존치중인 슬라브철근 및 단열재는, 레미콘 타설 지연으로 인해, 장시간에 걸쳐 우수에 노출되어 있는바, 보양조치하기 바람 ◦ 반입된 자재(철근, 단열제, 데크플레이트, 일부 조립된 철근기둥 등)는 우수에 노출되지 않도록 고임목 및 덮개 등을 이용하여 보양조치 ◦ 주출입구는 공사차량과 근로자의 보행동선을 구분하기 바람 ◦ 기둥식 기초 주변 터파기구간은, 안전휀스를 설치하여 관리하기 바람 ◦ 현장내 보관중인 자재는 정리정돈을 통해, 근로자 보행동선 및 공사차량의 작업공간 등을 확보하기 바람 ◦ 철근 피복두께 불균일. 적정 규격의 피복두께 확보하기 바람 ◦ 후속공정으로 사용예정인 철근 보양조치 미비(cap 설치 등) ◦ 기둥 후프근 갈고리 각도 일부 미확보. 후프근 갈고리 각도 규정에 맞게 수정요망 ◦ 레미콘 타설전, 거푸집 하부 이물질 제거 ◦ 경질 우레탄폼 연결부위 충진 누락, 단열재 내외부 충진철저 요망 ◦ 단열재 및 데크플레이트 자재 보양 미비 ◦ 보 일부구간 표피철근 피복두께 부족, 철근긴결 불량. 콘크리트 타설시 철근 이탈 및 피복두께 부족에 따른 내구성 확보 부족. 추후 철근 부식 우려 있음. 시방 기준에 따라 최소 피복두께 확보하고 긴결재로 긴결 필요 ◦ 기둥 띠철근은 바닥에서 10cm이상 과다 간격으로 배근되어 있음. 구조도면 일반사항(또는 표준구조상세)에 따라 바닥(슬래브)에서 처음 배근되는 띠철근은 5cm 이하 간격으로 배근 필요	7.21~7.22	18
60	강서구 주택과	서울강서지구 민간참여 공공주택건설사업	◦ 균열관리대장에 ‘건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침’ 별지 제41호 서식에 따라 콘크리트 타설시 온도를 기록하여 관리하기 바람 ◦ 지하층 합벽구간 유로폼 웨지핀 일부 체결상태 불량으로 콘크리트 타설 시 측압 및 타설하중으로 해체 시 배부름 등 표면결함 발생이 우려되므로 타설 전 웨지핀 체결상태 전수점검을 실시하고 변형된 거푸집 사용금지(반출실시 등) ◦ 지하층 벽체 개구부 보강 일부 누락된 부분 구조 일반기준에 따라 수직,수평 보강 시공 철저히 하기 바람 ◦ 지하층 벽체 철근 및 PC기둥/보 상부 철근 일부 보양관리 미흡으로 철근에 녹이 발생했으므로 장기간 방치(외부) 금지 및 천막보양 실시 바람 ◦ 지하층 철근 고임대 및 스페이서 일부 누락된 부분 조치바람 ◦ (권고사항) 지상층 거푸집 해체 시 Filler Support 존치기간 준수하여 시방기준에 따라 소요강도 발현 확인 후 탈형 실시바람 ◦ 벽체의 수직철근 이음부위에서 수직철근 Dowel에 부착된 시멘트 페이스트 제거 후 이음철근 설치하고 타설 바람(철근 부착강도 확보에 필요) ◦ 벽체에 매립된 전기배관과 철근의 간격을 이격하고 과도하게 집중되는 전기배관을 분산시켜 철근의 피복확보 및 콘크리트의 충전율을 높여 콘크리트의 내구성을 확보 바람 ◦ 벽체의 수평철근의 단부 정착 누락 또는 오시공, 콘크리트 구조기준의 상세와 상이하므로 보완하기 바람 ◦ 경사 거푸집에 설치된 동바리 이음부위 상하부 축방향이 일치되도록 시공하여 안전성을 강화하기 바람	7.21~7.22	10
61	서초구 주거개선과	신반포3차, 경남아파트 주택재건축정비사업	◦ 골조공사 시공계획에 대해 8월 중으로 협력업체 근로자 교육을 실시하고, 교육자료 및 교육결과 보고서를 제출하기 바람 ◦ 건물지상층 층간 시공이음부 방수key, 일부 미흡부위는 보완바람. 방수 key(각파이브) 재부착. ◦ 건물지상층 슬래브 거푸집 Filler 동바리, 래브 거푸집 해체 후 지주 바꾸어 세우기를 금지하며, 3개층의 동바리 위치를 동일 수직선상에 설치바람. 슬래브 콘크리트 구조체 내력 확보. ◦ 건물지상층 슬래브 하부, 일부 콘크리트면이 평탄치 못한 부위가 있으므로 보완하기 바람. 해당 부위는 적합한 재료로 면처리. ◦ 건물지상층 콘크리트 타설은, 서중콘크리트 시공계획서의 양생방법에 따라 시공하여 소성수축, 건조수축 균열을 예방하기 바람. 콘리트면 습윤상태 유지. ◦ 일부 슬래브 콘크리트 타설예정 부위에, 전기, 통신 주름관이 한곳에 집중하여 몰려있는바, 2EA씩 묶어 간격을 넓혀서 콘크리트를 타설하기 바람 ◦ 계단실 상부가 OPEN된 상태이므로 지수시설을 설치하여 계단실 하부로 물이 유입되지 않도록 조치요망 ◦ 조적공사 전, 소화전에 비닐시트를 부착하여 보양조치하기 바람	7.26~7.27	8
62	서초구 주거개선과	신반포15차아파트 주택재건축정비사업	◦ 옹벽 배근 하부의 전선배관이 슬래브에 닿지 않도록 띄워서 설치 바람 ◦ 자재 양중 시 받침목을 설치 후 줄걸이 하여 자재의 낙하를 방지하기 바람 ◦ 벽체 철근 중에 띠철근이 필요한 부분은 수직철근 위치를 동일선상에 위치토록 하여 띠철근 배근 시공성을 개선하기 바람(상부층 벽체부터 적용) ◦ 지하층 top-down부분에서 철골기둥 제거가 필요한 부분은 제거 후 녹발생 방지를 위한 별도 조치를 실시하기 바람	7.26~7.27	4
63	도시기반시설본부 도시철도 토목부	진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사	◦ 기자재 수급계획은 사용 자재별로 준공년도까지 계획을 수립하고연도별로 자재실적을 관리하기 바람 ◦ 공장검사계획서는 주요자재가 모두 포함되도록 전체년도 계획을 년도별로 나누어 작성 관리 하기 바람 ◦ 검교정 관리대장은 반출일자, 반출사유를 기재하고 건설사업관리기술자의 확인을 받아 관리될 수 있도록 보완 바람 ◦ 작업구 #3 터널개구부 상단 암은 풍화되면 탈락의 위험이 우려되므로 사전 안전 조치 검토 바람 ◦ 작업구 #3 sta4+745 지점 지보재 고정철물 커팅 바람 ◦ 터널 내부 일부구간 배수로 정비 바람 ◦ 작업구 #3 B함(금곡제2) 상부는 뒷채움이 완료되고 하부는 뒷채움이 되지 않아 우수유입시 BOX유동이 있을 수 있으므로 BOX 상부에 가배수로를 설치하여 우수유입을 방지하기 바람 ◦ S/C누수(백태현상)부위는 누수량 및 지속여부를 조사파악하여 다발부위는 방수포를 설치 포집하여 유도배수로 원활환 배수처리 환경 유도 ◦ 함수량 과다로 작업 통행환경이 열악한 부분은 양질도, 쇄석 등으로 다짐포설하여 작업 통행 환경 개선 요함	8.4~8.5	9
64	도시기반시설본부 도시철도 토목부	진접선(4호선연장) 차량기지 2공구(차량기지) 건설공사	◦ 작업장에서 외국인 근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화 할 수 있도록, 의사소통 관리기준에 외국인 근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 개천내기와 연결된 수로박스의 하부슬래브 타설 후 추가 시공되는 벽체 콘크리트 타설 전 시공이음부위 이물질이 완전히 제거될 수 있도록 조치바람 ◦ 수로박스 상면의 도막방수가 시공 중 일부 유실되어 추후 토공작업 전 도막방수 보수작업이 필요함 ◦ 시공 중 사면 안정을 위한 덮개가 금번 우수로 인해 일부 유실된 부분이 있으므로 이에대한 복구 조치 바람 ◦ 우수박스 상부 스틸 그레이팅 뚜껑과 본체 사이 이격이 적정한지 확인 바람 ◦ 공동구 외부 방수가 도막방수 2회 시공으로 적정 두께 확보가 되었는지 확인 바람 ◦ 판넬식 옹벽이 설치되는 대절토(높이40cm) 구간은 향후 유지관리에 도움이 되는 조기경보시스템(유지관리계측, CCTV등) 설치를 검토하기 바람(행정안전부에서 생활 SOC사업으로 조기경보시스템 구축사업을 각 자차체를 대상으로 사업 시행 중) ◦ 보강토 옹벽 하부 개거식 우수암거 인접부 토사유입 방지를 위한 조치가 필요함(현재 안전울타리 설치 준비중)	8.4~8.5	8
65	도시기반시설본부 도시철도 토목부	별내선(8호선연장) 1공구 건설공사	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 품질시험계획서의 시험 횟수는 계획대비 확인 방법이 현장시험, 의뢰시험, KS 인증성적서 대체로 나누어 표기되어 총 시험 횟수가 산출되도록 수정하기 바람 ◦ 시점부 아스팔트 포장 균열 및 파손 발생부위는 포장 하단면 공동여부 확인 후 재포장 바람 ◦ 가시설 흙막이 측벽파일(엄지말뚝) 인발 시 진동 및 공간 발생으로 주변 침하가 우려되므로 상세한 인발계획(유아장비사용, 공간채움 등)을 수립 후 시행 바람 ◦ 현장 내 되메우기용 토사 반입 시 가시설 지보재에 악영향이 없도록 하고 지보재에 쌓인 토사 하중물은 제거토록 하며 굴착 바닥에 고여있는 물은 자연배수토록 조치할 것 ◦ 현장 내 설치되어 있는 계측기의 보호박스를 견고하게 설치하고 시건 장치가 미설치 되어있으므로 보완할 것 ◦ 현장 내에서 발생되는 건설폐기물은 분류작업 후 사토처리 바람 ◦ 4층 연립주택 부분에 토사 일부가 유동되는 것은 보강조치하여 지반 거동 및 침하가 발생하지 않도록 조치바람 ◦ 되메우기 토사에 대한 실험을 통해 다짐에 적합성 여부를 확인 후 사용토록 하고 다짐은 단계별로 시행하고 다짐시험을 통해 확인바람	8.9~8.10	9
66	도시기반시설본부 도시철도 토목부	별내선(8호선)건설공사(2공구)	◦ 공사 근로자를 위한 휴게공간을 기반구조관리상태점검표에 추가하고, 분기단위(반기 -> 분기)로 점검을 실시하기 바람 ◦ 철근 결속선의 간격이 넓어 일부 움직이는 주철근이 있으므로 레미콘 타설시 철근 간격이 변화될 수 있으므로, 적정한 간격으로 철근을 결속하기 바람 ◦ 결로수에 의해 치핑부 채수가 있으므로, 레미콘 타설시 결로수를 제거하고 레미콘이 타설될 수 있도록 조치하기 바람 ◦ 집수정 상부에 설치된 그레이팅에 작업자가 인식할 수 있도록, 경계선 설치 및 그레이팅이 움직이지 않도록 고정하여 주기 바람 ◦ 콘크리트 타설시 다짐불량으로 브리딩 및 레이턴스 발생하여 강도저하가 우려되는바, 이어치기 부위는 타설전에 치핌 등의 방법으로 레이턴스를 제거후 콘크리트를 타설하기 바람 ◦ 콘크리트 타설시 다짐불량으로 인해 재료분리가 발생하여 콘크리트 강도 저하가 우려되는바, 재료분리 구간은 고강도 몰탈 등으로 보수 및 보강하기 바람(신축이음 하부)	8.9~8.10	6
67	동작구 도시개발과	흑석3구역 주택재개발 정비사업	◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 방바닥 전층 전수조사 실시 후 크랙 보수바람 ◦ 전층 화장실 상부등 전선연결 플렉시블 조치바람 ◦ 옥상 상부 누름 콘크리트 바닥 크랙 보수바람 ◦ 어린이의 건강한 놀이환경 조성을 위해 놀이터 평탄면의 구배 및 배수시설 관리를 철저히 하기 바람 ◦ 저층 주민들의 채광을 위해 건물 주변에 교목을 식재할 때 건물외벽으로부터 충분히 이격하기 바람 ◦ 남부지방에서 굴취한 수목의 경우 월동대책에 만전을 기하기 바람	8.11~8.12	7
68	동대문구 주거정비과	이문1구역 주택재개발 정비사업	◦ 현재 진행중인 공종을 기준으로 감리단 승인하에 중점품질관리 공종을 설정하여 관리하기 바람 ◦ 주차장 슬래브 상부 크랙 발생부위, 보수 및 균열관리를 철저히 하기 바람 ◦ 엘레베이터 홀 철근부위 콘크리트 잔재물 제거하기 바람(부착도 증진 요망) ◦ 지하3층 벽체 지수판 위치 조정해서 시공하기 바람 ◦ 공동주택 지하3층 기초상부 레이턴스 제거하여 콘크리트 부착도를 고려하기 바람 ◦ 지하3층 콘크리트 벽체 피복두께 확보 및 철저히 점검하기 바람 ◦ E/A, CIP 등 전반적으로 시공 및 품질관리 상태가 양호하나 발파 및 브레이커 진동 등으로 인한 긴장력 이완을 확인 할 수 있는 대표단면이 몇 개소 이므로 주기적으로 육안점검 및 관찰을 할 수 있는 점검통로 등 설치를 검토하기 바람 ◦ 현장 내 일부구간 배수가 원활하지 않은 구간이 있으므로 배수로를 정비하여 채수가 발생하지 않도록 관리하기 바람	8.11~8.12	8
69	동대문구 주거정비과	이문3재정비촉진구역 주택재개발 정비사업(현산)	◦ 품질관리계획서 배포현황(인허가청, 발주자, 감리단, 협력업체 등)을 관리하기 바람 ◦ 품질관리계획서 제정 및 개정날짜는 발주청 승인 날짜를 기준으로 관리하기 바람 ◦ 기반구조관리상태점검표를 분기 단위로 작성하여 관리하기 바람 ◦ 공장검사가 필요한 주요 건설자재(건축, 전기, 기계, 토목 등)는, 점검계획 및 점검실적을 납품회사별로 준공시까지 누적하여 관리하기 바람 ◦ 기자재의 추적관리 및 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수자(시공사)와 감리원 모두 레미콘 송장에 성명을 기재하기 바람 ◦ 보관자재 점검표를 작성하여 관리하기 바람 ◦ 계측기 보조덮게 자물쇠, 결속하기 바람 ◦ 코너스트러트 2단 설치가 되지 않은 상태로, 과굴착이 되었는바, 조기에 2단 스트러트를 설치하기 바람 ◦ 토공사 경사면을 상부부터 정리하여 지반을 안전하도록 하기 바람 ◦ 숏크리트는 ①1차 타설(T=750), ②와이어메시 시공, ③2차타설 시행, Rebound 최소화 도모하고 불량개소는 보수하기 바람 ◦ 역타구간(지하2층) 철골보 부재(횡방향)는 파일 변위 최소화를 위해 조속하게 설치하기 바람 ◦ 터파기시 굴착소단(수동영역)을 적용하여 공사의 품질을 확보하기 바람(알기쉬운 건설공사 p203쪽 참고) ◦ 암처리(breaker)시 물 뿌리기를 시행하고 소음, 진동 및 분진을 최소화하기 바람 ◦ 발파용 천공작업(crawler 사용)시 비산 방지막 설치 후 작업하기 바람	8.16~8.17	14
70	동대문구 주거정비과	이문3재정비촉진구역 주택재개발 정비사업(GS)	◦ 공사 근로자를 위한 휴게공간을 기반구조관리상태 점검표에 추가하여 관리하기 바람 ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 균열관리대장은 “건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침” 별지41 양식을 사용하여 콘크리트 타설 시 온도 등을 포함하여 작성 및 관리하기 바람 ◦ 안전난간 비계파이프 단부에 안전보호캡 시공바람(외부계단 동일) ◦ 띠장 이음 맞대음용접 등 용접검사 실시 바람 ◦ 차수(ASG) 구간 누수가 심한 부위 보강 후 공사 진행 바람 ◦ 띠장과 소단까지 굴착깊이 토사구간 0.9m 암구간에 대해 설계사 검토 의뢰 바람 ◦ 대좌길이가 하브띠장 Web에도 못미치므로 설계 확인 바람 ◦ 지하층 바닥 슬래브와 후시공 기둥 조인트 부위 시공오차에 따른 틈새 발생부위는 최종마감 Shop Dwg 작성(construction joint) 감리단 승인 후 마감처리 하기 바람 ◦ 지하층 외벽 역타공법에 따른 상하 벽체 조인트 부위는 세부 Shop Dwg 작성 및 밀실시공 되도록 처리 바람 ◦ 지하층 바닥 슬래브 골조공사 시 발생되는 construction joint 부위는 시방에 맞도록 연결시공하기 바라며 최종 마감 전 Joint 처리계획을 Shop Dwg 작성 감리단 승인 후 마감처리하기 바람	8.16~8.17	11
71	강동구 주택 재건축과	고덕강일 1BL 제일풍경채 아파트 신축공사	◦ 품질목표 달성을 위한 추진계획을 공정을 참고하여 수립하고 품질목표 달성도를 주기적(분기별)으로 확인하고 실적 관리하시기 바람. ◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람.(점검일 현재 보관위치 및 관리책임자 미지정 됨) ◦ 보관자재 점검표를 작성하여 시공에 사용될 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되는지 여부를 품질관리계획서에 명시된 주기에 따라 점검하기 바람 ◦ 현재 레미콘에 대한 불일치한 자재 관리만 서면으로 하고 있으므로 다른 공사용 자재 뿐만 아니라 시공에 관련된 불일치 사항을 서면으로 문서화 하여 기록 관리 하기 바람 ◦ 철근의 이음부 및 교차부에 사용한 결속선을 구조체 안쪽에 집어 넣도록 조치 바람 ◦ 기둥과 슬래브 사이의 STUD응력을 검토 바람 ◦ 계단실 벽체 이음부에 골재분리가 일어나지 않도록 타설 투입부를 가급적 낮게 하여 타설하기 바람 ◦ 콘크리트 바닥 슬래브의 중공부가 콘크리트 타설 시 뜨지 않도록 앵커에 주의 바람 ◦ 지하부 비상탈출을 위한 유도등을 보완하기 바람 ◦ 수직철근 수직도, 피복두께 파손, 벽체 콘크리트 손상 보수 바람 ◦ 감리 검측 결과 절차 준수 보완하기 바람 : 시공단계별 검측요망 – 검측대장 및 보완 시정 재검측 승인서 ◦ 옹벽하단, 슬래브, 계단 등 바탕청소 철저 및 계단실 콜드조인트 누수 처리하기 바람 ◦ 타워크레인 양중 로프 균형대를 설치하여 사용하기 바람 ◦ 레미콘 불량 폐기처리 시 책임자 서류 서명을 받기 바람	8.18~8.19	15
72	강동구 주택 재건축과	힐스테이트 리슈빌 강일(고덕강일5BL)	◦ 현장 조직도내 구성원 변경시, 업무분장을 변경(개정)하여 누적관리하기 바람 ◦ 품질관리계획서 배포현황(인허가청, 발주자, 감리단, 협력업체 등)을 관리하기 바람 ◦ 협력업체 근로자를 대상으로 하는 골조공사(철근배근 등) 시공계획 교육을 매월 실시하기 바람(연간 교육훈련계획표에 기재) ◦ 공장검사가 필요한 주요 건설자재(건축, 전기, 기계, 토목 등)는, 점검계획 및 점검실적을 납품회사별로 준공시까지 누적하여 관리하기 바람 ◦ 공종별 시공계획서(최종본)를 출력하여 관리하기 바람 ◦ 기자재의 추적관리 및 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수자(시공사)와 감리원 모두 레미콘 송장에 성명을 기재하기 바람 ◦ 균열관리계획에 의거, 거푸집 탈형 후 최초 2개월내는 1개월 주기로 균열조사를 실시하기 바람 ◦ 계단실 Filler Support 존치하기 바람 ◦ 옹벽 수직철근 피복 확부 부족함. 거푸집 조립 전 철근 피복 스페이서 설치하기 바람 ◦ 철근배근 수평근 누락. 거푸집 조립 전 확인 후 배근 조치하기 바람 ◦ 기둥, 벽체 콘크리트 타설시 Dowel에 부착된 시멘트 페이스트 제거 후 상부층 철근이음을 실시하고, 콘크리트를 타설하기 바람(철근과 콘크리트 부착강도 확보를 위해 필수) ◦ 벽체, 기둥 피복두께 과소 및 과다(최소 10mm ~ 60mm). 철근 내구성 확보 및 부재 설계강도 확보를 위해 적정 피복두께 확보 필요함 ◦ 벽체, 기둥 내부 이물질(콘크리트 잔재, 쓰레기 등)제거 후 후속 콘크리트 타설 ◦ 슬래브 상부근 피복과다(50mm). 스페이서 적절히 설치하기 바람 ◦ 보 전단보강근 크로스타이 하부와 주근 결속 불량. 추가결속하기 바람 ◦ 건축법시행령 91의3조에 따라 시행되는 특수구조물에 대한 골조공사 중 감리협력은 법이 지정하는 해당 층에 대하여 실시하기 바람	8.18~8.19	16
73	동작구 주택과	상도동 산65-74번지 일대 민영주택 건설공사	◦ 현장 품질활동에 적극 동참할 수 있도록 품질방침 및 목표에 대한 교육(현장내 전직원, 협력사 등 포함)을 실시하여 기록관리 하기 바람 ◦ 공장검사계획서는 주요자재가 모두 포함되도록 공장별로 자재수급 계획과 연계하여 전체년도 계획을 년도별로 나누어 작성 관리 하기 바람 ◦ 검교정 관리대장은 반입,반출일자,사유를 기재하고 감리의 확인을 받아 관리될 수 있도록 보완 바람 ◦ 지하외벽 시공을 위한 띠장(어스앵커) 철거시 일시적인 캔틸레버 건축옹벽의 안전성을 검토한 후 띠장 제거 바람 ◦ 골조 이어치기 부분중 슬래브(또는 보)가 장스팬 위치가 될 경우 잭 서포트를 각각 2set를 배치하여 예기치 못한 상황애 대비하기 바람 ◦ 철근에 녹 및 이물질로 인한 콘크리트 부착력에 영향을 미치는 부분은 이물질 제거후 콘크리트 타설하기 바람 ◦ 건물지상층 외벽 창호개구부 상인방 수평근과 늑근 결속을 견고하게 시공 바람 ◦ 건물 지상층 슬래브 거푸집 필러 동바리는 슬래브 거푸집 해체 기준강도 도달시까지 해체를 금지하고, 동바리는 동일 수직선상에 수직으로 설치 바람. ◦ 현장에 시공이음부 다웰바를 장기간 노츨시 보호캡 및 비닐을 설치하여 부식방지 조치 바람	8.23~8.24	9
74	용산구 도시계획과	국제빌딩주변 제5구역 도시정비형 재개발사업	◦ 품질관리계획서는 현장 내에서 품질활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자에게 배포(협력업체 포함)하고 배포결과를 대장에 기록관리 하기 바람 ◦ 보관문서 목록표를 작성하여 문서의 보관위치, 보관형태 뿐만 아니라 문서관리 책임자를 작성하어 기록관리 하기 바람. ◦ 건설 자재가 최상의 품질로 시공될 수 있도록 보관자재 점검표를 작성 활용하여 월1회 이상 점검 실시 바람 ◦ 품질시험계획서에 공사현장 사용 자재인 커플러가 누락되어 있으므로 반영하여 품질시험을 실시하기 바람 ◦ 지하2층과 지하3층 기둥 및 코어 옹벽 연결부 신구 콜드조인트 처리방안을 수립(내부 콘크리트 침하부분에 대한 대책)하기 바람 ◦ PRD Stud bolt 품질관리 확인 및 철근 배근 전 Scale 처리 바람 ◦ S/W 벽체 누수처리 방안 수립하기 바람 ◦ 콘크리트 타설 시 비닐 래핑 처리하여 페이스트 오염 방지대책 수립하기 바람 ◦ 작업지 인식 부족으로 자재(철근) 관리가 미흡하므로 받침대 설치 후 자재를 적치하기 바람	8.23~8.24	9
75	도시기반 시설본부 도시철도 사업부	동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사(1공구)	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 업무분장 문서에 직원 개개인의 분장사무가 명확히 부여되도록 담당자와 대직자를 지정하고 서명확인을 하시기 바람. ◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 교육훈련은 직무, 협력업체, 공통교육으로 구분하여 실시할 수 있도록 교육훈련계획서를 보완하시기 바라며, 교육훈련실시후 결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영에 관련된 사항에 대하여 내외부 의사소통이 적절한 방법으로 실행될 수 있도록 의사소통관리기준을 수립하시기 바라며, 특히 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 포함하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 제작공장에 방문하여 구매품을 검증할 경우 제품별, 공장별, 검사시기 등을 포함한 공장검사계획을 수립하고 공장검사를 실시하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 중점품질관리 대상이 공사 특성에 맞게 지정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 수립하시기 바람. ◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 보완하시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 월2회 이상 주기적으로 점검하시기 바람. ◦ 품질관리계획에 따라 검사 및 시험대상의 항목, 합격판정기준, 빈도, 사용장비 및 기법과 책임자, 발주자/감리자의 입회시기, 장소, 방법이 특성에 맞게 설정 되도록 검사 및 시험계획(ITP)를 수립하시기 바람. ◦ 104 환기구 종점방향 막장 조도유지 요망. ◦ 104 환기구 종점부 PE 블록 상부 윙카 연장 요망 ◦ 104 환기구 강관스트럿트 이음부는 변형체크를 위해 변형율계를 적정개소 1개소를 선정하여 설치, 계측하시기 바람. ◦ 104 환기구 흙막이 4~5단 사이의 엄지말뚝과 토류판 이격부위의 틈새 보강 요함. ◦ 104 환기구 steel rib 배면 숏크리트 충진 보완(변형전 충진 요함) ◦ 인접도로의 침하구간 계측기 설치 - 토류판의 누수가 심해 토사가 유출됨에 따라 주변도로의 침하 발생하였으니 도로에 계측기를 설치하여 침하량을 관측하고 필요시 강판으로 보강 검토 ◦ 녹발생된 철근의 품질관리 철저 - 지상에 노출된 철근에 녹발생시 con’c 강도 및 부착력에 영향을 줄 수 있으므로 부득이 노천 적재가 불가피할 경우 덮개를 덮어 녹발생을 방지하고 con’c 타설시 녹제거 요망. ◦ H파일 주변 부상방지를 위한 안전시설 설치 - H파일의 가각이 날카로워 안전 및 보호장치 없을시 부상이 우려되므로 H파일 각부분에는 위험표지판 및 휀스를 설치하여 작업자 부상 사전예방.	9.1~9.2	21
76	도시기반 시설본부 도시철도 사업부	동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장 입구나 공사 현장 내에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 품질관리자 2명(최순*, 이현*)에 대한 업무분장이 누락되어 있으므로 건설기술진흥법 시행령 제91조에 명시되어 있는 품질관리자의 6가지 업무 범위를 준수하여 업무분장을 실시하기 바람 ◦ 보관문서 목록표에 문서의 보관장소, 문서관리 책임자를 포함하여 작성하고 기록관리 하기 바람. ◦ 작업자의 자격기준이 작업특성에 맞게 설정되고 자격인정을 관리할 수 있도록 작업자 자격부여 평가서를 작성 및 활용하기 바람 ◦ 건설 자재가 최상의 품질로 시공될 수 있도록 보관자재 점검표를 작성 활용하여 월1회 이상 점검 실시 바람 ◦ 복공판의 단계별 설치로 중간단계에서 일시적으로 흙막이 설치구간이 필요한 것으로 판단되는 바 현장의 단계별 시공현황에 맞추어 설계 시공 보완 바람 ◦ 가시설 강재 연결부에 연결부 시공이 일부 누락되면 추후 굴착으로 인하여 보완작업이 어려워지므로 철저히 검사하여 누락이 없도록 조치 바람 ◦ (권고사항) 현장 현황과 설계의 차이에 따른 능동적인 대응을 위해 엔지니어링 및 shop drawing 팀을 운영한다면 성공적인 공사수행 및 안전관리를 위해 바람직할 것으로 판단됨 ◦ 106정가장 횡단보도 PE방호벽에 야간조명 추가하여 안전사고를 방지하기 바람 ◦ 107정거장 토류판 배면 뒤채움 조속히 시행 하기 바람 ◦ 108정거장 강재 천막덮기를 통해 부식을 방지하기 바람	9.1~9.2	11
77	도시기반 시설본부 도시철도 사업부	동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 환경관리담당자가 업무분장 문서에 지정되어 있지 않으므로 보완하시기 바람. ◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 교육훈련이 교육훈련운영기준표에 따라 직무, 협력업체, 공통교육으로 구분되고, 협력업체 교육이 공종별로 세분화되어 누락없이 실시될 수 있도록 교육훈련계획서를 보완하시기 바라며, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(토목, 건축, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 중점품질관리계획서 수립시 공종보다는 공종의 특정부위를 선정하여 작성될 수 있도록 하고 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 구조물별 콘크리트 타설현황은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지35호 서식을 준수하시기 바람.(슬럼프, 공기량 시험자와 28일강도 시험자를 구분할 수 있도록 보완할 것) ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 철제 안전계단 단부에 Non-Slip장치를 부착 바람. ◦ 우각부 사보강재(첫번째)는 길이가 짧아서(2m내외) Screw Jack 설치가 곤란하므로 직접 띠장에 설치하시기 바람. ◦ 토류판을 적기에 설치하여 배면토사가 유입되지 않도록하여 주시기 바람. ◦ 복공판 하부 지하매설물 매달기 시공 보완할 것. ◦ 지보재(원형강관STRUT) 조속히 설치 및 수동영역 확보할 것. ◦ 하수BOX 주변 침투수에 의한 세굴현상 방지할 것. ◦ 상수도관 지지말뚝 비지지길이가 과다하므로 보완할 것. ◦ S/C 조골재 세립분은 세척후 사용할 것.	9.6~9.7	18
78	도시기반 시설본부 도시철도 사업부	동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사(4공구)	◦ 근로자 휴게시설에 대한 기반구조관리상태 점검표를 추가하여 공사수행을 위한 적절한 작업환경이 유지될 수 있도록 조치바람 ◦ 균열관리대장은 ‘건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침’ 별지 제41조 양식에 따라 콘크리트 타설 시 온도 등을 추가로 작성하여 기입하기 바람 ◦ 검교정 관리대장은 시험장비 기기별로 반입 및 반출날자와 사유, 검교정 날자 등을 감리단에서 확인(서명)하기 바람 ◦ 품질시험계획서의 시험 횟수는 계획대비 확인 방법이 현장시험, 의뢰시험, KS 인증성적서 대체로 나누어 표기되어 총 시험 횟수가 산출되도록 수정하기 바람 ◦ 차량기지 가시설 공사 중 목재 토류판 구간 홈메우기 탈락구간에 대해서 숏크리트 타설 시 채움시공 보강을 하기 바람 ◦ 차량기지 구간 pswt pile 좌굴이 발생된 구간에 chammel보강 및 용접 보강하기 바람 ◦ 입출고선 종점부 복공판과 포장체 단차 발생부분 조속히 보수조치 바람 ◦ 보행자 통행구간 복공마개 미설치 부분에 대하여 추가보완 설치 바람 ◦ E/A용 보걸이, 차량기지 종점부 우측 일부구간 내민길이 부족부분 추가 보완조치 바람	9.6~9.7	9
79	중랑구 주택관리과	상봉동 109-28 역세권 청년주택 신축공사	◦ 작성된 설계도서를 협력업체 및 관련 업무 담당에게 배포하고 그 결과를 기록관리하기 바람 ◦ 중점품질관리 공종의 작업자 자격기준이 작업특성에 맞게 설정되고 자격기준에 적합한지 여부를 평가(작업자 자격인증관리)하여 배치하기 바람 ◦ 띠장하부 합판 제거하지 않은 부분은 제거하기 바람 ◦ 브레이싱 플레이트 볼트 체결 불량부 처리 필요 ◦ 고재 복공판 하부 부식여부 확인 바람 ◦ 띠장부와 버팀보부 안전점검 통로 설치기준 확인 및 조치 필요 ◦ 복공부 띠장 구 강재 볼트구멍 메우리 필요 ◦ 하중계(Load Cell) 반입 시 공인기관에 검정 및 교정여부 확인할 것 ◦ 계측항목별 계측관리기준(1차~3차)을 명시하기 바람(1차관리기준준치만 제시됨) ◦ 복공판 하부 Post Pile시공 오차에 따른 구조안전성 검토 도면 표기 수정하여 접수하기 바람(변경전,후 표기) ◦ 그렘셀 주위에 통행제한용 안전표지 설치 바람	9.15~9.16	11
80	서울시 건축기획과	현대자동차부지 특별계획구역 복합시설(GBC) 신축공사	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 환경관리담당자가 업무분장 문서에 지정되어 있지 않으므로 보완하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 그라우팅 주입수 over flow 방지하시기 바람. ◦ 계측기는 고정용 그라우팅 완료 후 초기치 재측정 바람. ◦ 굴착(open cut) 비탈면은 우기시 유실된 위치 보수 요망.	9.15~9.16	9
81	서울시 건축기획과	여의도동 27-2 업무시설 신축공사	◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 중점품질관리계획서 수립시 공종보다는 공종의 특정부위를 선정하여 작성될 수 있도록 하고 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 슬러리월 매립철근에 붙어있던 스티로폴이 아직 남아 있는 부분이 있으므로 다음 공정이 진행되기 전 모두 제거 필요. ◦ 커튼월 지지를 위해 철골보 하부에 PL을 용접하고 용접부분에 은분 도장이 되어 있는데, 층고가 높은 부분에 수평하중이 큰 부분이므로 방청페인트를 처리하는 것을 검토 바람.	9.20~9.21	4
82	강남구 재건축 사업과	홍실아파트 재건축정비사업	◦ 품질관리계획서 개정 시 품질관리계획 요건의 일부가 적용 제외된 항목과 사유에 대해 명시하고 인허가청의 심사 결과에 따른 발주자의 승인 서명(도장)을 받기 바람 ◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 현장 품질문서가 등록되고 관련업무 담당(협력업체 등)에게 배포,활용 여부를 확인하기 위해 문서관리 배포대장에 기록관리 하기 바람 ◦ 보관문서 목록표에 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급 뿐만 아니라 문서관리 책임자를 작성하여 기록관리 하기 바람. ◦ 주간 단위로 환경영향조사 결과서에 감리단 확인(서명)을 받아 환경관리에 대한 기록관리 하기 바람 ◦ 작업자의 자격기준이 작업특성에 맞게 설정되고 작업인정이 관리될 수 있도록 중점품질관리 공종에 대해 작업자 자격인증평가서를 작성하여 활용하기 바람 ◦ 검교정 관리대장은 시험장비 기기별로 반입 및 반출날자와 사유, 검교정 날자 등을 감리단에서 확인(서명)하기 바람 ◦ H-PILE 코너(No207)토류판 후면 뒷채움 실시 요망 ◦ 타워1호기 주변 D13mm 철근 보양조치 바람(녹방지 및 구부림방지) ◦ 벽체 철근 U-BAR 밀착 결속 바람 ◦ 4동 후면 흙막이 계측관리 철저 요망( 특히, ROAD cell DATA관리) ◦ 심하게 굽혀진 철근은 바르게 펴서 시공하고, 시공이 불가능한 부분은 별도 처리 바람 ◦ 콘크리트 이어치기 부분에 흘러나온 콘크리트는 수직으로 제거후 시공 바람 ◦ 콘크리트 기둥하부는 콘크리트공사 시방서에 따라 청소후 시공바람 ◦ 외벽전단철근은 135° 표준갈고리가 외부에 위치하도록 수정 바람	9.20~9.21	15
83	강남구 재건축 사업과	청담삼익아파트 주택재건축정비사업	◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 중점품질관리계획서 수립시 공종보다는 공종의 특정부위를 선정하여 작성될 수 있도록 하고 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 구조물별 콘크리트 타설현황은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지35호 서식을 준수하시기 바람. (슬럼프 공기량 시험자와 28일강도 시험자가 구분되어 성명, 서명을 할 수 있도록 서식 보완 요망) ◦ 사무실 앞측 흙막이벽 계측을 위한 계측기함이 경사면 하단에 설치되어 있으나 통로가 설치되지 않아 안전사고 및 적기 계측이 어려울 수 있으니 통로를 설치하시기 바람. ◦ 지하주차장 기둥 기초구간 암편 및 토사제거 지내력 확보하시기 바람. ◦ 보걸이 용접 일부 미흡 원인 : 작업자 용접(각장) 미인지 및 관리자 확인 미흡 대책 : 설계대로 각장 확보 용접시공(용접 비드 양호하게) ◦ 가시설(토공 단부) 일부 안전난간 보강 필요(추락위험 내재)	9.22~9.23	8
84	송파구 주거사업과	문정동 136번지 일원 주택재건축 정비사업	◦ 현장 품질문서가 등록되고 관련업무 담당(협력업체 등)에게 배포,활용 여부를 확인하기 위해 문서관리 배포대장에 기록관리 하기 바람 ◦ 근로자 휴게시설에 대한 기반구조관리상태 점검표를 추가하여 공사수행을 위한 적절한 작업환경이 유지될 수 있도록 조치바람 ◦ 교육훈련계획서에 따라 전직원에 대해 품질목표 달성 및 세부추진계획에 대한 교육을 실시하고 교육훈련결과서에 기록유지 하기 바람 ◦ 콘크리트 타설 후 장기 노출된 철근의 부식부위는 녹제거 후 후속철근 조립하기 바람(와이어브러싱 또는 녹 제거제 도포) ◦ 지하외벽 두께가 600mm로 매스콘크리트에 해당하므로 균열발생 최소화를 위한 시공계획 수립 후 콘크리트 타설바람(저발열(저열4종시멘트) 또는 수화열 저감을 위한 수화열 해석 후 배합비 결정) ◦ 동측 지하외벽(지하2층 바닥 시공이음부) 지수판의 오염물질 제거, 콘크리트면 오염물질(레이턴스 등) 제거 후 상부 콘크리트 타설 바람, 철근 피복두께 조정 바람(고압살수 청소 및 주근 철근 피복두께 조정) ◦ 데크 슬래브 위에 과도한 무게의 철근을 적재 금지할 것(분산적재 또는 동바리 설치) ◦ 철근 결속선 노출은 중성화(부동태막 방지) 영향을 초래하므로 내부로 삽입 시공 바람 ◦ 기중 주근과 Hoop근 밀착시공하여 좌굴에 따른 파괴를 방지하기 바람 ◦ 창하부 및 인방보 철근 배근은 스트럽 내부로 배근하기 바람	9.22~9.23	10
85	성동구 주거정비과	서울숲 IPARK리버포레 신축공사	◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 보완하시기 바람. ◦ 슬래브 등 콘크리트 타설후 기후조건에 따른 적절한 수분유지관리 대책을 마련하여 균열발생을 최소화하시기 바람 ◦ Top-Down공법에 의한 콘크리트 하향 후타설시 기둥,벽체 등 수직재 접합면에 콘크리트가 충분히 충진될 수 있도록 계획수립 바람 ◦ 동바리는 상·하고정하여 콘크리트 타설시 이동되지 않도록 유의하시기 바람 ◦ 콘크리트 이어치기 부분 철근이음길이가 부족할 경우 구조검토후 별도 대책을 마련하여 시공하시기 바람 ◦ 지하터파기시 슬래브 타설층 기준 깊이 준수 및 흙막이벽체부 소단폭 준수 바람 ◦ 철근콘크리트공사시 철근이음구간 시멘트 Paste 오염방지용 보양지 설치 바람 ◦ 시스템 비계(Support포함) 수평연결대 고정핀 견고하게 체결바람	9.27~9.28	10
86	성동구 주거정비과	서울숲 아이파크 리버포레 2차 신축공사	◦ 현장 품질방침 및 목표에 대한 교육 실시 -현장 품질방침 및 목표에 대한 전파 및 적극적인 동참을 위해 교육을 현장직원(협력업체,기능공 포함)에게 실시하고 기록관리 하기 바람 ◦ 품질관리계획서 배포대장 작성 -품질활동에 활용될 수 있도록 품질관리계획서를 업무관련자(감리, 현장내 직원, 협력업체 등)에 배포하고 배포결과를 배포대장에 등재하여 관리바람 ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고, 주간단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받기 바람 ◦ 현장내 비치된 소화기 중 일부 소화기에 대한 점검 주기 미흡 ◦ 크레인, 항타기 등 장비 주변에 대한 신호수 정위치 근무 필요 ◦ 현장내 반입 철근 부식에 대한 대책 및 보완 필요 ◦ 철근 교차부 결속상태 보완 필요 ◦ 토사 야적지 분진망 등 보안 필요 ◦ 세륜기 슬러지 보관상태 보완 필요 ◦ 전기식 지시저울 등 결과에 영향을 미치지 않토록 견고한 설비 보완 필요 ◦ 체가름시험기 결속상태 보완 필요	9.27~9.28	11
87	송파구 주거사업과	아남아파트 리모델링 주택사업	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 교육훈련계획서는 진행공정을 반영하여 교육훈련운영기준표에 따라 품질교육이 실시될 수 있도록 보완하시기 바라며, 교육훈련 실시후 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 제작공장에 방문하여 구매품을 검증할 경우 제품별, 공장별, 검사시기 등을 포함한 공장검사계획을 수립하고 공장검사를 실시하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고, 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 중점품질관리계획서 수립시 공종보다는 공종의 특정부위를 선정하여 작성될 수 있도록 하고 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 월2회 이상 주기적으로 점검하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 토사반출구 노출된 철근 녹방지 보양 조치 바람. ◦ 지하1층 슬래브 연속 타설부위 단부 콘크리트 슬러지 제거후 콘크리트 타설 전 접속부 수분유지 상태에서 콘크리트 타설바람. ◦ 합벽 타설전 철근 녹 제거 및 콘크리트 찌꺼기 제거 조치 바람. ◦ 스터드볼트는 시방서에 따라 시험 후 공사바람. ◦ SRC기둥 주철근(SD600)을 원터치 기계식이음으로 처리 바람. ◦ 기둥철골 표면은 시방서에 따라 표면 처리 후 시공바람. ◦ 흘러나온 수직 이어치기 부분의 콘크리트는 제거 후 시공바람. ◦ 벽체 콘크리트 수평이어치기 부분은 레이턴스 제거 등 시방서에 따라 조치 후 시공바람.	10.4~10.5	18
88	중구 도심재생과	세운6-3-3 재정비촉진구역 도시형생활주택 및 오피스텔 신축공사	◦ 개인별 업무분장이 누락된 김** 품질관리자에 대한 업무분장을 시행하여 책임과 권한을 명확히 부여하기 바람 ◦ 보관문서 목록표에 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급 뿐만 아니라 문서관리 책임자를 작성하여 기록관리 하기 바람. ◦ 주간 단위로 환경영향조사 결과서에 감리단 확인(서명)을 받아 환경관리에 대한 기록을 관리하기 바람 ◦ 검교정 관리대장은 시험장비 기기별로 반입 및 반출날자와 사유, 검교정 날자 등을 감리단에서 확인(서명)하기 바람 ◦ 가설 스트러트의 토압 전달이 원활하게 될 수 있도록 보강 바람 ◦ 합벽에 공극부분을 채우기 바람 ◦ 지하 굴착 구간에 배수로 및 근로자용 안전통로를 설치하기 바람 ◦ 계측 측정 시 시공사 및 감리단 입회하에 정확한 측정 및 사진자료를 남기기 바람	10.4~10.5	8
89	중구 도심재생과	세운재정비촉진지구 3-6구역 도시환경정비사업	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 환경관리담당자가 업무분장 문서에 지정되어 있지 않으므로 보완하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 중점품질관리공종에 대해 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 슬러리월 슬래브용 Dowel Bar 누락부분 앙카 철근 추가시공 바람. ◦ 슬러리월 Girder Dowel Bar 누락부분 앙카 철근 추가시공 바람. ◦ 1층 슬래브 철골 Stud Bolt 구부림 부분 추가시공 바람. ◦ Deck plate 시공부분에 대한 공사시방서 접수 바람(현재 건축시방서에 누락됨). ◦ 현재 공사장 주변으로 슬러리월 작업을 완료한 후 1층 바닥시공중인바, 설치된 계측기가 작업자 통행로에 단차가 발생되어 안전사고가 우려되니 보완 요망. ◦ 캠빔 상부 철근에 시멘트풀 제거하고 구조물면 치핑 작업하시기 바람.	10.11~ 10.12	11
90	중구 도심재생과	세운재정비촉진지구 3-7구역 도시환경정비사업	◦ 현장내 개개인의 책미과 권한에 업무분장 실시 -현장내 환경분야 업무에 대해서도 업무분장을 실시하여 관리하기 바람 ◦ 외국인 근로자들과 의사소통 기준 보완 -재해발생시 이를 알리고 도움을 요청시 어려움이 없도록 언어교육을 병행하여 작업장에서의 안전사고를 예방하고 불편을 최소화하기 바람 ◦ 기자재 수급계획서 준공년도까지 계획 수립 -자재의 효율적인 관리를 위해 주요 자재에 대해서는 사용자재 별로 준공년도까지 계획을 수립하기 바람(건축, 토목, 전기, 조경, 설비 등 포함) ◦ 주간단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받기 바람 ◦ 외부에 노출된 철근 보호조치 -장기 방치로 인한 철근 녹방지를 위해 철근 보양조치 요 ◦ 외부 노출 및 지하 흙에 접하는 부위에 대한 피복두께 확보토록 향후 각별한 주의가 필요함 ◦ 레크슬래브 절단 부위는 하부보강으로 콘크리트타설시 붕괴되지 않토록 보강 요 ◦ 철근 이음부(위치, 겹이음 길이 등) 품질 확보 방안 검토 필요 ◦ 콘크리트 이음부 품질확보 방안 검토 필요 ◦ 거푸집 결속자재 마감처리 등 품질확보 필요 ◦ 철근부식 및 이물질(모르타르 등) 자재 품질 확보방안 강구 필요 ◦ 시험실 온,습도 유지관리 및 고정이 필요한 시험장비 보완 필요	10.11~ 10.12	12
91	성동구 주거정비과	행당제7구역 재개발 정비사업	◦ 보관문서 목록표에 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급 뿐만 아니라 문서관리 책임자를 작성하여 기록관리 하기 바람. ◦ 근로자 휴게시설에 대한 기반구조관리상태 점검표를 추가하여 공사수행을 위한 적절한 작업환경이 유지될 수 있도록 조치바람 ◦ 공정계획을 반영하여 협력업체 공종별 교육이 반영된 교육훈련 결과를 최신화 하여 기록 유지하기 바람. ◦ 주간 단위로 환경영향조사 결과서에 감리단 확인(서명)을 받아 환경관리에 대한 기록관리 하기 바람 ◦ 건설 자재가 최상의 품질로 시공될 수 있도록 보관자재 점검표를 자재 특성별로 구체적으로 작성하여 월1회 이상 점검 실시 바람 ◦ 협력업체 검교정 관리대장에 시험장비 기기별로 반입 및 반출날자와 사유, 검교정 날자 등을 감리단에서 확인(서명)하기 바람 ◦ 현장 내 보행로 가설통로폭이 좁고 바닥부위 코아매트 설치 필요 ◦ 멀티폴 난간대 정리정돈(전도우려) 및 하부에 물 충만하기 바람 ◦ 가설울타리 주변 배수구 설치 바람(3번게이트 인근) ◦ 중앙교회 주변 가설휀스 비산분진망 보수 바람 ◦ 건설장비 주변에 유도요원 배치하기 바람 ◦ 현장 내 가설울타리 가설전기 전선 정리정돈 하기 바람 ◦ 기중 주근 피복두께 규정 준수하기 바람 ◦ 지하층 벽체 관통 슬리부 부위(임의철근 간격조정) 철근 보강 Shop DRW작성 보완시공하기 바람 ◦ 지하층 벽체 콘크리트 잔여물 제거 후 후속공종(형틀) 진행하기 바람	10.13~ 10.14	15
92	강동구 주택 재건축과	고덕강일10BL 공동주택 신축공사	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 중점품질관리계획서 수립시 공종보다는 공종의 특정부위를 선정하여 작성될 수 있도록 하고 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 철근 결속선 외부 돌출로 내부 매립 바람. ◦ 전기BOX함 주변 철근 절단 - 철근 절단에 따른 부족분은 상부 및 좌·우 측면에 보강설치 - 모서리부 대각 철근 보강바람 ◦ 상부차량 통행부 지지 잭서포트 수직도 불량으로 수직도 유지 바람. ◦ 지하주차장 슬라브 누수균열 및 단열재 젖음. 조속히 보수바람. ◦ 기초부 후타설 부위 지내력 저하 부위 치환후 지내력 확보 확인 이후 시공바람. ◦ 세대 결로방지 단열재 고정 및 설치 상태 미흡(틈새 발생 및 손상 등). 우레탄 폼 충진 및 동등 이상 재질로 보수 바람. ◦ 주차장 지붕층 부대시설과 인접부위 단열재 설치 상태 불량(파손 및 틈새 벌어짐). 동등 이상 재질로 보수 및 우레탄 폼 충진 실시 바람. ◦ 세대 기둥 철근 피복두께 일부 미확보. 구조 일반사항 기준에 따라 스페이서 설치 바람(폭 1m이상인 경우 3개 설치 등). ◦ 벽체 철근 전기 인입 배관시 분리 배관하도록 철근 순간격 기준 확보 바람. 콘크리트 타설시 일체성 확보를 위한 충진성 개선 바람. ◦ 콘크리트 재료분리 발생 부위는 설계기준 강도의 동등 이상의 재료로 보수바람. 구조물 보수용 폴리머 몰탈 및 무수축 몰탈을 사용하여 보수바람.	10.13~ 10.14	12
93	도시기반 시설본부 영동대로 복합개발 추진단	영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설공사(토목)	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고, 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 중점품질관리계획서 수립시 공종보다는 공종의 특정부위를 선정하여 작성될 수 있도록 하고 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 계측기함 주변 4변으로 보호장치(L형강 등) 설치, 접근제한 및 보존상태 유지 확보 바람. ◦ 안전휀스 경사버팀대 하부 지지대 설치가 미시공 상태이니 설치·체결하여 전도 등 외력에 안정성 확보 바람. ◦ 시점부 수직구 내 임시침사조 슬러지 청소하여 기능 할 수 있도록 조치 바람. ◦ 크레인 작업구간 횡경사가 있으니 전도방지 할 수 있도록 평탄성 확보 바람. ◦ 중점품질관리계획서 상 흙막이 완료후 지중경사계, 지표침하계, 지하수위계 등 계측기 설치토록 계획하였으나, 주변 지반침하, 균열 등을 흙막이 벽체 시공중에 주로 발생하므로 흙막이벽 시공 전 초기값 확보 할 수 있는 방안 검토 바람. ◦ 중점품질관리 대상으로 선정된 공종에 대하여는 설계도면, 상황판 등에 표기하여 관계자들이 숙지할 수 있도록 하고, 현장에도 푯말 설치하여 관리하시기 바람.	10.18~ 10.19	9
94	도시기반 시설본부 영동대로 복합개발 추진단	영동대로 지하공간 복합개발 2공구 건설공사(토목)	◦ 품질목표 또는 품질 관련 표어를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 작업환경이 최상으로 유지될 수 있도록 기반구조관리상태 점검표를 세부적으로 작성하여 점검 시 활용 바람 ◦ 연속벽 설치 시 발생한 벤토나이트 잔해물을 신속히 정화하여 배수보관통에 집수한 후 외부 반출할 것 ◦ 도로변에 적치된 목재 폐기물을 재사용하지 말고 즉시 외부 반출하기 바람 ◦ 연속벽 배면은 강우유입 방지를 위해 불투수층으로 포장하기 바람 ◦ 철근cage조립 시 결속선 체결보완 및 2,3중열 철근 조립부분은 견고하게 설치 바람 ◦ 철근cage 건입 후 레미콘 타설 시 작업이 중단되지 않도록 관리하고 굴착 후 타설 까지의 시간을 최대한 단축시켜서 타설하기 바람 ◦ 본 현장은 자갈층이 충전되어 있어 굴착 시 여굴량이 발생될 수 있으므로 굴착 후 여굴량을 검측(수직도 검측)토록 할 것 ◦ 안정액은 항시 가이드월 내 유지되도록 관리하고 안정액 시험을 통해 철저한 관리가 유지되도록 하기 바람	10.18~ 10.19	9
95	도시기반 시설본부 영동대로 복합개발 추진단	영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사(토목)	◦ 품질문서가 발주자, 감리단 뿐 아니라 협력업체, 현장내 직원 등 업무관련자에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고, 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 보완하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 지하연속벽 시공의 연직도 확인 방법 제시 바람. ◦ 지하연속벽에 설치되는 강관(직경 507mm) 용접 연결부 시험결과 제시 바람.	10.20~ 10.21	6
96	도시기반 시설본부 영동대로 복합개발 추진단	영동대로 지하공간 복합개발 4공구 건설공사(토목)	◦ 품질목표 달성 을 위한 세부추진계획을 계량화 하여 목표 대비 실적이 수치로 표시될 수 있도록 관리하기 바람. ◦ 근로자 휴게시설에 대한 기반구조관리상태 점검표를 추가하여 공사수행을 위한 적절한 작업환경이 유지될 수 있도록 점검하기 바람 ◦ 주간 단위로 환경영향조사 결과서에 감리단 확인(서명)을 받아 환경관리에 대한 기록관리 하기 바람 ◦ 펜스에 부착된 돌출물이 보행자에 부딪히지 않도록 상향 조정하기 바람 ◦ 오픈컷 구간 붕괴우려가 있으므로 작업자가 상부에서 근접 접근하지 않도록 제한하기 바람 ◦ 대형 강관 케이싱의 상부에 보호마개 설치하기 바람 ◦ H-pile이음 시 수직도 관리를 위한 체크를 하기 바람 ◦ 철근망 조립 시 스페이서 간격 유지하기 바람 ◦ H-pile과 덧댐판의 재질이 동등 이상인지 확인하기 바람	10.20~ 10.21	9
97	마포구 도시계획과	마포로1구역 제28,29지구 도시정비형 재개발복합시설 신축공사	◦ 품질목표에 대한 세부추진계획의 추진 실적을 정성적으로 수치화 하여 작성 및 관리하기 바람 ◦ 품질관리자의 업무분장을 개인별로 작성하여 책임과 권한을 명확히 부여하기 바람 ◦ 현장 품질문서가 등록되고 관련업무 담당(협력업체 등)에게 배포,활용 여부를 확인하기 위해 문서관리 배포대장에 기록관리 하기 바람 ◦ 공사수행을 위한 적절한 작업환경이 확보, 유지관리 될 수 있도록 기반구조관리상태 점검표를 작성하여 반기별 1회 점검하기 바람 ◦ 교육훈련계획서는 공정계획을 반영하여 직무,공통,협력업체별 교육이 반영되도록 보완하시기 바라며, 교육훈련결과를 기록유지 하기 바람. ◦ 건설 자재가 최상의 품질로 시공될 수 있도록 보관자재 점검표를 작성 활용하여 월 2회 이상 점검 실시 바람 ◦ 검교정 관리대장은 시험장비 기기별로 반입 및 반출날자와 사유, 검교정 날자 등을 감리단에서 확인(서명)하기 바람 ◦ 전면부 토류판 시공 및 뒷채움 몰탈채움 보강 실시 바람 ◦ H-Pile연장 후 토류판 시공 후 배면 되메우기 시공 바람 ◦ CIP 천공장비 간섭으로 토류판 시공부문 H-Pile 절단부분에 대해 기존 절단한 부분 H-PILE용접 및 Plate판 보강 시공 후 앵글 브레이싱 보강 실시 바람 ◦ 1층 슬래브에서 굴착 완료 후 백호 장비 인양 시 H-Beam을 깔고 아웃트리거 하중이 분산되도록 조치 바람 ◦ 장비운용 시 신호수 배치하고 운용할 것(신호수는 전담 업무만 수행하기 바람) ◦ 위험물 저장고, LPG, 산소 저장고 등은 목적외 사용하지 말고 반드시 시건장치 하여 관리하기 바람 ◦ 소화기는 화기가 가능한 작업근처에 배치하고 필요시 화기의 장소가 이동할 시 병행하여 이동 설치하여 운용하기 바람 ◦ 세륜시설이 없는 관계로 굴착공사 등 토사 등이 외부도로에 유입되지 않도록 조치 바람	10.25~ 10.26	15
98	마포구 도시계획과	마포로1구역 제48지구 도시정비형 재개발사업	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람.(점검일 현재 보관장소 및 관리책임자 미지정) ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 유지 관리될 수 있도록 기반구조관리상태점검표를 작성하여 반기별 1회 이상 점검하고 기록을 유지하시기 바람. ◦ 각 공종별 작업방법 및 절차에 대한 교육은 공사전에 실시하고, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람.(점검일 현재 골조공사 사전교육 미실시) ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 제작공장에 방문하여 구매품을 검증할 경우 제품별, 공장별, 검사시기 등을 포함한 공장검사계획을 수립하고 공장검사를 실시하시기 바람. ◦ 현재 일일환경점검을 실시하고 있음. 환경담당은 점검사항을 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 중점품질관리계획서 수립시 공종보다는 공종의 특정부위를 선정하여 작성될 수 있도록 하고 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 월1회 이상 주기적으로 점검하시기 바람. ◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람. ◦ 철근 유지관리를 철저히 하기 바람. ◦ 공사장 출입구에 신호수 배치 바람.	10.25~ 10.26	14
99	상수도 사업본부 시설건설과	광암수계 배수관로 정비공사(1공구)	◦ 업무분장 문서에 직원 개개인의 분장사무에 대한 담당자와 대직자를 지정하고 서명확인을 하시기 바람. (점검일 현재 대직자 미지정 및 서명이 누락) ◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 유지 관리될 수 있도록 기반구조관리상태점검표를 작성하여 반기별 1회 이상 점검하고 기록을 유지하시기 바람.(점검일 현재 점검 미실시) ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. (점검일 현재 기자재수급계획에 일부 사급자재 품목 누락)	10.27~ 10.28	4
100	강동구 주택 재건축과	길동 신동아 1,2차 아파트 주택재건축 정비사업	◦ 보관문서 목록표에 문서의 위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급 뿐만 아니라 문서관리 책임자를 각각 지정하여 기록관리 하기 바람. ◦ 근로자 휴게시설에 대한 기반구조관리상태 점검표를 추가하여 공사수행을 위한 적절한 작업환경이 유지될 수 있도록 조치바람 ◦ 균열관리대장은 ‘건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침’ 별지 제41조 양식에 따라 콘크리트 타설 시 온도 등을 추가로 작성하여 기입하기 바람 ◦ 세대 자재인양구 joint처리 철저히 하기 바람(joint방수, 천정면 처리 등) ◦ 화장실 단차 6cm이상 유지하기 바람 ◦ 다용도실 조적 천정부위 10mm완충재 시공 후 실링처리를 검토하기 바람 ◦ 코어 단열재 측벽세대 코어부분 단열보강 검토하기 바람(열반사형 단열재 또는 유레아폼 등) ◦ 주차장 Ramp 무근콘크리트 강도 상향을 검토하기 바람(24MPA) ◦ 지하3층 주행로 구간 배수판 제외를 검토하기 바람 ◦ 아파트 슬래브 배근 시 벽체 내부로 90도 Hook정착보다는 곧게 배근하여 이음하는 것이 시공적 측면에서 유리함(90도 Hook정착 시 시공 중 충격 등에 의해 이동 등으로 인해 정착길이가 부족할 수도 있음) ◦ 기준층 아파트 벽체 내에 전기Box등이 있는 부분은 콘크리트 타설 시 충분히 충전될 수 있도록 유의하고 거푸집 박리제 등도 유의하여 시공하기 바람 ◦ 공사 중 공사자재 등은 한곳에 집중하여 적재하지 말고 분산 적재하여 하부 구조물의 균열 등 손상이 없도록 조치 바람	10.27~ 10.28	12
101	서울주택 도시공사 건설사업부	답십리 제17구역 주택재개발정비사업 아파트 건설공사	◦ 근로자 휴게시설에 대한 기반구조관리상태 점검표를 추가하여 공사수행을 위한 적절한 작업환경이 유지될 수 있도록 조치바람 ◦ 주간 단위로 환경영향조사 결과서에 감리단 확인(서명)을 받아 환경관리에 대한 기록을 관리 하기 바람 ◦ 균열관리대장은 ‘건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침’ 별지 제41조 양식에 따라 콘크리트 타설 시 온도 등을 추가로 작성하여 향후 기입하기 바람 ◦ 검교정 관리대장은 시험장비 기기별로 반입 및 반출날자와 사유, 검교정 날자 등을 감리단에서 확인(서명)하기 바람 ◦ E/A설치각도와 콘의 각도가 일치되도록 보완시공 바람 ◦ E/A 브라켓 설치는 용접강도를 검토하여 허용범위 내 유지되는지 여부를 확인하기 바람 ◦ CIP와 띠장 이격된 부분의 스티프너 설치는 양호하나 시멘트 채움 시공은 조기 양생 될 수 있도록 관리할 것 ◦ 오픈구간의 절취공사는 토사의 안식각 확보를 위해 법면(사면)의 경사를 토사의 경우 1:1을 유지할 수 있도록 보완하기 바람 ◦ 천공다발 H-Pile을 재사용하지 말고 즉시 장외 반출하기 바람 ◦ 공사장 진출입구에 지반침하계를 추가 설치하여 상시 침하량을 측정하되 기준치 이상 침하 시 상부에 철판 등으로 보강하여 지하매설물 사고를 예방하기 바람	11.3 ~ 11.4	10
102	서울주택 도시공사 건설사업부	고덕강일 공공주택지구 2BL 제로에너지아파트 건설공사	◦ 품질관리계획서는 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 검토·확인 후 발주자에게 승인을 받으시기 바람. ◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 유지 관리될 수 있도록 기반구조관리상태점검표를 작성하여 점검하고 기록을 유지하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 품질문서가 업무관련자(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 제작공장에 방문하여 구매품을 검증할 경우 제품별, 공장별, 검사시기 등을 포함한 공장검사계획을 수립하고 공장검사를 실시하시기 바람. ◦ 중점품질관리계획서 수립시 공종보다는 공종의 특정부위를 선정하여 작성될 수 있도록 하고, 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정·관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 보완하시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 주기적으로 점검하시기 바람. ◦ 코너 스트러트용 띠장 횡력지지가 가능하도록 상하부 띠장 연결 바람(L형강 등). ◦ 토류판 손상 보완 바람. ◦ H-Beam내에 설치된 지중경사계 정확한 지반변위 측정이 가능하도록 배면지반 천공 후 재설치 바람. ◦ 영구배수공법에 수위를 측정할 수 있는 장치를(즉, 수위계) 설치하기 바람(건축공사 표준시방서)	11.3 ~ 11.4	14
103	도시기반 시설본부 토목부	성산대교 본교 성능개선공사	◦ 품질목표 달성을 위한 추진계획을 공정을 참고하여 수립하고 품질목표 달성도를 주기적(분기별)으로 확인하고 실적 관리하기 바람. ◦ 업무분장 문서에 직원 개개인의 세부 업무를 기록하여 책임과 권한을 명확하게 부여하기 바람 ◦ 보관문서 목록표에 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급 뿐만 아니라 문서관리 책임자를 작성하여 기록관리 하기 바람. ◦ 근로자 휴게시설에 대한 기반구조관리상태 점검표를 추가하여 공사수행을 위한 적절한 작업환경이 유지될 수 있도록 조치바람 ◦ 기자재 수급계획서는 계획 대비 실적이 관리될 수 있도록 사용자재별로 준공년도가지 작성 하기 바람(전체수량, 년도별(월별)계획, 사용누계) ◦ 주간 단위로 환경영향조사 결과서에 감리단 확인(서명)을 받아 환경관리에 대한 기록관리 하기 바람 ◦ 레미콘 납품서(송장)에 타설 완료시간을 기록하기 바람 ◦ 검교정 관리대장은 장비별 반출일자, 반출사유를 기재하고, 교정 유효기간 내 교정을 받을 수 있도록 건설사업관리기술자의 확인을 받아 관리하기 바람 ◦ 페인트 보관 창고를 바지선 내에 천막으로 설치하여 적정온도(5'~35'c) 유지가 용이하지 않을 것 같으니 내부에 온도계를 설치하고 시방서에서 정한 관리온도를 유지할 수 있는 방안을 마련하기 바람 ◦ 중점품질관리 대상 공종으로 선정된 공종은 현장에 푯말 설치하여 관리하기 바람 ◦ 바지선 난간에 설치한 추락방지망은 상부난간대에 감아 촘촘히 연결하기 바람 ◦ 페인트 보관창고에 MSDS부착하여 재해예방 하기 바람	11.8 ~ 11.9	12
104	영등포구 주택과	영등포구 신길동 역세권 청년주택 신축공사	◦ 현장 특성에 맞는 공종별 작업절차서 또는 작업지침서를 수립하고 절자 또는 지침에 따라 이행하시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람. ◦ 지하층 동바리 수직도 유지하고 상부멍에 하단 직상부에 설치할 것. ◦ 개구부 벽체 맞버팀대는 유로폼 앵글에 설치하지 마시고 보강재를 수직재로 댄 상태에서 설치 하여야 함. ◦ Life Line은 양측 단부에 긴장을 유지할 수 있도록 턴버클을 이용하여 텐션을 유지할 것. ◦ 콘크리트 타설시 잔여 부유물은 전체 제거할 것.(특히 철근con.c는 부착능력임.) ◦ 전단력과 주철근의 좌굴방지를 위해 설치된 띠철근과 주철근 사이가 이격되어 기둥 내력의 저하가 우려되므로, 주철근과 띠철근 사이에 이격이 발생하지 않도록 철근의 위치를 조정하거나 밀착되어 좌굴이 억제되도록 수정하기 바람.	11.8 ~ 11.9	7
105	관악구 주택과	봉천 4-1-2구역 주택재개발정비사업	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급 뿐만 아니라 문서관리 책임자를 작성하여 기록관리 하기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 작업환경이 유지될 수 있도록 근로자 휴게시설을 포함한 기반구조관리상태를 점검하기 바람(반기별 1회 정기적으로 실시) ◦ 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)주요 기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 기자재 수급계획서를 작성하시기 바람. ◦ 건설 자재가 최상의 품질로 시공될 수 있도록 보관자재 점검표를 작성 활용하여 월1회 이상 점검 실시 바람 ◦ 검교정 관리대장은 시험장비 기기별로 반입 및 반출날자와 사유, 검교정 날자 등을 감리단에서 확인(서명)하기 바람 ◦ 아파트 보 균열관리 보완 바람(현장에 균열관리표와 사무실의 균열관리대장이 일치되도록 관리) ◦ 지하층 일부 구간에 잭서포트 설치가 누락되어 있으므로 구조 확인 후 보완설치 바람 ◦ 강재 ELEV, PIT주변 기초 앙카 철근 피복 확보 조치 바람 ◦ 벽체 하부 터파기로 인해 기초 지내력 확보가 불투명한 구간에 대해 보완대책 강구 후 시공하기 바람 ◦ 지하주차장 보(DH-Beam) 하부 2단배근 간격이 넓을 경우 휨성능이 저하되므로 간격을 유지하여 시공하기 바람 ◦ 기둥 주변에 보가 예각으로 만나는 경우 보 주근 정착에 유의하고 기둥을 벗어난 보 접합부는 전단보강근을 추가하여 안정성을 향상시키기 바람 ◦ 주차장 슬래브(보포함) 끊어치기 부위 하부지지용 서포트 추가 보완하여 안전성을 향상시키기 바람	11.10 ~ 11.11	13
106	도시기반 시설본부 토목부	국제교류복합지구 도로개선사업 2공구	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 삼성교 하부 방음벽 설치구간 지장물조사를 위한 줄파기시 단계별 굴착관리 바람 ① GPR Test ② 인력굴착 ③ 기계굴착 ◦ 탄천주차장, 작업장 내부의 맨홀 및 배수로에 적치 및 퇴적된 잔재물 정비 바람 ◦ 동부간선램프교 P10구간 쉬트파일 천공홀 공극부분 모래충진 조치 바람 ◦ 동부간선램프교 보행자통로구간 외부인 출입금지 표지판 설치 바람 ◦ 동부간선램프교 세륜기 운용 관련 발생 스럿지 토양오염 및 수질검사 확인 바람 ◦ P2 근로자휴게실 안내표지판 설치 바람 ◦ 지하철2호선 본선박스 내 설치된 유지관리 계측기기의 항목별 계측관리기준(1차,2차,3차) 제시 바람 ◦ 코너 쉬트파일(전체 44개소) 용접부에 대한 용접시험검사 대상여부 확인 바람 ◦ 보행자 안내간판은 다수 설치되어 있으나, 현재도 자전거도로로 보행하고 있어 바닥에 보행자 통행금지 마킹 도색 검토 필요	11.15 ~ 11.16	11
107	은평구 건축과	역촌1구역 주택재건축 정비사업	◦ 현장 품질활동에 적극 동참할 수 있도록 품질방침 및 목표에 대한 교육(현장내 전직원, 협력사 등 포함)을 실시하여 기록관리 하기 바람 ◦ 현장 품질활동에 활용될 수 있도록 협력업체에도 배포하고 배포대장에도 기록 관리하기 바람 ◦ 기자재 수급계획서는 주요자재가 모두 포함하여 계획 대비 실적이 관리될 수 있도록 사용자재 별로 준공년도까지 계획을 수립하기 바람 ◦ 검교정 관리대장은 반입,반출일자,사유를 기재하고 감리의 확인을 받아 관리될 수 있도록 보완 바람 ◦ 품질시험계획서에 콘크리트 거푸집용 합판에 대한 시험항목을 추가하여 적정 관리 바람 ◦ 합벽 타설 양생후 띠장 해체시기는 지간거리에 확장에 따라 안정성 검토후 해체 요망 ◦ 상부 캡 부위 멍에 고정(꽉채움, 쐐기 고정) ◦ 구조계산서에 의거 동바리 간격, 규격, 보강재 연결재 등 표시하여 현장 시공(S/D승인) ◦ 배수판위 무근타설시 주행로구간 무근콘크리트 미타설 검토(배수판에 의한 콘크리트 손상 우려) ◦ 지하 외벽 액체 방수 제외 검토(누수 부위만 인젝션 후 배수판 시공 검토). ◦ 슬래브 타설시 배선 시공 타설 완료 후 가설등 설치 검토 및 지하 조명 확보 요망 ◦ 지하층 옹벽 수직철근에 시멘트페이스트가 부착되어 있어 보양을 실시하여 사전 대비 필요함 ◦ 지하층 옹벽 수직철근은 적정한 피복 두께 유지 및 정밀시공 요망 ◦ 지하층 슬래브 관통 클랙 발생 방지대책 및 적정한 보수 필요 ◦ 지하옹벽 어스앵커가 절단(2개소) 및 CIP 훼손부분 시공법 개선 및 구조 검토 필요	11.15 ~ 11.16	15
108	서초구 주거개선과	신반포 4지구 재건축 정비사업	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 품질문서가 발주자, 감리단 뿐 아니라 협력업체, 현장내 직원 등에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 중점품질관리계획서 수립시 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정·관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 균열관리대장을 작성하여 균열의 진행과 경과를 주기적으로 관리기록하고, 원구조설계자의 구조 검토를 받고 균열의 발생원인을 검토 바람 ◦ 슬래브콘크리트와 보가 분리되어 있는 상태임. 타설전 상태를 반드시 확인하고 타설 바람. ◦ PC보 상단의 콘크리트 면처리가 매우 불량하여 타설전 면처리를 한 후 후속 콘크리트 타설 바람. ◦ 수직옹벽 철근 내·외측 피복두께 상이. 양측 피복두께가 기준치를 확보토록 조정바람.(내측 30m/m, 외측 40m/m) ◦ 철근표면 오염 및 바닥 이물질 미제거. 콘크리트 타설전 철근표면 이물질 제거 및 바닥 청소바람. ◦ 후속 공정 사용예정 철근 보양 Cap 설치 누락. 후속공정 철근(돌출부분) 보양 Cap 설치 및 녹 발생 방지 조치 바람. ◦ 동바리 상하부 패킹(필러) 설치 일부 누락. 누락된 상하부 패킹 설치 바람.	11.17 ~ 11.18	11
109	서초구 주거개선과	신반포21차아파트 재건축정비사업	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 작성하기 바람. ◦ 검교정 관리대장은 시험장비 기기별로 반입 및 반출날자와 사유, 검교정 날자 등을 감리단에서 확인(서명)하기 바람 ◦ 지하층 PRD용 빌트업빔의 맞댄 용접부위 개선각도와 용접면의 녹 및 먼지 등을 완전히 제거하고 용접바람 ◦ CIP에 붙어있는 흙 및 이물질은 굴착공사 진행하면서 깨끗하게 청소하기 바람(수작업 및 물뿌리기 등) ◦ 좁은 대지에 어어컴프레셔 등 건설장비가 과밀하게 운영되고 있으므로 협착, 충격사고 예방과 고압호스 훼손 및 노후화 된 것은 교체바람 ◦ 계측관리 계측기 중 보호커버 미설치 된 계측기(지중침하계)는 보호커버 및 시건장치 설치하기 바람(파손으로 인한 데이터 손실 방지) ◦ 휀스 주변 안전통로에 안전표지판 부착하기 바람(이용자들 주위 환기) ◦ 안전통로 주변 각종 전선(전기,통신,계측관리 등) 정리 요망	11.17 ~ 11.18	9
110	구로구 건축과	아티스포럼 지식산업센터 신축공사	◦ 품질목표 달성을 위한 세부 추진계획 달성도를 주기적으로 확인하고 실적 관리하시기 바람. ◦ 현장 품질문서가 등록되고 관련업무 담당(협력업체 등)에게 배포,활용 여부를 확인하기 위해 문서관리 배포대장에 기록관리 하기 바람 ◦ 보관문서 목록표에 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급 뿐만 아니라 문서관리 책임자를 작성하여 기록관리 하기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 작업환경이 유지될 수 있도록 근로자 휴게시설을 포함한 기반구조 관리상태를 점검하고 기록관리 하기 바람 ◦ 균열관리대장은 ‘건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침’ 별지 제41조 양식에 따라 콘크리트 타설 시 온도 등을 추가로 작성하여 기입하기 바람 ◦ 검교정 관리대장은 시험장비 기기별로 반입 및 반출날자와 사유, 검교정 날자 등을 감리단에서 확인(서명)하기 바람 ◦ 계단실 주근 피복두께 및 일정간격 유지토록 관리할 것 ◦ 시스템 서포트 수평연결대 고정핀 견고하게 체결(고정)하기 바람 ◦ 슬래브 철근 배근 시 전기,소방,통신용 PE관 콘크리트 균일하게 투입되도록 최소 25mm이상 간격을 두기 바람 ◦ 계측기는 목적에 부합토록 시건장치 하기 바람 ◦ 작업자의 안전확보 차원에서 계단 안전 난간대 캡 설치하기 바람 ◦ 개구부 주변 안전대 설치 및 서포트 설치 시 지지 받침 목적에 부합하지 않으므로 위치 재조정 하기 바람 ◦ 데크 하부 지지용 시스템 비계 설치 시 U-헤드는 목적에 부합토록 재조정 하기 바람 ◦ 철근 콘크리트 부동태막 충족토록 결속선을 내부로 매입하기 바람	11.22 ~ 11.23	14
111	구로구 건축과	대륭포스트타워8차 신축공사	◦ 조직 구성원 개개인에 대하여 책임 및 권한이 명확히 부여되도록 문서화된 정보로 업무분장을 실시하고, 문서에 직원 개개인의 분장사무에 대한 대직자를 지정하고 서명확인을 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 양호한 상태로 관리 되도록 보완하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 구조물별 콘크리트 타설현황은 국토교통부 고시「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지35호 서식을 준수하시기 바람. ◦ 지하층 기둥 Form 고정용 철근 노출(가설)부위 마감 Shop DRW 작성, 보완계획 수립, 감리단 승인후 처리하시기 바람. ◦ Top Down Post Pile(TC)~지하층 바닥 OpenWing 부위 보완Shop DRW 작성, 보완후 후속공종 진행하시기 바람. ◦ 재료분리 부위 무수축몰탈 보완후 후속마감공종 진행하시기 바람. ◦ 임시개구부 주위에 90°로 구부러진 철근은 바로펴서 시공하되 곹게 펴지지 않는 철근은 별도 조치후 시공 바람. ◦ 보 수직이어치기 부분에 흘러나온 콘크리트는 제거후 시공바람. ◦ 철골기둥 표면은 청소후 시공 바람. ◦ 철골철근콘크리트 기둥 하부 거푸집 주위는 시방서에 따라 청소후 시공바람.	11.22 ~ 11.23	11
112	강동구 도시계획과	성내5재정비촉진구역 도시정비형 재개발사업	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)을 대상으로 주기적인 교육을 실시하고, 교육결과보고서를 기록 관리하시기 바람. ◦ 품질문서가 관련업무 담당(발주자, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자 등을 작성하여 기록관리 하시기 바람. ◦ 중점품질관리계획서 수립시 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관되어 그 기능을 유지할 수 있도록, 보관자재점검표를 작성하여 월1회 이상 주기적으로 점검하시기 바람. ◦ 옹벽철근 조립시 피복두께 확보필요(3층)(철근조립기준 준수). ◦ 기둥철근 조립시 대근조립을(135°, 90°부분) 구분하여 한단 걸러서 각각 배치되도록 조립 요망. ◦ 지하철골기둥조립부분, 콘크리트 타설전 녹발생 부분 녹제거후 후속작업 실시토록 보완. ◦ 형틀 조립시 고정용 핀을 매단 설치하여 형틀이 안전하게 조립되도록 보완(지상층)(콘크리트 타설시 측압 등에 안전하도록 조립). ◦ 지하층 작업장에 유사시 근로자가 신속하게 대피할 수 있도록 유도표지판, 안전계몽표지판 설치 필요. ◦ 1층 벽체 일부피복 부족(1개소) 20mm. ◦ 1층 벽체 하부철근 스페이서 미설치. ◦ 1층 벽체 연결철근 케미컬 앙카처리 미실시.	11.24 ~ 11.25	13
113	강동구 도시계획과	천호4촉진구역 도시환경정비사업	◦ 현장 품질문서가 등록되고 관련업무 담당(협력업체 등)에게 배포,활용 여부를 확인하기 위해 문서관리 배포대장에 기록관리 하기 바람 ◦ 보관문서 목록표에 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급 뿐만 아니라 문서관리 책임자를 작성하여 기록관리 하기 바람. ◦ 지하1층 바닥 하부 기둥 철근 레이턴스 제거 및 철근이음 간격 확보하기 바람 ◦ 지하1층 바닥 신구타설 조인트 및 기둥 타설구 정리,청소,보양조치 하기 바람 ◦ 데크 상부 안전난간대 설치 및 철거구간 안전통로와 금지구역 식별표시 하기 바람 ◦ 일정 높이 이상 가설지주 수평재 설치하기 바람 ◦ 역타공법에서 수평력 전달 경로를 확인하기 바람 ◦ 해체 잔재물 적재높이 관리기준을 검토하기 바람	11.24 ~ 11.25	8
114	동대문구 주거정비과	휘경3구역 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업	◦ 품질방침이나 품질목표, 또는 품질관련 표어 등을 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 검교정 관리대장은 시험장비 기기별로 반입 및 반출날자와 사유, 검교정 날자 등을 감리단에서 확인(서명)하기 바람 ◦ STA282 3단 및 4단구간 E/A띠장 받침 브라켓의 내민길이 부족부분에 대하여 보강조치 하기 바람 ◦ 구조물 근접시공 시 E/A두부 강선 충격으로 강선 정착부 풀림으로 반력 작용 시 안전사고 발생 우려가 있으므로 강선 보호조치 등 보완하기 바람 ◦ 타워크레인 기초철근 조립구간에 대하여 철근 결속 상태가 미흡하므로 교차부 결속 보완하기 바람 ◦ 토공 치환 예정인 부분에 대하여 유용암+con’c치환 계획에 대한 적정성 여부 기술 검토 후 절차에 따라 승인 받은 후 시행하기 바람 ◦ 세륜기 슬러지 반출 시 토양오염 및 수질시험을 실시한 후 반출하기 바람 ◦ 흙막이 배면 가설도로부분 con’c타설 등으로 정비하여 우수 등이 유입되지 않도록 조치하기 바람 ◦ 가시설 우각부 버팀보 지지띠장이 축방향 하중을 지지할 수 있도록 조치하기 바람(예-상하부 띠장 연결) ◦ 가시설 CIP하부에 띠장 미설치 구간 띠장 연결 또는 토공 되메우기 시행하기 바람 ◦ 기초의 부등침하량에 대한 안정성 검토 및 필요시 보강하기 바람 - 지층조건이 균등하지 않아서 부등침하 발생 우려 - 평판재하시험결과에서도 인접 위치에서 발생 침하량이 상이함 - 평판재하시험 결과와 시추주상도를 고려한 침하량을 산출하고 구조물의 허용부등침하량 비고	12.1 ~ 12.2	11
115	성북구 주거정비과	장위4구역 주택재개발 정비사업	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 가시설용 손상된 H Beam 자재는 품질관리를 위해 즉시 외부로 반출조치 바람. ◦ 레이턴스와 철근 부착 paste는 신규 콘크리트 타설전까지 제거하고 콘크리트 타설 바람. ◦ 공사차량진출입용 가설램프의 균열이 발생된 비탈면은 토사의 안식각을 참고하여 즉시 보수하고 방수포로 보강 바람. ◦ 기둥철근조립시 피복두께 좌우 불균형 발생. 철근 피복두께 준수바람.(4단지) ◦ 지하 외부옹벽 이어치기 부분의 지수재에 먼지 등 오염물질 있으므로 청소 후 이어치기 바람. ◦ 지하 흙막이 토류판 뒷부분의 뒷채움을 설계기준에 맞게 시공바람.	12.1 ~ 12.2	8
116	마포구 도시계획과	신촌지역(마포) 4-15지구 도시정비형 재개발사업 신축공사	◦ 품질방침 및 품질목표나 품질관련 표어 등을 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람. ◦ 근로자 휴게시설에 대한 기반구조관리상태 점검표를 추가하여 공사수행을 위한 적절한 작업환경이 유지될 수 있도록 조치바람 ◦ 품질 관련 문서들에 대한 보관문서목록표에 업무분장표에 따른 문서 관리 책임자를 지정하여 관리하기 바람 ◦ 스래브에서 소단까지 높이(1.5m)는 토질별 설계자 의견을 받아서 관리하기 바람 ◦ 벽체 철근 정착부 방향 보완하기 바람 ◦ 전기 전선관 밀집하여 콘크리트 타설 시 콘크리트가 채워지지 않을 수 있으므로 전선을 골재크기 이상으로 조정하기 바람 ◦ 계단난간 안전캡 보완하기 바람 ◦ 지하기둥 플레이트 접속구간 용접상태 보완하기 바람 ◦ 기둥 주철근 레이턴스 제거하기 바람 ◦ 철골 스터드 볼트 녹제거 하기 바람	12.6 ~ 12.7	10
117	금천구 주택과	독산동 역세권 청년주택 신축공사	◦ 사전 공종별교육(토공)이 실시되지 않았으므로 교육훈련계획서를 보완하고 교육 실시 후 교육훈련결과를 기록 유지하시기 바람. ◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람. ◦ 보관문서 목록표에 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자 등을 작성하여 기록관리 하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 중점품질관리계획서 수립시 공종보다는 공종의 특정부위를 선정하여 작성될 수 있도록 하고, 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정·관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람. ◦ 계측기함 표시 명패 및 시건장치 설치 바람.	12.6 ~ 12.7	6
118	서대문구 도시 재정비과	홍은13구역 주택재개발 정비사업	◦ 현장 품질활동에 적극 동참할 수 있도록 품질방침 및 목표에 대한 교육(현장내 전직원, 협력사 등 포함)을 실시하여 기록관리 하기 바람 ◦ 품질관리계획서 제‧개정 관리는 발주자가 승인한 날짜가 제정,개정일로 작성하고, 개정차수는 개정된 항목에만 표시 바람 ◦ 품질관리계획서는 품질활동에 활용될 수 있도록 업무관련자(발주자,인허가청,감리사,현장내 직원,협력업체)에 배포하고 배포결과는 대장을 작성하여 관리하기 바람(개정시 구문서와 신문서가 혼재되지 않도록 회수사항도 기록관리) ◦ 보관문서 목록표는 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급 등을 기재하여 관리하기 바람 ◦ 설계도서 배포대장을 작성하여 수령인 확인, 구문서에 대한 회수절차를 기록 관리하기 바람 ◦ 자재의 효율적인 관리를 위해 주요 자재의 범위에 대해서는 사용자재 별로 준공년도까지 계획 및 실적을 관리하기 바람(건축, 토목, 전기, 조경, 설비 등 포함) ◦ 검교정 관리대장은 반입,반출일자,사유를 기재하고 감리의 확인을 받아 관리될 수 있도록 보완 바람(교정 업체에 가지고 가서 받아야 하는 장비는 여유장비 비치 등 대체 방안 마련) ◦ 동바리 수직도 유지 및 헤드위치를 중앙에 위치하도록 시공하기 바람 ◦ 기둥 콘크리트 타설 전 철골기둥 녹제거 및 오염된 부분 청소 후 배근하기 바람 ◦ 데크 플레이트 시공 시 전기,통신박스 등을 매립할 때 데크철근 절단금지 ◦ 램프구간 조도 확보하기 바람 ◦ 철골브라켓 매립 타설 전 방수누수 상태 확인 후 선조치 하여 타설하기 바람 ◦ 기둥과 보의 접합부 콘크리트 타설 시 강재와 콘크리트의 부착력 확보를 위하여 콘크리트 묻힘 부위에 강재 도장 제거하기 바람 ◦ 기둥 이음 시 겹침부위는 옵셋방식에 의한 겹이음 방식을 택하여 후프 철근의 135도 확보 하기 바람 ◦ 굴착에 따른 주변 지반의 안전관리를 위하여 계측을 실시하는 바, 계측관리의 손망실 및 정확한 계측값 확보를 위해 반드시 주변 보호대 및 시건장치 하기 바람	12.8 ~ 12.9	15
119	서울 교통공사 기술계획처	서울교통공사 통합관제센터 신축공사	◦ 현장 품질활동에 적극 동참할 수 있도록 품질방침 및 목표에 대한 교육(현장내 전직원, 협력사 등 포함)을 실시하여 기록관리 하기 바람 ◦ 품질관리계획서 제‧개정 관리는 발주자가 승인한 날짜가 제정,개정일로 작성하고, 개정차수는 개정된 항목에만 표시 바람 ◦ 품질관리계획서는 품질활동에 활용될 수 있도록 업무관련자(발주자,인허가청,감리사,현장내 직원,협력업체)에 배포하고 배포결과는 대장을 작성하여 관리하기 바람(개정시 구문서와 신문서가 혼재되지 않도록 회수사항도 기록관리) ◦ 보관문서 목록표는 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급 등을 기재하여 관리하기 바람 ◦ 설계도서 배포대장을 작성하여 수령인 확인, 구문서에 대한 회수절차를 기록 관리하기 바람 ◦ 자재의 효율적인 관리를 위해 주요 자재의 범위에 대해서는 사용자재 별로 준공년도까지 계획 및 실적을 관리하기 바람(건축, 토목, 전기, 조경, 설비 등 포함) ◦ 검교정 관리대장은 반입,반출일자,사유를 기재하고 감리의 확인을 받아 관리될 수 있도록 보완 바람(교정 업체에 가지고 가서 받아야 하는 장비는 여유장비 비치 등 대체 방안 마련) ◦ 동바리 수직도 유지 및 헤드위치를 중앙에 위치하도록 시공하기 바람 ◦ 기둥 콘크리트 타설 전 철골기둥 녹제거 및 오염된 부분 청소 후 배근하기 바람 ◦ 데크 플레이트 시공 시 전기,통신박스 등을 매립할 때 데크철근 절단금지 ◦ 램프구간 조도 확보하기 바람 ◦ 철골브라켓 매립 타설 전 방수누수 상태 확인 후 선조치 하여 타설하기 바람 ◦ 기둥과 보의 접합부 콘크리트 타설 시 강재와 콘크리트의 부착력 확보를 위하여 콘크리트 묻힘 부위에 강재 도장 제거하기 바람 ◦ 기둥 이음 시 겹침부위는 옵셋방식에 의한 겹이음 방식을 택하여 후프 철근의 135도 확보 하기 바람 ◦ 굴착에 따른 주변 지반의 안전관리를 위하여 계측을 실시하는 바, 계측관리의 손망실 및 정확한 계측값 확보를 위해 반드시 주변 보호대 및 시건장치 하기 바람	12.8 ~ 12.9	15
120	강동구 주택 재건축과	둔촌주공아파트주택재건축 정비사업(현대)	◦ 보관문서 목록표에 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급 뿐만 아니라 변경된 문서관리 책임자를 새로 지정하여 기록관리 하기 바람. ◦ 공사중지로 인해 실시하지 못한 교육훈련계획을 2023년도에 공정계획을 반영하여 교육이 실시되도록 새로 수립하기 바람 ◦ 건설 자재가 최상의 품질로 시공될 수 있도록 보관자재 점검표를 작성 활용하여 월1회 이상 점검 실시 바람 ◦ 지하주차장 바닥 균열 보수하기 바람(균열관리대장에 작성하여 순차적으로 보수) ◦ 조적벽체 사춤 철저히 하기 바람. 특히 벽돌 쌓기 시에는 공법에 입각한 정밀 시공 바람 ◦ 바닥 open개구부는 여닫이 모양으로 폐쇄하기 바람 ◦ 주차장 상부 공사자재 적치 시 설계하중 이하로 관리하고 되도록 분산적재 하기 바람(자재 이동 시 충격이 발생되니 않도록 유의) ◦ 거푸집 재사용 시 표면에 이물질이 있을 경우 콘크리트 표면 품질이 저하되므로 청소 후 박리제 도포하기 바람 ◦ 계단 등 콘크리트 이어치기 부위는 불순물 제거 및 일부 치핑 후 타설하여 균열발생을 미연에 방지하기 바람	12.13 ~ 12.14	9
121	강동구 주택 재건축과	둔촌주공아파트주택재건축 정비사업(롯데)	◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바랍니다. ◦ 기둥철근에 플라스틱 도너츠형 스페이서가 3개씩 인접하여 설치되어 있어 콘크리트가 채워지지 않을 우려가 있음. 시멘트 계열 스페이서 또는 플라스틱 도너츠형 스페이서를 35mm이상 띄워서 설치 바람. ◦ 보조주방에는 반외기로 분류되어도 습도가 높은 경우에 결로발생 우려가 있음. 슬래브 하부에는 냉교로 인한 결로를 방지하기 위해 단열재 취부 또는 결로방지 몰탈 조치 검토 바람. ◦ 일부 벽체 철근 피복두께 확보 미흡. 표준시방서 기준에 따른 적정 간격재 설치 기준 확보 필요. 해당구간 시방 기준에 따른 간격재 배치하고 기준상의 피복두께 확보 바람 ◦ 일부 기둥·벽체 스트럽(후포) 철근과 주근 철근 이격됨. 주철근과 스트럽 철근이 밀착이 안될 경우 주근의 구조성능 확보에 어려움 발생 우려. 주근과 스트럽 철근 밀착 시공 바람. ◦ 가설서포트 일부구간 수직도 관리 미흡. 수직도 불량할 경우 서포트 내력 현격히 저하 우려됨. 수직도 불량 서포트 보완 바람.	12.13 ~ 12.14	7
122	강동구 주택 재건축과	둔촌주공아파트주택재건축 정비사업(현산)	◦ 세대 내 일부 주름관을 콘크리트 타설 전 2개씩 묶어서 분리하여 시공 바람(하부에서 조치) ◦ 화장실 조적공사(0.5B) 중 전기주름관 및 각종 파이프로 관통된 부분은 Fabric wire 또는 wire mash를 선부착 후 미장 실시 하기 바람(내부는 밀실하게 모르타르 사춤 실시) ◦ 지하층 단열공사 일부 훼손부분 교체하기 바람 ◦ Flat Slab 단차 부위 보강보의 수직,수평도 기울어지고 피복과다 및 피복 과소 발생 부분 개선하기 바람 ◦ 계단 절곡부위 철근 배근 상세 개선하기 바람 ◦ 동바리 하부지점 안정성 개선 하기 바람(부분접지, 목재 위 설치 등) ◦ 콘크리트 타설 후 노출된 기둥, 벽체의 수직 Dowel에 부착된 페이스트, 레이턴스 제거 후 철근이음 및 거푸집 설치하기 바람 ◦ 지하주차장 경사램프 초입지점 균열발생부위 V-cutting 후 보수하기 바람	12.15 ~ 12.16	8
123	강동구 주택 재건축과	둔촌주공아파트주택재건축 정비사업(대우)	◦ 교육훈련계획에 따른 정기교육(품질, 안전) 시행시 현장내 직원, 협력업체 등 모든 직원이 교육에 참여할 수 있도록 하고, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람 ◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 각 기술분야별(건축, 토목, 기계, 전기 등)기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 누락없이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 콘크리트 구조물 균열부분은 균열별로 현장에 관리표를 부착하여 사무실에서 관리중인 균열관리대장과 일치되도록 관리 바람. ◦ 계단실 옹벽 이어치기 부분의 이물질 제거 및 곰보 발생부분은 바탕면 정리하고, 감리단 확인 후 보수 작업 바람. ◦ 거푸집 동바리 3개층 존치부분에 일부 동바리 설치가 누락되거나 수직상태 관리가 미비한 부분은 수정하여 조치 바람. ◦ 향후 연결부위에 위치한 노출된 철근은 보양조치 바람. ◦ 계단실 철근 배근은 설계도서 참조하여 보완 바람. ◦ 스트럽(stirrup)의 높이가 큰 경우는 상부에서 2점 고정하여 스트럽의 위치 이동을 방지하기 바람.	12.15 ~ 12.16	8