공영도매시장 경쟁력 확보와 활성화

		서 울 특 별 시 농 수 산 식 품 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	2023년 가락시장 하수준설토 폐기물 처리용역 설계변경 시행

1. 재무팀-1571호(23.04.03.), ‘계약 체결 내역 알림(2023년 가락시장 하수준설토 폐기물 처리용역)’과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 진행중인 ‘2023년 가락시장 하수준설토 폐기물 처리용역’의 실처리 수량을 반영하여 설계변경을 하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2023년 가락시장 하수준설토 폐기물 처리용역

나. 계 약 자 : 공동도급(분담이행방식)

운반업체	처리업체	비 고
대청환경상사	리뉴에너지새한(주)

다. 변경사유 : 준설토 실처리 수량 반영(첨부문서 참조)

라. 변경내용

1) 계약기간 : 변경 없음

2) 계약금액 : (당초) 15,420,000원 → (변경) 18,197,980원(증 2,777,980원)

구 분	당 초	변 경	증 / 감	비고
계약금액	15,420,000원	18,197,980원	증 2,778천원
과업기간	‘23.03.30~’23.11.30.	‘23.03.30~’23.11.30.	변경없음
수량(하수준설토)	32 ton	38.74 ton	증 6.74 ton
수량(폐합성수지)	1 ton	0 ton	감 1.0 ton

붙 임 :	1.	변경합의서	..................	1부.
	2.	변경내역서	..................	1부.
	3.	일상감사요청서	..................	1부.	끝.

결재의견입력부

★담당자						팀장				건설안전본부장		11/30
		황상원						신종철			임창수
협조자
													감사실	감사필

시행			시설운영팀-3944				(2023.11.30.)			접수				()
우												/
전화		02-3435-0324			전송	02-3435-0396		/						/	공개
청렴, 당신과 나의 깨끗한 약속입니다.