보 고 서
			담당	팀장	도로환경처장	도로관리본부장
						03/26
문서번호	도로환경처-2233
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2024.03.26.
공개여부	공개
제목	2023~2024년 자동차전용도로 제설용역 설계변경 보고

1		용역현황

가. 용 역 명 : 2023~2024년 자동차전용도로 제설용역

나. 용역기간 : 2023.11.15. ~ 2024. 3.31.

*기성기간 : 2023.11.15. ~ 2024. 1. 8.

다. 용 역 비 : 1,452,700,000원

① 기 성 : 641,300,000원

② 준 공 : 811,400,000원

라. 도 급 자 : 덕은중기(대표 안태문)

2		보고내용

상기 제설용역 설계변경에 대한 시행 보고임.

가. 설계변경 사유 : 공종별 물량 변경

공 종	단 위	당 초	변 경	증 감
상황반장	hr	268	476	208
제설작업원	hr	3,216	5,329	2,113
제설작업운전원(2.5톤, 4.5톤)	hr	4,020	6,791	2,771
제설장비 상시대기(2.5톤)	일	1,076	1,320	244
제설작업(2.5톤)	hr	1,089	1,809	720
제설장비 상시대기(4.5톤)	일	464	480	16
제설작업(4.5톤)	hr	396	664	268
제설작업운전원(15톤, 굴삭기)	hr	6,164	9,898	3,734
제설장비 상시대기(15톤)	일	1,856	1,910	54
제설작업(15톤)	hr	1,584	2,650	1,066
제설장비 상시대기(굴삭기)	일	112	192	80
제설작업(굴삭기)	hr	693	1,061	368
살포기	hr	1,023	1,960	937

나. 용역비 변경내용

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총 용 역 비		947,819,000	1,452,700,000	504,881,000
용역비	공급가액	861,653,637	1,320,636,364	458,982,727
	부가가치세	86,165,363	132,063,636	45,898,273

3		향후계획

상기와 같이 설계변경하여 총무처에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임 : 변경설계서 및 변경내역서 각 1부.  끝.