스마트 지방 상수도 지원

(내역사업명 : 정수장 순환정비 체계 구축)

2023. 3.   .

시·도(시·군)명 (담당 부서)	서울특별시 상수도사업본부 (계획설계과)	담당자	성 명 : 여성우 연락처 : 02-3146-1414

1. 사업개요

□ 사업명 : 정수장 순환정비 체계 구축

□ 사업 목적

대부분의 정수센터가 30년을 경과하여 노후화의 단계에 진입하고 있어 안정적인 수돗물 생산체계 구축을 위해 정수센터 순환 재건설 추진

□ 사업내용

ㅇ 사업내용 : 안정적으로 수돗물을 생산하면서 노후 정수센터을 순환 재건설할 수 있는 체계 구축

ㅇ 총사업비 : 12,349억원

ㅇ 사업기간 : ’21. 3. ~ ’33. 12.

ㅇ 사업규모

- 기존 정수센터 고도 확충 : 1개소(광암), 10만㎥/일

- 순환정비용 정수센터 건설 : 2개소, 70만㎥/일

· 강북#2 25만㎥/일, 서울 서측 순환정비용(분산) 45만㎥/일

- 노후 정수센터 순환 재건설 : 암사 #1, 광암, 구의 #1, 영등포 #1

ㅇ 시행주체 : 서울특별시상수도사업본부

ㅇ 지원규모 : 69,174억원(총 사업비의 50%)

2. 추진현황

□ 추진실적

ㅇ ‘2040 서울 수도정비기본계획’에 반영, 환경부 승인 완료 : ’21. 12.7.

ㅇ ‘서울시 정수센터 재건설 등 정비방안 검토 용역’ 시행 : ’21. 3. ~ 12.

ㅇ 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 추진 중(3건)	: ’22. 4. ~ ’23. 6.

□ 연차별투자계획

구 분 (규모)				계	~’22 (기투자)	’23	’24	’25	’26	’27	’28	’29	’30	’31	’32	’33
	사 업 비			12,349	9	35	147	2,404	2,428	2,467	1,689	718	870	707	620	255
	신설	서측 (45만㎡/일)		4,897	4	16	61	1,300	1,300	1,300	916
		강북 (25만㎡/일)		2,486	3	7	56	700	700	700	320
	재정비	광암	(40만㎡/일)	990	2	12	20	300	300	300	56
			(고도확충 10만㎡/일)	359			10	100	100	100	49
		구의1 (25만㎡/일)		919				4	28	50	250	250	250	87
		암사1(130→85만㎡/일)		1,672						10	59	248	400	400	400	155
		영등포1(30만㎡/일)		1,026						7	39	220	220	220	220	100

3. 2024년 요구내용

□ 요구내용 및 산출근거

<요구내용>

ㅇ 순환 재건설 추진을 위한 타당성조사에 소요되는 용역비의 50% 국고보조

(단위 : 백만원)

타당성조사 용역비	국고	지방비
14,700	7,350	7,350

<산출근거>

ㅇ 기본 및 실시설계 용역비

- 직접인건비 : ‘건설기술용역 대가 등에 관한 기준’(국토교통부)

- 제경비, 기술료 : ‘엔지니어링사업대가의 기준’(산업통산자원부)

□ 지원 필요성

ㅇ 노후한 서울시 정수센터 정비 지연으로 인한 피해를 예방하기 위해 조속한 순환 정비체계를 구축 필요

ㅇ 사업 초기에 많은 사업비가 소요되나 재원 확보에 어려움

【정수센터 경과년수】

4. 세부추진계획

□ 추진 배경

ㅇ 정수센터 노후화 가속

- 서울시 정수센터는 밀집·대형화된

6개 정수센터가 대부분 30년을 경과,

생산용량의 여유없이 100% 풀가동 상황

ㅇ 대부분의 정수센터가 한강 상류 동쪽 지역적 편중 상태

- 강북, 암사, 광암, 구의, 뚝도 등 5개 정수센터가 한강상류 지역에 편중 위치

- 일부 지역은 생산 후 도달시간이 40시간 이상 소요 → 수질사고시 대처 곤란

□ 노후 정수센터 재건설

ㅇ 정수센터 내부에서 생산시설 일부를 가동 중단하면서 계열별 정비 불가능

ㅇ 전체 생산 프로세스가 결합되어 있어 현재 시스템으로는 부분 생산 중단이 불가하여 수돗물을 생산하면서 시행하는 땜질식 보수만 가능

	∙ 노후화에 따른 순환 재건설 : 암사 #1, 광암, 구의 #1, 영등포 #1

□ 급수생활권으로 분산 배치

ㅇ 서울지역 급수의 1/3을 담당하는 암사정수센터의 경우 일부 정수시설 가동을 중단하고 현 위치에 재건설 불가

	∙ 서서울 지역에 적정 부지 확보하여, 암사의 일정 부분을 대체할 순환정비용 정수센터 건설(450천㎥/일) ∙ 암사 현위치에 계열별 순환 재건설 및 영등포 1정수장 재건설을 위해 강북 2정수장 건설(250천㎥/일)

5. 사업추진계획