269. 방화대교 남단 접속도로 건설공사

	<건의(민원) 사항>
□ 치현터널 조기개통

□ 사업개요

○ 공사명 : 방화대교 남단 접속도로 건설공사

- 위    치 : 강서구 방화동 ~ 올림픽대로

- 규    모 : 도로개설 L=3,021m, B=5.75m~18.0m

(교량 756m, 터널 949m, 토공도로 1,316m)

- 사업기간 : '05. 10. 05. ~ '15. 10.31.

- 총사업비 : 109,807백만원 (도급비 66,092백만원)

※ 마곡지구 광역교통분담금466억 포함)

- 시 공 사 : 금광기업(주) 외1         - 감 리 사 : ㈜삼보기술단

□ 추진경과

○ '05.10.05 : 공사착공

○ '07.12.24 : 마곡지구 광역교통개선대책 수립

○ '08.12. ~ '09.11 : 변경설계용역 시행

○ '12.03.28 : 중앙투자심사(행안부)

○ '12.07.04 : 마곡지구 광역교통개선대책 변경 심의 완료(국토부)

○ '15. 3월 현재 : 램프확장부 A,C 하부 공사중(공정율 90%)

□ 향후계획

○ '15. 4. ~ 8. : 램프확장부 A,C 상부공 설치

○ '15. 7.       : 올림픽대로 → 방화동 진입램프 우선 개통

○ '15. 8.       : 방화동 → 올림픽대로 진출램프 개통

○ '15.10.       : 공사준공

작성자	토목부장 : 노우성	☎3708-2540	터널건설과장 : 권혁대	☎3708-2565	담당 : 박근우	☎3708-2566

※ 위치도

폭2차로, 연장 3.53km(상하행선)

※ 조감도 및 현황사진

올림픽대로방향

방화대로방향