붙임 2	작성양식 ※ 작성방법 : ① 작성기간은 7월 ~ 9월까지이며, 추진실적은 9월말까지 예상실적으로 구체적으로 작성

연번

사업명

사업개요

추진계획 및 실적

애로사항 및 대응방안

공정률

1

GIS DB 정확도 개선

(공간정보과)

ㅇ 사업대상(규모)

- 상수도 연장 : 238㎞

ㅇ 사업기간 : 2005년~

(계속사업)

ㅇ 소요예산 : 2,472백만원('23년)

ㅇ 사업내용 :

- 기존 관로는 첨단장비(전자유도)를 활용한 탐사 및 측량 후 DB 수정

- 신설 관로는 노출된 상태에서 측량 후 DB 구축

- 상수도 관로 및 부속시설물에 대한 속성 조사 및 위치 탐사

- 국토지리정보원(공간정보품질관리원) 공공측량 성과심사 등

□ (3분기) 추진계획

ㅇ GIS DB 구축 및 수정 : 168㎞(1~3분기 누적)

□ (3분기) 추진실적

ㅇ GIS DB 구축 및 수정 : 213㎞(1~3분기 누적)

ㅇ 권역별 추진실적                                                                       (단위 : ㎞)

구 분	계	강북권역	강남권역
목 표	238	130	108
실 적	213	107	106
달성율(%)	89.4%	82.3%	98.1%

ㅇ 예산집행현황                                                                   (단위 : 백만원)

예산현액	집행액(원인행위액)	집행률(%)
2,472	2,341	94.7

□ 향후계획

ㅇ '23.11. : 용역업체(강남권역, 강북권역) 간 성과물 교차점검

ㅇ '23.11. : 공공측량 성과심사 요청(우리 본부 → 공간정보품질관리원)

ㅇ '23.12. : 공공측량 성과심사 완료 및 용역 준공(장기계속계약 2차분)

※ '24. 1. ~ 3. : 장기계속계약 3차분 용역 시행 및 준공,

※ '24. 2.      : 신규 장기계속계약 발주(사업기간 : '24. 4. ~ '26.3.)

ㅇ 해당없음

(89%)

정상