(2018) 서울도서관 정보자료관리 업무

월간업무보고

# 1차 보고 (02월 26일-03월 31일)

주관사업자	㈜소르트		주관기관	서울도서관
PM	이화정		담당	나영선

(2018) 서울도서관 정보자료관리 사업

월간 업무현황 보고

1. 업무기간 : 2018년 02월 26일 ~ 03월 31일

2. 보 고 일 : 2018년 04월 02일

3. 업무내용

1) 진행현황

구분	최종목표	2/3월 실적		누계 실적		진행률
		계획	실적	누계계획	누계실적
MARC	33,000	3,510	4,953	3,510	4,953	15.01%
장비/RFID	33,000	3,340	4,622	3,510	4,622	14.01%
납품	33,000	3,340	2,551	3,510	2,551	7.73%

2) 세부현황

구분			MARC			납품
			2/3월 실적	전월 누적실적	총계	2/3월 실적	전월 누적실적	총계
신규	구입	일반도서	1,888	0	1,888	868	0	868
		희망·긴급도서	1,119	0	1,119	1,013	0	1,013
		비도서	395	0	395	291	0	291
	기증	서울시·정부간행물	1,310	0	1,310	379	0	379
		일반도서	241	0	241	0	0	0
재정리			0	0	0	0	0	0
총 계			4,953	0	4,953	2,551	0	2,551

4. 차월계획 (4월)

구분 현황	도서인수	MARC	장비/RFID	납품
물량 계획(건)
계획 건수(건)	3,039	3,600	3,590	3,590
예상공정률(%)	25.92%	25.92%	24.88%	18.61%

5. 요청사항

6. 업무협의 및 확인사항