3차공사 발주현황

2018.  06.

밤고개로 확장공사

공사(제3차) 발주 현황

1. 공사명 : 밤고개로 확장공사(장기계속 3차)

2. 공사기간 : 2018년 07월 01일 ~ 2019년   6월 30일

3. 준공예정일 : 2019년  6월 30일

4. 도급비 현황

(VAT포함, 단위:원)

도급공사비	전차공사	3차공사	잔여분	비고
12,467,686,000	5,171,810,600	3,083,600,000	4,212,275,400

▣ 세입 세출외 현금 전체 예산 현황(3차분 2구간)

(단위:원)

총 예 산	공사비					감리비	비고
	토목	전기	폐기물	관 급	설계비
5,701,116,000	3,083,600,000	604,746,000	127,760,000	1,191,600,000	293,410,000	400,000,000

▣ 세입 세출외 현금 예산 공사비 분계 현황

(단위:원)

구 분	총 계	3차공사				감리비	비고
		소계	토목 (관급포함)	전기	폐기물
공사비	4,802,960,000	4,402,960,000	4,275,200,000	-	127,760,000	400,000,000

5. 주요설계 현황(장기계속 3차)

주요공종 및 공사내용		단위	수량	공사금액	비고
1.토 공	기존구조물철거	㎥	980	32,998,240
	토공(사토운반 포함)	㎥	7,681(7,456)	184,214,522
	소 계			217,212,762

주요공종 및 공사내용		단위	수량	공사금액	비고
2.배수공	토 공	㎥	7,477	65,209,156
	측구공	m	116	8,055,419
	PC암거공	식
	맨홀공	개소	22	40,810,175
	우수관로공	m	931	53,659,594
	선배수로	m	954	15,010,748
	우수관로 보강공	m	158	63,303,813
	조립식 간이 흙막이	m	350	52,714,277
	기타	식	1	16,950,710
	소 계			315,713,892
3.옹벽공	산석옹벽	㎡	328	83,392,126
	기타공사	식	1	3,156,008
	소 계			86,548,134
4.포장공	아스콘포장	㎡	32,205	212,855,243
	경계석	m	3,875	61,384,499
	투수블럭	㎡	3,779	71,424,778
	기타	식	1	23,121,453
	소 계			368,785,973
5.교통안전	교통안전시설	식	1	506,920,987
	소 계			506,920,987
6.부대공	부대공	식	1	422,118,385
	소 계			422,118,385
7.데크공	데크공	식
	소 계			잘못된 계산식
8.조경공	수목 제거공사	주	7,500	17,588,661
	수목 이식공사	주	47	11,278,422
	수목 식재공사	주	17,982	157,174,381
	기타	식	1	31,893,653
	소 계			217,935,117
9.상수도	상수도	식	1	11,111,504
	소 계			11,111,504

주요공종 및 공사내용		단위	수량	공사금액	비고
직접공사비				2,146,346,753
제경비				591,572,355
제경비제외공종				60,872,496
임목폐기물				4,481,124
공급가액				2,803,272,728
부가가치세				280,327,272
도급공사비				3,083,600,000
관급자재비				1,191,600,000
폐기물처리비				127,760,000
총 공사비				4,402,960,000

도급공사비 발주현황

공 종	도급공사비	전차분	3차분	누 계	잔여분	비고
1.토공	850,015,002	332,630,229	217,212,762	549,842,991	300,172,011
2.배수공	1,313,372,479	693,964,998	315,713,892	1,009,678,890	303,693,589
3.옹벽공	591,107,142	504,559,008	86,548,134	591,107,142	0
4.포장공	987,848,824	223,091,479	368,785,973	591,877,452	395,971,372
5.교통안전시설공	1,732,785,827	740,593,283	506,920,987	1,247,514,270	485,271,557
6.부대공	1,598,063,184	659,764,438	422,118,385	1,081,882,823	516,180,361
7.데크공	166,415,350	166,415,350		166,415,350
8.조경공	1,010,312,157	136,913,599	217,935,117	354,848,716	655,463,441
9.상수도공	11,111,504		11,111,504		11,111,504
직접공사비	8,261,031,469	3,457,932,384	2,146,346,754	5,604,279,138	2,656,752,331
제경비	2,412,382,861	942,499,617	591,572,354	1,534,071,971	878,310,890
제경비 제외공종	424,412,728	301,214,000	60,872,496	362,086,496	62,326,232
임목폐기물	4,481,124		4,481,124	4,481,124	0
물가변동 조정 적용금액	231,951,818			0	231,951,818
공급가액	11,334,260,000	4,701,646,001	2,803,272,728	7,504,918,729	3,829,341,271
부가가치세	1,133,426,000	470,164,600	280,327,272	750,491,872	382,934,128
도급공사비	12,467,686,000	5,171,810,600	3,083,600,000	8,255,410,600	4,212,275,400

차수별 수량 현황

▣공사명 : 밤고개로 확장공사(장기계속 3차)

구 분		단위	주요수량					비고
			전체	전차	3차	누계	잔여분
1.토공	흙깍기	㎥	28,971	11,000	7,681	18,681	10,290
	사토운반	㎥	25,408	8,325	7,456	15,781	9,627
2.배수공	PC암거	m	356	356		356	0
	우수관로(D450)	m	2,126	958	700	1,658	468
	우수관로(D600)	m	980	210	134	344	636
	우수관로(D800)	m	97	0	97	97	0
	맨홀설치	ea	79	27	22	49	30
	선배수로	ea	1,182	563	505	1,068	114
3.옹벽공	산석옹벽	㎡	2,061	1,733	328	2,061	0
	경관옹벽	㎡	171	171		171	0
4.포장공	아스콘 기층	㎡	17,371	1,000	5,647	6,647	10,724
	아스콘 중간층	㎡	17,371	1,000	5,647	6,647	10,724
	아스콘 표층	㎡	65,866		20,911	20,911	44,955
	경계석	m	12,693	3,251	3,875	7,126	5,567
	투수블럭	㎡	13,790	4,524	3,779	8,303	5,487
5.교통 안전 시설공	PE방호벽	ea	2,723	1,400	1,007	2,407	316
	라바콘설치철거	ea	686	200		200	486
	디자인휀스설치철거	m	2,888	410	696	1,106	1,782
	가림막휀스설치철거	ea	1,373	1,068		1,068	305
	안전표지판	식	1	0.3	0.3	0.6	0.4
6.부대공	암파쇄방호벽	m	302	302		302	0
	냉각탑공사	식	1	1		1	0
	기타공사	식	1	0.3	0.4	0.7	0.3
7.데크공	테크공	식	1	1		1	0
8.조경공	수목제거	주	31,823	24,323	7,500	31,823	0
	수목이식	주	103	56	47	103	0
	수목식재	주	96,416	21	17,892	17,913	78,503
9.상수공	상수공	식	1	0	1	1	0
10.제잡비제외공종		식	1	0.52	0.14	0.66	0.34

발 주 현 황 (장기계속 3차)