공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 2022년 구소규모 편익시설(도로포장) 설치공사(연간단가)

2. 공사위치 : 성북구 관내 일원

3. 목    적 : 노후된 도로 및 도로시설물을 신속히 보수하여 주민 불편을 최소화하고, 도시미관을 제고하기 위해 시행하는 공사임.

4.공사개요

공 종	규 격	단 위	수 량	비 고
측구 설치	T=20Cm	m	600
아스팔트 포장	T=12.5Cm	a	110
보도블록 포장	T=6～8Cm	a	25

5. 설계변경조건

가. 다음과 같은 경우에 설계변경 할 수 있다.

- 물량의 변동이 발생한 때

- 설계도서와 현장여건이 상이할 때

- 기타 감독관이 필요하다고 인정할 때

- 우리 구청의 불가피한 사정에 의하여 공사물량의 변동이 있을 때

6. 공사기간

본 공사의 기간은 착공일로부터 2022. 12. 31일 까지로 하고, 다음의 경우에 한하여

기간을 연장 할 수 있다.

가. 공사시행 중 천재지변 등으로 인하여 작업이 불가하였을 경우

나. 시행청의 지시에 의거 작업을 중단하였을 경우

다. 기타 우리 구(시행청)의 사정에 의하여 공사기간이 연장되었을 경우

7. 예정공정표

공 종	수량	2022. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
부대공사	1식	----------------------------------------------------------
토공사	1식	----------------------------------------------------------
도로 및 포장공사	1식	----------------------------------------------------------

8. 사토처리

가. 사토는 실제 반출된 물량을 기준으로 정산하고 기성․준공시 사토대장 등을 제출하여야 한다.

나. 사토처리를 발주청의 승인 없이 불법 매립 및 부당하게 처리할 때는 형사 및 민사상 책임을 진다.

9. 재료관리

가. 공사용 모든 자재는 KS 규격품을 사용하되 KS 규격품이 없을 때에는 발주부서의 승인을 득한 제품을 사용하여야 한다.

나. 모든 자재는 필요시 품질시험을 실시하여야 하며, 시공자는 감독자의 지시에 의거 지정된 기관에 시험을 실시하여 합격된 제품을 사용한다.

다. 사용자재는 제조자로부터 KS 인증서, 품질시험성과표 등을 사전에 제출 받아 감독자에게 승인을 득한 후 사용한다.

라. 자재(관급, 사급) 수불부를 작성 기록하고 준공시 제출한다.

10. 공사현장 관리

가. 공사 시공 도중 수급인은 감독관의 허가 없이 공중에 해를 미칠만한 시공방법을 써서는 안 된다.

나. 공사현장에 화재, 도난, 기타의 사고 방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

다. 수급인은 공사현장의 일반 통행인이 보기 쉬운 장소에 공사안내표지판을 설치하여야 한다.

라. 수급인은 공사장 및 그 부근에 있는 지상, 지하의 기존 시설에 대하여  지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

11. 안전조치

가. 수급인은 공사 시행으로 인하여 인명 피해나 안전사고의 발생이 우려되는 장소가 있을 때에는 즉시 위험표시 및 적절한 응급조치를 수급인 부담으로 하고 감독관에게 보고하여야 하며, 안전사고로 인한 민ㆍ형사 사건 등이 발생할 경우에는 관련되는 모든 책임을 진다.

나. 공사에 필요한 보안조치는 관계법규에 따라 만전을 기하고 필요한 제반시설을 갖추어야 한다.

다. 공사시공 중에는 인접해 있는 기존구조물 또는 교통시설물 등에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호 시설을 설치하여야 한다.

라. 토지의 붕괴, 낙반, 가설물이나 건축물의 파손 등 기타 공정 계획에 영향을  미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때, 혹은 그러한 사고발생의 우려가 있는 사항을 발견하였을 때에는 즉시 응급조치를 취하고 감독관에게 보고하여야 한다.

12. 공기연장

가. 천재지변 또는 공사용 재료의 국내품귀, 시행청의 사정에 의하여 공사가 중단되었을 때

나. 공사기간 중 강우, 강설일수가 평년 보다 많아 공사에 막대한 지장을 줄 때

13. 공사시행 및 작업완료 보고

가. 수급인은 발주청의 작업지시가 있을 경우, 작업 대상지에 대한 상세 시공 계획 및 도면을      작성하여 공사를 시행하여야 하며, 작업 지시 기간 내 공사를 완료하고 시공 상황을      실측 한 도면과 공사 전, 중, 후 사진을 첨부하여 작업완료보고서를 감독관 경유      하여 제출하여야 한다.

나. 설계도서, 시방서 및 제반규정 사항 등이 서로 상이하거나 내용이 불분명한 경우      에는 감독관의 지시에 따르며, 공사구간 및 물량 증·감은 추후 정산한다.

14. 수급인의 의무

가. 모든 공사는 시방서와 설계도서에 부합되도록 하여야 하며, 수급인은 기술적인 사항을 완전히 숙지하고 공사를 시행하여야 한다.

나. 시공시 손상을 받은 공사 부분이나 표준 이하로 시공된 부분은 시방서와 설계도서에 부합되도록 수급인이 부담하여 대치 또는 복구하여야 한다.

다. 수급인은 법령에 의해 배치한 현장대리인을 감독관의 승인 없이 임의로 현장을 이탈시켜서는 아니 된다.

라. 시공 중 공사로 인한 주민피해 등 민원처리는 도급자 부담으로 처리한다.

15. 기타사항

가. 단가 계약된 물량은 추정 물량이므로 증ㆍ감 될 수 있다.

나. 보도포장 품질관리자 1인(품질관리자가 없는 현장은 현장 참여기술자 중 1인) 및 포장기능공 전원은 전문건설공제조합 기술교육원에서 시행하는 보도포장 전문기술 교육과정을 이수하여야 하며, 착공시 수료증 사본을 제출하여야 하고 공사 시행시 이수증을 소지하여야 한다.

다. 도로포장 품질관리기술자는 건설기술연구원 등 교육인정기관에서 시행하는 도로포장 전문기술 교육과정을 이수하여야 하며, 착공시 교육이수증 또는 교육이수계획서를 제출하여야 한다.

16. 고용개선지원비(주휴수당)

가. 계약상대자는 서울특별시 건설정보관리시스템(One-PMIS)을 통하여 사업 관리 및 공정보고를 하여야 합니다.

나. 계약상대자는 착공계 제출 후 7일 이내에 서울특별시 건설정보관리시스템(One-PMIS)에 사용자 및 공정계획 등록을 완료하여야 합니다.

다. 계약상대자는 서울특별시 건설정보관리시스템(One-PMIS) 사용 시「One-PMIS 운영지침」을 준수하여야 합니다.

라. 계약상대자는 노무비 청구 시 전자인력관리시스템(건설근로자공제회)와 연계한 건설정보관리시스템(One-PMIS)에서 노무비청구서를 출력하여 증빙자료로 첨부하여야 합니다.

마. 하도급계약 상대자가「산업안전보건법 시행규칙」제2조 제1항 각 호에 해당하는 재해를 발생시킨 경우에는 재해이력을 건설정보관리시스템(One-PMIS) 에서 관리하며, 서울시에서 발주한 공사의 하도급공사에 5년간 참여를 배제합니다.

- 「건설정보관리시스템(One-PMIS)」 사용 문의처

- 서울시 도시기반시설본부(☏02-3708-2382, 2387)

17. 근로자 적정임금 지급 의무

가. 계약상대자는「서울특별시 공사계약 특수조건」에 따라 계약 이행에 있어서 시공상 공종 및 직종에 따라 필요한 자격과 능력을 갖춘 근로자를 고용하여야 하고, 그 근로자에게는 적정임금(대한건설협회에서 조사‧공표하는 시중노임단가 이상)을 보장하여야 합니다.

나. 계약상대자는 하도급계약을 체결하는 경우, 그 대금 산정 시 적정임금을 반영하여야 하고, 하수급인으로 하여금 ‘가’항의 의무를 이행할 것을 하도급계약의 내용으로 포함시켜야 합니다.

※ 계약상대자가 상기 의무를 이행하지 않을 경우 계약담당자는 이를 시정하도록 요구할 수 있으며, 계약상대자가 시정요구를 따르지 않을 경우 계약담당자는 시중노임단가로 산정된 노무비 예정가격과 시중노임단가에 미달하여 근로자 또는 하수급인에게 실제로 지급한 노무비 간의 차액 상당에 대한 손해배상 청구 또는 계약해지를 할 수 있음.

다. 계약상대자는 건설근로자에게 주휴·연차수당 등 법정 제수당을 정당 지급하여야 하며, 반드시 “서울시 건설일용근로자 표준근로계약서”를 작성·보관하여야 합니다.

라. 계약상대자는 하도급계약을 체결하는 경우, 하수급인으로 하여금 ‘다’항의 의무를 이행할 것을 하도급계약의 내용으로 포함시켜야 합니다.

마. 고용개선지원비(PS단가)에 대한 정산은 ‘고용개선지원비 세부 집행기준’ 따릅니다.