<첨부1. 9호선 3단계 총사업비 조정현황>

□ 9호선 3단계 차수별 총사업비 조정현황

(단위:백만원)

구 분	1차 승인 (‘09.7.28)	2차 승인 (‘10.3.8)	3차 승인 (‘11.3.2)	4차 승인 (‘10.10.24)	5차 승인 (‘12.11.1)	6차 승인 (‘13.2.5)	7차 승인 (‘14.12.8)	8차 승인 (‘15.7.14)
총사업비	1,142,990	1,345,181	1,121,203	1,122,927	1,178,480	1,244,929	1,307,748	1,309,532
조정사유	예비타당성 대비 총사업비 반영 (증323,562)	차량구입비, 연장구간 보상면적 증가, 물량변동 (증202,191)	낙찰차액 등 감액 (감223,978)	물가변동 증액 반영 (증 1,724)	인천공항직결 차량구입비 증액 반영 (증55,553)	물가변동 증액 반영 (증 66,449)	종점부 연장 물량변동 차량구입비 증액반영 (증62,819)	실시설계 물량변동 증액반영 (증1,784)

(단위:백만원)

구 분	9차 승인 (‘17.3.10)	10차 승인 (‘17.5.30)
총사업비	1,356,656	1,401,460
조정사유	차량구입비 (증47,124)	물량변동 (증44,804)