《붙임2》소요산출 설명서

사당고가차도교

(도시안전본부 교량안전과 오석관 ☎2133-1972)

1. 시설물개요

○ 위    치 : 관악구 남현동 ~ 서초구 방배동

○ 시설물종별(등급) : 1종(B등급)

○ 준공년도 : 1997. 5.

2. 조치대상 현황

(단위 : 건)

구 분	시행년도	조치완료
		조치대상	보수․보강 완료	미조치
계		35	0	35
정밀점검	2014년	35	0	35

※ 작성요령

1) 진단․점검 지적사항 및 내진성능개선 등 전체 조치대상에 대해 작성

2) 2015년에 조치예정(일상유지 또는 단일사업)인 건수는 보수․보강 완료로 기재

3. 미조치사항 보수를 위한 년차별 소요예산

(금액단위 : 백만원)

구 분	계		2016년		2017년		2018년
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	35	1,209	26	1,200	9	9	0	0
2014 정밀점검	35	1,209	26	1,200	9	9	0	0

4. 미조치사항 세부내용                             (단위 : 백만원)

연번	사업 내용	물량	소요예산	용역보고서 상 보수 우선순위	보수계획 연도	사업시행 우선순위(※)
	35		1,209
2014 정밀점검			1,209
1	바닥판균열 (c/w=0.3mm이상)	0.9m	0.16	1	2016	3-1
2	바닥판 균열부 백태 (0.3mm미만)	21.94㎡	1.32	2	2016	2-10
3	바닥판 박리	0.27㎡	0.08	2	2016	2-10
4	바닥판 백태/누수	1.98㎡	0.12	2	2016	2-10
5	거더 및 가로보강재부식	3.86m	0.29	1	2016	3-2
6	도장박리(거더및가로보 )	3.12m	0.23	1	2016	3-2
7	거더 및 가로보 긁힘	3.33㎡	0.25	1	2016	2-10
8	거더 및 가로보볼트부식	0.98㎡	0.07	1	2016	3-2
9	하부구조 균열(c/w=0.3mm이상)	9.3m	1.67	1	2016	3-1
10	하부구조 박리,파손,긁힘	7.52㎡	2.26	2	2016	2-10
11	하부구조 백태/누수흔적	1.59㎡	0.1	2	2016	2-10
12	하부구조 시건장치노후화	3EA	0.23	2	2016	2-10
13	하부구조 교각표지판 노후화	7EA	1.05	2	2016	2-4
14	하부구조 교각점검로 미설치	2EA	7.5	2	2016	2-10
15	하부구조 점검사다리 길이부족	3EA	4.5	2	2016	2-10
16	받침장치/Plate부식	1.14㎡	0.09	1	2016	3-2
17	받침장치 볼트부식	0.06㎡	0.01	1	2016	3-2
18	받침몰탈/콘크리트파손	0.05㎡	0.01	2	2016	2-10
19	종조인트 Seal제 파손	75m	1.13	1	2016	3-9
20	아스콘 망상균열	교량부 (A=63a)	900	3	2016	2-1
21	아스콘 소성변형	옹벽부 (A=42a)	300	3	2016	2-1
22	옹벽 균열(0.3mm이상)	4.8㎡	0.86	1	2016	3-1
23	옹벽 콘크리트 파손	0.53m	0.16	2	2016	1-4
24	옹벽 백태	0.24㎡	0.02	1	2016	2-10
25	옹벽 균열(0.3mm이상)	73.95	13.31	1	2016	3-1
26	옹벽 백태	1.14m㎡	0.07	2	2016	2-10
27	거더 및 가로보 오염물 및 폐기물 청소	3.75㎡	0.15	3	2017	2-10
28	유간부 토사퇴적	11.25m	0.45	3	2017	2-10
29	배수구막힘	11EA	0.3	3	2017	2-10
30	배수관연결부누수(부식)	9EA	0.54	3	2017	2-10
31	연석균열(0.3mm이상)	18.9m	3.4	3	2017	3-1
32	난간연석 박리,박락,파손	5.88㎡	1.77	3	2017	2-10
33	난간연석 콘크리트 열화	8.33㎡	2.5	3	2017	2-10
34	난간·연석 철근노출	0.06㎡	0.02	3	2017	1-4
35	옹벽 실링재열화	2.55m	0.16	3	2017	2-10

※ 사업시행 우선순위는 전체 조치대상에 대한 시행 우선순위 결정