공  사  설  명  서

1. 공 사 명 : 가양 나들목 개선공사

2. 위    치 : 강서구 가양동 439-1(가양 나들목)

3. 사업목적 : 나들목 접근 불편 주민 의견에 대하여 예산을 반영, 나들목 주변 환경을 개선하고 이용시민 만족도 향상에 기여하고자 함.

4. 공사개요

E/V 1개소 신설, 계단 경사 개선 / 시설환경개선(보안등 및 조경식재)

5. 시공기준

본 공사는 표준시방서, 서울특별시 전문시방서, 공사시방서에 의거 시공하고 기타 공종에 대한 시공은 발주기관과 계약상대자가 합의하여 결정한다.

6. 공사기간

본 공사 기간은 착공일로부터 ´18.12.31일까지로 한다. 단, 다음의 경우에 한하여 발주기관에 연기 요청할 수 있다.

가. 천재지변 및 불가항력으로 작업이 불가능한 경우

나. 수급자재 등의 공급이 지연되어 공사의 진행이 불가능하였을 경우

다. 발주기관의 책임으로 착공이 지연되었거나 시공이 중단되었을 경우

라. 공사계약일반조건 제26조 제1항에 따른 공사기간 연장을 청구할 경우

7. 설계변경

본 공사 시행 중 다음과 같은 사유가 있을때는 설계변경 할 수 있다.

가. 당초 설계물량의 증․감이 있을 때

나. 단가의 변동지시가 있어 본 공사에 해당될 때

다. 시공 공법이 변경될 경우

라. 시공 중 한강사업본부 시행방침이 변경되었을 경우

- 설계변경 사유 발생시 해석상의 차이가 있을때에는 발주기관과 계약상 대자가 합의하여 결정한다.

8. 준공사진 제출

본 공사 시공자는 반드시 사진을 공종별로 동일장소, 동일방향으로 촬영하여 원판(전,중,후) 및 준공사진을 제출하여야 한다.

9. 안전관리

본 공사시공 중 책임당사자(도급자)의 부주의로 인하여 인명의 피해 및 사유재산의 손해발생, 공공시설물의 파손 또는 도난 등의 피해가 있거나, 공익에 손실을 끼친 경우에는 도급자가 책임을 지고, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

10. 공사 예정공정표

일정 공종	착공일로부터 8개월									비고
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
구조물공
마감공사
도로시설공
조경공사
부대공사
공정율(%)	5	30	30	5	5	10	5	5	5
누계공정율(%)	5	35	65	70	75	85	90	95	100

11. 현장사진