공 사 시 방 서

개화지하차도외 5개소 차량방호울타리 교체공사

2020. 04

서울특별시

강서도로사업소

목 차

	제1장	총 칙							1
		1.1		공사일반	···········································				1
		1.2		계획 및 관리	···········································				20
		1.3		자재관리	···········································				35
		1.4		품질관리	···········································				37
		1.5		안전․보건 및 환경관리		························			42
		1.6		준공	··········································				74
	제2장	안전방호책 알루미늄난간 시방서							80
		2-1		적용범위			···············		80
		2-2		재질			···············		80
		2-3		가공 및 표면처리			···············		81
		2-4		시공			···············		81
		2-5		검사 및 유지관리				··········	81
	제3장	교통처리계획							84

제1장 총 칙

제1장 총 칙

1.1 공사일반

1.1.1 적용범위

1) 적   용

이 공사 시방서는 서울특별시 강서도로사업소에서 발주하는 개화지하차도외 5개소 차량방호울타리 교체공사에 적용한다.

2) 적용순서

(1) 설계도서간에 상호모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

① 공사시방서

② 설계도면

③ 물량내역서

(2) 이 공사시방서의 총칙과 총칙 이외의 시방 내용간에 상호모순이 있을 경우에는 총칙이외의 시방에 명시된 내용을 우선 적용한다.

3) 법규 우선 준수

건설업자는 이 공사시방서에 “ 〇〇은 관련법규(조례를 포함한다. 이하 이 공사시방서에서 같다)의 규정에도 불구하고 이 절에서 정하는 바에 따른다”라고 별도로 명시되어 있지 않은 한, 이 공사시방서를 포함한 설계도서의 내용인 대한민국 관련 법규의 규정과 상호 모순될 경우(건설공사에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다)는 대한민국 관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

4) 감리원 또는 공사감독자 경유

건설업자 및 현장대리인 발주청에 통지 또는 제출하는 서류는 건설공사 감리원 또는 공사감독자를 경유하여야 한다.

5) 적용기준

본 공사는 본 특별시방서와 다음에 열거하는 표준시방서 및 설계도서에 의거 시공하되 동 시방서 및 규정에서 명시하지 않은 사항은 감독원의 지시를 받아 시공해야 한다.

(1) 도로의 구조․시설기준에 관한 규정 : 국토해양부

(2) 도로교 설계기준 : 도로교통협회

(3) 콘크리트 구조설계기준 : 국토해양부

(4) 도로공사 표준시방서 : 도로공사

(5) 토목공사 표준시방서 : 국토해양부

(6) 용접강도로교 표준시방서 : 국토해양부

(7) 하천공사 표준시방서 : 국토해양부

(8) 토목공사 일반표준시방서 : 국토해양부

(9) 건설공사 품질관리 검사기준해설 : 국토해양부

(10) 시험관리규정

(11) 건설기술관리법(법률 제3934) 및 동법 시행령 및 시행규칙(대통령령 제12692호)

(12) 도로포장설계․시공지침

(13) 서울특별시 표준시방서

6) 설계도서

(1) 계약도서의 정의

계약도서는 계약서에서 정의된 도서를 말하며 도면, 시방서 및 설계서를 포함한다.

(2) 계약도서의 우선순위

도급자는 각 계약서류 전부에 중복 기재되어 있지 않은 사항일지라도 어느 하나에 명기되어 있을 경우 이를 준수하여야 한다.  만약 중복되어 있으면 그 내용이 서로 상이할 경우에는 원칙적으로 감독의 결정에 따르도록 한다.

(3) 시공도면

도급자는 공사의 어느 부분이나 그 착수이전에 공사완공에 필요하다고 인정되는 추가 시공도면 즉 철근가공조립도, 현장조사시 기존 단면칫수가 설계도면과 불일치할 경우 변경도면을 작성하여 공사감독에게 서면으로 제출하여 승인을 받아야 한다.

도급자는 공사의 착수 전에 계약도면을 상세히 검토하고 판단하여 검토보고서를 제출하여야 한다.  또한 공사감독은 공사착수 승인에 앞서 도급자가 그들이 책임을 질 공사에 필요하다고 인정되는 세부시공도면의 작성, 제출을 요구할 수 있다.  계약도서의 검토 및 모든 시공에 필요한 도면의 작성에 따른 비용은 도급자 부담으로 한다.

(4) 계약도서의 비치

공사에 관련되는 계약도서는 항상 공사현장에 비치하여야 한다.  계약도서를 감독관실에 필요한 부수를 비치하여야 한다.

1.1.2 용어의 정의

1) 공사 감독자

이 공사시방서에서 “공사감독자”라 함은 “공사계약일반조건 제2조제3호” 의 공사감독자를 말한다.

2) 공사시방서

이 공사시방서에서 “공사시방서”라 함은 표준시방서 및 전문시방서를 기본으로 하여 작성하되, 공사의 특수성․지역여건․공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능․규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술하는 시공기준을 말한다.(건설기술관리법 시행규칙 제14조의 2 제1항, 제2항)

3) 건설업자

이 공사시방서에서 “건설업자”라 함은 “공사계약일반조건 제2조 제2호”의 “계약상대자”를 말한다.

4) 현장요원

이 공사시방서에서 “현장요원”이라 함은 당해 공사에 상당한 기술과 경험이 있는 자로서 건설업자가 지정 또는 고용하여 현장 시공을 담당하게 한 건설기술자를 말한다.

5) 공사 현장대리인

이 공사시방서에서 “공사 현장대리인(이하 이 공사시방서에서 ”현장대리인“ 이라 한다)”이라 함은 “공사계약일반조건 제14조”의 “공사현장대리인”을 말하며, 공사에 관한 전반적인 관리 및 공사업무를 책임있게 시행할 수 있는 권한을 가진 건설기술자를 말한다.

1.1.3 공사감독자의 업무

1) 공사감독자는 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 건설업자, 현장대리인, 현장요원, 건설업자가 당해 공사를 위하여 지정하거나 고용한 자 및 건설업자와 하도급계약을 체결한 자에 대하여 관련법규 및 계약조건이 정하는 범위 내에서 공사수행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 행한다.

2) 공사감독자가 건설업자에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 한다. 다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있다.

1.1.4 건설업자의 책무

1) 설계도서 검토

(1) 건설업자는 공사 착수 전에 설계도서를 면밀히 검토하고, 설계도서의 오류, 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

(2) 설계도서 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 해당공사 착수 전까지 현장대리인의 검토의견서를 첨부하여 발주청에 통지하고 발주청의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

① “공사계약일반조건 제19조의 설계변경 사유”에 명시한 사유가 있는 경우

② 설계도서와 같이 시공하는 것이 불가능한 사항이 있는 경우

③ 공사기한 연기를 필요로 하는 사항이 있는 경우

④ 기타 건설업자가 지급 받을 권리가 있다고 생각되는 추가비용이 있는 경우

⑤ 기타 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

⑥ 건설업자가 발주청에 통지하지 아니하나 발주청의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 공사에 대하여는 기성량으로 인정하지 않는다. 또, 건설업자가 임의로 시행한 공사에 대하여 발주청의 원상복구나 시정지시가 있을 때에는 건설업자의 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

2) 책임 한계

(1) 건설업자는 현장대리인 등 건설업자가 당해 공사를 위하여 임명․지정․고용한 자 및 건설업자와 납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

(2) 공사목적물을 발주청에 인도하기 전에 발생한 공사목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 건설업자 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 건설업자가 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다.

(3) 건설업자가 발주청에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

3) 현장대리인 등의 현장상주

(1) 건설업자가 지정․배치한 현장대리인, 현장요원, 안전관리자, 품질관리전담자 또는 품질관리자, 시험사는 현장에 상주하여야 한다.

(2) 공사의 전부 또는 일부의 착공지연기간동안의 현장요원, 안전관리자, 품질관리전담자 또는 품질관리자, 시험사 등의 상주여부 및 인원수 등에 대하여는 발주청과 협의하여 정한다.

4) 현장조사

설계도면 및 기타 계약도서에서 제공된 기존 단면의 치수, 수문자료, 토질 및 지질자료는 설계 당시의 자료에 근거한 것으로서 시공당시의 현황과 차이가 있더라도 도급자가 입찰 전에 충분히 공사현장을 조사하여 만족한 것으로 판단하며, 이러한 현장 내용의 변경이 분명히 기재된 설계변경 사항이 되지 않을 경우 도급자는 공사비 증액을 요구할 수 없다.

5) 기타 의무사항

도급자는 다음 사항에 대하여 의무가 주어지면 성실히 이행하여야 한다.

(1) 모든 공사를 시행함에 있어 시방서 및 설계도면의 기술적인 사항을 충분히 검토하여 시공토록 하여야 하며 도급자는 기술적인 사항에 대하여 책임을 져야 한다.

(2) 발주자가 도면에 의하여 본 공사의 최후 인계를 받을 때까지 공사목적물을 도급자 부담으로 관리하며 그 책임을 진다.

(3) 손상을 받은 공사부분이나 표준이하로 시공된 부분은 공사감독이 만족할 때까지 도급자가 대치 또는 복구하여야 한다.

(4) 현장대리인 및 현장직원과 고용원이 불미한 행위를 하거나 시공에 부적합하다고 인정하여 공사감독이 교체를 명하였을 때 도급자는 이에 응해야 한다.

(5) 본 공사에 대하여 제반검사결과 처분지시가 있을 시는 이에 따라야 하며 이의를 제기할 수 없다.

(6) 본 공사 시공지구이외에 있는 시설물을 보존하여야 하며 손상을 입혔을 때는 도급자 부담으로 복구하여야 한다.

(7) 도급자는 도로의 기존 시설물에 대한 피해가 없도록 공사를 시행하여야 하고 기존 시설물 철거시 원형이 보존되도록 주의를 기울여야 하며, 손상된 부분에 대하여는 도급자 부담으로 원상 복구하여야 한다.

(8) 도급자는 본 공사에 필요한 모든 인허가 업무와 민원업무를 도급자 부담으로 처리하여야 한다.

(9) 과적차량단속 SYSTEM, 계획관리SYSTEM, 기타 신기술 공법 및 시험에서 지정하는 방법 등에 대한 검토 및 설계를 해야 한다.

(10) 단계별 시공에 따른 교통 통행 교량 조사 및 감시는 전적인 책임하에 이루어져야 한다.

1.1.5 공사기한 연기

1) 연기 요청일수

건설업자가 “공사계약일반조건 제26조제1항”에 따라 계약기간(공사기한) 연장을 발주청에 요청할 수 있는 일수는“1.2.2 제출물 2) 공사예정공정표” 상의 주공정이 해당 연기사유로 인하여 불가피하게 지연된 일수를 초과할 수 없으며, 발주청과 협의하여 정한다.

2) 제출

공사기한 연기 요청시의 제출서류, 부수 및 시기 등은 “1.2.3 공무행정서류 6) (2) 공사기한 연기원”에 따른다.

1.1.6 설계변경

1) 설계변경 사유

건설업자는 다음과 같은 사유가 발생하여 설계도서의 변경이 불가피할 경우에는 발주청의 승인을 득하여 변경 시행할 수 있다.

(1) “공사계약일반조건 제19조 제1항”에 따라 건설업자가 발주청에 통지한 다음 각호의 사유

① 설계도서의 내용이 불분명하거나 누락․오류 또는 상호 모순된 점이 있을 때

② 지질․용수등 공사현장의 상태가 설계도서와 다를 때

(2) “공사계약일반조건 제19조의 5항”에 따라 발주청이 건설업자에게 통보한 다음 각호의 사유

① 당해공사의 일부변경이 수반되거나 추가공사의 발생

② 특정공정의 삭제

③ 공정계획의 변경

④ 시공방법의 변경

⑤ 기타 공사의 적정한 이행을 위하여 변경이 필요한 사항

(3) “1.1.1 3) 법규 우선준수”에 따라 설계도서의 내용이 관련법규 및 조례와 다른 사항

(4) 설계도서와 당해공사의 지급자재 구입계약서 및 시방서가 정합되지 않는 사항

(5) 기타 이 공사시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

2) 변경요청서류

설계변경 요청에 필요한 제출서류, 부수 및 시기 등은 “1.2.3 공무행정서류 6) (1) 설계변경승인 요청”에 따른다.

1.1.7 기성량의 조정

공사의 검사 결과, 기성량 부족 및 부적합 시공부분에 대하여는 기성량을 조정하여 공사금액을 지불할 수 있다.

1.1.8 하도급

1) 하수급자 선정

건설업자가 공사부분을 하도급하는 경우에는 그 시공을 담당하기에 적합한 기술 및 능력이 있는 자로서 해당 공사의 면허소지자를 하수급자로 선정하여, 해당 공사 착수 전에 동 면허 사본과 실적증명서를 제출하여 감리원 또는 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

2) 하수급자에의 주지

건설업자는 발주청 또는 감리원 또는 공사감독자나 공사감독자의 지시, 승인, 협의로 결정된 사항 및 안전의 확보에 관련한 사항에 대하여 수급자에게 철저히 주지시킨다.

3) 하도급 시행계획서 등

(1) 건설업자는 하도급을 시행하기 전에 하도급시행계획서를 발주청에 제출하여야 한다. 또한, 해당공사 착수예정일 30일전까지 하도급 계약을 체결하여야 한다.

(2) 하도급시행계획서에는 다음사항이 포함되어 있어야 한다.

① 하도급 예정업종

② 하도급 계획금액

③ 하도급계약 예정일

(3) 하도급에 관한 제출서류, 부수 및 시기 등은 “1.2.3 공무행정서류 9) 하도급 관련서류”에 따른다.

4) 안내판 설치

건설업자는 건설업자 및 발주청 사무실 입구에 “불공정 건설행위 신고센터 안내”를 알리는 안내판을 설치하여야 한다.

1.1.9 지중발굴물 등

건설업자는 공사장 안에 있는 물건, 지중에 있는 물건 또는 철거재를 임의로 발굴, 운반, 처분 또는 사용하지 못한다.

1.1.10 관련 규정 등의 비치

건설업자는 공사의 원활하고 신속한 추진 및 적정한 품질관리를 위하여 현장사무실 또는 현장시험실에 아래의 관련 규준 등을 상시 비치하여야 한다.

1) 공사와 관련한 계약문서 사본 일체

2) 관련 지급자재 구입계획서 및 자재시방서

3) 계약 및 건설 관련 법규 및 조례

4) 관련 한국산업규격(KS)

5) 적격심사서류 및 부대입찰심사 서류

6) 기타 “1.2.3 공무행정서류”에 명시되어 있는 서류

1.1.11 법령 및 규칙의 준수

도급자는 입찰당시 대한민국 내에서 효력을 가진 모든 법률, 조례 및 규칙과 다음 법률을 준수하여야 한다.

1) 예산회계법

2) 건설업법

3) 근로기준법

4) 산업안전보건법

5) 건설안전보건법

6) 환경보전법

7) 도로법

8) 도로운송차량법

9) 하천법

10) 소방사업법

11) 공해방지법

12) 소득세법, 법인세법, 지방세법

13) 국세법 및 지방세법에 관련된 제법령, 조례, 규칙 등

14) 한국 표준 공업규격

15) 시설물의 안전관리에 관한 특별법규(법, 시행령, 시행규칙)

16) 서울특별시 행정권한 위임 조례

17) 서울특별시 공공시설 안전관리규정

18) 서울특별시 구의 공공시설 관할에 관한 규정

19) 중앙재해대책본부 운영 규정

20) 재해의 예방 수급에 관한 훈령

21) 서울특별시 도시재해종합대책 운영 규정

22) 지방도로 과적차량 단속운영 규정

23) 기타 상기 법률과 관련된 법령, 규칙, 규정 등

24) 지방자치단체를 당사로 하는 계약에 관한 법률(법, 시행령, 시행규칙)

1.1.12 용지의 사용

1) 도급자는 감독관의 승인을 얻어 공사를 시행하기 위한 직접 필요한 발주자 소관의 용지를 무상으로 일시 사용할 수 있다.

2) 공사를 시행하기 위해 발주자로부터 차용한 용지 이외의 토지를 사용하여야 할 때에는 그 토지의 차용, 보상 등은 도급자의 책임하에 이루어져야 한다.

1.1.13 공사현장 발생품

공사시공에 의하여 발생한 현장발생품은 감독관의 지시에 따라 정리하고 관리하며 현장발생품 조서를 작성하여 감독관이 지정하는 장소에서 인계하여야 한다.

1.1.14 공사현장관리

1) 항상 공사의 안전에 유의하여 현장관리를 실시할 것이며 재해방지에 최선의 노력을 다하여야 한다.

2) 공사현장이 인접되어 있거나 또는 동일장소에 다른 공사가 있을 경우에는 항상 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 조치하여야 한다.

3) 공사시공중에 감독관 및 감리자의 허가 없이 교통에 방해가 되는 행위 또는 공중에게 불편을 끼치게 하는 시공방법을 택해서는 안된다.

4) 시가지 공사에 있어서는 관리청과 긴밀한 협의 하에 소음, 분진, 진동, 악취, 붕괴, 추락, 전도등 공중 재해예방에 적극적으로 노력하여야 한다.

5) 공사장이나 그 주변에 있는 지상, 지하의 구조물에 대하여 지장을 주지 않도록 감독관과 협의후 방호공 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

6) 집중호우등 천재에 대하여는 평소부터 기상예보 등에 충분한 주의를 기울여 항상 이에 대처할 수 있는 준비를 하여 두어야 한다.

7) 화약 취급, 전기 등의 위험물을 사용하는 경우에는 그 보관 및 위급에 대하여 관계 법령에 정해진 바에 따라 최선의 방책을 강구하여야 한다.

8) 감독관 및 관할경찰서와 협의하여 관계법령에 따라 교통안전에 대하여 필요한 조치를 강구하여야 한다.

9) 공사시공에 영향을 미치는 사고, 인명피해를 일으킨 사고 또는 제3자에게 손해를 끼친 사고가 발생하였을 때에는 지체없이 그 상황을 감독관에게 보고하고 산업재해 조사규정에 따라 상세히 조사한 후 필요한 조치를 강구하여야 한다.

10) 공사용 운반로에서 사용하는 도로는 항상 양호한 상태로 유지하도록 노력하여야 한다.

1.1.15 연도대책

1) 공사시행에 있어 주변의 거주자, 통행자의 생명, 신체 및 재산에 대한 피해, 불편이 없도록 극히 주의해야 한다.

2) 부근 거주자에게 공사의 내용(시공방법, 시간, 장소등)을 사전에 주지시키며 그의 협력을 얻어야 한다.

3) 공사시공중 주변 구조물 기타 변형이 예상될 때 공사착수 전에 그의 상황을 파악할 수 있는 자료(도면, 스켓치, 사진)를 감독에게 제출하여 그의 보호대책을 세워 시공해야 한다.

4) 주변 구조물 기타 제3자에게 피해가 있을 때에는 즉시 응급조치를 취함과 동시 감독관과 협의하여 그 처리를 해야 한다.

1.1.16 소방 및 진동방지

도급자는 공사시행에 있어서 관계법령을 준수하고 항상 시공에 의한 소음으로 공중에 피해가 없도록 하며 적극 소음진동의 방지에 유의해야 한다.

특히 항타기, 원치, 콘프레샤 등의 진동 및 소음 발생원 기계류의 사용에 대하여는 그의 성능을 검토하여 적절한 조치를 해야 한다.

1.1.17 작업시간

1) 공사시행의 편의상 작업시간을 연장, 단축할 수 있으나 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 미리 감독관의 승인을 받아야 한다.

2) 공사시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장, 단축 또는 야간작업의 필요성을 감독관이 인정할 때에는 도급자는 그 지시에 따라야 한다.

1.1.18 시공에 대한 대외교섭

공사시공에 있어 대외적으로 교섭 처리할 사항은 원칙적으로 도급자가 행해야 한다.  또한 도급자가 교섭하는 사항에 대하여는 사전, 사후 감독관과 협의해야 하며 그의 결과를 감독관에게 보고해야 한다.

1.1.19 특허권 등의 사용

공사시행에 있어 특허권, 기타 제3자의 권리를 대행으로 하도록 되어 있다.  시공방법 및 재료 등을 사용할 때, 도급자는 그의 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

1.1.20 기계기구

기계기구는 예정공정표에 나타난 작업량 이상의 용량을 가져야 한다.  도급자가 기계기구의 성능을 표시하는 일람표 및 그 배치계획 등을 감독관에게 제출하여야 한다.

1.1.21 안전관리

1) 공사시행에 앞서 안전관리체제를 조직하고 자격을 갖춘 자를 선임하여야 한다.

2) 안전점검제도를 확립하여 점검자를 지정하고(공종별로) 점검일지와 작성비치

3) 안전표지를 부착하고 공종별 안전수칙을 표시하여야 한다.

4) 공사별로 표준작업안전지침을 활용하여야 한다.

(가설공사, 콘크리트 공사, 철골공사, 해체공사, 건설기계 등)

5) 건설공사 표준안전관리비 산정기준에 의거 안전관리비를 필히 계상하고, 이를 정산하는 방향으로 현장관리를 하여야 한다.

6) 재해방생의 위험요소를 미리 예측하여 제거하고 안전관리를 위해 공사도중 건설안전 전문기관의 진단과 평가를 받아 활용하여야 한다.

(1) 안전관리 소홀로 인한 각종사고 및 재해를 미연에 방지하기 위하여 특별시방서 안전관리편에 의거 시행하여야 하며 다음과 같이 안전관리 실시계획을 수립하여 제출하여야 한다.

① 정기(일일․주간)수시점검계획

② 특별(우기․해빙기등)점검계획

③ 연 1회 이상 전문안전진단 의뢰계획

④ 월 1회 이상 안전관리 교육계획

(2) 시공과정마다 발생될 수 있는 안전사고요소를 도출하고 이를 방지할 수 있는 절차․수단 등을 규정한 총체적 안전관리계획서(TSC:Total Safety Control)를 작성, 활용하여야 한다.

7) 도급자는 소음, 분진, 진동, 악취등 공해에 관한 예방대책에 대하여 상세히 계획을 수립하여 감독관과 협의 하에 공사를 시행하여 민원발생이 없도록 하여야 한다.

1.1.22 안전조치

1) 호우, 홍수, 폭퐁 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여 유사시에는 피해를 최소한도로 적게 받는 응급조치를 하여야 한다.

2) 공사에 필요한 보완조치는 관계법령에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획, 점검, 훈련 등을 실시하여야 하고, 필요한 제반시설을 갖추어야 하며, 감독관의 승인과 검사를 받아야 한다.

3) 공사착수전에 보안시설을 하여야 한다.

(1) 공사구역내 출입금지구역의 설정

(2) 도로의 교통제한 또는 금지

(3) 폭약사용에 대한 위험표시

(4) 전기, 상하수도, 송유관 및 통신 등 지하매설물의 중요성 시설에 대한 보호

(5) 위생적 음료수의 확보

(6) 위생적 변소와 배수시설

4) 도로의 교통을 제한하고자 할 때에는 다음 요령에 의하여야 한다.

(1) 교통제한의 범위, 기간, 보안조치 등에 대하여 감독관을 경유하여 소정의 소속을 밟아야 한다.

(2) 소속완료후 표지, 지시표 등의 보안시설을 완료하여 검사를 받은 후가 아니면 교통제한을 실시할 수 없다.

5) 작업장내에서는 안전모자를 써야 한다.

6) 공사 시공 중에는 인접해 있는 가설구조물 또는 교통시설에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호시설을 설치하여야 한다.

7) 공사시공중 정기적인 안전진단 평가를 건설안전전문가에게 받아 안전시공에 활용하여야 한다.

1.1.23 교통과 보완

1) 노면을 점용하는 공사의 시공기간 및 시공구간은 관리자 및 경찰서의 허가 조건에 따른 것이며 구획범위를 안정시켜 시공해야 한다.

2) 공사구역내에 출입하는 공사용 차량은 일반교통에 방해되지 않도록 운행의 지휘유도를 전달하는 안전요원을 배치하여 사고예방에 노력해야 한다.

3) 공사구역내에 순시원을 두고 주야 상시 순회하여 주변의 구조물, 매설물 등의 이상을 조사할 것이며 이상을 발견하였을 때에는 즉시 그의 대책을 강구함과 동시에 감독관과 관계자에게 통보하여 그의 지시에 따라 처리해야 한다.

4) 공사장에서는 시공상 필요한 것 외에는 화기를 사용해서는 안된다.  또한 화기 사용시에는 특별히 파기단속에 유의하여야 한다.

5) 공사장에서는 시공중의 구역 및 시공완성부분 등에 종업원이 상시 안전하게 통행할 수 있도록 통로 및 계단을 정비하여 충분한 조명시설을 설치해야 한다.

6) 공사용 가설전기설비에 사용하는 전기 기구류는 K.S 규격품을 사용할 것이며 전담 전기 기술자는 설비를 점검하며 누전 기타의 위험을 사전에 방지해야 한다.

7) 공사용 재료는 노상에 방치하지 못한다.

단, 부득이 노상에 적치할 때에는 사전 도로관리자, 소속경찰서 및 감독관의 승인을 받아야 하며, 또한 교통에 지장이 없도록 정리 정돈해야 한다.

8) 공사중 발생하는 풍수해 및 공사중의 돌발사고 등의 응급조치에 필요한 예인선 및 기계, 기구, 재료는 상시 일정한 장소에 상당수 비치해야 하며 그의 소재를 종업원에게 항상 주지시켜야 한다.

1.1.24 사고의 보고

가설물이나 구조물의 파손, 기타 공사계획에 영향을 미치는 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때 혹은 그러한 사고발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급 조치를 취하고 감독관에게 보고하여야 한다.

1.1.25 물의 오염방지 및 위생시설

1) 도급자는 공사시행에 있어서 하천등 자연환경의 오염을 방지하기 위하여 적절하고 충분한 조치를 취하며, 물의 오염 및 위생에 관한 법령을 준수하여야 한다.

2) 도급자는 필요에 따라 노무자의 거주용 가주택과 제반 위생시설을 설치하고 유지관리를 하여야 한다.

3) 공사 부유물에 의한 한강 오염 방지를 위하여 오탁 방지망을 설치하여야 하며, 그 설치 범위는 단계별 공사 순서에 따라 선착장, 대선 진출입 구간 및 가도 구간에 대해서 설치하는 것으로 하며, 특히 유심부 구간에는 유람선, 대선 및 기타 배들의 운항을 위하여

공사 일정 계획에 따라 설치 위치를 조정하여 그 공간을 조성해야 한다.  그 설치일정은 공정 계획에 따라 조정하는 것으로 하고 위의 운항로를 제외한 교량 전구간의 상류와 하류 측에 공사 완료시까지 설치하여야 하며, 그 계획은 감독관의 승인과 관련기관에 협조를 얻어야 한다.

1.1.26 공사건물 및 전화

공사에 필요한 도급자 사무소, 재료창고, 기계기구, 거치장소 등에 대하여는 감독관과 협의해야 한다.  또한 현장사무소 및 분소에는 반드시 전화를 설치해야 한다.

1.1.27 가설구조물

현장대리인 감독관의 입회 하에 공사구역내의 노면, 가설구조물을 정기적으로 점검하여 안전의 확보에 노력해야 한다.  현장에 설치되는 시설물은 교통 소통 및 도시 미관을 고려하여 수시 점검, 세척, 정돈하여야 한다.

1.1.28 전력설비

본 공사에 필요한 전력은 한국전력공사로부터 수전하며 그 편용에 따라 변전설비 및 배전설비공사를 할 것이며, 전기설비의 제규정에 의하여 시행하고, 정전 누전사고가 생기지 않도록 전담 전기기술자에 의해 충분히 관리 보수해야 한다.

1.1.29 공사기록(시공후 검사가 불가능한 것)

공사준공후의 검사가 곤란한 부분에 대하여는 감독관의 지시에 따라 그의 형상, 치수, 강도, 품질 등을 확인할 수 있는 기록 및 기타 필요한 자료(검사보고서, 사진, 품질시험 성적표 등)를 제출해야 한다.

1.1.30 관계공사와의 협조

도급자는 본 공사와의 직접관계가 있는 제공사(전기, 통신)에 대하여 상호 협조하여 공사의 편의를 도모하여 진척시켜야 한다.

1.1.31 치수

설계도서 및 시방서에 표시되어 있는 치수는 모두 마무리된 치수이다.

1.1.32 시공검사

본 시방서에 의하거나 또는 미리 감독관으로부터 지시된 곳, 중요한 공사단계의 단계별 완료 등에서는 감독관의 검사를 받지 않으면 다음 작업을 진행하여서는 안된다.

1.1.33 공사검사

1) 공사의 기성부분 검사, 준공검사에서는 현장대리인이 검사를 받아야 한다.

2) 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 검사관의 지시에 따라야 한다.

1.1.34 관공서 등에의 수속

1) 공사시공을 위하여 필요한 관계관공서 및 기타에 대한 제수속은 신속하게 처리하여야 한다.

2) 관계관공서 및 기타에 대하여 교섭이 필요하거나 또는 교섭을 받았을 경우에는 지체없이 그 내용을 감독관에게 알리고 협의하여야 한다.

1.1.35 공사 후의 정리

공사가 완성되었을 때에는 감독관의 지시에 따라 가설물을 제거하고 뒷정리, 되메우기, 청소 등을 공기 내에 정리하여 감독관의 검사를 받아야 한다.

1.1.36 비용부담에 관한 세칙

1) 공사비

공사비는 원칙적으로 증감하지 않는다.  단, 공종에 따라 감독관이 인정할 수 있는 부분에 대하여는 증감할 수 있다.  본 공사 계약후 예정 가격 또는 계약금액 결정에 착오가 있거나 기타 계약 금액을 감액하여야 할 사유가 발견될 시는 그 금액을 환수 또는 감액할 수 있으며 준공 후에도 동일하다.

2) 각종 표준도에 따른 공사의 보강

표준도에 따라 시공되는 공사에 있어 현장의 사정에 따라 감독관이 지시하는 보강공 또는 필요한 시설중 국부적인 부분에 대하여는 도급자가 부담한다.

3) 사고발생

공사시행중 도급자의 과실로 민가 또는 공공시설, 차량 및 인명에 손상을 주었을 때에는 도급자의 비용으로 복구 및 보상한다.

4) 별도공사

본 공사에 관련되고 도급금액내역서, 시방서, 도면에 명기되지 않은 다음 사항에 대하여는 감독관이 별도 처리한다.

(1) 가공선 및 전주의 처리 및 이에 부속되는 공사

(2) 가로수의 이식 및 복구

(3) 매설물의 이설 및 복구

(4) 기타 시설물의 이설, 철거 및 복구

(5) 공사완료보고 및 준공사진

(6) 포장의 복구공사

도급자는 착공전, 시공중 및 준공사진을 공종별로 구분하여 감독관의 지시에 따라 천연색 (3″×4″)5부 사진첩으로 작성하여 준공과 동시에 제출토록하고 공사기록한 전체도면을 CD로 준공도면을 감독관의 지시에 따라 작성 제출하여야 한다.

5) 공사관련사항

공사시행에 있어 다음 각항에 필요한 비용은 도급자의 부담으로 한다.

(1) 공사시방서, 도급금액내역서, 도면등에 명기되지 않은 사항이라도 공사의 성질상 당연히 필요한 사항

(2) 기성부분 및 준공부분등의 검사에 필요한 협력

(3) 도급자가 부담하는 재료, 기계기구등의 시험 및 제검사와 감독관이 입회할 때의 협력

(4) 관계관공서, 공사, 제회사로부터의 요청에 대한 조치

(5) 공사시행에 지장이 되는 간략한 가로등, 간판, 우편함 등의 처리

(6) 공사시공상 필요한 시굴, 간략한 시추 및 형상관측

(7) 경미한 가공선의 처리

(8) 교통 및 공사현장의 보안상 필요한 제시설

(9) 공사장내의 배수로 하수도 시설의 처리

(10) 공사중 공사구역내 도로구조물, 도로부속물의 유지

(11) 소구경의 수도관(경 75mm이하), 하수관(경 250mm이하)의 처리

(12) 공사용 전력의 가설비 및 사용재료

(13) 공사용 기계, 기구, 자재등의 운반으로 도로를 손상하였을 때의 처리나 설계도면의 칫수와 조사시 칫수가 불일치할 경우

(14) 시방서, 도면에 명시되지 않은 공사나 기설계 조사결과와 조사시 결과가 불일치할 경우에 있어 필요로 하는 설계, 각종 계산 및 기타의 자료작성

(15) 공사착수전, 후나 시공도중의 연도구조물 기타 현장사진 등의 자료작성

(16) 도급자의 책임으로 인한 제3자의 피해보상

(17) 시공 보링

(18) 기존교량 상태조사

(19) 기타

1.1.37 공사사진 촬영 및 제출

1) 도급자는 공사 후 매몰되거나 사후 검사가 불가능한 부분에 대하여 공사기록이나 촬영사진을 증빙서류로 보존하여야 한다.

2) 이러한 증빙서류로 보존할 수 있는 부분중 지하수위, 관로바닥, 구조물바닥, 지반고등은 검측기록으로 보존하고 구조물의 철근조립, 관접합 및 접합시험, 암반지층 터파기, 물푸기, 성토다짐 및 관되메우기 다짐, 포장기층 다짐 및 포장작업 등은 촬영 연월일이 표시되는 천연색 사진으로 보존하여야 한다.

3) 본 공사용 사진을 동일장소에서 동일방향으로 촬영하고 필요에 따라 공사내용을 천연색 사진으로 촬영하여 아래와 같이 감독관에게 제출하여야 한다.

(1) 착공전 사진

(2) 공정 사진

(3) 공사기록사진 및 VTR 촬영 : 도급자는 공사진행 사항을 사진 및 VTR 촬영을 통해 기록 보존하여야 한다.

4) 또한 도급자는 공사내용을 공종별로 착공 전부터 준공까지의 공사과정을 공사순서에 따라 천연색 사진으로 촬영하고 사진원판과 함께 사진첩을 감독관에게 제출하여야 한다.

(1) 수중공사시 다음사항을 준수하여 시공하여야 한다.

① 수중공사는 잠수부를 통하여 시공되는 경우 시공성과에 대해 감독자의 확인이 가능토록 조치하여야 한다.

② 단계별 비디오 수중 촬영하여 공사에 대한 확인이 되도록 하여야 한다.

이때, 촬영장비는 데이타가 기록될 수 있는 장비여야 하며, 촬영시 촬영일시, 촬영부위, 시공내용 및 특기사항 등이 기록되어야 한다.

③ 잠수할 수 있는 도급자의 기술직 직원 및 공사 감독관이 수중에 직접 잠수 확인토록 하여야 한다.

④ 보수부위는 주관적이고 불확실한 조사를 최소화하고, 보다 객관적이고 과학적인 방법으로 조사가 되도록 하여야 한다.

⑤ 시공후 수중부 보수부위에 대해서는 품질확보를 위한 Core Boring등을 하여 확인작업을 감독관의 승인 하에 시공 완료되도록 하여야 한다.

1.1.38 기상관측자료 비치

도급자는 기상관련자료를 현장사무실에 비치하여야 한다.

1.1.39 기술도서 K.S등의 현장비치 운용

도급자는 본 공사와 관련되는 각종 표준시방서, 설계도서 및 기술도서, KS규정을 현장에 비치하여 필요시 즉시 활용될 수 있도록 하여야 한다.

1.1.40 하자보수 기간

모든 공사물의 하자보수기간은 다음과 같다.

1) 교면방수 : 3년

2) 콘크리트 보수공 : 2년

4) 포장(알루미늄제 교량난간, 철물, 철골제외)등 기타 공정 : 2년

5) 기타 : 지방계약법 시행령 제69조 동법시행규칙 제68조에 정한바와 같음.

1.1.41 천재지변, 비상사태 및 불가항력에 관한 사항

이 항의 규정은 계약에 포함된 다른 모든 규정에 우선한다.

1) 비상사태시 책임면제

도급자는 전쟁, 교전상태(선전포고 여부불문), 외적의 침입, 반란, 혁명, 폭동, 무력이나 약탈행위, 내란, 폭동(도급자 고용인이 일으키지 않은), 소요 또는 혼란, 기타 도급자의 정상적인 선견이나 능력으로서는 도저히 예측․대처할 수 없는 자연의 힘의 작용(이하에서 이해하기 쉽도록 “비상사태”라 칭함) 등 비상사태와 직접적으로 관련하여 일어난 공사물(위에서 언급한 비상상태가 발생하기 이전에 부실공사물 및 재료의 철거판정에 의거 지적된 공사물은 제외) 또는 가설물의 손괴와 정부 및 제3자의 재산피해, 또는 기타 인명피해에 대하여 보상과 기타 어떠한 명목의 보상책임도 지지 아니하며, 발주청은 그와 같은 비상사태로 인하여 일어나는 모든 청구, 요구, 소송절차, 손해배상, 제경비로 말미암아 도급자가 피해를 입지 않도록 보호하여야 할 뿐 아니라 그와 같은 비상사태로 인하여 직접적 또는 간접적으로 일어나는 도급자의 재산상(현장에 반입중인 재산을 포함하여 공사목적을 위하여 기사용 또는 사용하려던) 피해에 대하여 보상하여야 한다.

2) 비상사태로 인한 공사피해보상

본 공사물, 가설물 또는 현장으로 반입중인 자재 등이 전술한 비상사태로 인하여 파괴되었거나 손상을 입었을 경우에 발주청은 도급자에게 그와 같은 파괴나 손상된 공사 및 자재대금을 지불할 의무가 있다.  또한 공사감독이 요구하는 바에 따라 파괴된 공사물을 복원하거나 손실된 자재를 대치하였을 때에는 발주청은 그 비용을 지불하여야 하며, 이때 원가 청산 기준으로 공사를 완료할 필요가 있을 때에는 공사감독이 합당하다고 가정하는 이익금이 포함되어야 한다.

3) 비상사태로 인한 비용의 증가

전술한 비상사태(다만, 4)항에 포함된 전쟁의 발발에 관하여는 동규정에 따라야 함)로 인하거나 그 결과로 또는 그와 관련하여 도급자가 시행한 추가공사(비상사태가 발생하기 전에 부실공사분 및 재료의 철거판정에 의하여 내려진 지시에 따라 시행한 재공사 비용은 제외)에 대한 비용을 발주청이 지불하여야 하나, 도급자는 이러한 비용의 증가가 발생했다고 인지하였을 때에는 지체없이 그 내용을 공사감독에게 서면으로 통보하여야 한다.

4) 전쟁의 발발

이 계약기간중 세계 어느 지역에서 전쟁(선전포고 여부에 관계없이)이 발발하여 재산적으로 또는 그 밖에 물자면에서 이 계약공사의 순조로운 추진이 어렵게 되었을 경우라도 이 조항의 규정에 의하여 계약이 해지되지 아니하는 한 또는 계약이 해지될 때까지는 공사를 완성시키기 위하여 최선의 노력을 다하여야 한다.  발주청은 전쟁이 발발하면 도급자에게 서면 통보를 함으로써 언제라도 이 계약을 해지(이 조항에 따른 양 당사자간의 권리에 대한 분쟁의 해결 운영에 관하여는 예외)할 수 있으되 이로 인하여 만일 계약해지 이전에 이러한 당사자중 어느 한쪽이 계약을 위반하였을 경우에 대하여 상대방이 행사할 수 있는 권리는 계약해지에도 불구하고 소멸하지 아니한다.

5) 계약시의 설비철거

전쟁발발시의 규정에 따라 계약이 해지되었을 때에는 도급자는 자기가 현장에 반입한 공사용 설비를 철거하고 그의 하도급자들에게도 그렇게 할 수 있도록 똑같은 편의를 제공하여야 한다.

6) 해약시의 지불

전술한 바와 같이 계약전일까지 시행한 공사의 미종결분에 대한 공사비를 계약상에 규정된 단가에 의하여 지불하여야 하며, 이에 부가하여 다음 각항에 해당하는 비용도 지불하여야 한다.

(1) 사전준비항목에 포함된 공사나 업무로서 기수행된 부분의 대금 또는 공사감독이 그와 같아 항목이 부분적으로 수행되었음을 인정할 경우 적절한 비율의 대금

(2) 이 공사 또는 가설공사를 위하여 도급자가 정당하게 발주하여 인수된 자재나 물품의 대금 또는 도급자가 그러한 인수를 승낙하여야 할 법적 책임이 있는 자재나 물품의 대금(그러한 자재나 물품은 그 대금 지불과 동시에 발주청 재산이 됨)

(3) 도급자가 계약대로 공사를 모두 완성할 것으로 예측하고 그렇게 추진하는 과정에서 정당하게 발생한 비용이라고 공사감독이 인정하는 금액으로서 위에서 언급한 1), 2)항에서 포함되지 아니하는 것

(4) 정당한 장비철거비(도급자가 요구할 경우) 다만, 발주자는 이 조항에 따라 위의 비용을 지불함에 있어 장비나 자재와 관련하여 도급자에게 미리 지불한 금액이 있을 경우 발주자는 도급자에게 지불할 금액에서 이를 공제할 수 있다.

1.1.42 구조물 색채 재현

구조물의 색채 형성은 아래 시설물들이 서로 색채가 어울리고 주변 경관과 조합되도록 선택이 되어야 하므로 최종 도장하기 전에 시설물들에 대한 색상을 전문가와 협의하고 감독관의 승인을 득한 후 실시하여야 한다.

1) 난간

2) 기타 부대시설

1.1.43 공사 기간 연기

공사 기간 연기는 다음과 같은 사항등으로 연기될 수 있다.

1) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

2) 발주자의 지시에 의해 작업이 중단되었을 때

(도급자의 귀책사유로 작업이 중단되었을 때 공사 기간을 연기할 수 없다)

3) 기타 발주자가 연기할 필요가 있다고 판단되는 정당한 사유가 발생했을 때

1.1.44 해외 자재 및 장비

1) 공사에 필요한 중요 수입외자재 및 장비는 수입국에서 발주처 입회 하에 시험 및 성능을 확인후 인도할 것이며 이에 따른 비용은 도급자가 부담한다.

2) 공사에 필요한 모든 수입자재 및 장비는 수입면장에 의하여 정산한다.

1.1.45 시공관리 및 시험

공사의 규격 및 품질이 본 시방서에 적합하도록 충분한 시공관리를 하여야 한다.  또한 감독관이 규격 및 품질의 확인을 위한 자료의 제출을 요구할 때에는 그 지시에 따라야 한다.

1) 도급자는 선정시험 및 관리시험에 요하는 모든 시험기기 및 시설을 설치하여 품질관리에 만전을 기하여야 한다.

(1) 모든 시험은 감독관의 입회 하에 도급자가 시행한다.

(2) 모든 시험은 가능한 현장에서 시험하되, 불가능한 시험은 감독관과 협의하여 건설공사 품질시험규정 시행규칙상의 품질시험 대행자에게 위탁 시행하여야 한다.

(3) 도급자는 공사착공과 동시 설계서에 제시된 모든 관리 시험계획서를 공정계획에 준하여 작성, 감독관에게 제출하여야 한다.

(4) 도급자는 건설공사 품질시험 규정 시행규칙에 의거 관리시험에 필요한 모든 시험장비 및 시설을 설치하여 품질관리에 만전을 기하여야 한다.

(5) 도급자는 관리시험의 원활한 수행을 위하여 건설공사 품질시험 규정시행규칙에 의거 시험기술자를 현장에 상주시켜야 한다.

(6) 모든 관리시험을 KS시험규정 및 시방에 준하여 시행하여야 하며, 규정에 명시되지 않은 사항은 감독관이 제시한 시험방법에 의하여 시행하여야 한다.

(7) 본 공사에 신기술공법이 적용되는 공사는 그 공사 착수 전에 각 기술에 대한 시험확인 기간을 산정하여 사전에 시험용 공시체나 검증 기구를 설치하여 시험에 따른 검증에 의해 확인을 하고, 그 결과를 감독관의 승인을 득하여야 한다.  이에 따른 계획서는 사전에 제출하여야 한다.

1.2 계획 및 관리

1.2.1 공사협의 및 조정

1) 공사 상호간의 마찰방지

(1) 협의 및 조정

건설업자는 당해공사와 연관된 다른 공사의 건설업자들과 상호간의 마찰을 방지하고, 전체 공사가 계획대로 완성될 수 있도록 연관공사와의 연결부위의 적합성, 공사 시공한계, 시공순서, 공사 착수시기, 공사진행속도, 공사준비, 공사물 보호 및 가시설 등의 적합성에 대하여 모든 공사관련자들과 면밀히 협의, 조정하여 공사 전체의 진행에 지장이 없도록 협력하고 최선의 방안을 도출한 후에 시행하여야 한다.

(2) 건설업자의 책임

건설업자는 공사 상호간의 협의 및 조정을 소홀히 함으로 인하여 발생한 재시공 또는 수정, 보완 공사에 대한 책임을 진다.

(3) 종합공정관리에의 협조

건설업자는 착공부터 준공까지 관련 공사 전체의 원활한 추진을 위하여 감리원 또는 공사감독자가 행하는 종합공정관리계획 및 운영에 적극 협조하여야 한다.

2) 시공전 협의

(1) 전체진행회의

① 각공사의 특수사항 및 사전협의사항 등을 협의 및 조정하기 위하여 모든 공사 관련자가 참석하는 공사 전체회의를 매월 1회 이상 정기적으로 개최한다.

② 최초 전체진행회의

공사 착수일로부터 15일 이내에 최초 전체진행회의를 개최하여 회의를 총괄할 좌장을 선출하고, 각각의 책임한계를 검토하고 업무분담에 관한 조직을 편성하며, 회의장소, 일시, 참석범위, 월 개최횟수 등을 정한다. 최초 회의 개최일자 등은 건설업자외 발주청이 협의하여 정한다.

③ 협의 및 조정사항

ⓐ 공사간 공동작업 지역, 연관공사의 공사시기 및 공사순서, 운반 및 출입로, 부지활용, 임시가설물과 시설, 작업시간, 장애물 및 위험물, 공사장 보안 및 관리 등 공사장 관리에 관한 현재 상황과 추후 요구되는 사항

ⓑ 공사지연에 따른 요인분석 및 촉진방안에 관한 사항

ⓒ 공사기한 연기 또는 공사촉진을 위하여 필요한 공정계획서의 수정여부 등 공사진행에 관계되는 사항

ⓓ 설계변경 및 공사기한 변경에 관한 사항, 기성물 지급신청, 제출물 등에 관한 사항

ⓔ 각 공사간 또는 지급자재 납품자간의 시공한계에 관한 사항

ⓕ 회의 참석범위, 개최횟수는 개최일자의 변경에 관한 사항

④ 회의 자료 배포

협의 및 조정을 필요로 하는 사항이 있는 자는 회의개최 전에 협의 및 조정이 필요한 사항과 이에 관한 의견 및 관련공사의 추진계획 등의 자료를 준비하여 회의참석자모두에게 배포한다.

⑤ 회의록

회의안건 제시자는 각 공사진행회의 후 3일 이내에 회의록을 작성하여 관련 당사자 및 감리원 또는 공사감독자의 서명을 받아 비치하고, 그 사본을 회의참석자 및 관련자에게 배포한다.

(2) 작업착수계획

① 회의 개최

건설업자는 공사에 포함되어 있는 공종공사 착수 전에 관련공종과의 협의 및 조정을 위하여 작업착수회의를 개최하여야 하며, 회의 개최 전에 발주청에게 회의 개최일자를 통보하여야 한다.

② 협의 및 조정사항

현장대리인, 현장요원, 공사의 하건설업자, 제조자 또는 제작자, 관련 지급자재 납품자가 참여하여 관련 공종 공사를 위한 준비, 공사진행방법 또는 이에 관련된 작업에 대하여 상호 협의 조정한다.

③ 회의록

건설업자는 회의 종료 후에 주요내용, 결정사항 및 조치사항에 대한 회의록을 작성, 관련당사자의 날인을 받아 비치하며, 회의록 사본을 감리원 또는 공사감독자 및 공사관련자에게 배포한다.

(3) 시공계획서 수정․보완

전체진행회의 또는 작업착수회의 결과 시공계획서의 수정․보완이 필요하다고 인정될 경우에 관련 건설업자는 즉시 시공계획서를 수정․보완하여 제출한다.

(4) 공사진행 제한

전체진행회의 및 작업착수회의에서 공사방법 등이 확실히 결정되기 전에는 공사를 착수 또는 진행할 수 없으며, 이로 인하여 공정지연이 우려될 경우는 공사의 조정방안(지시로 볼 수 없다)에 따른다. 이 때 발주청의 조정 방안으로 인하여 발생하는 문제에 대하여 발주청 또는 감리원 또는 공사감독자는 책임을 지지 아니한다.

1.2.2 제출물

1) 제출절차 등

(1) 협의 및 확인

① 건설업자는 각 제출물 작성 전에 제출물의 작성 및 제출에 관한 사항을 검토하며, 분명하지 않은 사항이 있을 경우 감리원 또는 공사감독자와 협의․조정한다.

② 건설업자는 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후, 제출물에 날인하여 감리원 또는 공사감독자에게 제출하여야 한다.

③ 건설업자는 제출물의 작성 및 제출에 소요되는 비용(작성을 위한 자료수집․정리 및 전문가에 대한 자문 등에 소요되는 비용을 포함한다)에 대하여 공사에 추가로 청구할 수 없다.

(2) 규격등

① 서류의 규격은 정부 또는 공사의 지정양식을 제외하고는 건설업자가 내용의 성격에 따라 임의로 정하여 작성하되, 표지는 A4 용지에 세로로 작성하고 내용물은 A4 크기로 정리, 상철 하여 제출하여야 한다.

② 제출서류는 건별로 제출일자 및 각 면마다 일련번호를 명기하며, 비치서류는 건별로 작성일자 및 각 면마다 일련번호를 명기한다.

(3) 추가요청 및 변경

공사는 공사의 원활한 진행 등을 위하여 제출물의 제출부수의 추가, 제출시기의 변경 또는 이 공사시방서에 명시되지 아니한 제출물의 제출 또는 기록유지를 요구할 수 있으며, 건설업자는 이에 따라야 한다.

(4) 내용 변경

모든 제출물은 내용의 변경을 수반하는 사유가 있어 감리원 또는 공사감독자가 이를 인정한때에는 관련되는 제출물을 재 작성하여 제출하여야 한다.

(5) 미제출시의 제한

이 공사시방서가 정한 제출물을 감리원 또는 공사감독자에게 제출하지 않고서는 감리원 또는 공사감독자의 승인 또는 확인을 받을 수 없으며, 해당 공사를 진행할 수 없다.

2) 공사예정공정표

(1) PERT/CPM 공정표

① 공사예정공정은 PERT/CPM 방식으로 작성되어야 한다.

② 공사예정공정표에는 다음 사항이 명시되거나 첨부되어야 한다.

ⓐ 공종별 및 공종내 주요공종단계별(ACTIVITY) 착수시점, 완료시점

ⓑ 공종별 및 공종내 주요공종단계별 선․후․동시시행 등의 연관관계

ⓒ 주공종선(CRITICAL PATH) 또는 주공정 공사의 목록

ⓓ 의무적 중간관리일 및 권장 중간관리일

ⓔ 주간 공종률표

ⓕ 기성검사원 제출일정계획

ⓖ 주요제출물 제출일정계획 : 시공계획서, 시공상세도면 및 견본

ⓗ 기타 이 공사시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

(2) 제출시기 및 부수

① 제출시기

ⓐ 정상착공의 경우 : 착공 후 15일 이내

ⓑ 착공지연의 경우 : 실 착공과 동시

② 제출부수 : 2부

3) 시공계획서

(1) 승인

건설업자는 절(Section)별 각 절에 명시한 공사에 대한 시공계획서를 작성하여 감리원 또는 공사감독자의 확인을 받은 후 공사에 착수하여야 한다.

(2) 포함 내용

시공계획서에는 아래 사항이 포함되어야 한다.

① 공사개요

② 시공관리체제

③ 세부공종표(자재, 인력 및 장비계획을 포함한다)

④ 사용재료 및 시공결과의 품질

⑤ 공정단계별 시공법 및 양생계획

⑥ 품질관리계획 : 품질관리조직, 관리목표 및 실시방법, 목표미달시 조치방안

⑦ 안전관리계획 및 환경관리계획

⑧ 타 공사 및 공종과의 협의 및 조정이 필요한 사항

⑨ 적합한 시공을 위하여 설계도서의 조정 및 변경이 필요한 사항

⑩ 기타 이 공사시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

(3) 제출시기 및 부수

① 제출시기 : 각 공종공사 착수 7일전까지

② 부수 : 1부

4) 시공상세 도면

(1) 제출 및 승인

건설업자는 공사여건과 계약문서의 조건 및 설계도서와의 적합성 여부를 확인하고 공사 수행상의 잘못 또는 부분공사의 누락을 방지하기 위하여 시공상세도면을 작성, 제출하여 감리원 또는 공사감독자의 확인을 받은 후 공사에 착수하여야 한다. 감리원 또는 공사감독자의 확인을 받은 시공상세도면은 “1.8.3 준공서류” 에 따라 발주청에 제출하여야 하다.

(2) 작성방법

시공상세도면은 설계도서의 요구사항이 종합되도록 작성되어야 하며, 부위별 재료명과 시공 또는 설치 및 마감상태가 명확히 표기되어야 하고, 정확한 치수 및 축척이 명시되어야 한다. 또한, 설계도서대로 시공하기 위해 조정하여야 할 조건이 있을 경우는 이를 명시하여야 한다.

(3) 포함 내용

시공상세도면에 포함되어야 할 내용의 종류는 이 공사시방서 각 절의 해당 시방에 따른다.

(4) 제출시기 및 부수

① 제출시기 : 각 공종공사 착수 7일전까지

② 부수 : 2부(청사진 또는 복사물)

5) 자재 제품자료

(1) 제출

공사용 자재(재료, 부재, 제품 및 설비기기를 포함한다. 이하 이 공사시방서에서 같다)의 사용 또는 설치 전에 설계도서의 요구조건 및 품질 기준에의 적합성을 확인하고, 자재선정을 위한 검토나 자재의 품질보증을 위하여 자재 제품자료를 제출하여 발주청의 승인을 득한 후 사용 또는 설치하여야 한다.

(2) 제출 대상자재

제출 대상자재의 종류는 이 공사시방서 각 절의 해당 시방에 따른다.

(3) 포함 사항

자재 제품자료에는 아래의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 제품의 선정을 위하여 필요하지 않은 사항은 감리원 또는 공사감독자와 협의하여 생략할 수 있다.

① 자재 개요(모델명, 제조자명, 연락처)

② 당해 자재가 설계도서에 명시한 기준 등에 적합한 품질임을 나타내는 다음과 같은 증빙서류 중 하나를 제출하여야 한다. 이 증빙서류에 대한 사항은 “1.4.3. 1)의 품질 시험기준”에 별도 명시나 지시가 없는 경우에는 품질시험․검사를 실시하지 않는 자재에 대한 기준과 같다.

ⓐ 품질검사전문기관이 발급한 시험성적서가 제출되는 재료. 다만, 발급한 날로부터 1년이 경과되지 않았고, 공공기관 사업장에서 감리원 또는 공사감독자의 서명․날인을 받아 시험 의뢰하여 발급 받은 시험성적서에 한한다.

ⓑ “산업표준화법”에 의한 한국산업규격표시품

ⓒ “주택법(구주택건설촉진법)”등 관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질을 인증받은 재료나 자재 제조사의 시공 또는 설치시방서

③ 설계도서 및 현장여건이 제품설치 등에 적합함을 나타내는 서류, 적합하지 않을 경우 등은 자재의 설치 등을 위하여 필요한 설계도서 및 현장요건의 조정 요구사항

④ 기타 이 공사시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

(4) 제출시기 및 부수

자재의 사용 또는 설치 15일전까지 2부 제출한다. 다만, 건설공사에 최초로 사용되기 전에 품질시험․검사가 필요하다고 이 공사시방서 절(Section)별 일반사항에 명시되어 있는 경우에는 그 시험․검사에 소요되는 기간을 추가로 감안하여 제출하여야 한다.

(5) 증빙서류 사본

상기 “1.2.2 5) (3) ②”항의 증빙서류가 사본일 경우는 현장대리인의 원본대조필 서명․날인이 있어야 한다.

6) 견  본

(1) 제출 및 비치

건설업자는 공사용 자재에 대하여 설계도서에 명시한 기준에 적합한 자재의 견본을 제출, 감리원 또는 공사감독자의 승인을 득하여 선정하여야 하고, 선정된 자재의 견본은 반입되는 자재의 검수기준으로 활용할 수 있도록 감리원 또는 공사감독자 사무실 또는 건설업자 사무실에 준공시 까지 비치하여야 한다.

(2) 제출대상 자재

제출대상 자재의 종류는 이 공사시방서 각 절의 해당 시방에 따른다.

(3) 포함 사항

① 자재의 견본(이 공사시방서 각 절에 명시된 자재에 한한다)

② 해당 시방번호 및 품질 기준

③ 납품소요기간

④ 기타 이 공사시방서의 각 절에 명시되어 있는 사항

(4) 제출시기 및 부수

자재의 사용 또는 설치 15일전까지 1세트를 제출한다. 다만, 건설공사에 최초로 사용되기 전에 품질시험․검사가 필요하다고 이 공사시방서 절(Section)별 일반사항에 명시되어 있는 경우에는 그 시험․검사에 소요되는 기간을 추가로 감안하여 제출하여야 한다.

7) 공사 사진

(1) 비치 및 제출

공사시 공중 매몰되어 나타나지 않는 부분 또는 준공 후 해체되는 가설물 등에 대하여 수시로 부분 또는 전경을 분명히 나타내는 천연색 사진(규격 9cm x 12cm)으로 기록, 사진첩으로 정리하여 상시 현장에 비치하여야 하며, 준공시 “1.8.3 중공서류”에 따라 발주청에 제출하여야 한다.

(2) 촬영방법

공사시공중 매몰되는 주요부위에 대해서는 기술적 판단자료로 활용할 수 있도록 시공상태가 분명히 나타나게 주요부위의 상세 및 주변을 포함한 전경을 촬영하여야 한다.

(3) 대상부위

사진촬영 대상자는 이 공사시방서의 절(Section)별 일반사항 항목의 해당 시방에 따른다.

8) 공무행정서류

공무행정서류에 대하여는 “1.2.3 공무행정서류”에 따른다.

9) 신고 및 인․허가 신청서류

(1) 대행

건설업자는 계약 이행을 위하여 필요한 관계기관 신고 인․허가에 관련한 설계도서 작성, 신청서류 제출, 관계기관의 협의 및 착공․준공에 필요한 수속업무를 발주청을 대신하여 수행하여야 한다.

(2) 제출

신청서에 건설업자 또는 설치자란이 있을 경우에는 건설업자 대표가 기록 날인하고 신청란은 필요시 발주청 장의 직인 날인을 받은 후 관계기관에 신청하고, 신고 및 인 허가 필증을 교부 받아 준공시 “1.8.3 준공서류”에 발주청에 제출하여야 한다.

10) 준공서류

(1) 제출서류

준공서류의 종류, 내용, 제출시기 및 부수는 “1.8.3 준공서류”에 따른다.

1.2.3 공무행정서류

1) 비치 및 제출

(1) 관련 철

본 절은 “1.2.2 8) 공무행정서류”에 대한 세부사항을 정한 것이다.

(2) 비치 및 제출

건설업자는 공사의 진행을 위하여 공무행정에 관한 서류를 사실과 그 증빙자료에 준거하여 작성하며, 상시비치를 요하는 서류는 공사 중에는 감리원 또는 공사감독자가 필요시 수시로 열람할 수 있도록 비치하고 공사가 준공되면 지체없이 발주청에 제출하여야 하며, 제출을 요하는 서류는 지정된 제출시기에 지정된 부수를 발주청에 제출하여야 한다.

2) 착공서류

(1) 착공신고서

① 정상착공시 제출서류

ⓐ 착공신고서

ⓑ 현장기술자 지정신고서 : 현장대리인, 현장요원, 안전관리자, 시험사, 품질관리전담자를 통합하여 작성한다.

ⓒ 현장기술자 경력증명서(한국건설기술인협회 발급) 및 자격증 사본

ⓓ 내역서

ⓔ 착공전 사진

단지 전체의 상태, 지형 및 준공후 보존되어야 할 시설물 등을 알아 볼 수 있고, 촬영한 연월일을 확인할 수 있도록 촬영한다.

② 착공지연시 제출서류

ⓐ 정상착공시 제출서류

ⓑ 착공지연 사유 및 착공예정일

ⓒ 착공지연 관련증빙자료(지장물현황 등)

③ 부분착공시 제출서류

ⓐ 정상착공시 제출서류

ⓑ 부분착공 현황, 사유 및 미착공부분 착공예정일

ⓒ 부분착공 관련증빙자료

④ 제출시기 및 부수

공사 착공시(착공지연시는 당초 착공예정일) 각 2부 제출

(2) 공사계획서류

① 제출서류

ⓐ 공사예정공종표(PERT/CPM)

“1.2.2 2) 공사예정공정표”에 따른다.

ⓑ 품질시험계획

품질시험계획의 수립대상공사의 범위 및 내용 등은 “1.4.2 품질관리계획”에 따른다.

ⓒ 자재수급계획서

공사에 사용할 자재(지급자재를 제외한다)의 전기반입을 위하여 건설업자는 자재의 품명, 규격, 수량, 사용예정일 및 반입예정일 등을 포함한 자재수급계획서를 공사예정공정표에 부합되도록 작성하여야 한다.

ⓓ 지급자재 수급계획(변경요청)서

공사에 사용할 지급자재 수급계획에 대하여 공사예정공종표에 부합되도록 작성한다. 수급계획 변경요청서에는 변경사유를 첨부하여야 하며, 이때의 변경사유는 사업 계획 변경 및 설계변경, 천재지변 등 불가피한 사유로 인한 공사지연에 한한다.

ⓔ 공종별 인력 및 장비 투입계획서

공사 예정공정표에 부합되도록 공사를 위하여 투입할 공종별 기능 인력수, 소요장비의 규격 및 수량에 대한 계획서를 작성한다.

ⓕ 안전관리계획서

안전관리계획의 작성기준 등은“1.5.1 3) 안전관리계획의 수립 및 안전점검의 실시등”에 적합하도록 작성한다.

ⓖ 하도급 시행계획서

하도급 예정업종, 하도급 계획금액 및 하도급 계약 예정일 등을 포함하여 작성한다.

ⓗ 현장기술자 조직표

건설업자 본사의 해당현장담당원 조직표 및 현장 기술자 조직표를 함께 제출한다.

② 제출시기

(2) ①의 품질시험계획 및 ⓕ 안전관리계획서는 공사 착공전, 기타는 공사착공 후 15일 이내와 계획변경시

③ 제출부수 - 각2부

3) 공사일지

(1) 제출서류

공사일지, 당일의 일기, 공정, 장비현황, 출역사항과 익일의 공사추진계획을 상세히 기록

(2) 공사일지에는 아래 사항이 포함되어야 한다.

① 최저․최고온도 및 날씨

② 공정, 출력, 장비현황

③ 공사주요사항

ⓐ 사고, 사건

ⓑ 공사의 중단, 연기 결함, 손실

ⓒ 측정사항

ⓓ 돌관(급속) 공사사항

ⓔ 발주청 및 관련통제기관 지시, 요구사항

ⓕ 공공관료 등의 연결 또는 절단과 설비기기 시험가동

ⓖ 점검, 감사 등

ⓗ 익일 공사추진 예정사항

(3) 제출시기 및 부수

매일 18:00시전까지 1부 제출

4) 현황 보고

(1) 월별현황

① 제출서류

ⓐ 월별공정률 및 수행공사금액

ⓑ 인력․장비 및 자재현황

ⓒ 계약사항의 변경 및 계약금액의 조정내용

ⓓ 공사진행상황을 나타내는 천연색 사진

② 제출시기 및 부수

익월 14일까지 1부 제출

(2) 공정현황

① 제출서류

ⓐ 공정현황보고

② 제출시기 및 부수

격주 1회 1부 제출

5) 기성검사원 및 준공검사원

(1) 제출서류

① 제출서류

ⓐ 기성검사원

ⓑ 기성부분 총괄내역

ⓒ 공사비 세부내역

ⓓ 품질시험․검사성과총괄표

② 제출시기 및 부수

기성검사 요청시 각 2부 제출

③ 기성검사원 제출시 감리원 또는 공사감독자의 확인을 받아야 하는 서류

ⓐ 안전관리비 사용내역

ⓑ 공정현황

ⓒ 시공확인 결과에 관한 기록

ⓓ 현장점검 지적사항 조치완료 여부

ⓔ 관련 공무행정서류 기록 및 비치에 관한 사항

(2) 준공검사원

① 제출서류

ⓐ 준공검사원

ⓑ 준공부분 총괄표

ⓒ 공사비 세부내역

ⓓ 준공사진

ⓔ 공사기록부

ⓕ 토목설비공사 완료 확인서(토목준공일이 건축준공일과 상이한 지구에 한함)

ⓖ 품질시험․검사성과 총괄표

ⓗ 안전점검에 관한 종합보고서

ⓘ “1.8.3 준공서류”에 명시된 서류

② 제출시기 및 부수

준공검사 요청시 각 2부 제출. 단 공사기록부는 3부, “1.8.3 준공서류”에 명시된 서류중 준공부분에 대한 도면은 3부

③ 준공검사원 제출시 감리원 또는 공사감독자의 확인을 받아야 하는 사항

ⓐ 안전관리비 사용내역

ⓑ 공정현황

ⓒ 시공확인 결과에 관한 기록

ⓓ 현장점검 지적사항 조치완료 여부

ⓔ 준공 예비점검 지적사항 조치완료 여부

④ 미준공시

ⓐ 미준공시 확인서 1부 제출

6) 변경승인 요청

(1) 설계변경 승인 요청

① 제출서류

ⓐ 변경요청 공문

ⓑ 변경 사유서

ⓒ 변경 총괄표, 내역서 및 산출근거

ⓓ 변경 설계도면

ⓔ 계산서(구조, 설비, 토질) 및 공사시방서

ⓕ 기타 관련증빙자료(관련사진 등)

② 제출시기 및 부수

설계변경 승인요청시 각 3부 제출

(2) 공사기한 연기원

① 제출서류

ⓐ 공사기한 연기원

ⓑ 연장사유 및 연기사유로 인한 주공정 지연일 산출근거

ⓒ 공사중단사실확인서 및 증빙자료(공사중단으로 인한 공사기한 연기원 제출)

ⓓ 기타 관련증빙서류

② 제출시기 및 부수

ⓐ 공사기한 연기 요청시 각 2부 제출

ⓑ 착공 지연시는 실착공 후 15일 이내 제출

③ 전기, 통신공사의 경우 제출서류

ⓐ 동의서

7) 시공확인 및 점검서류

(1) 시공확인

건설업자는 시공확인서를 작성하여 시공확인을 이행하고, 감리원 또는 공사감독자의 서명을 득하여 상시 비치하여야 한다. 시공확인서 작성 절차 등에 대하여는 “1.4 품질관리 1.4.7 1) 시공확인”에 따른다.

(2) 현장 지도점검

① 현장지도점검대장

공사 지도점검자의 시공부분 및 반입자재 부식여부에 대한 지도점검결과 지적사항 및 시정완료 확인에 관한 사항을 기록하여 상시 비치하여야 한다. 현장지도점검의 절차 등은 “1.4 품질관리 1.4.7 2) 현장 지도점검”에 따른다.

② 지적사항 조치결과보고

현장지도 점검결과 지적사항에 대하여 재시공 내용과 재시공전 및 후의 사진을 촬영하여 결과보고하고, 그 결과보고자료를 상시 비치하여야 한다.

8) 품질시험․검사 및 자재관리서류

(1) 품질시험계획 “1.2.3의 2) (2) 공사계획서류”에 따른다.

(2) 사급자재 관련서류

① 자재수급계획서

“1.2.3의 2)-(2) 공사계획서류”에 따른다.

② 자재 선정검토 요청서

공사용자재(지급자재를 제외한다) 선정을 위하여 자재품질 검토 요청서 1부 제출한다. 이 요청서에는 해당제품에 대한 “1.2.2 제출물 5) 제품자료” 및 “1.2.2 제출물 6) 견본”을 첨부하여야 한다.

③ 품질시험․검사대장

공사용자재(지급자재를 제외한다)에 대한 품질시험․검사결과에 대하여 시험사 및 현장대리인이 날인하고, 감리원 또는 공사감독자의 확인을 득하여 상시 비치한다.

④ 품목별시험․검사작업일지

ⓐ 공사용자재(지급자재를 제외한다)에 대한 품질시험․검사결과에 대하여 시험사 및 현장대리인이 날인하고, 감리원 또는 공사감독자의 확인을 득하여 상시 비치한다.

ⓑ 종류

- 콘크리트 시험․검사일지 : 슬럼프, 공기량, 압축강도, 염분함유량

- 콘크리트 압축강도(슈미트헤머)

- 모래 염분함유량 시험․검사작업일지

⑤ 품질 시험․검사성과총괄표

기성검사원, 준공검사원에 첨부하여 제출하고, 예비준공검사 신청시 제출한다.

⑥ 자재 검수부

공사용자재(지급자재를 제외한다) 반입시마다 승인된 제출자료 및 견본과 일치하는지 여부를 확인한 후 품질시험․검사를 실시하고 그 결과를 품목별로 종합기록하여 비치한다.

⑦ 품질검사전문기관 의뢰시험대장

품질검사전문기관 의뢰시험하여 발급받은 시험성과표 원본을 첨부하여 감리원 또는 공사감독자 확인후 상시 비치하여야 한다.

⑧ 품질시험․검사 불합격자재조치표

품질시험․검사에 불합격된 자재의 장외반출 사진 및 내용을 기록하여 비치한다.

(3) 지급자재 관련서류

① 지급자재 수급계획(변경요청)서

“1.2.3 2) (2) 공사계획서류”에 따른다.

② 지급자재 관리부

지급자재 품목별 인수, 출고, 재고의 상태를 상시 기록 관리한다.

③ 지급자재 수급현황

분기별 1회씩 2부 제출한다.

9) 하도급 관련서류

(1) 하도급 시행계획서

“1.2.3 2) (2) 공사계획서류”에 따른다.

(2) 일부하도급 승인신청 및 통지서류

① 승인신청서류

ⓐ 하도급 승인신청서

ⓑ 하도급 사유서

ⓒ 하도급 예정금액(하도급 비율)

ⓓ 하건설업자(예정)의 면허증 및 면허수첩 사본

ⓔ 하건설업자(예정)의 관련공사 시공실적

② 통지서류

ⓐ 하도급계약 통지서

ⓑ 하도급 계약서

ⓒ 공사내역서

ⓓ 예정공정표

ⓔ 하도급 대금지급보증서 사본

ⓕ 하도급 이행(계약)보증서 사본

ⓖ 하건설업자의 건설기술자 자격증 사본 또는 경력수첩 사본

ⓗ 하건설업자의 건설기술자 경력증명서(건설기술인 협회 발급)

③ 시기

ⓐ 승인신청시기 : 하도급 계약을 체결하기 전

ⓑ 통지시기 : 하도급계약을 체결, 변경 또는 해체한 날로부터 15일 이내

④ 부수 – 각2부

(3) 전문공사 하도급 통지

① 통지서류

ⓐ 하도급계약 통지서

ⓑ 하도급 계약서

ⓒ 내역서

ⓓ 예정공정표

ⓔ 하도급 이행(계약)보증서 사본

ⓕ 하건설업자의 건설업 면허수첩 사본

ⓖ 하건설업자의 건설기술자 자격증 사본 또는 경력수첩 사본

ⓗ 하건설업자의 건설기술자 경력증명서(건설기술인 협회 발급)

② 통지시기

하도급계약을 체결, 변경 또는 해체한 날로부터 15일 이내

③ 부수 각 2부 통지

(4) ( )월 하도급 대금 및 노임 현금지급 명세표

① 제출서류

( )월 하도급 대금 및 노임 현금지급 명세표

② 제출시기 및 부수

월 1회 이상 제출하고 관련계산서, 세금계산서, 입금표는 건설업자 보관 관리

(5) 하도급관리대장

하도급공사명 등의 하도급관리에 관한 제반사항을 기록하여 상시 비치

10) 안전관리 서류

(1) 안전관리계획서

계획서의 작성기준은 “1.5 안전․보건 및 환경관리 1.5.1 3) 안전관리계획의 수립 및 안전점검의 실시 등”에 따르고, 제출시기 및 부수는 “1.2.3 2) (2) 공사계획서류”에 따른다.

(2) 일일 안전점검표

건설업자가 자체관리하며 안전점검, 안전진단, 건설재해전문기관의 지도, 안전검사, 안전보건교육, 안전의 날 행사 등에 관한 사항을 기록하여 상시 비치하여야 한다.

(3) 정기안전점검 결과

건설업자가 건설안전전문기관에 의뢰하여 정기안전점검을 시행하였을 경우에는 점검결과 사본 1부를 제출하여야 한다.

(4) 안전일지

건설업자가 자체관리하며, 관리기록을 상시 비치하여야 한다.

(5) 안전관리비 사용내역 및 집행영수증

건설업자는 안전관리비 항목별 세부사용내역 및 집행영수증 사본을 월1회, 기성검사원 및 준공 검사원․제출시 1부를 제출하여야 한다.

(6) 안전점검에 관한 종합보고서

건설업자는 건설공사를 준공한 때에는 안전점검에 관한 종합보고서를 작성하여 “1.2.3 공무행정서류 5) (2) 준공검사원”에 따라 준공검사원에 첨부하여 제출하여야 한다.

1.3 자재관리

1.3.1 적용기준

1) 사용자재

공사에 사용하는 자재(재료, 제품 및 설비기기를 포함한다. 이하 이 공사시방서에서 같다)중에서 이 공사시방서를 포함한 설계도서에 품질기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질기준에 적합한 신품(가설시설물용 자재를 제외한다)을 사용하여야 한다. 다만, 해당 설계도서에 품질 기준이 명시되어 있지 않은 품목은 아래 순서에 따라 적합한 자재를 사용한다.

(1) 다음 각호의 1에 적합한 자재(이하 이 공사시방서에서 “한국산업규격에 적합한 제품등”이라한다)를 우선 사용한다.

① “산업표준화법”에 의한 한국산업규격 표시품(이하“KS 표시품”이라 한다)

② “건설기술관리법 제25조”에 의한 품질검사전문기관(건축, 토목, 기계설비, 조경의 경우) 또는 공인시험기관(전기설비, 통신설비의 경우)에서 “산업표준화법”에 의한 한국산업규격에 따라 품질시험을 실시하여 KS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인 한 것

③ “산업표준화법”에 의한 KS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 건설교통부령이 정하는 것

(2) 전기설비, 통신설비에 사용하는 자재로서 ①에 적합한 자재가 없을 경우에는 “전기용품 기술기준”에 의한 형식승인품을 사용한다.

(3) ① 및 ②에 적합한 자재가 없을 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는 것으로써 품질 및 성능이 우수한 시중제품으로 사용한다.

2) 사용제한

품질시험․검사시험 결과 불합격률이 높다고 인정되는 생산업체의 자재에 대하여 발주청은 건설업자에 사용제한을 지시할 수 있으며, 건설업자는 이에 따라야 한다.

3) 자재 선정

건설업자는 공사에 사용하는 자재(지급자재를 제외한다)에 대하여 “1.2.2 제출물 5) 자재 제품자료” 및 “동 6) 견본”에 따라 자재 제품자료 및 견본을 제출하여 감리원 또는 공사감독자에게 품질, 색상, 무늬, 질감을 확인받은 것 중에서 임의대로 선정, 사용한다. 다만, 마감자재 품평회 상정된 자재는 품평회 결과에 따라 선정하여 사용한다.

4) 단일규격자재 사용

하자발생시의 교체 및 유지관리의 용이성을 감안하여 단일 제조업체의 단일규격의 자재를 사용한다.

1.3.2 반입

1) 자재수급계획서

“1.2.3 공무행정서류 2) (2) 공사계획서류”에 따른다.

2) 반입시기

(1) 자재(지급자재를 제외한다)는 사용예정일 7일전까지 현장에 반입한다. 다만, 선정시험이 필요한 자재는 선정시험 소요기간을 추가로 감안하여 반입하여야 한다.

(2) 반입시기

① 자재(지급자재를 제외한다)는 사용예정일 7일전까지 현장에 반입한다. 다만, 선정시험이 필요한 자재는 선정시험 소요기간을 추가로 감안하여 반입하여야 한다.

② 파동이 예상되는 자재는 공사에 지장이 없도록 사전에 구매하여 비축한다.

3) 시험결과등이 기재된 납품서

“건설기술관리법시행령 제47조의 4 제3항”에 따라 아래 자재는 반입시 차량별로 시험결과등이 기재된 납품서를 납품자로부터 받아 감리원 또는 공사감독자가 확인할 수 있도록 비치하여야 한다.

(1) 레디믹스트 콘크리트

(2) 이 공사시방서 절(Section)별 각적에 품질보증이 이행이 명시되어 있는 자재

1.3.3 자재의 보관, 운반, 취급

1) 품질 변화 방지

자재는 준공 전후를 막론하고 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색 등 품질에 영향을 주는 일체의 변화가 생기지 않도록 운반, 취급 및 보관하여야 한다.

2) 화기위험자재의 분리보관

수급자는 자재중 화기위험이 있는 자재는 다른 자재와 분리하여 보관하고 화재 예방대책을 수립하고 시행하여야 한다.

3) 관리시험자재는 분리보관

현장 반입 후 관리시험을 시행하여야 할 자재는 시험이 종료될 때까지 기존에 반입된 자재와 섞이지 않도록 분리하여 보관하여야 한다.

4) 지급자재의 관리 책임

건설업자는 지급자재(설치도인 지급자재를 제외한다)의 인수, 출고 및 재고 상태를 지급자재관리기록부에 정확히 기록하고 상시 비치하여야 하며, 이에 대한 보관 및 관리의 책임을 진다.

1.4 품질관리

1.4.1 적용범위

건설업자는 건설공사의 시공 및 공사에 사용하는 자재(재료, 부재, 제품 및 설비기기를 포함한다. 이하 이 공사시방서에서 같다)에 대한 품질관리는 (관련법규의 규정에도 불구하고) 이 절에서 정하는 바에 따라 성실하게 수행하여야 한다. 다만 이 절에 명시되지 아니하는 사항은 해당 절(Section)의 시방에 따른다.

1.4.2 품질관리계획

1) 계획수립 및 제출

(1) 건설업자는 건설공사의 품질확보를 위하여 품질시험계획을 수립하여 발주청의 승인을 득한 후, 이에 따라 품질시험 및 검사를 실시하여야 한다.

(2) 건설업자는 품질시험계획을 발주청에 제출하여야 하며, 제출시기 및 부수 등은 “1.2.3 공무행정서류 8) (1) 품질 시험계획”에 따른다.

(3) 품질시험계획에는 품질관리비 사용내역서를 첨부하여야 한다.

(4) 발주청은 건설업자가 제출한 “(2)”의 계획에 대한 내용을 검토하여 보완하여야 할 사항이 있는 경우 건설업자에게 이를 보완하도록 요구할 수 있으며, 건설업자는 이에 따라야 한다.

2) 계획의 내용

(1) 품질시험계획의 내용은 시험계획회수와 시험시설 및 인력배치계획이 포함되어야 한다.

(2) 품질시험계획의 품질시험․검사계획은 “1.4.3 1) 품질시험기준”에 적합하게 작성되어야 한다.

3) 계획이행 확인

(1) 발주청은 건설업자가 품질시험계획에 따라 건설공사의 시공 및 사용재료에 대한 품질관리업무를 적정하게 수행하고 있는지 여부를 확인요령에 따라 공사 착공일로부터 연1회 이상 확인할 수 있으며, 이 때 건설업자는 입회하여야 한다.

(2) 발주청은 확인결과 시정이 필요하다고 인정하는 경우에는 건설업자에게 시정을 요구할 수 있으며, 시정을 요구받은 건설업자는 지체없이 이를 시정한 후 그 결과를 발주청에 통보하여야 한다.

4) 품질관리비 사용

(1) 건설업자는 품질관리비를 당해 목적에만 사용하여야 하며, 발주청은 이의 사용에 관하여 지도․감독할 수 있다.

(2) 품질관리비는 감리원 또는 공사감독자가 확인한 시험성적서 등이 품질관리활동 실적에 따라서 정산한다.

1.4.3 품질시험․검사

1) 품질시험기준

(1) 건설업자는 건설공사용 자재의 규격 및 품질 등이 설계도서에 명시한 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 품질시험 및 검사를 실시하여야 한다.

(2) 품질시험 및 검사의 종별, 시험종목, 시험방법 및 시험빈도 등 품질시험기준은 이 공사시방서 절(Section)별 일반사항에 따른다.

(3) “가”의 규정에도 불구하고 다음의 자재에 대하여는 이 공사시방서 절(Section)별 일반사항에 별도로 명시하였거나 발주청의 별도 지시가 있는 경우를 제외하고는 품질시험 및 검사를 실시하지 아니한다. 다음의 자재임을 증빙하는 서류는 “1.2.3 제출물 5) 자재 제품자료”에 따라 발주청에 제출하여야 한다.

① 품질검사전문기관이 발급한 시험성적서가 제출되는 자재. 다만, 발급한 날로부터 1년이 경과되지 않았으며, 공공기관 사업장에서 감리원 또는 공사감독자의 서명․날인을 받아 시험의뢰하여 발급받은 시험성적서에 한한다.

② “산업표준화법”에 의한 한국산업규격표시품

③ 주택건설촉진법등 관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질을 인증받은 자재

(4) 구조물의 안전에 중요한 영향을 미치는 시험종목의 품질시험․검사를 실시할 때에는 감리원 또는 공사감독자에게 입회를 요청하여 감리원 또는 공사감독자 입회 하에 품질시험검사를 시행하여야 한다.

(5) 설계변동에 따라 품질시험기준에 명시되지 않은 자재를 사용할 경우에는 별도의 시험을 추가로 시행하여 당해 설계도서에 규정된 품질성능을 확인하여야 한다. 건설업자 사유로 인하여 설계변경하는 경우, 이에 따른 품질시험․검사비용은 건설업자 부담으로 한다.

2) 시험장소

(1) 품질시험중 건설공사현장에서 실시함이 적절한 시험은 현장시험을 실시하여야 한다.

(2) 현장시험실에서 시행할 수 없는 자재 품질시험은 품질검사전문기관(국․공립시험기관 또는 건설교통부장관이 지정한 자)에 의뢰하여 시행한다.

(3) 현장시험실 또는 품질검사전문기관에 의뢰하여 시험하는 것이 부적합한 자재는 제조공장에서 품질시험․검사를 시행할 수 있다. 이 때에는 감리원 또는 공사감독자를 입회시켜 직접 확인케 하여야 한다.

3) 결과기록

(1) 건설업자는 품질시험․검사대장 및 품목별시험․검사작업일지에 품질시험․검사의 결과를 기재하여 감리원 또는 공사감독자의 확인을 득하여야 한다.

(2) 건설업자는 품질시험 또는 검사를 완료한 때에 품질시험․검사 성과총괄표를 작성하고, 당해 건설공사에 대한 기설 검사원, 준공검사원 제출시 또는 예비준공검사 신청시 발주청에 이를 제출하여야 한다.

(3) 품질시험․검사대장, 품목별 시험작업일지 및 품질시험․검사총괄표의 서식, 제출시기 및 부수 등은 “1.2.3 공무행정서류 8) (2) 사급자재 관련서류”에 따른다.

4) 불합격 자재의 장외반출

(1) 건설업자는 품질시험․검사결과가 설계도서의 기준에 부적합한 경우(이하 이 공사시방서에서 “불합격”이라 한다)에는 시험작업일지에 그 내용을 기재한 후 즉시 감리원 또는 공사감독자에 보고하고, 불합격된 자재는 지체없이 장외로 반출하여야 한다.

(2) 건설업자는 불합격되어 장외반출된 자재에 대한 품질시험․검사 불합격자재조치표를 작성하여 보관하여야 한다. 품질시험․검사 불합격자재조치표의 서식은 “1.2.3 공무행정 서류 8) (2) 사급자재 관련서류”에 따른다.

5) 자재시험

(1) 건설업자는 사용할 자재가 품질시험․검사에 불합격된 경우 시험결과 확인 등을 이유로 동일자재에 대하여 반복하여 시험을 요구하거나 시행할 수 없다.

(2) 품질시험․검사에 불합격된 경우 건설업자는 재시험을 시행하여야 하며, 이에 따른 추가비용은 건설업자가 부담한다.

1.4.4 현장 시험실

1) 인력․장비기준

수습인은 현장에서 품질시험 및 검사를 실시하기 위하여 필요한 시험실의 규모, 시험․검사장비의 설치와 시험 및 검사요원의 배치기준은 이 공사시방서 절(Section)별 일방사항에 따른다.

2) 비치서류

현장시험실에는 아래 서류를 비치하고 기록․유지하여야 한다. 각 서류의 양식 등은 “1.2.3 공무행정서류 8) 품질시험․검사 및 자재관련서류”에 따른다.

(1) 자재 수급계획서

(2) 품질보증계획 또는 품질시험계획

(3) 품질시험․검사대장

(4) 품목별 시험작업일지

(5) 품목시험․검사성과총괄표

(6) 사급자재 검수부

(7) 품질검사전문기관 의뢰시험대장

(8) 품질시험․검사 불합격자재조치표

(9) 지급자재수급계획서 및 변경요청서

(10) 지급자재에 대한 품질확인평가표

1.4.5. 품질시험․검사 의뢰

1) 의뢰 절차

(1) 품질검사전문기관에 시험․검사를 의뢰하는 시료는 감리원 또는 공사감독자 및 직상급공사감독자 2인 이상이 입회 하에 건설업자가 채취하고, 시험의뢰서 및 시료봉인 부위에 시료채취 입회자 전원이 인감을 날인하여야 한다.

(2) 품질검사전문기관에 시험을 의뢰할 경우에는 감리원 또는 공사감독자가 건설업자와 동행한다.

(3) 현장여건 및 시료의 변질 가능성 등을 감안하여 시료채취 후 15일 이내에 시험을 의뢰하여야 한다.

1.4.6 시공 허용 오차

1) 시공오차 측정

(1) 건설업자는 해당공사 시행 전에 시공한 공사 목적물의 품질이 시공 허용오차 기준에 적합한지 여부를 확인하기 위하여 시공오차 측정계획을 수립하여야 한다.

(2) 건설업자는 시공오차 측정계획에 따라 측정을 시행하되, 공사진행단계마다 시공 전과 시공 후로 구분하여 층별, 동별 또는 부위별로 측정방법에 따라 실행하여야 한다.

2) 시공 허용오차기준 및 측정방법

부위별 시공 허용오차기준 및 측정방법은 이 공사시방서 절(Section)별 각 절의 해당 시방에 따른다.

3) 공사진행

(1) 시공오차 측정결과가 시공 허용오차기준을 벗어나는 부위는 반드시 이를 시정․조치한 후 후속공사를 진행하여야 한다.

(2) 허용오차 기준은 부실시공을 방지하기 위한 최소한의 범위를 규정한 것이므로 이 허용오차 기준보다 설계도서에 명시된 기준이 더 강화되어 있을 경우 건설업자는 설계도서에 명시된 기준에 적합한 시공이 이루어지도록 하여야 한다.

(3) 시공상태가 허용오차 범위내일지라도 외관상 또는 구조적, 기능적으로 문제가 있다고 판단될 때는 이를 시정하여야 한다.

1.4.7 시공 확인 및 점검 등

1) 시공확인

(1) 건설업자는 품질관리전담자(이하“QC"라고 한다)로 하여금 매공정단계마다 다음과 같은 절차에 의하여 현장 시공확인을 하게 하고, 확인된 내용에 대하여 담당 감리원 또는 공사감독자의 검사․확인을 받은 후 (감리원 또는 공사감독자 직상급자의 확인여부에 관계없다) 후속공정을 진행하여야 한다.

① 건설업자는 시공확인의 적합한 시행을 위하여 시공확인서 양식을 사전에 제작하여야 한다.

② QC는 각 공종별 시공확인 시점별로 주요검사항목에 따라 시공확인을 실시하고 검사결과 부적합한 사항이 있을 경우 Key Plan의 해당부위에 청색으로 주요검사 항목의 번호를 표시하고 해당란에 부적합한 내용을 기재하여야 한다.

③ QC는 부적합한 사항에 대한 시정조치 완료를 확인한 후, 감독에게 “시공확인서”를 제출하고 검사를 요청하여야 한다.

④ 시공확인 요청을 받은 감리원 또는 공사감독자는 특별한 사유가 없는 한 지체없이 시공과정, 완료 상태, 자재의 품질규격 등이 설계도서의 규정에 적합하게 시공되었는지 여부를 확인하며, 확인 결과 부적합한 사항에 대하여 시공확인서에 기재하여 건설업자에게 이를 시정 완료한 후에 재확인을 받도록 지시할 수 있다.

⑤ 감리원 또는 공사감독자는 공사착공 초기에 공사의 규모, 난이도, 예상되는 기능공의 수준 등을 감안하여 시공확인 시점, 검사의 범위 및 주요검사항목을 조정할 수 있으며, 시공확인시 주요검사항목 이외의 부적합한 사항에 대해서도 시공확인서에 기재하거나 구두로 시정지시를 할 수 있다.

⑥ 감리원 또는 공사감독자는 QC가 동일 유형의 지적사항이 반복되거나 감독의 지시사항을 이행하지 않는 등 업무를 태만히 할 경우 건설업자에게 QC의 교체를 요구할 수 있으며 특별한 사유가 없는 한 건설업자는 이에 따라야 한다.

(2) 공종별 시공확인 시점, 범위 및 주요검사항목은 절(Section)별 일반사항 항목의 해당 시방에 따른다. 다만, 감리원 또는 공사감독자는 공사착공 초기에 현장여건(공사 종류, 규모, 구조, 공법, 하도비율(하도급율), 시공난이도, 예상되는 기능공의 수준 등)을 감안하여 시공확인 시점, 범위 및 주요 검사항목을 가감하여 조정할 수 있다.

2) 현장 지도점검

(1) 발주청은 건설공사가 계약문서의 요구조건에 맞게 수행되고 있는지를 확인하기 위하여 현장 지도점검을 시행할 수 있으며, 현장 지도 점검을 시행하는 공종 및 점검시기는 이 공사시방서 절(Section)별 일반사항 항목의 해당 시방에 따른다.

(2) 발주청은 점검결과 지적사항에 대하여 건설업자에게 시정을 요구할 수 있다. 이때, 건설업자는 시정조치하고 시정조치내용에 대하여 시정전, 시정후의 천연색 사진을 포함하여 기록․유지하여야 한다.

(3) 건설업자는 지적사항에 대한 조치방안을 제시하여 감리원 또는 공사감독자의 확인을 받아야 하며, 지적사항이 주요사항인 경우에는 발주청의 승인을 받아야 한다.

(4) 지적사항에 대하여 시정조치가 완료되기 전까지는 기성 또는 준공검사원을 제출할 수 없다.

1.5 안전․보건 및 환경관리

1.5.1 일반

1) 적용범위

본 안전관리규정은 안전시공 및 안전관리 업무에 적용하며 서울특별시 안전시공 및 안전관리 업무에 관한 관계법령, 시장 지시사항 및 서울특별시 규정에 별도로 정한 것을 제외하고는 이 지침을 적용한다.

본 안전관리규정은 다음 사항을 참고하여 건설안전사항을 상세히 수록하였으며 도급자는 산업안전보건법 제 48조에 의거, 위험방지계획서를 작성하여 관할노동부 승인을 득하여 감독관에게 제출해야 한다.

(1) 관리분야

① 산업안전보건법 20조(조직 등)

② 산업안전보건법 23조(안전조치)

③ 산업안전보건법 31, 32조(안전보건교육)

(2) 기술분야

① 가설공사 표준안전작업지침	노동부 고시 84-37

② 콘크리트공사 표준안전작업지침	〃     84-38

③ 굴착공사 표준안전작업지침	〃     85-10

④ 철골공사 표준안전작업지침	〃     85-11

⑤ 해체공사 표준안전작업지침	〃     85-12

⑥ 건설기계 표준안전작업지침	〃     85-13

⑦ 전기재해를 위한 기술상의 지침	〃     85-34

⑧ 작업환경측정방법	〃     88-70

⑨ 사업상 안전보건관리규정	예     규  133호

위험기계기구 방호조치기준	고     시  제4호

크레인등 특정기계작업 표준신호	예     규  95호

Steel Box등 중량물의 현장반입, 상․하차 등 취급요령과 가설시 안전지침을 명시

수상(하천, 호수, 해상) 작업의 안전지침

가설공사에 포함된 공종별 안전지침

2) 안전관리업무 책임한계

안전관리 미흡으로 인한 안전사고에 대한 모든 책임은 도급자에게 있고 손해(損害) 발생에 대해서는 도급자 부담으로 처리하여야 하며, 안전시공계획서의 심의 및 안전점검은 그 책임이 소멸되거나 전가될 수 없다.

3) 안전시공 계획서의 심의

(1) 도급자는 착공에 앞서 발주자가 필요하다고 판단되어 지시하는 주요공사에 대하여 안전시공에 대한 발주처의 심의를 받아야 한다.

(2) 안전시공계획서의 심의는 도급자가 작성하여 제출하며, 발주자는 즉시 심의하고, 그 결과를 도급자에게 통보하여야 한다.

(3) 안전시공 계획서는 구간별, 공종별로 월간(30일) 작업량을 기준으로 작성하여 제출하여야 한다.

4) 도급자 안전관리 전담반 운영

(1) 도급자는 안전관리 전담반을 편성하여 안전관리를 자율적으로 성실히 실시하여야 한다.

(2) 도급자는 해빙기, 우기, 동절기에 대한 안전대책을 수립하여 감독관의 승인을 받아 실시하여야 한다.

(3) 도급자는 회사내 안전관리 규정을 제정하여 실시방법 및 내용을 구체화하고, 시공현장 및 본사에 안전관리 전담부서를 편성․운영하여야 한다.

① 본사 안전관리

안전전담 임원외 3명 이상으로 구성하며 주1회 이상 현장을 안전점검하여야 하며 감독관에게 결과를 보고하여야 한다.

② 현장 안전관리

현장 안전관리책임자를 건설안전기사 1급이상 자격증 소지자로 임명하고, 현장 안전관리책임자외 2명 이상으로 구성하며, 일일 안전점검을 실시하고 그 결과를 현장소장에게 일일 보고하여야 한다.

③ 현장소장의 안전관리 임무

일일 안전점검결과 보고에 대한 확인점검을 실시하고 그에 따른 조치를 타업무보다 우선하여 조치하여야 한다.

④ 본 시방서에서 안전보건 총괄책임자, 안전관리자 및 안전담당자라 함은 다음과 같다.

ⓐ “안전보건 총괄책임자”라 함은 산업안전보건법 제12조, 제15조 및 동시행령 제8조 제19조, 동시행규칙 제3조, 제7조, 제8조의 규정에 의거하여 현장내에서 작업을 할 때에 생기는 산업재해를 예방하기 위한 업무를 총괄 관리하기 위한 자를 말한다.

ⓑ “안전관리자”라 함은 산업안전보건법 제 13조 및 동시행령 제9조, 제10조, 동시행규칙 제3조의 규정에 의거하여 안전보건 총괄책임자의 업무중 현장내 안전에 관한 기술적인 사항을 관리하는 자를 말한다.

ⓒ “안전담당자”라 함은 산업안전보건법 제13조 및 동시행령 제12조에 의거하여 안전관리자를 보조하며 위험방지가 특히 필요한 작업에 있어서 안전업무를 담당하는 자를 말한다.

1.5.2 건설안전일반

1) 교육 및 훈련

작업장에서는 항시 위험부담을 안고 있어 주의를 게을리할 수 없다.  예기치 않은 돌발사고로 귀중한 인명의 피해는 물론이고 재산상의 피해도 아울러 입게 되어 불행을 겪게 되는 사례가 허다함은 우리 주위에서 많이 보아오고 있다.  이러한 사고를 최소한 줄이기 위하여서는 작업장에 종사하는 작업원에 대한 교육훈련이 필요하다.

작업장마다 각기 특색을 가지고 있는 것이므로 작업착수 전에 작업원에 대한 기본안전교육의 실시는 절대로 불가결한 일이다.  실시하여야 할 교육 및 훈련내용은 작업장의 특성에 따라 결정하여야 한다.

작업개시 전에 공사안전관리책임자는 감독자와 근로자에 대하여 전반적인 안전교육을 실시하여야 하며, 안전작업의 요령 및 사고의 보고, 의료시설의 이용에 관한 사항을 작업원이 숙지할 수 있도록 교육하고, 공사감독자는 매주 한번 최소한 5분간의 안전교육을 실시하여야 한다.

또한, 특별한 기구나 장비를 사용하는 작업원이나 유독물, 부식제, 기타 유해물질을 취급하거나 위험물을 취급하는 작업원이나 위험지에 출입하는 작업원은 거기에 대응할 수 있도록 특별 안전교육을 받아야 한다.

2) 위생시설

작업환경의 쾌적은 작업원의 작업능률에 커다란 영향을 주고 있다.  보건위생시설의 불비로 인하여 피고용인이 불행한 일을 당하게 되면 고용자측의 손해는 물론 이려니와 피고용자도 불행한 일이다.  그러므로 작업장내의 위생시설의 완비는 당연한 일이다.

(1) 음료수시설

① 작업장에 취업하고 있는 작업원 등의 음료수는 보건당국에서 인가한 수원에서 공급되는 물을 사용하여야 한다.

② 보건당국에서 인가한 수원으로부터 공급받지 못할 때에는 오염을 방지할 수 있는 시설을 갖추어 급수하여야 한다.

③ 비음료수를 급수하는 모든 수도전에는 음료에 부적합이라는 표지를 표시하여야 한다.

④ 음료수는 배수시설에 오염되어서는 안된다.

⑤ 작업장내에서 100m이내에 최소 한 개의 수도전이 있어야 한다.

(2) 변소시설

① 작업장에는 매 30인당 1개 또는 이에 준한 비율의 변소시설을 갖추어야 한다.

② 변소는 청결하여야 하며, 통풍장치를 마련하고 통풍구에는 철망으로 그물을 쳐야 한다.

③ 변소에는 반드시 세면시설을 갖추어야 한다.

④ 남녀변소는 따로 설치하고 출입구에는 반드시 남녀 구분의 표지를 표시하여야 한다.

⑤ 전염병 발생의 예방을 위하여 적당한 분량의 소독약을 정기적으로 살포하여야 한다.

(3) 식당시설

① 식당은 검사원의 책임 하에 위생관리를 철저히 할 것이며, 보건당국에서 규정한 보건 및 위생시설에 준하여 시설유지 및 운영에 만전을 기하여야 한다.  주기적으로 위생검사를 받아야 한다.

② 식당관리책임자는 보건당국에서 인정한 식료품 취급면허(허가, 자격)증 소지자이어야 한다.

3) 의료시설

(1) 작업장에는 불의의 사고로 부상자가 발생하였을 때 응급치료할 수 있는 의료기구와 약품을 구비하여야 한다.

(2) 작업장에 따라 자주 발생하는 사고 및 상해에 대한 응급약품 및 기구를 갖추고 작업중의 몇 사람은 사고에 대한 응급치료법을 습득하여 둘 것이며 습득한 자는 언제든지 작업장에서 대기하고 있어야 한다.

4) 작업원의 신체적 조건

(1) 작업원은 작업을 수행함에 신체적으로 적합하여야 한다.

(2) 작업을 함에 있어 유의하여야 할 사항은 체력, 인내력, 민활성, 협조성 및 시청각의 정확성을 갖추어야 한다.

(3) 피로, 질병 또는 기타사유로 능력 또는 긴장이 해이해짐으로 본인 또는 타인으로 하여금 의외의 사고를 입힐 위험성이 있거나 또는 재산피해를 초래할 위험이 있을 때에는 그에게 작업을 허용하여서는 안된다.

(4) 중장비, 작업원수송에 종사하는 운전사는 21세 이상이어야 한다.  또한 모든 작업원은 작업장에서 사용되는 표지, 신호 그리고 작업지시를 읽고 이해할 수 있어야 한다.

5) 개인보호구 및 안전시설

(1) 작업원은 보호구와 안전장비를 착용하여야 한다.

(2) 작업원 각 개인에게 지급되는 보호구와 안전장비의 활용법에 대하여는 미리 숙지시키도록 하여야 한다.

(3) 각 개인에게 지급된 보호기구는 작업장에서는 반드시 사용하여야 한다.  지급된 보호기구는 기능을 다하지 못하는 예가 없도록 항시 손질을 가하여 유지관리하여야 한다.

(4) 작업장입구에는 안전모 착용이라는 표지를 표시하여야 한다.

(5) 철근공, 비계공은 적당한 고리나 물림쇠로 장비된 안전벨트를 착용하여야 한다.

(6) 지면에서 6m이상 높은 곳에서 작업할 때에는 안전방책이나 안전망을 반드시 설치하여야 한다.

(7) 작업장 하부에 공로, 통로 또는 다른 작업이 있을 때에는 안전방책 또는 안전망을 반드시 설치하여야 한다.

(8) 개인보호구 및 안전장비로서 다음과 같은 것들이 있으며 이들 장비로 보호할 필요가 있는 작업에 종사하되, 고무장갑, 절연체로 된 모자, 고무담요, 전선외피관 부도체, 도구등 전기공의 보호용구

① 고무장화, 보호덧신, 안전화 등(보호신)

② 전공의 혁업장에서 종사하는 작업원에게는 사고의 미연방지를 목적으로 한 보호구와 안전장비를 착용하여야 한다.

③ 방사선으로부터의 보호렌즈를 가진 안경, 안면마스크, 헬멧, 안면가리개, 적당한 농도를 가진 안경

④ 예리한 모서리가 있는 물건을 다루거나 타박상을 입기 쉽거나 뜨거운 것을 다루기 위한 손보호용구(동력톱, 선반, 드릴 등과 같이 끌려 들어가지 쉬운 기계옆에서 일하는 사람은 장갑을 껴서는 안된다.)

⑤ 교통수단에 직접 노출되는 신호수나 기타 작업원을 보호하기 위하여 반사물질 또는 아주 잘 보이는 물질로 제작된 벨트나 의복

⑥ 콘크리트, 돌, 금속 등 파편이 생겨 눈이나 머리에 날아와 피해를 입힐 것을 예방하기 위한 안전렌즈, 측면보호망이 붙어있는 안경, 안면마스크, 가리개, 헬멧(가열금속을 던질 때나 뜨거운 타르, 유류 액체 취급시도 동일함)

⑦ 화학약품으로부터 보호하기 위한 특수안경, 특수안면마스크 및 보호의복

⑧ 안전혁대

⑨ 먼지, 가스, 냄새, 안개가 꽉차거나 산소가 결핍한 곳에서의 호흡기(산소 16%이하인 곳에서는 작업중단)

연마폭파작업, 밀폐된 방에서의 용접, 밀폐된 방에서의 유해물질 분무시 착용할 호스마스크, 공기선호흡기, 원동형마스크는 독성의 응집을 제거할 수 있는 경우에 허용(호흡을 위하여 압축공기를 사용할 때는 조절기 및 여과기를 공급선에 삽입한다.)

안전망

6m 이상의 높이에 승강대나 작업대의 보호방책이 없을 때는 안전 그물을 반드시 쳐야 한다.

ⓐ 작업구역 하부에 공용통로나 작업인이 있을 때에도 안전 그물을 쳐야 한다.  그물의 재질은 철사 또는 인조섬유질이며 철사인 경우 #22호선 이상의 것으로 인조섬유질인 경우 18가닥 꼬아서 만든 것이어야 한다.

ⓑ 그물 눈금은 가로, 세로 공히 15cm이하이어야 하며 ①의 경우는 간격이 2.5cm이하이어야 한다.  안전 그물은 작업가장자리로부터 2.5m밖으로 연장되어야 하고 가설후에는 반드시 성능시험을 한 후 작업개시토록 하여야 한다.  성능시험은 그물에 영향을 끼치는 가장 높은 곳이나 6m높이 중 더 높은 곳에서 250kgf(밀도 1.7gr/cm2이상의 것)의 중량물을 떨어뜨려 시험한다.  그물은 위치를 변경할 때와 수리 후에는 즉시 시험하고 매 6개월마다 시험한다.

6) 유독성 및 유해성 물질

(1) 유해성 공기

작업장에서 먼지, 안개, 악취, 가스, 기타 공기중의 불순물이 있어 그것들이 종업원의 건강에 유해하다고 인정될 때에는 배기, 통풍, 여과 등의 방법으로 유해량 이하로 이를 배제하여야 한다.

(2) 유해성 물질

유해성 물질이 피부나 의류에 닿을 우려가 있는 작업에는 다음과 같은 조치가 필요하다.

① 필요한 보호의류 및 장비

② 피해입은 종업원에 대한 응급조치 및 치료를 할 수 있는 약품, 기구, 인원

③ 누적된 물질 및 보호연고를 제거하기 위한 공인된 용해약, 비누, 온수

④ 노출된 피부에 바르는 보호연고

⑤ 샤워 및 세척장치

(3) 고열물질

① 보일러, 용광로는 견고하고 평탄한 지반위에 설치하고 사람의 왕래에 의해 흔들리거나 넘어뜨리는 따위의 위험이 없도록 난간, 철망 등으로 보호해 주어야 한다.  또한 자연배기가 되지 않으면 인공적으로 배기시설을 갖추어야 하며 반드시 소화기를 구비하여야 한다.

② 액체연료를 사용하는 버어너에 불을 켜둔 채 급유하는 일은 절대 금한다.

③ 장애물이 있는 통로로 뜨거운 물건을 들고 다니는 일, 뜨거운 물건을 들고 사다리를 오르내리는 일이 없도록 한다.

7) 조명

(1) 광도

사무실, 작업장, 계단, 복도, 통로, 기타작업 구역에는 필요한 밝기의 등화를 달아야 한다.  장소에 따른 조명밝기의 규준은 아래와 같다.

장 소	조 명 도	비 고
현관, 일반적인 바깥문 콘크리트 작업장 적재 및 하역장 출입구 강의실 기계실 연료주유소 작업장-세밀한 작업 작업장-보통 작업 작업장-조잡한 작업	30룩스 50 50 50 100 100 50 300 100 50	촉광 : W(Watt) 전등의 밝기 조도 : L(Luxe) 작업장의 밝기 거리 : D(Distant) 전등과 작업장의 거리(m) 소요촉광 : W=L×D2

장 소	조 명 도	비 고
물품보관실 저장실1실내 저장구역1실내 화장실 창고 응접실	100 100 30 100 50 300

(2) 등의 종류 및 배치

① 직사광선으로 인한 눈부심이 없도록 한다.

② 최소의 반사광선이 되도록 한다.

③ 심한 그림자가 지지 않도록 한다.

④ 수직면, 경사면도 잘 비치게 한다.

⑤ 청소와 조리에 안전하고 편리하게 한다.

8) 신호, 신호수 및 경계표지

1) 신  호

① 동질의 모든 작업장에서는 동일신호법을 사용한다.

② 신호는 운전자의 위치, 신호통제자가 볼 수 있는 위치에서 한다.

③ 수동신호할 때 한사람만 하고 신호수는 운전자와 대상물을 항상 동시에 볼 수 있는 위치에 서야한다.

④ 신호수와 운전자간의 거리가 18m이내일 때는 수동으로 신호해도 좋지만 18m이상일 때는 무전기, 수리, 전화, 기타 가시․가청장치를 사용하여야 한다.

⑤ 신호시설은 타목적에 사용하여서는 안된다.

2) 교통정리원(신호수)

① 신호수는 믿음성이 있고 그 작업에 대하여 충분한 경험과 자격을 갖춘 자로 한다.

② 차량, 기계, 장비와 운전원이 작업지점을 잘 볼 수 없고 별다른 기계, 신호장치가 없을 때는 반드시 신호수를 사용한다.

③ 공로상 혹은 인근에서 작업함으로 인해 통행차량, 보행자에 위험을 느낄 때는 반드시 신호수를 사용한다.

④ 신호수는 잘 보이는 장갑을 끼거나 신호기를 사용한다.

3) 경계표지

① 작업장내외에 경고표지를 붙여 작업원과 일반인에게 위험이 있음을 경고한다.

② 교통안전표지판은 모양, 규격, 색깔, 위치 등 공로표시 규준에 따라야 한다.

③ 위험표지는 직발적인 위험이 있는 곳에만 설치하고 주로 색깔은 적색을 사용한다.

④ 주의표지는 잠재한 위험을 일깨워 주거나 불안한 행위에 주위를 환기시킬 위치에 설치하고 주로 색깔은 황색이다.

⑤ 안전표지는 일반적인 안전계몽을 위하여 작업장내에 여러 군데 설치하고 주로 색깔은 녹색으로 한다.

⑥ 비상구, 소화기 및 소방장비의 위치는 잘 보일 수 있도록 표시한다.

⑦ 야간에도 봐야 할 표지판에는 조명시설을 달거나 야광페인트를 사용한다.

⑧ 기타 고시판(告示板), 방향표시판 등은 백색과 흑색을 사용한다.

9) 화재예방

(1) 일반 유의사항

① 각 시설 및 작업장별로 화재예방 대책을 수립하고 대책의 적부 및 효과에 대하여 적어도 6개월에 한번씩 검사하고 시정 조치하여야 한다.

② 인화성, 가연성 및 기타 유사한 위험물이 있는 장소에서는 흡연을 금하여야 하며 금연표지를 표시하여야 한다.

(2) 청소 및 환경정리

① 작업장 및 옥외창고에 인화성, 가연성 및 기타 유사한 물질을 반입하기 전에 불순물을 제거하고 화재의 원인이 없도록 청소할 것이며 옥외창고 바깥쪽 10m까지는 공지가 있어야 한다.

② 건물위치에서 3m이내에 가연성 물질을 저장하여서는 안되고 나무가지, 가랑잎 등이 쌓이지 않게 하여야 한다.

(3) 간  격

① 가설건물간의 최소 간격은 단층일 때는 12m, 2층일 때는 15m이상으로 하고 전 구역을 통하여 화재비상통로를 두고 항상 장애물이 없도록 정리되어야 한다.

② 목재저장은 여러개의 구간으로 분할하여 1구간에 백만재 이상 쌓지 말고, 구간구간 사이에 15m 정도의 방화지대를 두어야 한다.

③ 건물 및 시설물에 인접하여 가연성 물질을 저장하여야 할 때에는 최소 3m이상 떨어져야 한다.

(4) 난방기구 및 장치

① 스토우브나 다른 난방시설의 연통이 가연성의 벽 및 지붕을 통과할 때는 적당한 내열재와 단열시설을 하여야 한다.

② 연통의 이음부는 리벳을 박든지, 용접하든지 기타방법으로 잘 접합하여 삐뚤어지거나 떨어지지 않도록 할 것이며 특히 연탄난로일 때는 이음부를 잘 밀폐하여야 한다.

(5) 인화성, 가연성 액체

① 인화성 액체의 저장취급 및 사용은 경험있는 사람이 취급토록 하며 이 지역내에 일절의 발화원인이 되는 물질의 반입을 금할 것이며 적절한 경고표지와 금연표지를 반드시 붙여야 한다.

② 주변 지역에는 쓰레기, 마른풀 등 가연성 물질을 항상 제거하여야 한다.

③ 마루, 별 등에 인화성 액체가 묻지 않도록 주의하고, 마루, 벽 등에 흘렀을 때는 즉시 깨끗이 닦아내야 한다.

④ 지역내의 조명은 전등이외에는 사용하여서는 안된다.

⑤ 전구를 갈아 끼우거나 전기회선을 수리할 때에는 반드시 전원 스위치를 끄고 하여야 한다.

⑥ 저장 취급하는 실내는 적당한 수단으로 환기시켜야 한다.

⑦ 운반수송할 때는 용기에 넣어서 하고 경고표지를 달아 누구나 알아 볼 수 있도록 한다.

⑧ 용지의 뚜껑은 잘 밀폐되게 닫을 수 있어야 한다.

⑨ 이 지역 및 건물 내에서 불꽃이 노출되는 기구를 사용하여서는 안되며 발화요인이 되는 작업도 금하여야 한다.

저장탱크 및 그 부속은 전기용접으로 제작하고 적당한 크기의 배기구가 있어야 하며 배기구는 화염, 난방시설 등 화기에 가까이 하지 말아야 하며 탱크의 급유구는 빨리 닫혀지든지 또는 자동으로 닫히는 밸브가 장치되어야 한다.

탱크 및 부속에서 액체가 새는 경우 기름이 퍼질 것에 대비하여 주위에 도랑을 만들거나 둑을 만들어야 한다.

저장건물은 내화성 구조라야 하며 인접건물이나 구조물에서 적어도 15m 떨어져 있어야 한다.

내화성이 아닌 건물을 사용할 때에는 30m 떨어져야 하며 건물내부에 환기시설을 반드시 하여야 한다.

저장 혹은 취급하는 지역 및 건물은 취급원이 없을 때는 반드시 잠궈놓고 취급원 외의 출입을 금하여야 한다.

작업자는 옷에 인화물이나 가연성 액체가 묻지 않도록 방비하고 기름묻은 옷을 입고 계속 작업하는 것을 금하여야 한다.

(6) 도료 및 도료작업

① 페인트, 니스, 락카 등 휘발성 도료가 담긴 용기는 사용치 않을 때에는 반드시 닫아두어야 한다.

② 시공중 건물 내에서는 당일에 쓸 만큼 이상의 도료를 두지 말아야 한다.

③ 용기는 과도한 열, 연기, 불꽃, 태양의 직사광선을 피하고 환기가 잘되는 곳에 두어야 한다.

④ 뚜껑이 없는 용기 담아 쓰던 도료는 철제용기나 내부가 불연성재로 된 용기에 넣어 저장하여야 한다.

⑤ 도료가 묻은 의류나 넝마 등을 쓰지 않을 때에는 통풍이 잘되는 캐비넷에 넣어 두어야 한다.

⑥ 도료찌꺼기, 쓰레기는 매일 작업장 밖으로 안전하게 제거되어야 한다.

⑦ 분무기를 쓰는 작업장에는 공기중의 유해물질의 농도를 안전한 정도까지 낮추기 위하여 적당한 환기시설을 하여야 하며 환기가 불가능하면 안전 호흡기를 사용하여야 한다.

⑧ 작업장에서 흡연, 불꽃 등의 발화원인이 되는 물질 및 행위는 금하여야 하며 금연, 화기엄금 등의 주의표지를 적당한 위치에 붙여 두어야 한다.

10) 소방

(1) 응급소화

① 소화기는 알맞게 배치하여 잘 보이게 표시하며 언제든 접근에 편리하게 하며 장애물로서의 지장이 없도록 한다.

② 모든 소화기는 제작회사의 사용법 지시에 따라 점검, 정비, 소화액 보급 등을 철저히 하고 매 소화기마다 점검표를 붙여 점검, 정비, 사용, 소화액보급 등을 상세히 기록하여야 한다.

③ 방화수, 방화모래 등이 담긴 용기는 적색으로 칠하고 물, 모래가 항상 채워져 있어야 하고 동계에는 물이 얼지 않도록 하여야 한다.

(2) 방화순찰

① 작업이 끝난 후 담당 책임자는 작업장, 창고, 건물주변을 순찰하고 이상 여부를 확인하여야 한다.

② 경비원은 작업장내외를 수시 순찰하여야 한다.

③ 용접, 뜨거운 금속, 불꽃 등을 취급하는 작업장은 작업의 종료 후 적어도 30분간 감시원이 있어 안전여부를 확인하여야 한다.

(3) 소화기구 및 소화장비

① 소화기구 및 소화장비는 고장난 상태로 두거나 다른 목적으로 사용하는 일이 없도록 하여야 한다.

② 언제든지 쓸 수 있도록 그 상태를 보장하기 위하여 매주 검사하여야 한다.

③ 작업장에는 싸이렌이나 전화 혹은 다른 화재경보장치를 갖추어야 한다.

(4) 교육, 훈련

① 각 작업장, 공장, 사무실, 변전실, 유류저장소 등 단위로 예비 소방조로 조직하여 유사시 즉시 출동하여 소화작업에 임할 수 있어야 한다.

② 항시 소화대책을 수립하고 교육훈련을 통하여 전종업원에게 이를 숙지시켜야 한다.

11) 자재

(1) 일반유의사항

① 포대나 통에 담긴 자재를 층으로 쌓을 때는 미끄러지거나 무너지지 않게 안정되게 놓이도록 서로 연결시켜 쌓아야 하며 높이는 안전하게 제한하여야 한다.

② 부득이 통로상에 자재를 쌓을 경우 높이는 안전하게 제한하여야 한다.

③ 가연성 액체나 구리스는 금연구역에 저장하고 다른 자재와 격리하여야 한다.

④ 자재를 쌓을 받침, 마루바닥, 기타시설은 자재의 정하중(靜荷重)에 대하여 안전계수 4이상의 부재이어야 하며 활하중이 작용할 때에는 활하중에 대하여 안전계수 6이상의 부재로 설계하여야 한다.

⑤ 담당 취급원 이외의 창고출입은 금하여야 한다.

(2) 시멘트 및 석회

① 포대시멘트나 석회는 튼튼한 벽에 기댈 수 있을 때 외에는 13포 이상 쌓아서는 안된다.

② 쌓아 놓은 포대더미의 바깥쪽 포대는 개봉구를 안쪽으로 향하게 놓아야 한다.

③ 쌓아 놓은 더미를 내릴 때는 더미 상부가 시종 수평에 가깝게 내려야 한다.

(3) 철근, 철관 및 철재

① 철재는 밑에 받침대를 놓고 잘 정돈해서 쌓아야 한다.

② 미끄러지거나 무너지지 않게 쌓아야 한다.

③ 파이프는 치수별로 밑에 받침대를 깔고 굴러 내리거나 무너지지 않도록 쌓아 비끌어 매어야 한다.

④ 파이프는 1.5cm이상 높게 쌓아서는 안된다.

(4) 모래, 자갈, 쇄석

① 모래, 자갈, 쇄석은 저장소에서 퍼낼 때 밑 부분을 파내거나 절벽을 만들어서는 안된다.

② 벽이나 칸막이에 잇대어 쌓아 놓을 때 벽이나 칸막이에 저항력 이상의 무게를 초과하거나 안전도를 위태롭게 하여서는 안된다.

(5) 환경관리

① 모든 단계, 통로 및 출입구에는 항시 물자나 보급품 및 장애물을 두어서는 안된다.

② 공구, 물질, 연결코스, 호스, 잡부스러기 등이 발이 걸려 넘어지는 위험이나 기타위험을 야기시키지 않도록 흐트러 놓아서는 안된다.

③ 석회, 시멘트 및 기타 먼지를 일으키는 물품을 저장했던 빈 포대는 매일 작업장에서 옮겨 치워야 한다.

(6) 폐기물 처리

① 목재, 나무조각, 부스러기 및 폐품 등은 적어도 매일 처리할 수 있도록 수집하여 한 장소에 쌓거나 또는 용기 속에 저장하여야 한다.

② 폐물, 부스러기 등은 상층에서 하층 또는 내려던져서는 안된다.

1.5.3 용접 및 절단

1) 일반사항

(1) 인정된 용접공 외에 용접 및 절단작업을 하지 못하게 하여야 한다.

(2) 이상이 있는 용접기구 및 장치를 쓰는 일이 없도록 수시 점검하여야 한다.

(3) 작업장에는 반드시 소화기를 비치하여야 한다.

(4) 작업장내에 가연성물질이 없도록 작업 전에 확인하여야 한다.

(5) 용접섬광, 불꽃, 스파크, 녹은 금속 등으로부터 작업원이나 일반인을 보호할 조치를 선행하여야 한다.

(6) 케이블, 탱크 또는 기타용기는 사전에 내외부를 조사하고 용접이나 절단에 착수하여야 한다.

(7) 드럼통, 탱크 또는 기타용기는 사전에 내외부를 조사하고 용접이나 절단에 착수하여야 한다.

2) 가스용접 및 절단

(1) 산소나 아세틸렌 실린더는 불똥, 화염(火焰), 섬광(蟾光)이 미치지 않는 곳에 놓아두고 PLO작업을 하여야 한다.

(2) 작업이 중단된 때에는 토치밸브와 실린더밸브를 반드시 닫아두어야 한다.

(3) 압축된 산소가스 등의 저장 운반에 사용하는 모든 휴대용 실린더는 그 목적에 적합하게 설계된 것을 사용하여야 한다.

(4) 실린더에 태양광선의 직사에 의한 과열 또는 빙설(氷雪)이 쌓이는 일이 없도록 하여야 한다.

(5) 실린더 밸브는 동목적에 제작된 공구로만 사용하고 공실린더 밸브는 반드시 잠궈 두어야 한다.

(6) 전자석, 자석을 실린더 취급에 사용하여서는 안된다.

(7) 가스가 새는 실린더는 잠근 채로 발화의 위험이 없는 옥외에 운반하여 천천히 가스를 빼어 두어야 한다.

(8) 산소실린더 및 그의 부속물(밸브, 커플링, 레률레이터)은 유류로부터 격리시키고 기름이 묻은 손이나 장갑으로 만지지 말아야 한다.

3) 용접

(1) 전기용접기의 회로가 아닌 금속부분은 접지(어스)시켜야 한다.

(2) 가스나 인화성액체가 든 파이프, 도선이 든 파이프 등을 접지회로로 써서는 안된다.

(3) 용접봉 집게로부터 3m이내에 흠이 있는 케이블이나 보수한 케이블을 사용하여서는 안된다.

(4) 용접케이블을 동력케이블이나 고압선 근처에 두지 말아야 한다.

(5) 달아 맨 작업대 위에서 용접할 때 달아 맨 금속성 와이어 등에 용접케이블이 닿지 않게 하여야 한다.

(6) 용접공구 이외에 사용되는 용접기로부터 나오는 회선은 접지가 되어 있어야 한다.

1.5.4 전기배선 및 전기기구

1) 일반유의사항

(1) 모든 전선 및 전기기구는 공인된 형의 것을 사용하여야 하며, 평소 주기적으로 안전진단(점검, 시험, 검사, 측정 등)을 하여야 한다.

(2) 모든 전기시설은 한국전력주식회사 규정 및 전기설비기술기준령에 따라야 한다.

(3) 모든 전기시설은 경험과 공인된 자격을 갖춘 전공에 의하여야 한다.

(4) 전류가 통하는 전선 또는 전기설비의 어떤 부분도 사람이 위험한 접촉을 하지 않도록 적절히 방호되어야 한다. 부재시는 출입구를 잠그고 “고압경고” 표지와 “취급원외 출입금지” 표지를 출입구에 표시하여야 한다.

(5) 변압기실, 발전실, 고압전기기계실 등의 출입구인 문은 밖으로 열리도록 한다.

(6) 작업원이나 장비가 건너다녀야 하는 활선 위는 적당히 보호시설을 하여야 한다.

(7) 활선이나 전기설비에서 작업하는 작업원은 고무장갑이나 기타 보호장치를 착용하여야 한다.

(8) 배선이 복잡하거나, 외딴 곳이거나, 밤 또는 혹독한 날씨에 작업할 때에는 한 사람은 일하지 말고 작업원의 동작을 살피다가 위험한 활선이나 도체에 접근하면 경고해 주고 유사시 구조할 수 있도록 하여야 하며 작업원이 감전됐을 때에 즉시 단전치 못할 경우는 감전된 사람에 직접 접촉하지 말고 고무장갑이나 기타 절연물체를 사용하여 전선으로부터 분리시키고 쇼크로 호흡이 중지되었을 때는 인공호흡 등 긴급조치를 하여야 한다.

(9) 가동동력선, 스위치함, 콘센트와 전기설비 일절에 대하여 최대전압을 써야 한다.

(10) 프러그, 소켓, 콘센트는 규정된 전류와 전압에만 사용될 것이며, 다른 회로와 상호교차되어서는 안된다.

(11) 모든 회로는 퓨유즈 또는 자동회로차단기를 달아 과부하가 걸리지 않도록 하여야 한다.

(12) 스위치는 상자형의 안전한 것을 사용하여야 하며 우연히 켜지지 않도록 잘 설치하여야 한다.

(13) 퓨우즈함은 잠글 수 있는 잘 맞는 문을 달아 두어야 한다.

(14) 스위치나 회로차단기는 수리하는 동안 단전상태로 차단할 수 있는 장치를 갖추어야 한다.

(15) 퓨우즈나 회로차단기는 정격이 되어 있어야 한다.

(16) 스위치 회로차단기, 퓨우즈, 배전반 등이 옥외에 설치되었을 때에는 반드시 보호덮개를 하여야 한다.

2) 접지

(1) 모든 회로는 규정대로 접지장치를 하여야 한다.

(2) 발전기, 스위치, 퓨우즈함, 배전함, 전기크렌, 전기엘리베이터의 궤도, 후렘, 전기설비를 둘러싼 금속제 덮개함 등 전류가 흐르지 않는 부재도 반드시 접지하여야 한다.

(3) 휴대용, 반휴대용 전기기구나 설비도 양질의 도체코드로 접지를 확실하게 하여야 한다.

(4) 전등 및 작업등도 접지되어야 한다.

3) 배선

(1) 가배선은 작업원이나 장비가 닿지 않게 높이 가설하여야 한다.

(2) 600V내외의 회로는 노면 위에서 3m이상 수직간격을 가져야 한다.

(3) 배선은 전주로부터 절연되어야 한다.

(4) 탱크 속이나 둘러막힌 공간에서 가배선할 때에는 비상시 곧 단전할 수 있도록 입구에 공인된 형의 스위치를 달고 잘 보이게 표시하여야 한다.

4) 고가선

(1) 고가송전선, 배전선은 도로 및 구조상에 안전수직거리를 주도록 전주나 탑에 걸어야 한다.

(2)  동력선이나 배전선은 전기설비기준령에 따를 것이며 전기설비를 많이 쓰는 지역에서는 지하에 매설하여야 한다.

(3) 차량통과와 건설장비의 작업에 방해가 되지 않을 만큼의 간격을 두어야 한다.

(4) 고사 송전선, 배전선에 6m 이내에 공장이 있어서는 안된다.

(5) 고가선 근방에서 작업할 때에는 사전에 한국전력주식회사에 연락하여 협조를 얻어야 한다.

(6) 고가선 근처에서 작업하려면 다음의 제조건을 구비하여야 한다.

① 전류가 흐르지 않도록 동력을 차단시키든가 기타 방법을 취하여야 한다.

② 장치나 그 부속물이 고가선에서부터 다음 표의 최소거리 안에 오지 못하게 자리 잡고 작업하여야 한다.

동 력 선 6 전 압(KV)	최 소 간 격(m)
69이하 69 115-161 230-285 345 500	3.0 3.6 4.5 6.0 7.5 10.5

③ 상기 제한구역내로 장비나 그의 부속물이 들어가 작업할 때에는 절연망 및 적절한 조치를 하여야 한다.

1.5.5 소공구 및 휴대용공구

1) 일반유의사항

(1) 공구는 잘 손질하여 정돈해 두고 본래의 목적이외에 사용하여서는 안된다.

(2) 이상이 있는 공구는 수리할 때까지 사용하지 말아야 한다.

(3) 높은 곳에서 일할 때 쓰지 않는 공구는 「집」(Holder)에 넣어 떨어지지 않게 안전하게 두며, 쓰지 않는 공구는 높은 작업장에 놓아두지 말 것이며, 공구를 던지거나 떨어뜨리는 일이 없어야 한다.

(4) 끝이 뾰족한 공구를 주머니에 넣어 다니지 말 것이며, 불에 달구고 두드리고 날세우는 등의 작업은 그 작업에 숙련된 사람에게만 시켜야 한다.

(5) 동력공구를 쓰기 전에 또 가끔 검사하여 안전한 상태가 있는가 확인하고, 지정된 사람외에 사용하지 못하게 하여야 한다.

2) 연마공구

(1) 동력그라인다 바퀴는 그 둘레의 3/4이상이 안전덮개로 덮여 있어야 한다.

(2) 돌고 있는 동안에는 그 작업대나 공구대를 조정하거나 수리하지 말아야 한다.

(3) 금이 갔거나 흠이 있는 그라인더 바퀴는 사용하여서는 안된다.

(4) 제작회사 규격의 안전속도 이상으로 돌리지 말아야 한다.

3) 동력톱

(1) 원형동력톱은 반드시 안전덮개로 덮혀 있어야 한다.

(2) 금이 갔거나, 굽었거나, 깨어진 날을 사용하여서는 안된다.

(3) 사용치 않을 때에는 가동하여서는 안된다.

4) 압축공기를 쓰는 공구

(1) 압축공기용 공구는 그 사용법에 익숙하고 잘 교육받은 기능공에 한하여 사용토록 한다.

(2) 공구는 언제나 손질해 두고 사용 전에 검사하고 조절밸브, 배기밸브, 호스의 이음부, 헤머의 다아즈 끼우개 등을 잘 조사하여야 한다.

(3) 공기호스는 공구로부터 떼기 전에 배출밸브를 잠그고 호스내의 공기를 먼저 빼어 버리며 공구와 호스 연결부는 끈으로 잘 잡아매어야 한다.

(4) 공기호스는 제작자의 허용압력 이상 가해지지 않도록 하여야 하고 터진 호스, 파손된 호스는 쓰지 말아야 한다.

(5) 호스를 사다리, 계단, 통로 상에 놓아 걸려 넘어지는 일이 없도록 하여야 한다.

(6) 손, 얼굴, 또는 옷에 묻는 먼지를 털기 위해 압축공기를 쓰는 일이 없도록 하여야 한다.

1.5.6 로우프, 고리줄 체인

1) 일반유의사항

(1) 로우프․고리줄 및 체인을 사용할 때에는 제작자가 추천한 안전사용법을 따르고 또한 장비와 함께 사용할 때에는 장비제작자가 추천한 사항에 따라야 한다.

(2) 작업원의 머리 위로 지나가는 하물(荷物)을 운반하는데 사용하는 걸고리는 잘 묶어 놓아야 한다.

(3) 고리를 사용하여 하물(荷物)을 운반할 때 고리가 다른데 걸리거나 또한 충돌함으로써 고리가 비틀릴 우려가 있을 때에는 끝이 열린 고리를 사용하여서는 안된다.

(4) 걸고리․고리․클립 등 및 그의 부속물이 너무 낡았거나 굽었거나 비틀어졌거나 기타 흠이 있는 것은 사용하지 말아야 한다.  너무 낡았다 함은 20%이상의 강도 감소를 말한다.

(5) 10톤 이상의 하물(荷物)을 인양할 때의 걸고리에는 특별한 조치를 취하여야 한다.

2) 와이어 로우프

(1) 와이어 로우프는 사용 전 또는 사용 후에도 수시로 유능한 사람으로부터 검사를 받아야 한다.

(2) 다음 상태에 있는 와이어 로우프는 사용해서는 안된다.

① 1Lay안에 12가닥 끊어진 철사가 있는 것 혹은 1Lay안에서 1다발에 4가닥 이상 끊어진 철사가 있는 것, “로우프의 1Lay라 함은” 한 다발이 로우프 둘레를 완전히 한바퀴 돈거리를 말한다.

② 원래의 직경의 1/3이상 달았거나 찌그러진 것

③ 철사가 삭은 것

④ 꺾어서 얽힌 것, 부서진 것, 새장처럼 펼쳐진 것

⑤ 로우프의 정격 직경에서 다음 양 이상 직경이 준 것

정 격 직 경	직 경 감 소
19mm 22-28 32-38	1.2mm이상 1.6이상 2.4이상

(3) 소켓 주변이나 로우프 끝에서 철사가 끊어지거나 녹슬거나 부식한 것이 있을 때는 사용해서는 안된다.

(4) 흠이 있어 폐기한 와이어는 더 이상 중량물 작업에 쓰지 않도록 분명하게 표해두어야 한다.

(5) 로우프의 직경과 로우프를 감는 드럼, 블록 또는 뿌우레이 등의 직경의 비율은 로우프 자체가 과도하게 닳던가 변형 또는 손상을 입지 않고 잘 잠길 수 있도록 하여야 한다.

(6) 드럼, 블록 또는 뿌우레이의 로우프가 닿는 표면은 매끈하여야 하며 로우프를 손상할만한 흠이 없어야 한다.

(7) 드럼, 블록 등의 회전 중심축에 이상이 있거나 흠이 생겼을 경우에는 이를 사용하여서는 안된다.

(8) 로우프의 연결에 필요한 모든 부속품은 제작자가 제시하는 방법에 따라야 한다.

(9) U자 볼트 클립으로 와이어 로우프를 이었을 때 처음 한번 화물을 달고 난 후 너트를 다시 조여야 한다.  그리고 작업도중 수시로 너트가 풀리지 않았는지 검사하고 필요하면 수시로 조여야 한다.

(10) 와이어 로우프의 소켓잇기, 꼬아잇기, 얽매이기 등은 충분한 경험을 가진 자가 취급하여야 한다.

(3) 체인

① 중량물 작업에 쓸 체인은 사용 전 또는 그후 수시로 검사를 하여야 한다.

② 체인은 주기적으로 제작자가 지시한대로 가열하여 벼르고 강도를 유지할 수 있도록 하여야 한다.

③ 체인에 금이 갔거나 부러졌거나 용접이 떨어진 것은 쓰지 말아야 한다.

4) 섬유질 로우프

(1) 얼었거나 산이나 과도한 열을 받은 로우프는 중량물 작업에 사용하여서는 안된다.

(2) 거친 면이나 모서리에 맞닿는 곳에는 그 사이에 받침을 고이고 닿지 않도록 보호하여야 한다.

1.5.7 중기 및 기계장비

1) 일반 유의사항

(1) 중기 및 장비는 작업에 임하기 전에 자격증을 가진 정비공에 의해 검사를 받고 시운전을 받아야 하고 시운전 및 검사결과는 항시 기록비치하고 정기적으로 책임자에게 보고하여야 한다.

(2) 안전한 가동을 보장하기 위해 기종에 따라 정기적으로 점검 및 시운전을 하여야 한다.

(3) 기계제작자가 지시하는 절차에 따라 예방정비를 하여야 한다.

(4) 고장난 기계 및 장비는 완전히 수리할 때까지 절대 사용하여서는 안된다.

(5) 기계나 장비를 설치할 때에는 사전 답사하여 도로 및 구조물의 상태를 파악하고 강도와 여유고 및 폭원의 여유 등을 고려하여 안전을 기할 수 있도록 하여야 한다.

(6) 기계 및 장비는 지정된 운전원 만이 운전하여야 한다.

(7) 장비나 화물 위에 올라타는 일은 금하여야 한다.

(8) 작동중인 기계 및 장비에서 뛰어내리거나 올라가는 일은 금하여야 한다.

(9) 운전원이 있어야 하는 기계 및 장비는 가동중 운전원 없이 혼자 두어서는 안된다.

(10) 무단으로 시동걸지 못하게 기계 및 장비는 언제든지 안전하게 잠가 두어야 한다.

(11) 안전속도 및 허용부하를 초과하여서는 안된다.

(12) 수리 및 주유중에 우연히 움직이지 않게 확실한 조치를 하여야 한다.

(13) 수리는 통행 및 작업에 지장이 없는 안전한 장소에서 하여야 한다.

(14) 무거운 기계장비 및 부속품을 밧줄, 잭키, 기타 인양기를 들고 수리할 때 주유할 때 작업인이 그 밑이나 사이에 작업을 하기 위하여 들어가지 전에 튼튼한 버팀이 되어 있는가를 확인하여야 한다.

(15) 불도우저, 스크레퍼, 크레인 등의 삽날이나 버켓 등은 작업하지 않을 때는 내려 두어야 한다.

(16) 수리, 주유 등이 끝나면 곧 뚜껑이나 안전보호장치를 다시 덮어두어야 한다.

(17) 떨어지거나 날아드는 물체 기타 유사한 위험을 막아줄 적당한 방호시설을 운전석에 갖추어야 하며 유리를 쓸 경우에는 안전유리로 하여야 한다.

(18) 장비가 공로상으로 지나갈 때에는 운행방향 신호수단을 갖추어야 한다.

(19) 궤도상에서 움직이는 기계나 장비 즉 토운차, 케이블카 등은 확실한 정지 장치를 갖출 것이며 궤도에서 초과운행을 차단하는 바리케이트나 벽 등의 시설을 갖추어야 한다.

(20) 기동성이 없는 기계 및 장비는 견고한 기초 위에 안전하게 놓여져야 한다.

(21) 움직이는 기계나 장비의 야간작업시에는 헤드라이트 및 후미라이트를 켜고 작업하여야 한다.

(22) 야간에 작업중인 장비가 공로상에 주차해 있거나 다른 장비 및 차량보다 현저히 느린 속도로 작업을 하고 있을 때에는 주위에서 볼 수 있는 위치에서 황색 등을 달아야 한다.

(23) 초과속도 및 과대부하에 대한 제동조절장치가 없는 장비에는 안전운행속도 및 허용하중을 운전석에 써 붙어야 한다.

(24) 발동을 걸어 둔 채 급유하는 일은 절대 없어야 한다.

(25) 완전히 정차하기 전에 견인차량과 견인물 사이에 들어가서는 안된다.

(26) 끌거나 들어올리기 위한 장치는 인장력에 대하여 안정하게 확실히 끼어져 있는지 검사하여야 한다.

2) 방호시설 및 안전장치

(1) 벨트, 치차(톱니바퀴), 운전축 활자, 체인 등과 같이 왕복 또는 회전 운전을 하는 부분은 노출하지 않게 덮개 및 난간 등으로 방호하여야 한다.

(2) 배기구, 배출관 등의 뜨거운 화상부분은 화재의 위험이 없도록 적당한 절연 또는 방호장치를 하여야 한다.

(3) 연료탱크는 연료가 새거나 넘쳐 엔진, 배기구 또는 전기장치에 들어가지 않도록 설치하여야 한다.

3) 후진시의 경적신호

모든 자동식장비는 후진 경보신호기를 설치하여야 하며 경적은 일반적인 조건하에 가청할 수 있어야 하며 후진시에 자동적으로 작동하고 연속 또는 3초 이내의 간격을 두고 울려야 하며 후진이 완료되었을 때 자동적으로 정지되어야 한다.

4) 인양장치

(1) 인양장치는 작업에 임하기 전에 시운전을 하여야 한다.  특히 수리, 정비, 개수, 재조립후에는 시험운전을 하여야 한다.

(2) 인양장치에 붙은 드럼에는 회전제어기나 역회전방지기 또는 고정장치를 갖추어야 한다.

(3) 작업중의 드럼에는 언제나 완전히 두바퀴 이상 잠길 수 있도록 와이어 로우프가 감겨야 한다.

(4) 허용하중이상의 인양은 하지 말아야 한다.

(5) 바켓이나 짐짝 등에 사람이 매달리거나 올라타서는 안된다.

(6) 작업하는 동안 운전원은 다른 일을 한다거나 하물이 적재되든가 지상에 놓기 전에 운전석을 떠나서는 안된다.

(7) 동일한 작업에 약속된 표준신호를 사용하여야 한다.

(8) 와이어 로우프의 상태가 늘어지면 작업을 중지하고 와이어 로우프가 활차의 드럼에 제대로 감겨 있는가를 살펴보아야 한다.

(9) 붐은 바람이나 기타 외부로부터 힘에 견딜 수 있도록 하고 작업 외에는 지면에 내려놓아야 한다.

(10) 가능한 운전원은 하물을 직접 보면서 작업하도록 하여야 한다.

(11) 수상의 바지 위에서의 크레인 작업은 바지가 5°이상 경사지면 안된다.

5) 화물자동차

(1) 지정된 검사원에 의해 안전한 운행상태에 있음이 확인되지 않은 차량은 운행하여서는 안된다.

(2) 차량은 매주 또는 1,600km 주행했을 때마다 지정된 검사원에게 감사를 받아야 한다.

(3) 차량의 제동장치는 차량에 규정되어 있는 제동거리 내에서 제동되어야 한다.

(4) 작업인원의 수송용 차량은 좌석 및 승강계단을 설치하여야 한다.

(5) 승차한 인원은 차량 밖으로 몸을 내밀지 말아야 한다.

(6) 달리는 차에 올라타거나 뛰어 내려서는 안된다.

(7) 차량에 실은 화물이 운전원의 전방 및 양 측방의 시계를 가리는 일이 없도록 하여야 한다.

(8) 차체 밖으로 화물의 돌출을 방지하고 만약 차후미에 화물이 돌출할 때에는 빨간깃발, 조명, 반사경 등으로 경계조치를 하여야 한다.

6) 고압장비 및 시설

(1) 일반유의사항

① 고압장비 및 시설을 가동 전에 점검하고 시운전해 보아야 하며 개수나 보수 후 매 6개월마다 검사하고 시운전하여야 한다.

② 시운전은 가압시험, 계량기, 안전장치, 조정장치의 시험을 포함한다.

③ 고장이 확인된 고압장치 및 시설은 “고장”, “사용금지”등의 표지를 반드시 부착하고 수리될 때까지 사용하여서는 안된다.

④ 지정된 자격있는 운전원외의 작동은 금한다.

⑤ 수리 및 조정할 때 외에는 장비 및 시설에 붙은 방호장치를 개방하여서는 아니되며 이 경우에는 반드시 배출구를 열고 동력을 절단하여야 한다.

⑥ 안전밸브, 배출밸브에서 나오는 배출물이나 바람이 작업원에 향하지 않도록 그의 위치를 정하여야 하나, 불가피할 때에는 방호시설을 갖추어야 한다.

⑦ 밸브류 및 조정장치는 바닥에 서서 조정할 수 있는 적당한 높이에 설치되어야 한다.

⑧ 고압탱크나 파이프에 결함이 생겼을 때에는 수리될 때까지 가동할 수 없다.

7) 비계 및 발판

(1) 계단, 고가로, 작업대, 발판 등에는 빙설, 기름, 구리스, 진흙 등이 끼는 일이 없도록 유의하고 어쩔 수 없을 때에는 톱밥, 연탄재 등으로 미끄럽지 않게 하여야 한다.

(2) 비계발판의 설계는 안전율 4이상 보아야 하며 와이어 또는 로우프는 8이상 보아야 한다.

(3) 높은 작업대 발판은 계단사다리 등 안전한 승강시설을 갖추어야 한다.

(4) 바퀴가 달린 이동식 발판 및 작업대는 저절로 구르는 일이 없도록 확실한 조치를 취하여야 한다.

(5) 비계발판에 사용되는 목재는 균열이 없고 결이 고르고 옹이가 없는 양질의 것이어야 한다.

(6) 비계발판에 자재나 장비 등을 놓으므로 통행에 지장을 주지 않도록 충분한 폭을 가져야 한다.

(7) 지상 2m이상의 모든 비계발판 및 작업대에는 보호난간 및 발의 미끄럼 방지 시설 등으로 보호되어야 한다.

(8) 사람이 작업장 아래에서 작업하거나 그곳을 통과하는 것이 요구되는 곳에는 보호망을 설치하여야 한다.

(9) 어떠한 비계발판이라도 건물이나 구조물에 견고하게 붙들어 매어야 하며, 만약 독립되어 있으면 이동을 방지할 수 있는 시설을 하여야 한다.

(10) 모든 금속제비계는 KS합격품 또는 동등한 재료이어야 한다.

(11) 모든 비계 및 탑은 금속제비계 제조회사의 설계방법에 의하여 조립되어야 하며 제조회사가 추천한 하중한계를 초과하여서는 안된다.

(12) 금속제비계를 사용하는 곳에서는 전기의 단락 또는 감전을 방지하기 위하여 특히 조심하여야 한다.

(13) 지주에 작업원이 기어오르내리는 행위는 금하여야 한다.

(14) 모든 금속비계 및 탑의 조립은 수직 도는 수평이어야 한다.

(15) 접속부 및 연결부는 안전하게 연결되어야 한다.

(16) 발판은 움직이지 않게 고정시켜야 한다.

(17) 이동식비계는 견고하고 평탄하며 깨끗이 청소된 표면에서만 사용되어야 한다.

(18)	2층 이상의 건물 및 구조물 공사에는 공사기간중 작업원이 오르내리기 위한 임시계단을 마련하여야 하며 반드시 난간을 설치하여야 한다.

(19) 매달린 발판의 제작에 쓰는 재료는 상품을 쓰고 작업중 편하중에 의해 기울어지거나 자기 위치를 벗어나는 일이 없도록 모든 방향으로 잡아매어 두어야 한다.

(20) 이동사다리를 세울 때 사다리의 상부와 하부까지의 수평거리가 수직높이의 1/4이상 초과하면 위험하다.

(21) 작업원이 억지로 손을 뻗쳐 위험한 자세를 취하지 않도록 충분히 긴사다리를 사용하여야 하며 사다리 위에서의 작업은 금하여야 한다.

(22) 흠이 있는 사다리는 사용하여서는 안된다.

(23) 비계의 조립, 해체, 변경작업은 감독자의 지시에 의하여 숙련공이 하여야 한다.

(24) 조립을 변경한 후 또는 악천후(강풍, 폭우) 이후에는 작업개시 전에 비계를 면밀히 점검하고 위험성이 있는 곳은 신속히 보수하여야 한다.

(25) 비계에서 작업할 때에는 반드시 안전모와 안전밸트를 착용하여야 한다.

1.5.8 고소작업

1) 일반유의사항

(1) 지상작업가능한 일은 지상에서 하도록 작업방법을 구상하고 고소작업은 될 수 있는 대로 피하여야 한다.

(2) 고소 작업시에는 작업대(발판)를 설치하여 안전작업이 가능토록 하여야 한다.

(3) 작업대는 넓이가 적당하여야 하고 전도되거나 탈락되지 않도록 견고하게 설치되어야 하며, 반드시 보호난간을 설치하여야 한다.

(4) 작업대를 설치할 수 없을 때나 작업대가 있는 경우에는 안전밸트를 반드시 착용하여야 하며, 사고방지망을 치는 조치도 강구하여야 한다.

(5) 고소작업자는

① 미끄러지기 쉽거나 벗겨지기 쉬운 신발을 신지 않아야 한다.

② 모험행동은 절대로 해서는 안된다.

③ 정신적이나 육체적이나 그 상태가 좋지 못할 때는 고소 작업을 해서는 안된다.

④ 작업공구 및 재료 등은 공구 주머니나 상자를 만들어 이용하기 편한 곳에 고정시키고 작업대 위에 놓지 말 것이며, 작업대위에는 떨어질 만한 것을 놓지 말아야 한다.

⑤ 악천후시에는 옥외고소작업을 피하여야 한다.

1.5.9 안전수칙

1) 안전수칙의 작성 절차

(1) 당해 작업부서의 부서장 및 근로자가 상호 협의하여 기초(안)을 작성하되 근로자의 수준을 감안하여 통상 사용하는 알기 쉬운 말로 표시하고 작업전 안전수칙, 작업중 안전수칙, 작업후 안전수칙의 순으로 배열한다.

(2) 기초(안)은 당해 작업부서 전근무자에게 회람을 한다.

(3) 회람을 마친 기초(안)은 안전관리자의 검토를 거치도록 한다.  다만, 각부서 공통 안전수칙은 안전관리자가 근로자 대표와 협약하여 직접 작성한다.

(4) 안전관리자 검토 또는 작성 안전수칙은 안전 보건위원회의 심의를 거쳐 전원 일치에 의거 확정을 하되 대표자의 결재를 득한 후 필요한 작업부서에 부착 사용한다.

2) 안전수칙의 부착 및 준수

(1) 안전수칙의 부착

① 안전수칙은 근로자가 식별이 용이하고 알아보기 쉽도록 적당한 크기로 제작한다.

② 안전수칙의 부착장소는 근로자의 주작업 장소에 부착하되 작업에 방해되거나 쉽게 떨어지지 않도록 부착하고 전 작업부서에 공통적으로 적용되는 안전수칙은 회사입구 또는 모든 근로자가 잘 볼 수 있는 곳에 게시판 형태로 제작 설치하되 눈, 비등에 지워지지 않도록 한다.

③ 안전수칙의 내용을 표시하는 글씨는 고딕체로 하되 글씨 위에 PVC등 투명비닐 막을 입혀서 쉽게 훼손되지 않도록 한다.

④ 안전수칙은 하얀색 바탕에 검은색 글씨로 표하되 전체크기의 중앙에 녹십자 안전표지를 녹색으로 표시한다.

(2) 안전수칙의 준수

① 확정부착된 안전수칙은 일차로 해당 근로자를 소집하여 교육을 실시하고 안전수칙 제정의 배경 및 중요성을 강조한다.

② 각부서의 책임자는 안전수칙의 준수가 생활화될 때까지 매일 작업시작 전 해당 안전수칙을 외운 후 작업에 임하도록 한다. (약 1개월간)

③ 작업부서장은 근로자의 안전수칙 이행여부를 수시로 점검감독하고 그 결과는 매월 발표하고 불이행자는 매일 작업시간 전 다시 안전수칙을 외운 후 작업에 임하도록 한다. (약 1주일간)

④ 근로자 대부분이 안전수칙을 준수하기 어렵든지 또는 재해가 다발하는 작업부서는 안전수칙을 보완 개선토록 한다.

1.5.10 공사현장 안전수칙

1) 현장 안전수칙

(1) 작업장 내에서는 안전모 및 안전 장구류를 반드시 착용해야 한다.

(2) 명령계통 및 신호는 통일하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 인화물질 또는 폭발물이 있는 장소에서의 화기 취급은 일체 금지한다.

(4) 지하작업에는 폭발물 및 뇌관을 사용하지 않는다.

(5) 발파 및 위험표시 구역은 담당자외 출입을 금한다.

(6) 모든 장비나 작업기구는 점검한 후에 사용하여야 한다.

(7) 움직이는 차량이나 장비에 오르거나 뛰어내리는 위험한 행동을 금한다.

(8) 작업차량과 작업원의 안전거리를 유지하여 작업에 임한다.

(9) 지정된 탑승석 이외에는 승차를 하지 않는다

(10) 작업장내에서 음주행위는 일체 금한다.

(11) 작업장 주위의 정리정돈을 철저히 한다.

(12) 위험요인 발견 및 사고 발생시는 즉시 보고하고 긴급조치를 취한다.

2) 고소작업 안전수칙

(1) 지상작업가능한 일은 지상에서 하도록 작업방법을 세우고 고소작업은 될 수 있는 대로 피하여야 한다.

(2) 고소작업시에는 작업대(발판)를 설치하여 안전작업이 가능토록 하여야 한다.

(3) 작업대(발판)는 넓이가 적당하여야 하고 전치되거나 탈락되지 않도록 견고하게 설치되어야 하며 반드시 보호난간을 설치하여야 한다.

(4) 작업대를 설치할 수 없을 때나 작업대가 있는 경우에는 안전벨트를 반드시 착용하여야 하며 사고 방지망을 치는 조치도 강구하여야 한다.

(5) 고소작업지대

① 미끄러지기 쉽거나 벗겨지기 쉬운 신발을 신지 말아야 한다.

② 모험행동은 절대로 해서는 안된다.

③ 정신적이거나 육체적이거나 그 상태가 좋지 못할 때는 고소작업을 해서는 안된다.

(6) 작업공구 및 재료 등을 공구 주머니나 상자를 만들어 이용하기 편한 곳에 고정시키고 작업대 위에 놓지 말 것이며 작업대 위에는 떨어질 만한 것을 놓지 말아야 한다.

(7) 악천후시에는 옥외고소작업을 피하여야 한다.

3) 비계공 안전수칙

(1) 계단 고가로, 작업대, 발판 등에는 빙설, 기름, 구리스 진흙 등이 끼는 일이 없도록 하여야 한다.

(2) 지상 2m이상의 모든 비계 발판 및 작업대에는 보호대 및 미끄럼 방지시설 등으로 보호되어야 한다.

(3) 사람이 작업장 아래에서 작업하거나 그곳을 통과하는 것이 요구되는 곳에는 보호망을 설치하여야 한다.

(4) 모든 비계 및 탑은 하중한계를 초과하여서는 안된다.

(5) 금속재 비계를 사용하는 곳에서는 전기의 감전에 특히 유의하여야 한다.

(6) 작업원이 비계를 뛰어 오르내리는 행위는 금하여야 한다.

(7) 금속비계 및 탑의 조직은 수직 또는 수평이어야 한다.

(8) 접속부 및 발판은 움직이지 않게 완전 고정시켜야 한다.

(9) 2층 이상의 건물 공사에는 임시 계단을 마련하여야 하며 반드시 난간을 설치하여야 한다.

4) 장비의 안전수칙

(1) 장비는 평탄한 지역에 정지하고 작업할 것.  경사 15°이내, 장비수평 한계 : 길이 및 옆으로 각 15°

(2) 도로 상태를 확인하여 장비가 전복 또는 흙구렁에 빠지는 것을 사전에 예방한다.

(3) 출발전 하부 및 타이어의 이상 유무와 공기 압력을 확인한다.

(4) 출발전 브레이크 작동상태를 점검하고 급발진, 급정지를 금한다.

(5) 모든 적재물은 결박상태 및 안전 적재 여부를 확인한다.

(6) 악천후 기상조건 하에서는 장비 이동을 금하고 특별한 경우는 책임자 인솔하에 이동한다.

(7) 기계의 가동시 자리를 비우지 말 것이며, 대리운전을 금한다.

(8) 중요장비 해체, 조립시는 사전 교육을 실시하고 책임자 감독 하에 시행해야 한다.

(9) 작업중 음주행위는 절대 금해야 한다.

(10) 장비 운전중 과속 운전을 금하며 항시 전후 좌우를 잘 살피면서 운행한다.

(11) 장비에서 이탈시는 반드시 시동을 끄고 키를 들어낸 후 핸드 브레이크 레바를 당겨놓는다.

(12) 지정된 탑승석 이외의 곳에 인원 승차를 금한다.

(13) 교통법규를 준수한다.

5) 크레인 안전작업수칙

(1) 모든 제반동작은 구분하여 운전한다.

(2) 규정중량을 초과하여서는 안된다.

(3) 좌우 이동시 급정지하지 않는다.

(4) 크레인 직하에서 이동하지 않으며 안전밸트를 착용한다.

(5) 작업자는 작업전 와이어로프, 후크, 브레이크 안전장치 등의 이상 유무를 점검후 운전한다.

(6) 동작 중 이상이 있을시 즉시 운전을 중지하고 관계부서의 조치를 받는다.

(7) 운전중 주위 경계를 소홀히 해서는 안된다.

(8) 걸고리 및 매달기 기구는 확실히 정착하여야 한다.

(9) 와이어 로프 및 기계기구는 정기점검 및 주의를 하여야 한다.

(10) 운전지정자 이외에 조작운전을 절대 금한다.

(11) 운전시는 반드시 유도자를 배치하여 유도자의 유도에 의하여 운전한다.

(12) 운전 정지는 현장 작업자중 누구를 막론하고 시킬 수 있다.

(13) 화물을 인양한 상태에서 운전원이 위치를 이탈해서는 안된다.

(14) 작업중지시 후크는 최상단으로 올리고 조작반을 살며시 놓고 전원을 차단한다.

6) 용접공 안전수칙

(1) 용접공 외에 용접 및 절단작업을 하지 못하게 하여야 한다.

(2) 이상이 있는 용접기구 및 장비를 쓰는 일이 없도록 수시 점검하여야 한다.

(3) 작업장에는 반드시 소화기를 준비하여야 한다.

(4) 작업장내에 가연성 물질이 없도록 작업 전에 확인하여야 한다.

(5) 용접, 섬광, 불꽃, 스파크, 녹은 금속으로부터 작업원이나 주위 사람들은 보호할 조치를 선행하여야 한다.

(6) 작업이 중단될 때에는 도치 밸브와 실린더 밸브는 반드시 닫아 두어야 한다.

(7) 케이블, 호스, 기타 용접기구들은 통로 사다리 및 계단 등에 두지 말아야 한다.

(8) 가스가 새는 실린더는 잠금 채로 발화의 위험이 없는 장소는 운반하여 천천히 가스를 대기중으로 확산시켜야 한다.

(9) 산소실린더 및 그의 부속물(밸브, 커플링, 레귤레이터)은 유류로부터 격리시키고 기름이 묻은 손이나 장갑으로 만지지 말아야 한다.

7) 목공 안전수칙

(1) 복장은 항상 단정하여야 한다.

(2) 작업 내 통로, 발판에 공구, 자재 등을 방치하지 말아야 한다.

(3) 판다와 각목에 박힌 못은 항상 뽑아 둔다.

(4) 전기톱이 작동 중에는 주유, 청소, 조절 등의 작업을 하지 말아야 한다.

(5) 일반용 사다리, 발판식 사다리 및 바퀴달린 이동식 사다리에는 사다리 멈치를 사용하여야 한다.

(6) 보호용 앞치마, 매드, 안전화, 밀대, 보안경 등 개인 보호구를 갖추며 적절히 사용하여야 한다.

(7) 바닥에 톱밥, 대패밥 등을 작업중 수시로 정리하여야 한다.

(8) 기계 주변의 작업 공간을 충분하게 하여야 한다.

(9) 분진은 잘 배출되는가를 확인하여야 한다.

1.5.11 안전표지

1) 목적

이 규격은 근로 기준법의 적용을 받은 사업장(이하 “사업장”이라고 한(3)에서 안전을 기하기 위하여 사용되는 산업안전의 표지, 표찰, 완장 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2) 용어의 정의

이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

(1) “산업안전표지”라 함은 사업장 위험시설, 위험장소 또는 위험물질에 대한 경고, 비상시의 지시나 안내사항 또는 안전의식을 고취하기 위한 상황 등을 표시한 그림, 기호 및 글자를 포함한 형체를 말한다.

(2) “산업안전색채”라 함은 산업안전 표지에 그 표시상황을 나타내기 위하여 사용하는 색채를 말한다.

(3) “안전표찰”이라 함은 안전모 등에 부착하는 녹십자표시를 말한다.

(4) “안전완장”이라 함은 안전에 관하여 일정한 책을 가진 자가 그 직책을 표시하기 위하여 팔에 두르는 장식을 말한다.

3) 산업안전표지의 종류, 형태, 용도 등

(1) 산업안전표지의 종류, 형태, 용도 및 사용장소는 다음 예와 같다.

(2) 산업안전표지가 표시하는 사항을 명백히 하기 위하여 필요한 때에는 그 표지의 주위에 그 표시상황을 글자로 부기할 수 있다.  이 경우 그 글자는 흰색 바탕에 검은색 한글 고딕체로 표기하여야 한다.

(3) 산업안전표지는 그 용도에 따라 산업안전을 위하여 그 표시사항이 인식되어야 할 곳에 부착하거나 설치되어야 한다.

(4) 산업안전표지의 색채

산업안전표지에 사용하는 산업안전 색채의 종류와 색도기준 및 표시사항은 산업안전보건법에 준하여야 한다.

(5) 산업안전표지의 제작방법

산업안전표지는 산업안전표지의 기본모형을 기준으로 한 산업안전표지의 종류, 용도, 사용 장소, 형태 및 색채에 따라서 법규를 준용한다.

(6) 산업안전표지의 재료

산업안전표지는 용이하게 파손되거나 변질되지 아니하는 재료로 제작되어야 하며, 그 색채의 물감은 색채고정원료를 배합하여 변질되지 아니하는 것을 사용하여야 한다.

(7) 산업안전표지의 크기

① 산업안전표지는 그 표시내용을 근로자가 빨리 쉽게 인식할 수 있는 크기로 제작되어야 한다.

② 산업안전표지 속의 그림 또는 크기는 표지의 크기와 비례하여야 하며, 산업안전표지 전체규격의 30퍼센트 이상이 되어야 한다.

(8) 야간용의 안전표지

야간에 필요한 산업안전표지는, 표지에 조명등을 설치하거나 야광물질을 사용하여 제작한다.

(9) 안전표찰

안전표찰은 다음의 곳에 부착한다.

① 작업복 또는 보호의의 우측 어깨

② 안전모의 좌우면

③ 안전완장

(10) 안전완장

① 안전책임자, 안전관리자 및 안전유지담당자는 근무중 안전완장을 항상 착용하여야 한다.

② 안전완장에는 노란색 바탕에 검은색 한글 고딕체로 직책을 표시하여야 한다.

1.5.12 가설공사

1) 가설재료 및 가설용 장비

가설공사에 사용하는 재료 및 장비기계는 한국공업규격에 의하여 제작된 신품을 사용하되 특기가 없을 때에는 변형, 부식, 갈라짐 등이 없는 제품으로 감독관의 승인을 받아 사용해야 한다.

2) 강재의 관리

(1) 볼트 구멍은 산소천공을 금지하고 드릴천공을 하여야하며 변형개소 발견시는 즉시 추가설치 또는 ㄴ형강, ㄷ형강 등으로 보강하여야 한다.

(2) 볼트를 체결할 때는 반드시 볼트와 너트에 와샤를 삽입하여야 한다.

1.5.13 공사장 주변의 안전관리

1) 안전시설물 설치

도급자는 공사구간의 가설울타리, 난간의 견고한 설치 및 자재, 기계, 기구등의 정리정돈과 각종 표지판, 보안등, 경고등, 갱내투광등, 갱내 환기시설 등을 설치하여야 하고, 감독관은 이를 확인하여 이용에 차질이 없도록 해야 한다.

2) 환경정비

도급자는 우기, 동절기, 해빙기 등 도시미관이 불량해질 우려가 있을 때는 다음 사항에 의한 환경정비를 실시하여야 한다.

(1) 주변 도로의 보수 및 복공연결판 설치

(2) 자재 및 기구, 기계등의 정리 및 폐자재의 반출

(3) 차로 및 안전보행로 확보와 교통정리원 배치

(4) 휀스, 울타리, 현장사무실 등의 도색

3) 교통안전시설

(1) 공사는 일반교통에 지장을 주지 않도록 하고 교통량이 적은 시간(야간, 휴일 등)을 선정하여 실시한다.

(2) 공사중이라도 2차로를 확보하는 것을 원칙으로 하고 부득이한 경우 1차로 또는 일반통행을 적당한 회로로 지시를 하여 교통의 지장을 최소화한다.

(3) 공사중 위험을 알리는 표지(적색등, 보호책), 신호시설 또는 필요한 인원을 배치하여 교통을 유도하여야 한다.

(4) 공사용 기계, 가시설 등은 교통에 지장이 없는 장소를 택하여 관리를 하여야 한다.

(5) 감독관은 항상 현장을 순회하면서 불안전한 상황이 있을 경우는 즉시 개선 조치하여야 한다.

(6) 필요에 따라 속도제한, 서행, 일단정지 등의 주의표지를 계시한다.

1.5.14 공사감독의 안전관리

1) 임무

공사감독은 시공에 대한 안전관리는 물론 다음 사항에 대해서 매일 점검 관리하고 시정조치를 하여야 한다.

(1) 작업장내 안전통로 및 계단, 개구부의 추락방지시설의 확보 여부

(2) 유류, 산소 화약 등의 위험물 관리상태

(3) 중장비 작업시 운전자의 면허증소지 및 장비의 검사증 확인

(4) 주요 작업장의 운전담당자, 교통정리원 장비작업시 안전원 고정 배치여부

(5) 터널 및 갱내 작업장 조명상태

(6) 전기 가배선 노후상태

(7) 저장물 보호상태 및 기타 보강안전관리에 필요한 사항

2) 공사부서 및 현장자체 안전점검 실시

(1) 편  성

① 공사부서 담당과장

② 현장감독 및 현장소장

(2) 점검시기

① 공사부서 담당과장은 현장을 월1회 이상 안전점검 실시

② 현장감독 및 현장소장은 현장을 1일 1회 이상 안전점검 실시

(3) 시정조치

지적된 점검사항은 현장 안전점검일지에 정리기록하여 시정토록 한다.

1.5.15 안전관리계획서

1) 개요

건설공사 현장에서의 사고발생 요인은 타산업에 비하여 대단히 많고 또한 대부분의 재해가 증대되고 있어 인적, 물적으로 많은 손실을 가져다준다.

그러므로 재해로부터 인간의 생명과 재산을 보호하기 위한 계획적이고 조직적인 체계를 형성 활동하기 위하여 본 계획서 작성에 의미가 있다.

(1) 목적

본 계획서는 본 공사를 수행함에 있어 발생이 야기되는 제반건설산업 재해의 방지대책으로 안전관리 업무 일반과 시공안전의 기술적 사항을 효과적으로 관리함으로서 사고의 사전예방 활동을 전개하여 무재해 건설과업을 수행코자 함이 그 목적이다.

(2) 안전관리 업무의 특수성

① 공사 자체의 특수성

한강교량과 특수공법에 대한 중량구조물 시공(유해 위험방지 계획확인 심사필 여부 점검)

② 안전점검 계획

ⓐ 개요

현장 안전점검은 대별하여 정기, 임시, 수시, 특별점검으로 구분되며 이는 재해예방 활동의 기본적 대책이므로 필히 시행하여야 하며 세부사항은 아래와 같다.  그 외의 계절에 수반되는 풍수해 점검과 한냉기 점검으로 대별한다.  현장에 안전조직이 구성되면 실제 안전예방 활동을 위하여 조직의 구성원은 구체적인 활동에 들어가야 할 것이다.

공단 기타의 안전관계 관련기관의 여러 분야에 걸쳐 많은 항목 중에 관련되는 사항을 간추려 기재한다.

ⓑ 안전점검의 의의 및 목적

․ 의의

- 인적, 물적, 작업환경의 결함으로 인한 근로자의 안전사고 예방

- 생산성의 극대화

․ 목적

- 결함이나 불안전한 조건의 제거

- 구조물 원래의 기능 유지

- 합리적인 생산 및 안전관리

안전점검은 안전관리 활동의 핵심적인 기능으로서 이를 소홀히 함으로서 안전사고를 유발한다.  즉 안전점검이란 불안전한 상태(물리적요인), 불안전한 행동(인적요인)등의 재해요인을 찾아내는 것이다.

위험요인을 찾는 것은 안전순찰과 안전점검으로 구별되는데 안전순찰은 “잘하고 있는가”라는 차원에서 하는 것이며 안전점검은 “무엇이 문제인가?”라는 차원에서 행하는 것이다.

따라서 안전점검은 재해 취약요소에 대하여 점검표를 작성하고 점검반(원)등을 활동하여 문제가 예상되는 부분에 대한 결함도출, 시정조치 등을 행하는 구체적이고 계획적인 행동이라 정의할 수 있다.

ⓒ 점검계획

순위	구분	내용	주 기		점 검 반		비고
					발 주 자	시 공 자
1	정기점검	기술점검	월1회		반장 : 공사 감독 또는 책임감리원	반장 : 소장 직원 : 안전 관리자 안전담당자 ․현장별 : ․책임기사 ․작업반장
		관리점검	″
2	임시점검	기술점검	특별한 사유발생시
		관리점검	″
3	수시점검	기술점검	사고발생 중점 예방
		관리점검	″
4	특별점검	기술점검	각종 검사 및 조사
		관리점검	″
5	풍수해점검	기술점검	년중 6∼9월간
		관리점검	″
6	한냉기점검	기술점검	년중 11∼3월간
		관리점검	″
7	기타	일일점검	매일	현장순회
			정기

ⓓ 점검의 실시

․ 필요시 점검대상에 대하여 전문지식이 있는지 확인하여 사전교육을 받는다.

․ 점검당일 점검책임자로부터 점검에 대한 세부지시를 받는다.

․ 점검대상에 대한 현장담당자의 사전연락 후 동행하도록 한다.

․ CHECK LIST에 의한 점검 후 그 결과를 점검표에 상세히 기록한다.

․ 당일 점검이 완료되면 점검표를 작성하고 점검난에 서명날인후 점검책임자에게 제출하고 특기사항을 간략히 메모 또는 의견을 전한다.

ⓔ 점검결과 조치

․ 문제점 분석

- 도출된 결함은 재해 발생원인과 연결되므로 불안전한 상태와 행동으로 분리하여 그 발생원인을 분석한다.

- 대부분의 발생원인은 한가지 원인보다는 복합적인 원인이 있으므로 다각도로 분석하도록 노력한다.

․ 분석결과 조치

- 단순한 원인에 대해서는 현지에서 시정하거나 감독자를 교육한다.

- 관리, 감독이 불충분한 원인에 대하여는 계획서를 수립하도록 하여 단계별로 조치한다.

․ 시정조치에 대한 원인

․ 안전검검후 시정에 대한 진행 및 완료상황을 확인하여야 한다.

- 시정시기 사항에 대한 보고공문 등을 근거로 수시 확인점검을 실시한다.

- 중요한 시정사항은 진행상태를 확인하여 올바르게 시정토록 한다.

ⓕ 안전점검표 작성 방법

안전점검표 작성방법은 점검대상별로 주요 착안점을 기준으로 하여 세부 점검사항을 결정한다.

세부결정시에는 중요도에 따라 순위를 결정하는 것이 바람직하다.

대 상	주 요 취 약 작 업 및 착 안 점
재 해 다 발 현 장	․작업공정의 타당성 ․재해발생 및 원인별 추적 ․안전관리 실태(교육, 점검, 시설)
작 업 장	․고소작업자의 안전시설물 이용 상태 ․장비작업시의 안전조치 상태 ․작업감독 실시여부 ․위해 작업시 안전조치
특 정 기 계 기 구	․안전장치 부착 상태 ․안전수칙 부착 상태 ․전원 결속 상태 ․제동장치 부착 여부
안 전 관 리 감 독 측 면	․안전관계 기준의 교육 실시 여부 ․표준작업 설정 여부 ․안전수칙 제정 ․작업환경의 적합성
기 타 특 정 분 야	․기준에 의거한 성능, 규격의 적합성 ․취급방법, 위치의 적합성 산업안전보건법 제48조 3항 및 산업안전보건법 시행규칙, 제124조 확인여부

1.6 준공

1.6.1 준공 예비점검

1) 발주청은 준공예정일 1개월 전에 자재, 시공 및 설비기기의 작동상태가 계약문서에 명시된 기준에 적합한지를 확인하는 예비점검을 실시할 수 있다.

2) 준공 예비점검 결과 기준에 적합하지 않은 미비사항이 있을 경우 이에 대한 시정조치를 건설업자에게 요구할 수 있으며, 건설업자는 이의 시정조치를 완료할 후에 준공검사원을 제출하여야 하며, 준공 예비점검 지적사항 및 조치내용을 기록하여 준공검사자에게 제시하여야 한다.

1.6.2 준공검사

1) 준공검사원

준공검사원의 제출은 “1.2.3 공무행정서류 5) (2) 준공검사원”에 따른다.

2) 준공검사 내용

발주청이 시행하는 준공검사시에 아래 사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가한다.

(1) 시공의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용여부

(2) 제반설비기기의 작동상태 등 기능점검

(3) 지급자재 정산, 잔재 및 발생물 처리

(4) 사업승인 조건사항 이행상태

(5) 주변정리 및 원상복구사항 처리내용

(6) 제출물 및 공무행정서류 처리상태

(7) 인․허가 완료상태

(8) 부대시설 공사 진행상태

(9) 준공전 청소 이행상태

(10) 기타 계약문서에 명시된 사항

1.6.3 준공서류

1) 종류 및 내용

(1) 설계도면

① 당해 공사의 준공부분에 대한 설계도면(준공도면)

② 공사현장에서 설계 변경한 부분의 설계도면 원도

(2) “1.2.2 제출물 4) 시공상세도면”

(3) “1.2.2 제출물 7) 공사사진”의 공사사진첩

(4) “1.2.2 제출물  9) 신고 및 인․허가 신청서류”에 의하여 발급 받은 신고 및 인․허가필증 원본

(5) 하건설업자 목록(상호, 소재지, 대표자, 전화번호, 공사범위, 공사기간 등)

(6) 측정, 시험 및 검사보고서

이 공사시방서 각 절에 명시된 사항에 한한다.

(7) 유지관리 지침

① 이 공사시방서 각 절에 명시된 사항에 한한다.

② 포함하여야 할 내용

ⓐ 설비기기 목록

ⓑ 설비기기 제조자 및 설치자명, 주소, 전화번호

ⓒ 사용설명서, 운전 및 유지관리지침

ⓓ 설비기기 보증서

2) 제출시기 및 부수

“1.2.3 공무행정서류 5) (2) 준공검사원”에 따른다.

1.6.4 준공도서 사본 작성 및 제출

시설물의 안전관리에 관한 특별법에 규정된 1종 및 2종 시설물에 해당되는 시설물을 시공하는 수급자는 아래의 준공도서 사본을 시설안전기술공단이 제시한 “준공도서 사본작성관리지침”에 따라 마이크로필름과 CD-ROM으로 각각 2세트를 작성하여 준공검사가 완료되기 전까지 발주청 및 시설안전관리공단에 각각 1세트를 제출하여야 한다.

1) 준공도면

2) 준공내역서 및 시방서

3) 구조계산서

4) 안전점검에 관한 종합보고서

5) 유지관리 지침서 및 도면(필요시)

6) 기타 시공상 특기한 사항에 대한 보고서 등

제2장 AL교량난간 시방서

제2장 안전방호책-알루미늄 난간 시방서

2-1 적용범위

2.1.1 일반 사항

1. 본 시방서는 알루미늄 안전방호책의 재료 및 시공에 관한 사항을 규정한다.

2. 안전방호책은 설계도면 및 관련 시방규정에 따라 제작, 조립, 시공이 되어야 하며, 사전에 감독자의 승인을 득하여야 한다.

2.1.2. 분  류

1. 알루미늄난간은 보도용 알루미늄난간, 교량용 알루미늄난간으로 나뉜다.

2.1.3. 참조규격

1. 다음의 인용표준은 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용하며 발행연도가 표기되지 않은 인용 표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

가. KS D 3503 (일반 구조용 압연 강재)

나. KS D 3568 (일반 구조용 각형 강관)

다. KS D 6759 (알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재)

라. 국토교통부 도로안전시설 설치 및 관리지침 (차량방호안전시설) (2014.02)

2-2 재질

2.2.1 재질

순번	모델명	재료명	KS기준	강종	규격	단위	수량	원산지	비고
1	K05-SB5	메인지주	KSD3503	SS400	100*100*850	본	1	대한민국	용융아연도금
			KSD3568	SPSR400					용융아연도금
		충격흡수지주	KSD6759	A6063-5T	210*142*820	본	1	대한민국	알루미늄압출
		알루미늄레일	KSD6759	A6061-6T	180*6000	EA	2/3	대한민국	알루미늄압출
		연결용 레일	KSD6759	A6061-6T	75*78*300	EA	2/3	대한민국	알루미늄압출
		레일연결 B/N	KSB1002	STS304	16*40	EA	8	대한민국	용융아연도금
		알루미늄지주연결B/N	KSB1002	STS304	12*130	EA	1	대한민국	용융아연도금

순번	모델명	재료명	KS기준	강종	규격	단위	수량	원산지	비고
1	K05-SB5	앙카볼트	KSB1002	SS400	24*240	EA	4	대한민국	용융아연도금
		연결용 레일B/N	KSB1002	STS304	16*200	EA	2	대한민국	용융아연도금
		지주캡	PE		110*142	EA	1	대한민국
2	K10-SB4	메인지주	KSD 3503	SS400	100*100*850	본	1	대한민국	용융아연도금
		충격흡수지주	KSD6759	A6063-5T	210*142*820	본	1	대한민국	알루미늄압출
		알루미늄레일	KSD6759	A6061-6T	180*6000	본	1	대한민국	알루미늄압출
		연결용 레일	KSD6759	A6061-6T	75*78*300	EA	1	대한민국	알루미늄압출
		레일연결 B/N	KSB1002	STS304	16*40	EA	8	대한민국	용융아연도금
		알루미늄지주연결B/N	KSB1002	STS304	12*130	EA	1	대한민국	용융아연도금
		앙카볼트	KSB1002	SS400	24*240	EA	4	대한민국	용융아연도금
		연결용 레일B/N	KSB1002	STS304	16*200	EA	2	대한민국	용융아연도금
		지주캡	PE			EA	1	대한민국

2-3 가공 및 표면처리

2.3.1 가공

1. 레일의 형태, 무게, 길이 및 단면은 표준도에 맞아야 하며, 표준도에 일치하도록 구멍이 뚫어져 있어야 한다.

2. 모든 부재의 완성품에는 이음이나 천공, 용접을 해서는 안된다.

3. 절단, 천공, 프레스 작업 중 재료에 굴곡, 균열 등이 발생하여서는 안된다.

4. 자재는 가공 시 거친면이 없이 깨끗이 다듬질 되어야 하고 완성된 제품은 뒤틀림, 휨 등이 없어야 한다.

2.3.2 표면처리

1. 난간의 마감  부  상부 레일에는  레일 (PIPE) 과  동일한  형상의 엔드캡을 삽입, 마감하여야 한다.

2. 알루미늄  합금 주물은  수요자  지정 색에 의거,  수요자의  특기 시방에 따른다.

3. 알루미늄  압출  형재의  표면처리는 양극산화복합피막  처리 방법에  의거, 투명계 건용 옥외피막을 사용하여야 한다.

4. 각종 강재의 절단 및 홀 가공은 자동 가스 절단  및 SHARING  MACHINE , PRESS로 절단 가공 하고 단부는 평활하게 끝 맺음을 해야하며 홀 가공은 정확한 위치에  하여야 한다.

2-4 시공

2.4.1 일반사항

1. 지주는 연직으로 설치하며, 레일은 도로 경사와 동일한 경사가 유지되도록 설치한다.

2. 난간의 설치 높이는 연석을 기준으로 한다.

3. 연석의 높이는 25cm를 기준으로 한다.

4. 케미칼앙카 천공시 앙카의 설치는 지면에 연직되도록 천공한다.

5. 레일의 연결시 볼트와 너트를 충분히 조여 고정한다.

2-5 검사 및 유지관리

2.5.1 검사

설치가 완료되면 수급인은 감독자로부터 다음 사항의 검사를 받아야 하며, 검사 시 지적된 사항은 감독자가 만족할 수 있을 때까지 즉시 수정되어야 한다.

1. 설계된 위치와 설치한 위치의 적정성

2. 차량진행 방향에 대한 레일의 이음 상태

3. 레일의 높이

4. 볼트, 너트의 조임 상태

5. 가드레일의 손상 및 오염여부

6. 현장 복구 상태

2.5.2 유지관리

1. 자재는 운반 및 보관 시 변형 또는 도장 도금 면이 손상을 입지 않도록 맞닿는 부분에 발포 폴리스틸렌 필름이나 골판지 등을 끼워넣고 전체를 비닐 등으로 덮어 보호 하여야 한다.

2. 보관 시에는 흙이나 기타 이물질에 접촉되지 않도록 지면에서 적절한 간격을 띄워 보관 하여야 한다.

※ 본 시방서에 기록되지 않는 사항은 관계규정 및 일반 상거래의 관례에 따른다.

제3장 교통처리계획

제 3 장 교통처리계획

3.1 교통처리계획

3.1.1 일반사항

1) 수급인은 공사착공부터 준공시까지 단계별로 교통처리 계획을 수립하여 공사감 독자 및 관할 경찰서의 승인을 받아야 한다. 수립한 교통처리계획을 변경시에도 변경승인을 받아야 한다.

2) 교통정리원은 지정된 복장을 착용하고 공사구간내 필요 개소에 고정 배치하여 교통흐름이 원활하도록 유도 처리하여야 한다.

3) 차선 변경이 불가피한 경우 구차선 삭제 및 변경차선(횡단보도 포함)을 설치하여야 한다.

4) 도로상 자재적치 및 작업장 점용구간을 최소화하여 교통차선을 확보하여야 한다.

5) 교통 장애를 최소화하고 교통처리 계획에 맞추어 단계별으로 보수작업을 시행하여야 한다.

6) 신축이음보수공사는 캇터기를 사용하여 포장면을 절단하여야 한다.

7) 발생 잔토는 복구와 동시 현장에서 반출하여야 한다.

8) 공사구간내 도로파손 및 도로침하 구간은 신속 보수 조치하여야 한다.

9) 공구별 환경정비 전담요원을 확보하여 가설울타리, 교통안전 표지판 정비 및 물청소, 현장 주변 청소 등을 전담을 할 수 있도록 조치하여야 한다.

10) 표지판 및 지주에 사용할 모든 재료는 본 시방서 규정 및 아래 한국산업규격에 적합한  재료를 사용하여야 한다.

3.2 교통 통제 및 안전처리

3.2.1 목적

도로상에서 시행되는 각종 공사로 인하여 도로 혼잡과 교통사고가 유발되고 있어, 이에 대한 효율적 교통관리와 체계적인 안전시설 설치 목적

3.2.2 방 법

당회 공사 “공항입구지하차도 보수공사”의 교통 통제 및 안전처리는 하기의 도면을 참조해 시행하며, 이중 교통정리원의 역할은 공사 진행 시 보행자 및 차량의 통행이 원활하도록 유도하고, 공사의 내용에 대해 알림의 역할을 한다.