과  업  지  시  서

한강 준설(저수로, 취수장) 정비공사

감독 권한대행 건설사업 관리기술용역

2019. 01.

한강사업본부

(치 수 과)

목     차

1. 목    적	2

2. 과업범위	2

3. 용어의 정의	2

4. 일반사항	3

5. 과업수행 기간	4

6. 건설사업 관리자원 구성 및 배치	4

7. 준설공사	8

8. 검사	13

9. 공사중지 명령	13

10. 현장 안전 및 환경관리	13

11. 비치서류	15

12. 보고사항	14

13. 성과품 제출	15

1. 목     적

한강 유수소통, 수해예방, 수질개선(확보) 등을 위해 유입된 퇴적 토사를 적기에 제거하기 위해 건설사업관리 기술자가 현장에 상주하여 공사안전, 품질관리, 검측관리(토적량, 수심측량)를 위한 감독권한 대행 용역 수행이 필요함

2. 과업의 범위 :

- 한강 저수로(지천합류부, 선박시설, 본류 등) 및 잠실상수원 퇴적물

(취수장 주변) 준설공사 감독권한대행 건설사업관리 기술용역

3. 용어의 정의

본 과업지시서에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

가. “발주자”라 함은 본 과업수행 사항을 지휘 감독하는 서울특별시 한강사업본부장을 말한다.

나. “감독 권한대행 건설사업관리 기술용역”라 함은 한강 저수로 정비공사 설계도서, 시방서, 기타 관계 서류대로 시공되는지의 여부를 확인하고 공사관리, 품질관리, 안전관리 등에 대한 기술 지도를 하며, 관련법령에 따라 발주자의 감독권한을 대행하는 건설사업 관리 업무를 수행하는 것을 말한다.

다. “시공자”라 함은 한강 저수로 정비공사를 발주자로부터 도급받은 건설회사(계약자)를 말한다.

라. “감독 권한대행 건설사업 관리기술자”이라 함은 일정한 자격을 갖추고 건설사업 관리기술 업무를 수행하는 자를 말한다.

마. “책임건설사업 관리기술자(건설사업 관리자)”이라 함은 발주기관의장과 권한대행 건설사업관리 계약이 체결된 건설사업관리 전문 회사를 대표하여 현장에 상주하면서 공사의 권한대행 건설사업 관리업무를 책임지는 자를 말한다.

바. “공사관리관”이라 함은 공사수행에 따른 업무연락 및 문제점 파악, 민원해결, 기타 필요한 업무를 수행하기 위하여 발주기관의장이 지정한 소속직원을 말한다.

사. “책임 건설사업관리 전문회사(건설사업관리 전문회사)”라 함은 한강 저수로정비공사 감독 권한대행 건설사업관리 용역을 발주자로 부터 도급받은 회사를 말한다.

4. 일반사항

가. 건설사업관리 전문회사 대표자는 본 과업을 성공적으로 수행할 수 있도록 일정한 자격을 갖춘자를 현장에 상주시켜야 한다.

나. 건설사업 관리자는 과업수행중 시공자에게 지시한 중요한 내용은 발주자에게 서면으로 보고하여야 한다.

다. 건설사업 관리자는 과업수행중 설계 또는 시방서의 변경요인이 발생될 경우에는 발주자에게 서면으로 보고하여 승인을 받은후 건설사업 관리업무를 수행하여야 한다.

라. 본 과업 내용서에 명시되지 않은 사항은 한강 저수로 정비공사 시방서 및 건설기술진흥법, 같은법 시행령, 같은법 시행규칙 및 건설사업관리업무수행 지침서(국토해양부 제정)에 따라 권한대행 건설사업 관리업무를 수행하여야 한다.

마. 건설사업 관리자가 건설사업 관리를 함에 있어 고의 또는 과실로 발주자에게 재산상의 손해를 발생하게한 경우에는 건설사업 관리원이 속한 건설사업 관리회사가 이를 배상하여야 한다.

바. 발주자로부터의 업무수행 착수 통보를 받았을 경우 통보일로부터 3일 이내에 업무 수행토록 하여야 한다.

사. 최종 용역 보고서에 용역손해배상 보험·공제 증권을 수록해야 한다.(용역손해배상 보험·공제 업무 개선방안)

5. 과업수행기간 : 착공일로부터 8개월간

6. 건설사업 관리원 구성 및 배치

가. 구   성

		책임건설사업 관리기술자
		고 급(1인)
				기 술 지 원 기 술 자
				고 급 이상 1인
		보조건설사업 관리기술자
		중 급 (1인)

나.  배  치

(1) 건설사업관리 전문회사는 공사현장에 상주하는 상주 건설사업 관리자와 상주 건설사업 관리자를 지원하는 기술지원 기술자를 구분 배치하되 배치계획을 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(2) 기술지원자는 건설관리자 배치계획에 따라 과업 수행기간 중 다른 현장의 상주 건설사업 관리자로 배치할 수 없다.

(3) 건설사업관리 전문회사는 건설사업 관리자가 건설사업 관리 업무수행 중 법령에 의한 교육을 받을 경우나 휴가(년차 포함)로 인하여 건설사업관리 업무에 지장이 없도록 발주자와 협의하여 별도의 필요한 건설사업 관리자를 배치하여야 한다.

(4) 건설사업 관리자는 당해공사 시행중은 물론 공사가 종료된 후라도 감사기관의 수감요구가 있을 경우에는 이에 응하여야 한다.

【 비 고】

•기술 자격자 : 국가기술 자격법에 의한 해당기술분야 자격 취득자 (토목, 건설재료시험, 측지기사에 한함)

•학력․ 경력자 : 교육법에 의한 해당학교에서 건설기술 관련학과 소정의 과정을 이수하고, 졸업하거나 기타 관계법령에 의하여 국내 또는 외국에서 이와 동등이상 학력이 있다고 인정하는 자

다. 배치계획(건설사업 관리자)

구분		투 입 개 월 수(8개월)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
책임건설사업관리기술자	고급 (1인)
보조건설사업관리기술자	중급 (1인)

※ 건설사업 관리기술자 전문회사는 발주자와 협의하여 현장 실정에 따라 인력배치를 조정 할 수 있다.

라. 임  무

(1) 건설사업 관리자(고급) - 1인

○ 건설사업 관리자 전문회사에 종사하면서 건설사업 관리전문회사를 대표하여 현장에 상주하면서 건설사업 관리자 업무를 수행하는 자

○ 건설사업 관리자 전체업무 총괄

(2) 보조건설사업 관리자(중급) - 1인

○ 책임건설사업 관리자 보좌

○ 시공계획의 검토

○ 공정관리 및 검토

○ 시공자가 작성한 시공도면의 검토

○ 준설전 심도조사 및 준설심도 결정 검토

○ 시공전․후 측량 물량산출 및 검토 보고

○ 준설량, 운반량, 야적량 확인 및 검사

○ 설계도면 및 시방서의 내용대로 적합하게 시공되는지의 여부에 대한 확인

○ 사용자재의 적합성 검토.확인

○ 재해예방대책 및 안전관리의 확인

○ 설계변경에 관한 사항의 검토.확인

○ 공사진척 부분에 대한 조사 및 검사

○ 준공도면의 검토 및 준공검사

○ 발생토 관리업무 총괄

○ 준설토 발생량 및 반출량 확인

○ 기타 공사의 질적 향상을 위하여 필요한 사항

(3) 기술지원기술자 - 1인

○ 상주건설사업 관리자가 수행하지 못하는 현장 조사 분석 및 기술 검토

○ 기성 및 준공검사

○ 행정지원업무

○ 하천유지관리에 필요한 기술 검토

○ 준설전 심도조사 및 준설심도 기술검토

○ 중요한 설계변경에 대한 기술검토

○ 현장 시공 상태의 평가 및 기술지도

7. 준설공사

가. 기술검토

○ 건설사업 관리자는 다음사항을 검토하고 필요한 사항은 의견을 첨부하여 발주자에게 제출한다.

(1) 공사 착공계 제출 시

○ 현장 기술자 지정신고서(현장대리인, 안전관리자, 품질관리요원)

○ 공사예정공정표

○ 품질관리 시험계획표

○ 공사도급 계약서 사본 및 산출내역서

○ 착공전 사진

○ 현장대리인 자격의 적격성 여부

○ 안전관리 계획서

(2) 공사 착공시

○ 설계도서의 내용

○ 설계도서의 의문사항

○ 특별시방서 및 일반시방서

○ 시공도․시공계획서

○ 설계도서의 현장과의 적합성

(3) 공사 시공 중

○ 시공계획서

○ 공사시공 측량결과

○ 공사 기성부분 검사원

○ 설계 변경 사항

나. 시공요령

(1) 시공측량

○ 시공측량은 필히 건설사업 관리자 입회하에 실시하여야 한다.

○ 공사를 착공하기 전에 기 설치된 기준점과 대 횡단점을 활용하여 시공측량을 실시하여야 한다.

○ 준설구역내 수심측량을 실시하여 설계수량을 확인하여야 한다.

○ 공사현장에 타 선박이 진입 할 수 없도록 식별이 가능한 경계선에 부표를 설치하여야 한다.

○ 공사현장 부근에는 시공 상태를 확인 할 때 사용 할 수 있도록 양수표를 설치하여야 한다.

○ 착공전 수심측량에 사용된 모든 기준점 및 사용 장비를 확인하여야 한다.

○ 정비대상지역을 설계도면과 일치되게 지정하여야 한다.

○ 강서둔치 야적장의 종단 및 고저측량 등 원지반 측량 등을 실시하여 야적부지의 적치된 상태를 조사 보고하여야 한다.

○ 임시 야적장의 원지반 측량을 실시하여 준설토 야적후의 성과로 사용하므로 이를 착수전 검토 확인하여야 한다.

(2) 유관기관 협의

○ 안내 센터에 공사내용 및 공사에 저촉되는 시민공원의 시설물은 협의 후 공사 시행토록 조치

○ 준설지역 하저에 매설되어 있는 각종시설물의 현황을 파악한 후 관계부서와 협의 후 공사 시행토록 조치

○ 기타 시공에 필요한 사항을 관련부서와 협의

(3) 시공준비

○ 시공장비 및 장비조합의 적정성 검토 승인

○ 도급자의 시공 준비 상태확인 및 준설방법 및 준설토 처리방안에 대한 타당성 여부를 검토한 후 준설작업을 착수토록 조치

○ 오탁방지막 설치내용 확인

○ 공사추진계획 및 장비․인력투입계획을 검토 승인

○ 발주자에게 준설작업의 착수사항을 보고하여야 한다.

○ 작업구역 부표설치는 육안 식별이 가능하도록 설치하여야 한다.

(4) 시  공

○ 백호 준설 작업시 수심이 낮고 노출된 지역을 우선 백호로 1차 준설후 계획수심까지 수심면 고르기를 하여야 하며, 오탁수 확산을 억제하기 위하여 오탁방지막을 설치하여야 한다.

○ 준설작업은 블록단위별로 평면범위에 따라 작업순서를 정하여 준설대상 평면위치를 표시한 후 실시하고 준설후 준설수심측량을 실시하여야 한다.

○ 설계도서 및 시방서에 따라 계획수심까지 정확하게 준설하되 허용오차를 벗어난 과굴시 원상복구 한다. 단 여굴의 허용오차는 계획수심에서 ± 30~50cm 로 한다.

○ 정비지역별 준설작업이 완료되면 준설지역 수심측량과 당해지역 준설토 야적장 적치량 검측을 실시하여야 한다.

○ 준설작업 시 육안식별이 가능한 곳에 수위표를 설치하고 수위관측을 실시하며, 수위기록을 하여야 한다.

○ 준설계획(지역 및 물량)의 타당성 검토.

○ 설계도서 및 시방서에 따라 시공되도록 감독한다.

○ 준설토사는 운반가능 여부를 검토하여 시공자에게 운반토록 조치한다.

○ 준설토사는 발주청이 지정하는 장소에 운반하고 물량확인 측량를 실시한다.

○ 준설토사 운반 시 출발, 도착지 시간, 수량을 송장으로 작성 기록하여야 한다.

○ 야적장 원지반측량을 실시하여 야적 부지를 검토하여 보고하여야 한다.

○ 공사로 인한 시민공원 시설물(자전거도로, 잔디 및 기타)의 손괴 규모 및 위치조사 파악

○ 토사반출지역에 대한 현장 사전조사

○ 공사 지장물 조사

○ 토운선 하역장(집토장)의 위치와 규모를 보고 하여야한다

○ 토운선의 용적을 실측하여 운반량을 산출하여야 한다.

○ 사토는 수도권매립지로 운반하는 것을 원칙으로 하고 발주처의 일반사토장 확보 시에는 일반사토장으로 변경 운반한다.

○ 반출 단위는 ㎥로 한다.

○ 토사 야적장에 출입하는 차량은 강서 안내센터에서 운영하고 있는 감시 초소에 신분증을 제시하여야 한다.

○ 반출 수량은 24톤 덤프트럭 1대당 13㎥로 하며, 그 외 차량에 대하여는 용적을 확인하여야 한다.

○ 반출시간은 원칙적으로 09:00 ~ 18:00로 하며, 발주처의 사전승인을 받아 연장 할수도 있으나 연장에 따른 소요되는 일체의 비용은 시공자가 부담한다.

○ 사토 운반차량은 반드시 세륜 시설을 통과하여야 하며, 공원내 도로에 흙이 묻어나오지 않도록 조치하여야 하며, 흙이 묻어 나올시는 청소원을 배치하여 물청소를 실시하여야 한다.

(5) 시공확인

○ 모든 측량은 건설사업 관리자 입회하에 실시한다.

○ 수심측량을 실시하여 계획수심이 확보되는지를 확인하여야 한다.

○ 준설공사 성과 검측을 위한 수심측량은 음향측심기를 사용하여 10m 측심간격으로 측량한다.

○ 준설토야적 현황측량 및 수심측량의 허용오차는 건설교통부 국립지리원 및 해양 조사원의 공공측량 작업규정에 따른다.

(6) 설계변경 및 정산

○ 건설사업 관리자는 설계 변경 사유가 발생될 경우에는 사유와 처리의견을 발주자에게 서면보고하고, 승인을 득한 후 시공토록 조치하여야 한다.

○ 건설사업 관리자는 설계변경에 필요한 서류를 작성하여 건설사업 관리전문회사 대표자와 연명으로 발주자에게 제출하여야 한다.

○ 준설위치, 준설량, 준설토사의 야적장 위치 및 수도권매립지 반출수량, 일반사토장의 위치, 수량, 처리방법이 변경될 경우

○ 수상운반 시 접안시설 위치가 변경될 경우

○ 준설방법, 기타 설계변경 및 정산이 필요한 경우

○ 준설 및 운반량은 준설전(당초설계)실시한 수심측량결과에 의한 수량과 토사 야적장에 적치 후 전․후 실시한 야적장 현황측량 결과에 의거 계산식(양단면 평균법)으로 산출된 수량을 비교하여 적은량으로 한다.

○ 준설토사 활용방안 변경(서울시 산하 공사장 되메우기용)으로 준설방법, 사토장이 변경될 경우

○ 준설토 상차 및 운반량은 실제 반출수량으로 정산한다.

○ 준설공사가 조기 완료 될 경우 건설사업 관리 계약기간도 공사기간에 맞춰 정산 후 종료 한다.

8. 검  사

가. 기성검사

(1) 제출한 기성검사원을 실제시공현황(수심측량 및 야적량 등)과 비교 검토한 후 건설사업 관리 조서를 첨부하여 건설사업 관리전문회사에 제출한다.

(2) 건설사업 관리전문회사 대표자는 기술지원 기술자 중 건설사업 관리자 이상으로 검사자를 지정하여 기성검사 수행계획을 발주자에게 통보하고 기성검사를 실시한다.

(3) 현장대리인과 건설사업 관리자는 기성검사 시 입회하고 서명날인 한다.

(4) 건설사업 관리전문회사 대표자는 검사가 완료된 즉시 검사결과를 발주자에게 통보한다.

(5) 발주자는 필요하다고 인정되는 경우에는 담당직원으로 하여금 입회시켜 확인 할 수 있다.

나. 준공검사

(1) 예비준공검사

○ 건설사업 관리전문회사는 준공 1개월 전에 준공기한내 준공가능여부를 위해 예비준공검사를 실시하고, 시공자에게 보완 지시 후 그 결과를 발주자에게 보고하여야 한다.

○ 발주자는 예비준공검사 결과 미진한 사항을 준공검사 전까지 보완토록 건설사업 관리전문회사에게 지시할 수 있다.

(2) 준공검사

○ 건설사업 관리자는 시공자가 제출한 준공검사원을 검토하여 계약대로 시공이 완료되었는지 여부를 확인하고, 건설사업 관리자조서를 첨부하여 소속 건설사업 관리자 전문회사에 접수되도록 한다.

○ 건설사업 관리전문회사 대표자는 기술지원 기술자중 건설사업 관리자 이상으로 준공검사자 1명을 지정하여 준공검사 수행계획을 발주기관의 장에게 통보하고 준공 검사를 실시하게 한다.

○ 현장대리인과 건설사업 관리자는 준공검사시 입회하고 서명날인 한다.

○ 건설사업 관리자 전문회사 대표자는 검사가 완료된 즉시 발주자에게 검사결과를 통보한다.

○ 발주자는 준공검사 시 담당직원을 입회시켜 확인할 수 있다.

○ 건설사업 관리자는 준공보고서 및 정산설계도서 등을 검토, 확인하고 발주자에게 인계될 수 있도록 지도, 감독하여야 한다.

○ 건설사업 관리자는 공사준공 후 발주자와 시공사간에 하자보수처리(부족 시공 등)에 대한 분쟁 또는 이견이 있는 경우 건설사업 관리자로서의 의견을 제시하여야 한다.

9. 공사중지명령

가. 건설사업 관리자는 시공사가 설계도서, 시방서 기타 관계서류의 내용과 적합하지 않게 시공할 경우에는 재시공, 공사중지 명령, 기타 필요한 조치를 취해야 한다.

나. 건설사업 관리자는 시공사에게 재시공, 공사중지 명령, 기타 필요한 조치를 한 경우에는 지체 없이 발주자에게 보고하여야 한다.

10. 현장 안전관리 및 환경관리

가. 공사현장의 안전관리 상태를 점검하고 수방계획을 수립하여 안전사고를 예방한다.

나. 공사와 관련한 안전사고 및 재해가 발생할 경우에는 즉시 조치방안을 강구하여 시공자에게 처리토록 지시하고 확인한다.

다. 공사로 인하여 시설물(수중보, 교각, 케이블 등)이 손괴되지 않도록 조치한다.

11. 비치 서류

가. 건설사업 관리자는  다음 서류를 비치 및 준공 후 발주자에게 인계하여야 한다.

(1) 책임, 보조 건설사업 관리자는 업무일지

(2) 검측요청, 결과통보서

(3) 주요자재 검사 및 수불부

(4) 공사설계변경현황

(5) 공사사고보고서(재해발생현황)

(6) 문서접수 및 발송대장

(7) 민원처리부

(8) 안전교육실적표

(9) 안전보건관리체계

(10) 협의내용 등의 관리대장(협의관 회의록)

(11) 각종 측량자료 및 결과 (수심, 야적장, 처리장, 준설기록지)

(12) 공사기성(준공)검사원 및 조서(내역서포함)

(13) 운반대장(송장 등)

(14) 각종 보고서

(15) 공사일지 및 공사사진

12. 보고 사항

가. 시공자의 제출서류 검토 보고

(1) 건설사업 관리자는 시공자가 제출한 서류를 검토하고 필요시 의견을 발주자에게 보고 하여야 한다.

○ 공사착공 보고서 ⇒ 현장관리조직 및 기술자 배치계획서, 현장대리인 선임계 안전관리자, 세부공정표, 안전관리계획서, 인력동원 및 장비투입 계획서, 착수전 사진, 내역서, 환경보전계획 등

○ 공사 시공측량 결과 보고서

○ 준공기한 연기 신청서

○ 현장실정 보고서

○ 작업실적 및 작업계획서

○ 기성 및 준공검사원

○ 기타 시공과 관련되는 보고서 및 신청서

나. 건설사업 관리자자 보고

(1) 건설사업 관리자는 다음의 경우 적절한 임시 조치를 취하고 처리방안을 수립하여 발주자에게 보고하여야 한다.

○ 천재지변 및 기타 사고로 인하여 공정이 지연 될 때

○ 시공자가 정당한 사유 없이 공사를 중단 할 때

○ 시공자의 현장대리인이 건설사업 관리자와 발주자의 사전승인 없이 3일 이상 상주하지 않을 경우

○ 시공자에게 계약에 따른 시공능력이 없다고 인정되거나 기성공정이 예정공정에 미달할 때

○ 시공자가 공사에 불성실하거나 건설사업 관리자의 정당한 지시에 응하지 아니할 때

○ 시공자가 건설사업 관리자는 발주자의 승인 없이 공사의 전부 또는 일부를 하도급 하는 경우

○ 현장에 투입되는 장비가 적절하지 않을 경우

○ 발주자로부터 별도 검토보고의 지시가 있을 때

○ 기타 필요한 사항

다. 기타 보고

(1) 준설공사 공정 : 매주, 월

(2) 기타 필요한 사항

13. 성과품 제출

가. 건설사업 관리용역 월간(월 1부) CD 저장

종합보고서(1부) : SSD 500G(solid state drive) 저장

나. 제12항의 비치서류 중 준공 후 제출 협의된 서류 :  1식

다. 기타 필요한 자료 : 1식