설계변경 소심의위원회 심의요청서

『 북단IC 교통소통대책 변경으로 인한 R-F 신설 실정보고 』

2014년  12월

월드컵대교 건설공사

설계변경 소심의위원회 심의요청서

문서번호

요청부서

토목부   담당 최진우

요청일

2014년 12 월   일

공 사 명

월드컵대교 건설공사

공사개요

공사규모

○ 총공사구간 연장 L = 1,980m

- 교 량 폭 : B=31.4m(왕복 6차로)

- 주경간교 : 855m

(비대칭 복합사장교 540m, 강박스거더교 315m)

- 접속교 : 1,125m

(남단 418m, 북단 212m, 지하차도 495m)

공사기간

2010.03.22. ~ 2015.08.22.(66개월)

감 리 사

㈜포스코엔지니어링, ㈜동일기술공사

설 계 사

㈜유신코퍼레이션, ㈜삼보기술단

시 공 사

삼성물산(주), 삼성엔지니어링(주), 이화공영(주)

자문 안건명

북단IC 교통소통대책 변경으로 인한 R-F 신설 실정보고

요청금액

증)167,177천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 :

- 월드컵대교 북단IC 실시설계 시 도로 선형변경으로 진출로가 영구 차단됨(내부순환로→증산로)에 따라         서울지방경찰청 교통소통대책 규제심의 시 개선 지시가 있어, 내부순환로에서 증산로(월드컵경기장)방향        으로 직결하는 도로(북단구간 Ramp-F)를 신설하여 도로 교통의 원활한 소통과 안정을 확보코자 함.

- 관련문서: 실정보고 승인 통보[월드컵(감리) 2014-호(2014.12.)]

- 승인공문: 실정보고 승인 [SMIH-(2014.12..)]

원설계자 의견(요약)

○ 내용 : 해당 없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 당초: -

- 변경: 북단IC Ramp-F(B=5.75m, L=227m)신설

▪ 물량 증감내역

(단위:천원)

구 분	당초	변경	증감
북단IC Ramp-F 신설	-	111,100	111,100
관급자재비 (레미콘)	-	7,149	7,149
관급자재비 (철근)	-	135	135
관급자재비 (아스콘)	-	48,793	48,793
계	-	167,177	167,177

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 : -

- 변 경 : 167,177천원

- 증 감 : 증)167,177천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 북단IC 교량 공사

별첨서류

1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 관련근거 및 경위 1부.

3. 설계변경도서 1부.

▪ 공사예정시기

2015. 08.

▪ 소요관급자재

레미콘 129 M3, 철근 0.176 ton 아스콘 784 ton

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	월드컵대교 건설공사
계약금액	176,063,000,000	계약일	2010.03.18	시공사	삼성물산(주)외 2개사
공사기간	2010.03.22.~2015.08.22.(66개월)	낙찰률	64%	설계자	㈜유신코퍼레이션 ㈜삼보기술단
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜포스코엔지니어링 ㈜동일기술공사
공사규모	○ 총공사구간 연장 L = 1,980m - 교 량 폭 : B=31.4m(왕복 6차로) - 주경간교 : 855m (비대칭 복합사장교 540m, 강박스거더교 315m) - 접속교 : 1,125m (남단 418m, 북단 212m, 지하차도 495m)			※ 작성자 : 최진우 (☎3708-2542)

□ 심의 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		북단IC Ramp-F 신설 (B=5.75m, L=227m)	증) 북단IC Ramp-F 신설 (B=5.75m, L=227m)
공 사 비	-		167,177천원	증)167,177천원
적 용 요 율	-		낙찰률 : 64% (기존 단가)	낙찰률 : 64% (기존 단가)
설계변경요구자	▢ 발주처 ▢ 계약상대자 ☑ 관련기관(서울지방경찰청)
협의율 적용 근거	실정보고 승인 [SMIH-(2014.12..)]
설계변경 근거	방 침	-
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제1항
설계변경 유형	- 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)
설계변경 내용	- 월드컵대교 북단IC 실시설계 시 도로 선형변경으로 진출로가 영구 차단됨(내부순환로→증산로) 에 따라 서울지방경찰청 교통소통대책 규제심의 시 개선 지시가 있어, 내부순환로에서 증산로 (월드컵경기장)방향으로 직결하는 도로(북단구간 Ramp-F)를 신설하여 도로 교통의 원활한 소통과 안정을 확보코자 함.
효 과	- 시민편익증진, 민원해소
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 시공사문서 : 삼건월드컵 2014-466호(2014.12.05.)

· 감리단문서 : 월드컵(감리) 2014- 호(2014.12..)

· 발주처승인문서 : 실정보고 승인 [SMIH-(2014.12..)]

□ 설계변경 기준검토 보고

구 분	검 토 내 용	결과검토	비 고
설계변경의 타당성	① 설계변경사유 해당유무 - 별도 발주해야 할 공사를 추가공사로 설계변경 함으로서 사실상 수의계약 결과를 초래하는 것은 아닌지	해당없음
	② 설계변경의 적합성 - 부적절한 공법을 채택하여 공사비를 부당 증액시키는 사례 및 시공조건을 공사비 증액 방향으로 변경 조정 하지는 않았는지	해당없음
단가적용1 (기존단가)	③ 증가 물량의 단가 - 계약단가로 적용하였는가	적 정
	④ 당초 계약단가가 예정가격단가(설계단가)보다 높은 경우 - 증가물량의 단가는 예정가격단가(설계단가)를 적용 하였는가	해당없음
	⑤ 발주처의 요구 또는 시공사 귀책이 없는 설계변경 단가적용 - 설계변경 시점을 기준으로 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액의 범위안에서 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정 하였는가	해당없음
단가적용2 (신규단가)	⑥ 신규단가의 비교 - 조달청에서 고시한 단가와 재정경제부에 등록한 전문가격 조사기관이 공표한 가격등 2개 이상의 단가를 비교하였는가	해당없음	조달단가적용 (아스콘자재)
	⑦ 견적단가의 적정성 - 위 단가와 공표되지 않은 경우 2인 이상의 사업자로부터 적정하게 견적을 받았는가(동등한 조건 제세 및 부가가치세 삽입여부 등)	해당없음
	⑧ 단가 결정시점의 적정성 - 설계도면 변경시에는 발주기관이 확정한 때 - 설계도면 불변시에는 설계변경을 문서로 합의한 때	적 정
	⑨ 발주기관의 요구 또는 시공자 귀책이 없는 설계변경의 단가적용	해당없음
	⑩ 제잡비 요율적용의 적정성 - 설계변경으로 인한 계약금액의 증가분에 대한 제잡비 적용율 당초 계약서의 요율대로 적용하였는지(관계법령이 정한 비율을 초과여부)	적 정
설계자 의견청취	⑪ 당초 설계자의견 청취여부 - 설계변경으로 인하여 목적물의 구조를 변경하는 경우 당초 설계자에게 사전 의견을 들었는지 여부	해당없음

- 위와 같이 검토한 바 설계변경 관련규정에 적합함.

보고일시 : 2014년  12월    일

월  드  컵  대  교   건  설  공  사

책 임 감 리 원  김  동  귀