서울시차량정비센터 내진성능 보강공사

감리용역 과업지시서

2019.08.

서울특별시

차량정비센터

제1장 총  칙

1.1 용역 명칭

서울특별시 차량정비센터 내진성능 보강공사 감리용역

1.2 과업 목적

본 과업은 해당 시설물을 대상으로 정확한 시공을 통하여 설계자가 의도한 내진성능이 발휘될 수 있도록 공사현장을 관리하고 시공품질을 확보하는데 목적이 있다.

1.3 시설물 개요

1) 시설물명: 서울시 차량정비센터 내 본관동,변전소,대형정비동

2) 위    치: 서울특별시 성동구 가람길 117 (송정동 73-36)

3) 시설물 제원

대 상	대상건물	층수	준공일	건물구조
서울시 차량정비센터	본 관 동 변 전 소 대형정비동 (3개동)	지하1-3층	1995.03.09	철근 콘크리트조

1.4 과업 범위

1) 시공관리

2) 설계변경 등(필요시)

3) 기성 및 준공검사

4) 최종감리보고서 제출

1.5 과업 기간

1) 본 용역의 기간은 공사 착수일로부터 공사 종료일로부터 10일 후로 한다.

- 착수일: 내진보강공사 착공일과 동일

- 종료일: 내진보강공사 준공일 후 10일

2) 본 공사가 준공예정일보다 지연될 경우 감리기간은 자동 연장되며, 준공예정일 이전에 모든 공사가 완료되었을 경우에는 본 감리용역도 완료된 것으로 본다.

3) 단 공사 준공예정일의 지연으로 감리기간이 연장되었을 경우 연장기간에 대한 계약금액의 변경은 없는 것으로 한다.

1.6 용어의 정의

1) 내진보강공사 및 감리용역 발주처는 ‘발주처’로 명칭한다.

2) 내진보강공사 수행자는 ‘시공자’로 명칭한다.

3) 내진보강공사 감리용역 책임감리원은 ‘감리원’으로 명칭한다.

제2장 적용기준 및 준수사항

2.1 적용 관련 법령 및 기준

1) 공통

(1) ｢지진‧화산재해대책법｣ 및 ｢동법 시행령｣(행정안전부)

(2) 강구조 설계기준

(3) 콘크리트 구조설계기준(국토해양부)

(4) 콘크리트 표준시방서(국토해양부)

(5) 건설기술관리법 품질시험 규정

2) 건축물

(1) 건축법 및 동법 시행령, 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

(2) 건축구조기준(KBC)

(3) 기존 시설물(건축물) 내진성능 평가 및 향상요령(국토해양부‧한국시설안전공단)

2.2 일반사항

1) 착수계 등 제출서류

(1) 감리원은 계약일로부터 ** 이내에 착수계 등을 제출하여야 한다.

① 착수계

- 사업 책임기술자 선임계

- 사업 책임기술자 사용인감계

- 용역업자 서약서

- 계약금액에 따른 산출내역서

- 과업수행계획

․ 분야별 책임감리원 및 참여감리원 조직표

․ 각 분야별 인력투입계획(투입인원 이력서 제출, 필요시 장비투입계획 포함)

․ 예정 공정표

․ 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

② 보안각서

(2) 감리원은 필요시 다음 제반 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

① 납품 기한 연기원

② 납품 검사원

2) 업무협의

감리원은 착수계 제출 후 발주처와 협의하여 수시 업무협의회 실시하고, 업무협의 실시내용은 보고서에 기록한다.

3) 과업의 변경 등

본 과업수행 중 발주자의 사업계획 변경 등에 따라 변경사항이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고, 발주처의 요구에 의하여 정산처리하거나 과업의 범위를 조정․변경할 수 있다.

4) 기타사항

과업수행은 아래사항을 숙지하고 예정공정표에 따라 성실히 수행하되, 공사와 관련하여 발주처의 요청사항이 있을 경우 성실히 임하여야 한다.

(1) 감리원은 본 과업지침내용을 숙지하여 전반적인 과업을 성실히 수행하여야 한다.

(2) 감리원은 본 과업지시서 및 관계법령, 규칙 및 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하고 수행한 본 과업의 성과에 대한 모든 책임을 진다.

(3) 본 과업의 부분성과 및 최종성과가 그 내용상 미비, 기술상 과오 등 결격사유가 발견된 경우에는 용역완료 전･후를 막론하고 발주처 지침에 따라 지체 없이 보완조치 하여야 한다.

(4) 기타 필요한 사항은 발주처와 협의하여 처리한다.

2.3 특기사항

발주처 요구 시 감리원은 용역 종료 후라도 각종 심의 등 필요할 경우 동 동역의 결과물에 대한 설명 또는 설명서 작성, 출석설명 등 최대한 업무에 협조하여야 한다.

2.4 일반 수행 지침

1) 적용 요령

(1) 용역 수행은 본 과업지시서에 의하되 세부적인 사항은 감리원이 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킬 수 있으며, 이 경우 발주처의 승인을 거친다.

(2) 본 과업지시서에서 제시된 사항은 감리원이 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주처와 협의하여 정한다.

(3) 본 과업지시서에 대한 대안은 제시될 수 있으며 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출, 발주처의 승인을 얻은 후 채택될 수 있다.

(4) 발주처 및 관계 부서와 긴밀한 협조 체제를 유지하고, 필요시 자문회의 등을 통해 분야별 전문가의 참여를 유도, 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.

(5) 각종 계산 기준은 외국 기준을 적용할 수 있으나, 발주처와 협의하여야 한다.

2) 발주처와 감리원의 책임 및 업무

(1) 용역 목표와 추진 절차

① 본 용역은 내진보강설계 분야의 전문지식을 습득한 자로서 책임감리원  1인 이상이 수행한다.

② 감리원은 전문적 기술 능력과 경험을 통해 주어진 과업내용을 파악하여 시공자로 하여금 최상의 내진보강공사를 수행할 수 있도록 하여야 한다.

③ 감리원은 합리적으로 용역을 추진하기 위해 용역 착수 시 발주처가 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 한다.

④ 감리원은 발주처 승인 없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

⑤ 용역의 시행 과정에서 변경 요인이 발생했을 경우 감리원은 발주처에 보고할 책임이 있으며, 관계법규 및 계약서 검토, 발주처와 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 모색하여야 한다.

⑥ 감리원은 동 용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있으며, 계약 조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대하여 즉시 발주처에 알려야 한다.

⑦ 감리원은 계약의 범위 내에서 용역을 수행하는 동안 시설물의 실제 상황을 반영하여야 하며, 보고서에 실제 조건을 정확하게 표시 반영하여야 한다.

⑧ 용역 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 분쟁기간 중이라 할지라도 감리원은 본 용역의 수행을 중지하여서는 아니 된다.

(2) 감리원의 책임한계

감리원은 부실 감리 시에는 그에 상응하는 법적 책임을 진다. 또한 세부 책임한계는 다음과 같다.

① 자재의 품질시험, 검사, 시공물의 검측과 관련한 사항

② 건설목적물의 품질관리, 시공관리 전반에 관련한 사항

③ 구조부분, 준공검사의 수행

(3) 보  안

① 업무 내용의 비공개 : 감리원은 발주처와 업무 수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 발주처의 승인 없이 공개해서는 안 된다.

② 검토 및 협의 창구 단일화 : 감리원와 발주처의 관계에서 성과품, 보고서 등에 대한 검토 및 협의 창구는 단일화하여 보안 유지가 용이하도록 하여야 한다.

(4) 과업변경(발주처 승인에 의한 업무내용 변경 시 계약변경)

① 발주처는 용역 계약의 관리에 책임이 있고, 감리원은 발주처의 승인이 없는 한,  계약서를 위반할 수 없다.

② 업무 내용 변경은 발주처와 감리원이 문서화를 통하여 상호 승인을 하여야 하고, 이는 계약 변경의 근거 서류가 된다.

③ 계약서 및 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주처와 감리원이 상호 협의하여 결정하기로 한다.

④ 천재지변 등 불가피한 사항이 발생하여 과업의 정상적인 수행이 불가능한 경우에는 도급금액의 범위 내에서 용역의 내용 또는 기간을 쌍방 합의하여 변경할 수 있다.

⑤ 과업물량의 증감이 필요한 경우에는 예산의 범위 내에서 설계변경 할 수 있다.

⑥ 본 과업 수행 중 정책의 변경이나 발주처의 기본 방침이 변경, 과업 내용 중 일부 또는 전부의 변경이 필요할 때에는 발주처의 방침과 결정에 따라야 한다.

⑦ 과업의 항목 및 주요내용이 누락, 변경 또는 불분명한 경우, 발주처와 감리원 상호 간의 협의를 원칙으로 하되, 상호 이견이 있을 때는 과업의 목적이 부합되는 범위 내에서 발주처의 요구 및 해석에 따라 수행한다.

⑧ 감리원은 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업수행에 필요하다고 판단되어 발주처에 요청할 경우에는 이를 성실하게 이행하여야 한다.

⑨ 본 과업의 부분성과 및 최종성과가 그 내용상 미비, 과오 등의 결격사항이 발견된 경우에는 용역완료 전․후를 막론하고 발주처 지침에 따라 지체 없이  보완조치 하여야 한다.

⑩ 본 과업의 발주처는 과업수행을 위하여 공공기관과 협의가 필요한 경우, 이를 적극 지원 조치한다.

제3장 과업내용

3.1 시공관리

1) 감리원은 공사단계 시 설계도서에 작성된 내진보강 상세 시공도면을 검토하여 공사 진행하고 준공단계 시 적정 시공여부를 확인 후 시행한다.

2) 감리원은 시공자가 실시한 각종 측량성과 등을 검측, 확인하고 시공계획, 품질관리계획 사용자재의 적합여부 등을 검토, 확인한다.

3) 감리원은 현지조건과 설계도서를 연계 검토하여 시공자가 공사를 원활히 수행할  수 있도록 검토의견을 제시하여야 한다.

4) 감리원은 시공자의 업무와 책임을 면제시킬 수 없으며 임의로 설계를 변경시키거나 기일연장등 공사계약조건과 다른 지시나 결정을 하여서는 아니 된다.

5) 감리원은 시공자가 설계도서에 의거 관계법령에 일치하게 시공하는지의 여부를 수시 확인하여 설계도서, 공사설명서 및 공사계약서 내용대로 시공되지 아니하였을 경우 즉시 그 내용을 발주처에 보고하여야 한다.

3.2 설계변경 등(필요시)

1) 내진설계시 확정된 설계로 공사 진행하며(설계서의 임의 변경 불가) 변경 불가피 시 책임감리원의 검토 후 변경하여야 한다.

2) 불가피하게 전문가 협의체 검토 후 설계변경 시 감리원은 시공자로부터 설계변경에 필요한 자료를 제출받아 계약변경이 가능한 설계변경 서류를 작성, 소속대표자와 연명으로 발주기관의 장에게 제출한다.

3.3 기성 및 준공검사

1) 시공여부 확인 후 구조부분 준공 검사 시행

2) 감리원은 시공자가 제출한 기성 및 준공검사원을 실제 시공현황과 비교 검토한 후 감리조서를 첨부하여 발주처에 제출한다.

3) 감리원은 발주자의 요청이 있을 경우  기성 및 준공검사 시행하고 기성 및 준공검사를 실시하고 그 조서를 작성하여 발주기관에 제출하여야한다.

3.4 준공처리에 필요한 서류제출 요구시 작성 및 제출

3.5 주요공정 추진감리 사항

1) 내진보강공사에 대한 구조 보강, 마감공사 확인

2) 내부마감재의 마감 및 설계도서에 맞는 치수, 기준

3.6 최종감리보고서 제출

1) 중간감리, 최종감리현황

2) 품질관리 현황(재료검사 및 시험성적 확인사항 등)

3) 시설물 구조부분 준공검사 및 검사조서

4) 과업 수행 내용을 일목요연하게 정리하고 사용자 관점에서 이해하기 쉽도록 작성한다. 작성방법은 ‘제4장 보고서 작성’에 따른다.

제4장 보고서 작성

4.1 작성기준 및 요령

1) 작성기준

(1) 최종감리보고서 내용은 시공자의 공사 과정에서 기술적 교류와 시공에 대한 의견 등이 일목요연하게 정리되어야 한다.

(3) 과업 수행에 사용한 공식 자료와 통계는 그 근거와 발행 연도를 제시하여야 한다.

(4) 성과품 작성은 한글 사용을 원칙으로 하되 필요한 경우 영어를 사용할 수 있으며, 이 경우 한글을 병용하여야 한다.

(5) 본 과업의 성과는 과업시행부분에서 제시한 기준 및 절차에 따라 작성되어야 한다.

4.2 보고서 내용

1) 서두

보고서의 표지 다음에 용역의 전반내용을 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

(1) 제출문

(2) 참여감리원 명단

(3) 시설물의 위치도

(4) 시설물의 전경사진

(5) 용역결과 요약문

(6) 보고서 목차

2) 용역의 개요

용역의 범위와 과업내용 등 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

(1) 용역의 목적

(2) 시설물의 개요 및 이력사항

(3) 용역의 범위 및 내용

(4) 용역 수행일정 등 주요사항

3) 시공관리

4) 설계변경 등(필요시)

5) 기성 및 준공검사

4.3 보고서 제출

1) 성과품의 제출

(1) 감리원은 본 용역의 납품 예정 성과품을 과업종료 전에 감독 공무원에게 제출하여 사전검토를 받아야 한다.

(2) 감리원은 검토 받은 용역 성과품을 수정하여 감독공무원의 확인을 받은 후, 최종 성과품을 제출토록 한다.

2) 제출목록

(1) 최종감리보고서 ............................... ........................... 2부

(2) 성과품 CD-ROM ......................................................... 2Set

(3) 기타 발주처가 요구하는 사항

3) 기 타

(1) 용역 결과는 용역결과보고서에 빠짐없이 반영시켜야 한다.

(2) 보고서 한글 파일, 보고서 내 삽도, 그래프 원본파일, 구조해석 실행파일(필요시), 소스파일은 전산파일 형식(한글, 워드, PDF, CAD 등)으로 작성하여 CD-ROM에 담아 성과품 납품 시 발주처에 제출한다.

[서식1]

내진보강공사 기술감리 참여기술자 명단

(수행계획서, 종합보고서에 첨부)

ㅇ용 역 명 :

ㅇ용역기간 :

ㅇ도 급 자(회사명 및 대표자 명기) :

ㅇ용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연별	분야별	기술감리 참여기술자					비고
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	생년월일	자격종목 및 등급

[서식2]

책임감리원 선임계

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 20   .   .   .

4. 착수일자 : 20   .   .   .

5. 완수예정일 : 20   .   .   .

-  아     래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 검증용역의 책임감리원으로 선임하여 제출하오며, 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

20   .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                 (인)

서울시 차량정비센터 (담당감독관) 귀하

[서식3]

주간공정 보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 2018 년  월  일 ~ 2018 년  월  일

◦ 계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항 (2018 . . .~ . .)	금주예정사항 (2018 . . .~ . )	비고 (진행률)
업무내용			실시공정/예정공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                     (인)

책임감리원 :                   (인)

서울시 차량정비센터 (담당감독관) 귀하