설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 도시고속도로과 담당 백종임		요청일		2019년 8월 일
공 사 명	구로고가 철거공사
공사개요	공사규모		교량철거 : 154.25m, 옹벽철거 : 234.30m+148.0m=382.30m(하행선)
	공사기간		2018. 08. 20 ~ 2019. 08. 31
	감 리 사		동부엔지니어링(주)외 2
	설 계 사		㈜이산외 1
	시 공 사		새천년종합건설(주)외 2
자문 안건명			보도확장공사 수량증감 변경				요청금액		증 196,568천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 교통소통대책 자문회의 결과와 금천구 도로과 보도정비 추가 요청에 대한 보도공사를 반영하는 사항임.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 구로고가 철거공사와 관련 자치구(금천구) 요청에 의한 추가공사(보도확장공사), 교통소통대책 자문회의 결과 및 현장여건 등을 감안하여 수량 증·감을 설계에 반영 함. ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 투수블록포장 2,835㎡, 경계석설치 1,517m L형측구설치 974m, 빗물받이설치 43개소, 가로수식재 111주 - 변 경 : 투수블록포장 4,042㎡, 경계석설치 1,807m L형측구설치 1,268m, 빗물받이설치 51개소, 가로수식재 77주					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 789,902 천원 - 변 경 : 986,470 천원 - 증 감 : 증) 196,568 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 포장공(보도확장공사)
별첨서류	1. 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 설계내역서 1부				▪ 공사예정시기 : 2018년 12월 ~ 2019년 08월 ▪ 소요관급자재 : 투수블록외

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	구로고가 철거공사
계약금액	7,783,253천원	계약일	2018. 08. 13	시공사	새천년종합건설(주)외 2
공사기간	2018.08.20 ~ 2019.08.31	낙찰율	85.516%	설계자	(주)이산외 1
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	동부엔지니어링(주)외 2
공사규모	- 교량철거 : 154.25m - 옹벽철거 : 234.30m+148.0m=382.30m(하행선)			※ 작성자 : 업무담당 백종임 (☎:3708-8666)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	투수블록포장 2,835㎡ 경계석설치 1,517m L형측구설치 974m 빗물받이설치 43개소 가로수식재 111주		투수블록포장 4,042㎡ 경계석설치 1,807m L형측구설치 1,268m 빗물받이설치 51개소 가로수식재 77주	투수블록포장 1,207㎡(증) 경계석설치 290m(증) L형측구설치 294m(증) 빗물받이설치 8개소(증) 가로수식재 34주(감)
공 사 비	789,902천원		986,470천원	증 196,568천원
적 용 요 율	낙찰율 85.516%		낙찰율 85.516%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침
	관련규정	공사계약일반조건 제20조 제2항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	구로고가 철거공사와 관련 자치구(금천구) 요청에 의한 추가공사(보도확장공사), 교통소통대책 자문회의 결과 및 현장여건 등을 감안하여 수량 증·감을 설계에 반영 함.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

1.2019년 제1차 도로점용공사장 교통소통대책 사전 검토 결과 통보 및 자문회의 개최 알림

[교통운영과-1033호(‘19.01.17) : 교통운영과 → 토목부]

2.2019년 제1차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 알림

[교통운영과-1546호(‘19.01.28) : 교통운영과 → 토목부]

3.교통소통대책 자문회의 최종결과 통보(제1차)

[교통운영과-2359호(‘19.02.26) : 교통운영과 → 토목부]

4.구로고가차도 철거공사 구간 보도정비 추가 요청

[도로과-644호(‘19.04.23) : 금천구청 → 도시기반시설본부]