등록번호	건축과-28680		주무관		건축시설팀장		건축과장
등록일자	2016.12.14.
결재일자	2016.12.15.
공개구분	비공개(5)
			협조	주무관
				주무관
				보육지원팀장
				여성가족과장
- 황학어린이집 증개축 공사 - 실정보고 제출 검토결과 보고
도시관리국 건 축 과

『황학어린이집 증개축 공사」와 관련 시공사의 실정보고서 제출에 따른 검토보고.

- 황학어린이집 증개축 공사 -

실정보고서 제출 검토결과 보고

1		공사개요

공 사 명 : 황학어린이집 증개축공사

공사범위

- 1개층 증축 및 내외부 마감 변경 등

- 노후설비, 소방안전설비, 전기설비 등

공사기간 : 2016.08.30. ∼ 2017.02.25.

시 공 사 : 케이월드종합건설 주식회사

도 급 액 : 780,907,000원

2		실정보고 주요내용

계단옆 신규벽체 신설에 따른 물량 증가

옥상구조물 설치에 따른 물량 반영

내부계단 마감물량 반영 등

옥상 데크 및 벤치 물량 및 조경공사 물량 반영 등

어린이집 공사현장 인접지 가설방음판 물량 신설 및 철거물량 증가

구조보강에 따른 물량 증가 등

석고보드(9.5T→12.5T) 변경 등

외부 조적벽 설치에 따른 앵글물량 반영 및 외부바닥 고압블록 포장 등

지하실 배수 팩케이지 변경 및 지하 화장실 오수 팩케이지 신설

세면기 수전(혼합수전→유아전용 수전) 변경

양변기 2EA 추가 및 유아용 소변기 전자감응식센서 변경

지하실 배관경로 변경 등

3		실정보고 공사비 증감내용

구 분		직 접 공 사 비		증감금액
		당초	변경
건축	철근콘크리트공사	49,700,180원	79,967,517원	중)30,267,337원
	철골공사	14,391,148원	21,048,163원	증) 6,657,015원
	조적공사	61,387,021원	79,710,983원	증)18,323,962원
	목공사	149,316원	24,697,119원	증)24,547,803원
	금속공사	37,707,386원	51,770,231원	증)14,062,845원
	미장공사	21,111,856원	22,432,254원	증) 1,320,398원
	칠공사	7,015,914원	7,308,180원	증) 292,266원
	수장공사	79,069,957원	79,954,598원	증) 884,641원
	기타공사	43,676,852원	51,717,842원	증) 8,040,990원
	철거공사	26,898,124원	39,802,901원	증)12,904,777원
	조경공사	602,283원	2,581,483원	증) 1,979,200원
기계설비	장비설치공사	8,903,365원	16,050,752원	증) 7,147,387원
	위생기구설치공사	10,021,531원	12,223,157원	증) 2,201,626원
	오배수배관공사	12,357,965원	13,424,014원	증) 1,066,049원
총 계		372,992,898원	502,689,194원	증)129,696,296

4		처리의견

시공사 실정보고 내용이 타당하다고 사료되어 승인처리하고, 향후 준공정산 등 설계변경시 반영하고자 함.

붙 임 : 실정보고서(별도첨부).  끝.