준공기한 연기 요청사유

〇 공  사  명 : 정릉동 202-58 ~ 168-29 외 9개소 장기사용 배급수관정비공사

〇 계  약  일 : 2021년 04월 27일

〇 착  공  일 : 2021년 04월 29일

〇 준공예정일 : 2021년 11월 24일

〇 공 사 개 요

- 배급수관부설(D=15mm~300mm) 연장 L=1,614m

〇 공정 현황

1) 현 공정률 : 90%(2021년 11월 10일 기준)

※타절구간 포함

2) 완료 공정 : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10구간

3) 잔여 공정 : 4구간 분기연결

〇 준공기한 연기 사유

1) 공사정리기간 부족(15일)

- 추가 작업지시 및 대규모 단수 원인 파악 등으로 정대공기 부족을 감안하고 “ 적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인”에 따라 시공사가 요청한 중공기한(15일)을 연기하여 잔여공종 및 준공처리에 만전을 기함이 타당하다고 판단됨.

〇 준공기한 연기 요청일

1) 준공기한 연기 요청일 : 15일

- 당초 : 2021년 04월 27일 ~ 2021년 11월 24일

- 변경 : 2021년 04월 27일 ~ 2021년 12월 09일

□ 예정공정표(당초)

※ 현장여건에 따라 시공일자 변경이 가능하며 변경 시 공사감독 사전승인 후 시공일정 변경

본 공사 예정공정표를 제출합니다.

마천건설  대표 김 평 화 (인)

□ 예정공정표(변경)

※ 현장여건에 따라 시공일자 변경이 가능하며 변경 시 공사감독 사전승인 후 시공일정 변경

본 공사 예정공정표를 제출합니다.

마천건설  대표 김 평 화 (인)