문서번호	서울역일대종합발전기획단-3401
결재일자	2016.4.15.
공개여부	비공개(5)
방침번호

					시 민
★주무관	사업계획팀장	재생사업반장	서울역일대종합발전기획단장		안전총괄본부장
협 조
	토목총괄과장

「서울역 7017 프로젝트」관련

기본 및 실시설계용역 준공기한 연기

2016.4.

안전총괄본부

(서울역일대종합발전기획단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「서울역 7017 프로젝트」관련

기본 및 실시설계용역 준공기한 연기

「서울역 7017 프로젝트」와 관련하여 도시관리계획 결정(변경) 절차 이행에 따른 용역 준공기한 연기에 대해 검토 보고 드림.

※ 준공기한 : 당초) 2016.4.13. →  변경) 2016. 06.30. (증 78일)

▢ 근거 :

○ 도화(구조)-2016-A20-0038호(‘16.4.11) : 용역기간 변경 요청

○ 서울역일대종합발전기획단-1684호(‘16.2.24) : 서울역 7017 프로젝트

서울역고가 도시관리계획 사항 변경 추진계획

▢ 용역개요

○ 용 역 명 : 서울역 7017 프로젝트 기본 및 실시설계

○ 위    치 : 중구 남대문로 5가 627~ 만리동1가 67

○ 용역내용 : 서울역고가 보행길 전환(B=10.3m, L=1,024m)

○ 용역기간 : 2015. 7. 1. ~ 2016. 4. 13.

○ 용 역 비 : 금1,886,290,000원(금일십팔억팔천육백이십구만원)

○ 용 역 사 : ㈜종합건축사사무소 디자인캠프문박 디엠피, MVRDV,

㈜삼안, ㈜한국종합기술

▢ 추진현황

○ '15.07.01 : 기본 및 실시설계용역 착수

○ '15.09.30 : 기본설계 완료

○ '15.12.14 : 회현역 연결 E/V 설계 착수

○ '16.2.24 : 서울역고가 도시관리계획 사항 변경 추진계획(부시장 방침 제45호)

○ '16.3.16 : 서울역고가 도시관리계획(도시계획시설) 변경결정 요청

○ '16.3.24 : 도시계획시설(도로) 변경결정(안) 열람공고

▢ 보고내용

○ 서울역고가 도시관리계획 사항 변경 절차 이행

- 서울역고가 용도, 선형변경에 따른 도시관리계획(도시계획시설) 결정(변경)

- 국토교통부 노선변경 승인시 검토시항(도시계획시설 변경검토) 이행

도시계획시설사업(도로) 실시계획 인가(변경) 필요

○ 준공기한 변경

- 용역비 및 용역기간 변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
용 역 비	1,886,290,000	1,886,290,000	-	변경없음
용역기간	'15. 7.1.~'16.4.13.	'15. 7.1.~'16. 6.30.	증)78일

- 준공기한 연기 사유

⦁도시관리계획 결정(변경) 절차 이행에 따른 설계기간 부족

- 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치의견

○ 서울역고가의 도시관리계획 결정(변경) 절차 이행에 따른 설계 절대공기가 부족하여 준공기한을 연기(‘16.06.30)코자 하며, 용역비는 향후 설계변경시 정산코자 함.

붙임   1. 관련 공문 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.(별첨)   끝.