마포 석유비축기지 재생 및 공원화사업 (’17. 5. 개원)

제6차 개원 준비 추진사항(공원조성과)

□ 사업개요

○ 위    치 : 서울시 마포구 성산동 산53-1일대

○ 규    모 : 140,022㎡ (공원 101,510, 임시주차장 35,212, 접근로 3,300)

○ 기    간 : 2013. 1. ~ 2017. 4.말 (5월 개원 예정)

○ 사업내용 : 친환경·재생의 복합 생태·문화 공간 조성

－ 석유탱크 5기를 생태·환경·문화 체험공간으로 활용 및 재생

－ 탱크 등 시설 및 외부 공간 활용을 위한 콘텐츠 및 프로그램 제시

－ 건축 및 외부 공간계획 (보행·차량 동선, 식재·포장 등 공원조성계획)

○ 총사업비 : 46,889백만원 (기 집행 2,000, ’15. 10,319, ’16. 25,707, ’17. 8,863)

입지여건	조성계획 (주변여건에 따라 변경 예정)

□ 조성공사 추진현황

○ 1단계 문화공원 (101,510㎡ / 장기계속공사)

－ 총공사비 : 32,847백만원 (도급 26,013, 관급 6,342, 이설·폐기물 492)

－ 시공업체 : ㈜텍시빌 등 8개사 공동도급

－ 공 정 율 : 70.19% (계획 71.34% / 98.39%)

○ 2단계 임시 주차장 부지 (38,512㎡ / 장기계속공사)

－ 총공사비 : 5,322백만원 (도급 4,197, 관급 839, 이설·폐기물 286)

－ 시공업체 : 에스지신성건설(주) 등 4개사

－ 공 정 율 : 6.2% (’16. 7. 11. 착공), 설계 변경 중 (’17. 1.말 완료 예정)

□ 공원명칭 결정현황

○ 추진현황

－ ’15.05.22. : 공원명칭 결정(안) 시장보고 (공원명칭 : 서울문화비축기지)

－ ’15.10.19. : 시 지명위원회 심의 － 심의결과 : 보류

※ 심의의견 : 8음절로 가독성이 떨어지고, 심의위원 간 다양한 의견이 있어 보류

－ ’16.11.18. : 시 지명위원회 심의 － 심의결과 : 기타 (공원명 추천)

※ 심의의견 : 석유비축기지라는 시설을 공원 명까지 확대 적용하는 것은 무리가 있음. 시설명칭과 공원명칭은 별도로 하는 것이 좋겠으며, 공원 명칭으로 ‘석유기지문화공원’, ‘석유비축기지문화공원’을 추천드림

○ 공원명칭 결정 고시

－ 고시예정 : ’17. 1. 12. (’17. 1. 6. 서울시보 게재요청)

－ 공원명칭 : 석유비축기지문화공원 (사용계획 : 공원현황 책자등록 등)

－ 시설명칭 : 문화비축기지 (사용계획 : 공원 홍보물, 안내판·안내사인 등)

※ 예) 오동근린공원(공원명칭) ⇨ 북서울꿈의숲(시설명칭)

□ 지장물 등 이전 (서울시 사회적경제지원센터, 사회적기업)

○ 추진현황

－ ’16.11.21. : 시설물(컨테이너) 배치도면 작성

－ ’16.11.22. : 가설건축물 축조신고 (사경센터 ⇨ 마포구)

－ ’16.12.26. : 가설건축물 축조허가 완료

○ 향후계획

－ ’17.01.13. : 실시설계 완료 (금주 까지)

－ ’17.01.16. : 기초 콘크리트 타설 및 우·배수관로 설치 등

－ ’17.01.23. : 시설물(콘테이너 등) 이전 완료 (설 연휴 이전 목표)

□ 개원준비 TF팀 구성

○ 구성계획 : 각 분야별 학문적 이론과 현장 경험이 풍부한 실무 전문가

－ 현장에서 발생하는 문제점에 대한 해결방안 및 대안제시 가능한 사람

○ 운영기간 : ’17. 1. ∼ ’17. 5. (공원 개원 시까지)

○ 운영계획 (현장 Base camp 설치)

－ ’17. 5. 개원에 차질이 없도록 문화공원과 공간특성을 고려한 개원준비

－ 각종 개원행사 프로그램 개발, 공간·장비·시설점검 및 운영매뉴얼 제작

○ 구성인원 : 총 55명 (홍보전략, 공간·장비·시설점검, 브랜딩 및 디자인, 개원·운영 프로그램)

○ 세부현황

－ 팀 구 성 : 4개 팀 (협력단 1인 + 분야별 전문가)

－ 구성현황 : 행정지원, 홍보, 점검, 브랜딩·디자인

행정지원 TF(8)		홍보전략 TF(4)		공간·장비·시설점검 TF(4)		브랜딩 및 디자인 TF(4)
소 속	성 명	소 속	성 명	소 속	성 명	소 속	성 명
공원관리팀장	이용남	협력단	나효우	협력단	이원재	협력단	김연금
공원문화팀장	조윤주	소셜벤처 인큐베이터	안이영노	서울문화재단 본부장	이규석	노네임노숍	김건태
생활공원팀장	박미애	유쾌한 상상 공장 대표	신윤선	서울국제미디어비엔날레 전시팀장	이지원	서울액션	이장섭
공원관리팀	석승우	전, 국제교류 센터 팀장	심규선	쥬스컴퍼니	이한호	피쉬아이	최은희
공원녹지정책팀	구자현
공원문화팀	송형남
생활공원팀	박철수
생활공원팀	양지윤

※ 개인별 참여 가능 의사를 확인하여 최종결정

－ 구성현황 : 개원 및 운영 프로그램

개원행사(6)		탱크 1 (6)		탱크 2 (5)		탱크 4 (11)
소 속	성 명	소 속	성 명	소 속	성 명	소 속	성 명
서울프린지페스티벌	오성화	금천아트캠프	조지영	상수동 제비다방 대표	오창원	서울시립 미술관	임근혜
극단 뛰다	배요섭	믹스라이즈	조지은 양철모	서울시 거리예술센터장	조동희	토탈미술관	신보슬
세종문화회관 문화예술본부장	박승현	전시기획자	장혜령	극단 몸꼴 대표	윤성진	서울시립 미술관	백기영
한강 몽땅 예술감독	윤성진	교육연극 프락시스 대표	김지연	미디어공연 기획자	라지웅	그문화갤러리	김남균
춘천마임축제 부예술감독	최석규	목요일 오후 1시 대표	마 뇨	서교음악자치회의 대표	한 받	미디어 아티스트	양수인
문화기획자	김성진					중앙대 교수	천경우
						전시기획자	안애경
						건축가	정재학
						영상기획자	조영각
						서울과학산업대 교수	김상규
						국립현대미술관 큐레이터	김장언

－ 구성현황 : 개원 및 운영 프로그램

문화마당 (6)		시민프로그램 (5)		탱크 6 (4)		비 고
소 속	성 명	소 속	성 명	소 속	성 명
동대문 DRP 디렉터	박찬국	소생공단 대표	이정혜	작가(적당히 벌고 잘살자)	김진선
망원동 오늘 공작소 대표	한광현	문화로놀이짱 대표	안연정	녹색활동가	이유진
일상예술 창작센터 대표	김영등	마르쉐 공동대표	이보은 김수향	철학공방 별난 대표	신승철
서울와우책문화센터 대표	이채관	시민자치 문화센터 소장	안성민	상수동 이리까페 대표	김상우
정원디자이너	황지해
서울디자인재단 큐리이터	박동수

※ TF팀 운영과정에서 전문성확보를 위해 필요하다고 판단되는 경우 수시 인력 충원 가능