검 토 의 견 서

□ 공 사 개 요

○ 공 사 명	:	신마포 나들목 신설공사
○ 공사위치	:	서울특별시 마포구 용강동 148-2 (마포대교 북단 하류)
○ 공사개요	:	보행전용 나들목 신설 L=51.5m, B=5.0m, H=3.5m 육갑문 1개소 신설
○ 공사기간	:	(전체분)	2017년 08월 30일 ~ 2019년 11월 17일(27개월)
		(1차분)	2017년 08월 30일 ~ 2018년 06월 30일(기 준공)
		(2차분)	2018년 02월 20일 ~ 2019년 03월 31일(405일)
○ 공 사 비	:	(전체분)	당초 4,677,000천원 ⇒ 변경 4,728,434천원 (증 51,434천원)
		(1차분)	당초 977,300천원 ⇒ 변경 977,300천원 (기 준공)
		(2차분)	당초 2,,840,766천원 ⇒ 변경 2,491,000천원 (감 349,766천원)
○ 시 공 사	:	우탑건설 ㈜

□ 검 토 건 명 : 전체 4회(2차 4회) 설계변경 사유 및 적정성 검토

□ 검 토 목 적

○ 신마포 나들목 신설공사를 시행함에 전체 4회 및 2차 4회 설계변경 사유 및 설계변경 적정성을 검토하고자 함.

□ 추 진 사 항

○	공사계약	:	‘17. 08. 28.
○	1차분 준공	:	‘18. 06. 30.
○	2차분 착공	:	‘18. 02. 20.
○	2차분 준공 예정	:	‘19. 03. 31.
○	3차분 착공 예정	:	‘19. 04. 01.

□ 설계변경 사유

⦁기승인된 물가변동 금액 반영

⦁기 실정보고 승인 사항에 대하여 공사비 반영

□ 실정보고 승인 현황

구 분	공사비 증·감	실정보고 승인	비고
물가변동금액 반영	69,708,000	기반시설과-118호(19.01.15)
도달기지가시설 측벽부 보강방안	9,300,000	기반시설과-271호(19.02.01)
추진강관내부 콘크리트 수량정산	-3,777,911	기반시설과-466호(19.02.26)
육갑문 매스콘크리트 타설깊이조정	858,000	기반시설과-568호(19.03.08)
비개착구간 방수처리 방안 변경	-25,157,000	기반시설과-568호(19.03.08)
쉬트파일 절단부 차수벽 설치변경	495,000	기반시설과-568호(19.03.08)
소 계	51,426,089
관급 자재비	1,352,415
공 사 비 계	52,778,504

□ 공사비 증·감 현황

(단위 : 백만원)

구 분	전 체			금 회(2차)
	당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
총공사비	7,600	7,600	-	2,930	2,608	-322
도급공사비	4,677	4,728	51	2,841	2,491	-350
공급가액	4,252	4,298	46	2,583	2,265	-318
부가가치세	425	430	5	258	226	-32
관급자재비	808	809	1	89	117	28
이 설 비	2,115	2,063	-52

□ 설계변경 수량 및 공사비 증 ․ 감 현황

○ 전체공사 계약금액 변경현황

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총 공 사 비	7,600,000,000	7,600,000,000	-
도급공사비	4,677,000,000	4,728,434,000	51,434,000
공 급 가 액	4,251,818,182	4,298,576,365	46,758,183
부가가치세	425,181,818	429,857,635	4,675,817
관급자재비	807,959,479	808,865,622	906,143
이 설 비	2,115,040,521	2,062,700,378	-52,340,143

○ 2차공사 계약금액 변경현황

⦁시공 가능 수량 반영

- 추진 및 도달기지 가시설 해체 제외

- 비개착구간 구조물(벽체, 상부슬라브) 제외

- 제잡비 정산 (건강보험료, 연금보험료, 퇴직공제부금 등)

⦁기 실정보고 승인 사항중 시공분 반영

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
직접공사비	1,797,104,604	1,642,446,646	-154,657,958
제 경 비	755,409,842	613,786,167	-141,623,675
정기안전점검비	30,000,000	8,000,000	-22,000,000
공 급 가 액	2,582,514,446	2,281,563,588	-317,968,990
부가가치세	258,251,444	226,454,545	-31,796,899
도급공사비	2,840,765,890	2,491,000,000	-349,765,889
관급자재비	89,445,608	116,639,424	27,193,816

○ 2차공사 주요 공사수량 및 공사비 변경 현황

공 종	수 량			금 액 (천원)
	당 초	변 경	증 ․ 감	당 초	변 경	증 ․ 감
1.개착구간구조물공사				5,085	1,392	-3,693
강관비계 외	-	-	-	-	-
철근가공및조립	-	-	-	-	-
말뚝두부보강	84본	23본	-	5,085	1,392
2.추진및도달기지설치공				199,749	145,887	-53,862
터파기 및 운반 외	2,900㎥	342㎥	-	57,484	28,230
가시설 시공(해체포함)	30본	20본		89,627	65,667
어스앙카공	12공	16공	4공	16,806	23,578
강재손료 외	85.073톤	64.15톤	-	35,832	28,412
3. 추 진 공				1,260,977	1,284,333	23,356
강관추진외	1개소	2개소	1개소	960,632	980,970
고유동콘크리트 외 자재비	649㎥	528㎥	121㎥	300,345	303,363
4. 굴 착 공				63,361	67,442	4,081
내부굴착	951㎥	951㎥	-	27,262	29,499
강관외부 정리	221㎡	221㎡	-	36,099	37,943
5. 구조물공				132,701	51,679	-81,022
콘크리트 타설 외	477㎥	151㎥	326㎥	87,164	45,608
방수쉬트 외	866㎥	-	866㎡	45,537	6,071
6. 부 대 공				55,085	36,748	-18,337
공사용 가림막 해체외	28m		28m	36,813	36,748
아스팔트 포장	73.7톤		73.7톤	18,272	-
8. 도로시설공사				6,379	2,584	-3,795
삼각표지판외	20EA	8EA	12EA	5,638	2,033
경광등 외	4개소	1개소	3개소	741	551
9. 조경공사				10,342	10,342	-
왕벗나무 이식 외	20주	20주	-	10,090	9,162
개나리제거	258주	258주	-	1,180	1,180
10. 공통부대공사				63,425	42,037	-21,388
기존옹벽철거, 신설	1식	1식	-	21,042	7,394
기타공사	1식	1식	-	42,9383	34,643
직접공사비				1,797,104	1,642,446	-154,658
정기안전점검비				30,000	8,000	-22,000
제 경 비				1,013,661	840,554	-173,107
도 급 액				2,840,765	2,491,000	-349,765

□ 검 토 결 과

상기와 같이 물가변동에 의한 계약금액 조정 및 실정보고 승인 사항에 대하여 적정성 검토 결과 신마포 나들목 신설공사의 전체분 제4회(2차분 4회) 설계변경 수량 및 금액은 적정한 것으로 사료됨.

신마포 나들목 신설 외1건

책 임 기 술 자   김 만  선