제6차 설계변경 자문회의(소위원회) 검토요약

건 명	검 토 의 견
서울역고가 바닥판 철거공사 - 작업자 추락방지용 안전발판 설치	적용단가는 설계도서 누락 등에 의한 변경으로 낙찰율 적용
서울역고가 바닥판 철거공사 - 가림막 디자인(시안) 변경설치	가림막 시공 등 기 계약된 단가가 있으면 계약단가 적용하고 단가적용이 곤란한 실사출력, 출력지 변경, UV코팅 등에 대하여 견적단가 적용 P4, P7공사기간이 서로 상이하니 확인 후 반영 P26 단가 변경현황 중 가림막 설치장비 당초477,849원에서 695,048원으로 변경된 증가 원인 작성 P33 견적대비표 가림막설치장비가 도로, 철도구간의 단위(㎡→ 댓수)를 수정하고 설치장비비 표기에서 계림과 극동이 서로 바뀌었으므로 수정