합   의   서

관리번호	제 호	계약번호	제 호
용 역 명	국사봉 및 사당배수지 건설공사 감독권한대행 등 통합건설사업 관리용역
계약금액 (4차)	당 초	일금사억일천일백삼십육만팔천원정(￦411,368,000)
	변 경	일금사억일천일백삼십육만팔천원정(￦411,368,000)
	증 감	-
총부기금액 (총괄)	당 초	일금일십삼억팔백일십이만오천원정(￦1,308,125,000)
	변 경	일금일십삼억팔백일십이만오천원정(￦1,308,125,000)
	증 감	-
당사는 상수도사업본부와 계약을 체결하여 용역중에 있는 상기 용역에 대하여 아래와 같이 계약내용이 변경됨에 합의하고 하등의 이의를 제기치 않고 계약자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 확약합니다.
합 의 내 용 ○ 계약금액(4차) ○ 총부기금액(총괄) 당초 :￦411,368,000 당초 : ￦1,308,125,000 변경 :￦411,368,000 변경 : ￦1,308,125,000 증감 : - 증감 : - ○ 계약기간(4차) ○ 계약기간(총괄) 당초 : 2019.01.01 ∼ 2019.10.09 당초 : 2016.12.05 ∼ 2019.10.09 변경 : 2019.01.01 ∼ 2019.10.30 변경 : 2016.12.05 ∼ 2019.10.30 ※ 국사봉배수지 건설공사의 전체공기가 21일 연장됨에 따라 공사준공에 맞추어 건설사업관리 용역에 대한 전체분 준공기한 연기(4차 용역기간 : 2019.01.01.∼10.30, 착수일 : 2019.02.15).
계약상대자 주 소 : 서울특별시 종로구 필운대로9 회 사 명 : 주식회사 대 한 콘 설 탄 트 대 표 자 : 이 영 민 (인) 주 소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 121 회 사 명 : 주식회사 이 산 대 표 자 : 이 원 찬 (인) 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 완암로 50, 넥스동 9층 909호 회 사 명 : 주식회사 한국종합엔지니어링 대 표 자 : 한 명 웅 (인)

서울특별시 상수도사업본부 분임재무관 귀하