『서울시립과학관 관측을 위한 구축물 설치』

기본설계용역 과업지시서

2019.  4.

목          차

1. 총 칙

1.1 과업의 명칭

1.2 과업의 목적

1.3 과업의 개요

1.4 일반사항

1.5 적용기준 및 시방서

2. 일반지침

2.1 공통사항

2.2 조사 및 자료수집

2.3 기본설계단계

2.4 실시설계단계

2.5 별도 추가업무

3. 기술지침

3.1 공통지침

3.2 분야별설계지침

4. 성과품 작성 및 납품

4.1 일반사항

4.2 성과품의 작성

4.3 성과품의 납품

4.4 부속서류

1. 총 칙

1.1 과업의 명칭

서울시립과학관 천체관측실 구축을 위한 설계용역

1.2 과업의 목적

본 과업은 지역시민들에게 천문・과학 기술에 대한 관심 및 이해 제고의 경험 기회를 확대하고 야외 휴게 시설과 천문・우주과학을 결합한 시민휴식공간을 조성하기 위해 천체관측실 설치를 하고자 기본설계 및 실시설계를 수행함에 목적이 있다.

1.3 과업의 개요

1) 과업의 위치(대지위치)

: 서울특별시 노원구 한글비석로 160 서울시립과학관 메이커스튜디오 옥상 (약 33㎡)

2) 과업의 범위

(1) 설계범위 : 기본 및 실시설계

(2) 기존건물규모 : 지하1/지상3층, 연면적 12,330㎡

(3) 예정공사비 : 금284,800천원(금이억팔천사백팔십만원) *부가가치세포함

(4) 용역내용

- 메이커스튜디오 옥상 천체관측실 약 33㎡ 증축설계 (건축/구조/냉난방/철거)

- 기존 구조검토 및 구조보강 설계 포함

※ 용역진행중 관련규정(법규) 및 예산가용 범위내 공사범위(과업내용) 변경 가능

3) 과업기간

:  본 과업의 기간은 계약일로부터 30일간으로 한다.(공휴일 포함)

4) 발주기관 및 연락처

(1) 서울시립과학관 (담당자: 신지혜 주무관, E-MAIL : sjh0306@seoul.go.kr)

(2) 주소 : 서울특별시 노원구 한글비석로 160

(3) TEL : (02) 970-4542

(4) FAX : (02) 970-4597

5) 공사사항

(1) 공사발주 예정시기 : 2019년 05월

(2) 공사예정기간 : 2019년 6월 ～ 2019년 11월(6개월)

(3) 공사 발주방법 : 미정

1.4 일반사항

1) 착수신고서 및 기타 제출서류

:  계약상대자는 계약문서에 명시한 착수기간 내 다음 제반 서류를 제출하여야 한다.

(1) 착수보고서

a. 사업 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

b. 예정 공정표

c. 용역비 내역서

(2) 기타 용역 수행에 필요한 사항

2) 과업수행계획서

: 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 아래내용이 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.(승인된 과업수행계획서는 본 용역 계약 서류의 일부로 간주되며 계약서와 동일한 효력을 갖는다)

(1) 각 관련주체(건축, 기계, 전기, 소방 등)간의 업무범위와 책임

(2) 계약상대자는 본 과업의 최종 설계보고서상에 참여기술자의 명단과 실제로 참여한 업무 내용을 구체적으로 명기하여 제출하여야 한다.

(3) 설계품질 보증계획

(4) 목표예산(예정공사비 : 1.3 과업의 개요 참조)을 고려한 설계운용계획

a. 계약상대자는 발주기관의 예정공사비를 벗어나는 과도한공사비 증액, 부실설계, 공사도 중 설계변경에 의한 공사비 증액이 발생되지 않도록 설계 초기단계부터 예측 가능한 설계를 하기 위해서 전문분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조체계 구축방안을 제출하여야 한다.

b. 본 과업내용 중 설계 지침상 친환경적 계획요소로서 자원의 효율적 활용 등 설계조건의 반영 정도를 판단하기 위하여 여러 공법 및 시공등급별로 소요공사비용을 면밀하게 검토, 제출하여야 한다.

(5) 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

3) 업무협의 및 공정보고

(1) 계약상대자는 계약 후 7일 이내 착수신고서 제출시 발주기관과 1차 업무협의를 한다.

(2) 2차 업무협의는 과업수행계획서 제출시 하고, 이후 다음과 같은 경우에는 반드시 업무협의를 한다.

a. 조사 및 자료 수집 완료 또는 공법 결정시

b. 기본계획 완료시

c. 실시설계 완료시 (유지관리 계획 포함)

d. 성과품 작성시

(3) 상기 협의를 포함하여 과업수행기간 동안 발주기관과 계약상대자는 주 1회 이상의 업무협의를 갖는다.

(4) 계약상대자는 과업예정기간동안의 과업수행계획서의 예정 공정표를 기준하여 공정보고서(건축사 명의)를 작성하고, 발주기관에 보고하여야 한다.

4) 관련기관 인․허가 및 협조

: 계약상대자는 본 과업수행 중 구조물 계획 및 설계 시에는 관련부서 및 발주기관과 협의하여야 한다.

5) 설계 검토 및 기술심의 (필요 시)

(1) 본 과업수행 기간 중 발주기관은 설계사항에 대한 검토 및 자문을 할 경우 계약상대자는 자문에 필요한 자료 준비 및 협조를 하여야 한다.

(2) 본 과업 수행 시 예정공사금액 또는 관련규정 변경으로 서울특별시 심의위원회 심의를 받아야 할 경우, 계약상대자는 이에 대한 설계 자료를 준비하여 제출하여야 한다.

(3) 설계자문위원회의 자문사항에 대해서는 검토 후 설계에 반영 여부를 발주기관에 통보하고승인을 득한 후 설계에 반영한다.

(4) 서울특별시 심의위원회 심의를 받는 경우, 심의 지적 사항에 대하여는 검토 후 반영여부를 발주기관에 제출하여 승인을 받도록 한다.

(5) 본 과업수행 기간 중 발주기관은 상기 사항과는 별도로, 필요시 수시로 본 과업의 설계 사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는 계약상대자가 준비하여야 한다.

6) 하도급의 범위

(1) 계약상대자는 본 설계 용역을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

(2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

a. 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

b. 건축구조, 건축기계설비 분야의 설계 작업

c. 제도 및 도면작성 등 작업

d. 건설공사의 수량 및 견적업무

e. 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

(3) 계약상대자는 발주기관이 특별히 인정하는 업무에 대하여 부분적으로 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 당해 용역 착수시 설계협력업체 명단을 발주기관에게 제출하여 승인을 받는다.

이때 계약상대자는 하도급 된 당해 업무에 대하여도 모든 책임을진다.

7) 설계에 사용하는 재료

(1) 공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업규격(K.S), 각종 표준시방서 규정에 적합한 것으로 경제성(LCC 고려), 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영하며, 이를 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대하여는 “발주기관”의 승인을 받되, 설계서에 KS, 표준시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용하도록 공사시방서 및설계도면에 명시하여야 한다.

(2) 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무)에 따른 고효율 기자재를사용하여야 한다.

(3) 인체에 유해한 물질(예 : 석면 등)이 함유된 자재는 사용을 지양하며, 가능한 친환경자재의 사용을 고려한다.

8) 타 계약상대자와의 업무한계

: 다수의 계약 상대자가 공동계약 또는 별도 계약으로 일정 지역 내의 과업을 수행하여 서로간의 업무한계가 명확하지 못할 우려가 있는 경우, 계약상대자간의 업무 한계를 명확히 구분하여야 한다.

9) 발주기관의 제공 자료

(1) 본 과업수행을 위하여 발주기관이 제공할 자료는 다음과 같다.

a. 기존 건축/구조/기계/전기 설계도면 1부

b. 기타 발주처에서 확인 가능한 자료(지장물 등) 1부

(2) 상기 자료는 설계 참고용으로 제공된 것으로 계약상대자는 그 내용의 오류, 정확성을 검토하여 확인 후 설계하여야 한다.

10) 품질관리방안

(1) 계약상대자는 발주처의 요구가 있을 경우, 과업수행계획서에 설계 과업 수행시 발생하기 쉬운 오류와 설계 성과품의 품질 향상을 위한 품질관리 방안을 작성하여 제출하여야 한다.

(2) 품질관리 방안에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

a. 품질관리 조직표

b. 설계 점검 흐름도

c. 점검 시기 및 회수

d. 점검 사항 및 점검 방법

e. 기 타

11) 언 어

: 과업 수행상 사용 문서는 한글로 작성하며, 사용 언어는 한국어로 하며 설계서나 보고서 작성과 관련된 통역 및 번역에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

12) 기 타

(1) 계약상대자는 착수와 동시에 작업일지를 작성한다.

(2) 계약상대자는 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 소유권 및 저작권 등에 관련한 제반사항은 저작권법이 정하는 바에 따른다.

(3) 설계용역 성과물의 저작권 및 특허권은 용역준공 후 그 사용권은 발주기관에 있다.

1.5 적용기준 및 시방서

1) 적용기준 및 시방서

(1) 본 설계용역은 건축, 토목, 조경, 전기, 통신, 소방 관계법규 및 규정에 따른 설계기준, 시방서, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 등과 서울시 각 분야별 전문시방서에 의거 수행하되, 설계도서의 작성 및 제출에 관한사항은 『설계도서 작성 기준(국토해양부

2009-906,2009.9.21』 및 『설계용역관리편람 제3권 건축부분(서울특별시 2011.12)』을

준용한다.

(2) 지식경제부에서 새로 제정되는 KSC IEC, KSC ISO 규정을 적극 참고 반영 하도록 한다.

(3) 계약상대자는 과업수행계획서에 설계시 적용할 기준 및 시방을 포함하여 제출한다.

2. 일반지침

2.1 공통 사항

1) 용어의 정의

:  과업내용서 작성시 주로 관계되는 용어의 정의는 다음과 같다.(건축법 제2조, 건설기술관리법 제2조, 건축사법 제2조)

(1) “건축물”이라 함은 토지에 정착하는 공작물 중 지붕과 기둥 또는 벽이 있는 것과 이에 부수되는 시설물, 지하 또는 고가의 공작물에 설치하는 사무소․공연장․점포․차고․창고 기타 대통령령이 정하는 것을 말한다.

(2) “건축”이라 함은 건축물을 신축․증축․개축․재축 또는 이전하는 것을 말하다.

(3) “건축주”라 함은 건축물의 건축․대수선, 건축 설비의 설치 또는 공작물의 축조(이하 “건축물의 건축 등”이라 한다.)에 관한 공사를 발주하거나 현장 관리인을 두어 스스로 그 공사를행하는 자를 말한다.

(4) “설계자”라 함은 자기 책임 하에(보조자의 조력을 받는 경우를 포함한다)설계도서를 작성하고 그 설계 도서에 의도한 바를 해설하며 지도․자문하는 자를 말한다.

(5) “설계 등 용역”이라 함은 건설기술관리법 제2조 제3호의 건설기술용역 중 다음 각 목의 1에해당하는 역무를 수행하는 것을 말한다.

a. 건설공사에 관한 계획․조사․설계․설계감리 및 안전성검토

b. 시설물의 검사․관리 및 운용

c. 건설공사에 관한 시험․평가․자문 및 지도

(6) “설계감리”라 함은 건설공사의 계획․조사 또는 설계가 관계법령 및 건설기술관리법 제39조각 호의 건설공사 설계기준 및 건설공사 시공 기준 등에 따라 품질 및 안전을 확보하여 시행될 수 있도록 관리하는 것을 말한다.

(7) “건축사”라 함은 국토해양부장관이 시행하는 자격시험에 합격한 자로서 건축물의 설계 또는공사감리의 업무를 행하는 자를 말한다.

(8) “건축사보”라 함은 건축사법 제23조의 규정에 의한 건축사사무소에 소속하여 건축사업무를 보조하는 자중 국가기술자격법에 의하여 건축, 토목, 전기, 기계, 화공 및 세라믹, 통신, 환경, 에너지, 국토개발 또는 안전관리 기타 대통령령이 정하는 분야의 기술사, 기사 또는 산업기사 자격을 취득하거나 건축사법 제15조의 규정에 의한 건축사예비시험에 합격한 자로서 국토해양부장관에게 신고한 자를 말한다.

(9) “설계”라 함은 자기 책임하에(보조자의 조력을 받는 경우를 포함한다) 건축물의 건축․대수선,건축설비의 설치 또는 공작물의 축조를 위한 도면․구조계획서 및 공사시방서 기타 국토해양부령이 정하는 공사에 필요한 서류(이하 “설계도서”라 한다)를 작성하고 그 설계도서에서의도한 바를 해설하며 지도․자문하는 행위를 말한다.

2) 적용 요령

(1) 용역의 수행은 본 과업내용서에 의하되 세부적인 사항은 계약상대자가 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

(2) 본 과업내용서 외에 정부, 서울특별시 관계 규정 및 각종 시행 기준을 준수하여야 하며, 본 과업내용서와 상이한 부분이 있을 때에는 본 과업내용서를 우선 적용한다.

(3) 본 과업내용서에서 제시된 사항은 계약상대자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주기관과 협의하여 정한다.

(4) 본 과업내용서에 대한 대안은 제시될 수 있으며 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출, 발주기관의 승인 후 채택될 수 있다.

(5) 발주기관 및 관계 부서와 긴밀한 협조 체제를 유지하고 분야별 전문가의 참여를 유도, 보다광범위한 의견을 집약시킨다.

(6) 각종 계산 기준은 외국의 기준을 적용할 수 있으나, 이 경우 발주기관과 협의하여야 한다.

(7) 신개발 공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영시에는 검토 보고서가 있어야 한다.

(8) 설계도면 및 시방서에 특정 제품을 사용할 수 없으며, 부득이한 경우 발주기관에서 운영하는 설계자문회의 또는 기술심의를 거쳐 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

3) 발주기관, 계약상대자의 책임 및 업무

(1) 설계의 목표와 추진 절차

a. 계약상대자는 건설공사의 시행 과정에 대한 전문적 기술 능력과 경험을 가지고 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정 계획, 자금 계획 등 사업 계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 해야 한다.

b. 계약상대자는 합리적으로 설계를 추진하기 위해 용역 착수시 계약에 의거 발주기관이 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 하고, 기본적인 프로그램의 요구 조건들을 판단하고 결정하여 설계 요구 조건(Design Criteria)을 작성하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

c. 계약상대자가 각종 계획이나 결과에 대하여 승인을 요청하였을 경우 부득이한 경우를 제외하고 5일 이내에 결정하여 계약상대자에게 통지하여야 한다.

d. 계약상대자는 발주기관의 승인없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

e. 계약상대자는 건축과 관련된 각 전문 분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계 용역의 각 단계별 성과품을 작성하여 그에 대해 총체적 책임을 진다.

f. 설계는 관련 법규와 계약 조건, 발주기관과 협의된 기본설계 조건을 만족해야 한다. 만약, 설계용역의 시행 과정에서 변경 요인이 발생했을 경우 계약상대자는 발주기관에게 보고 할 책임이 있고 관계법규 및 계약서 검토, 발주기관 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 모색해야 한다.

g. 발주기관은 언제든지 설계 용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있도록 적극 협조하여야 하며, 계약상대자는 계약 조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대해 즉시 발주기관에 알려야 한다.

h. 계약상대자는 계약의 범위 내에서 설계를 수행하는 동안 대지의 현 상황을 준수하여야하며, 모든 설계도서에서 실제 조건을 정확하게 표시 반영하여야 한다.

i. 계약상대자는 계약을 체결할 때와 설계용역을 착수할 때, 설계도서를 완성하여 제출할 때는 반드시 대지를 방문하여 계약 및 설계도서와 상이점이 발생되지 않도록 하여야 한다. 대지의 조건에 중요한 변경이 발생되었을 때는 발주기관에 보고하여 필요한 조치를 취하 여야 한다.

j. 계약상대자는 설계 추진과정에서 건축, 기계, 전기 등 각 공종별로 서로 긴밀히 협조하여야 하며, 세부 설계내용에 상위됨이 없도록 만전을 기하여야 한다.

k. 계약상대자는 용역 종료 후 공사 진행과정 또는 기타 사정으로 설계도면의 미비 또는 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주기관이 이에 대한 보완자료를 요구하였을 경우 자신의 비용으로 지체 없이 이를 이행하여야 한다.

l. 계약의 수행 중 계약당사자간에 의견을 달리한는 경우 협의에 의하여 결정하되, 협의 불가시에는 지방자치단체 용역계약 일반조건의 제9절-3의 규정에 따른다.

(2) 착 수

계약상대자는 발주기관과 계약 후 7일 이내에 설계 용역을 착수하여야 한다. 착수시에는 착수계와 용역추진 예정공정표를 제출 승인을 받아야 한다.

(3) 공정 계획

a. 계약상대자는 설계 용역의 공정에 대하여 막대 공정표나 네트워크(Net Work)공정표를 작성하여 발주기관에 제출하여 승인을 받거나 발주기관이 동의할 수 있는 새로운 공정을제안한다.

b. 공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 발주기관이 동의한 공정 계획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

c. 최초의 공정 계획이 계약 조건에 포함되지 않았다면 발주기관과 계약상대자의 용역 착수회의에서 제안되고 검토되어져야 한다.

d. 공정 계획은 용역 착수시 뿐만 아니라 용역 수행 과정에서도 항상 재검토되어 적절한 대응이 이루어질 수 있도록 한다.

(4) 업무점검표(Check List)

a. 계약상대자는 발주처의 요구가 있을 경우, 계약의 성공적인 완성을 위해 모든 업무에 대하여 검토 가능한 목록을 작성하여야 한다. 이러한 업무점검표는 업무 진행에 따라 관리되고 필요 시 수정, 보완되어야 한다.

b. 업무점검표 각 항목에 있어서 업무의 시작과 완성 날짜는 정확하여야 하고 전체 공정계획과 일치하여야 한다. 이때 전체 공정 계획에 영향을 줄 수 있는 업무에 대하여는 특별히 주의하여야 한다.

c. 업무점검표는 각 공정에 맞추어 발주기관에 제출되고 검토․보완되어야 한다.

(5) 공정보고

용역의 진도를 보여주는 공정보고는 발주처가 지정한 날짜에 발주기관에 제출되어야 하고,만약 공정이 지연되면 그 사유를 명시하고 적절한 대책을 수립하여야 한다.

(6) 인․허가 및 승인

용역 착수시 인․허가 및 승인이 요구되는 목록을 작성하여 발주기관에 제출함으로써 업무범위를 명확히 하고, 필요한 경우 발주기관의 협조를 받아 필요한 도서를 작성함과 동시에 인․허가 취득에 성실히 노력하여야 한다.

(7) 하도급의 범위

a. 계약상대자는 발주기관으로부터 도급 받은 설계 용역을 다른 설계자에게 일괄하여 하도급 할 수 없다.

b. 계약상대자는 발주기관이 특별히 인정하는 업무에 대하여 부분적으로 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며 용역 착수 시 설계 협력 업체 명단을 발주기관에 제출하여 승인을 받는다. 이때 설계자는 하도급 된 당해 업무에 대하여 모든 책임을 진다.

c. 설계 등 하도급의 범위 및 내용

- 각종 조사․측량 및 이와 유사한 작업

- 건축구조, 건축기계설비 설계작업

- 제도 및 도면 작성 등 작업

- 건설공사의 수량 내역서 작성 및 견적 업무

- 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

(8) 업무 연락

업무 연락은 계약상대자와 발주기관이 상호 근거를 남길 수 있는 방법으로 수행되어야 하며, 용역 착수시 계약상대자가 과업수행계획서에서 업무 연락의 절차, 조직, 방법 등을 체계적으로 제안하여 발주기관의 승인을 받아 시행하여야 한다.

(9) 회 의

a. 설계 용역과 관련된 회의는 계약상대자 또는 발주기관이 필요하다고 판단할 때 항상 소집될 수 있어야 하고 회의의 목적이 분명하며 소요 시간이 가능한 짧아야 하고, 반드시회의록을 작성하여 상호 보관하여야 한다.

b. 또한 회의는 진척된 공정 보고와 회의에서 제안된 모든 안건이 포함되어야 하고, 회의 소집자는 회의 3일전까지 모든 참석자에게 회의 정보를 전달하여야 한다.

c. 회의록 작성시에는 일련번호, 날짜, 장소, 참석자, 안건, 결론, 질문, 책임 소재와 일정 등을 포함한다.

(10) 보 안

a. 업무 내용의 비공개 : 계약상대자는 발주기관과 업무 수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 발주기관의 승인없이 공개해서는 안 된다.

b. 성과품은 발주기관에 최초 제출 : 계약상대자가 작성한 모든 발주기관 관련 성과품에 대하여 이를 공개, 공모 기타 다른 행위에 앞서 발주기관에 최초로 제출되어야 한다.

c. 검토 및 승인 창구 단일화와 절차 체계화 : 계약상대자와 발주기관의 관계에서 성과품, 보고서 등에 대한 검토 및 승인 창구는 단일화되어야 하고, 절차가 일정한 양식을 통하여 체계화되어 보안 유지가 용이하도록 하여야 한다.

(11) 계약서와의 관계

a. 발주기관과 계약상대자는 계약 내용 수행에 상호 책임

b. 발주기관의 승인으로 업무 내용 변경시 계약 변경

- 발주기관은 설계 용역 계약의 관리에 책임이 있고, 계약상대자는 발주기관의 승인이 없는 한 계약서를 위반할 수 없다.

- 업무 내용의 변경은 발주기관과 설계자가 문서화를 통하여 상호 승인을 하여야 하고,

이는 계약 변경의 근거 서류가 된다.

- 계약서 및 본 과업내용서에 명기되지 아니한 사항에 대해서는 발주기관과 계약상대 자가 상호 협의하여 결정하기로 하며, 이때 업무 내용의 변경이 발생할 때는 “b”항에 따르거나 지방자치단체 용역계약 일반조건 제6절-1의 규정에 의한다.

(12) 발주기관 승인

a. 계약상대자는 용역 착수시 작성하는 과업수행계획서에서 성과품 및 자료에 대한 발주기관 승인, 검토, 자문, 자료 제출의 범위와 절차 및 기간을 제안하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

이때 발주기관의 적절한 검토 소요 기간은 설계자의 용역 수행 기간에 별도로 반영한다.

b. 계약상대자는 발주기관에 의해 소집되는 업무 회의에 참석하고 성과품을 승인요청서와 함께 제출한다.

(13) 대지 현황 자료

a. 발주기관의 대지 현황 자료 등의 준비 및 제공 발주기관은 필요시, 법규적 현황, 도로 이용, 벤치마크와 기준선 등 지형과 토지에 대한 정보와 각종 조사 자료(보링테스트결과, 지하 수위, 토질 시료, 실험 결과서, 기타 계약의 이행에 필요한 사항으로 설계자의 지침이 될 만한 자료)를 제공할 수 있다. (또는 이를 설계 용역에 포함하여 계약할 수 있다.)

b. 계약상대자의 분석 및 검토

- 계약상대자는 성실하게 전문적 지식을 이용하여 제공된 자료 및 서류에 대해 조사․연구를 해야 한다. 업무의 수행에 따라 추가로 요구되는 자료는 서면으로 발주기관에 제출하여 필요한 조치를 취해야 한다.

- 계약상대자는 대지의 현황에 대한 실사를 실시하여 건설공사의 모든 단계에서 필요한 사항(인접 대지에 손실을 초래할 사항, 부적절하거나 불확실한 시설, 기타 건설공사 장애요인 등)을 조사하여 발주기관과 협의하고 해결책을 제시하여야 한다.

- 계약상대자는 대지 경계선에 대한 자료, 경사, 높이, 하수로, 지하 매설물, 이용 가능한 시설이나 상태, 조사 자료, 일반적 기록, 추가 정보 등을 참조하여 설계하여야 한다.

(14) 기존 시설의 처리

a. 계약상대자는 본 사업과 관련하여 기존 구조물이 있어 공사 내용의 변경, 추가 등이 예상될 때 이에 대한 상세한 조사를 해야 한다.

b. 계약상대자는 발주기관에 의해 제공되는 모든 기존 구조물의 자료에 대하여 검토하고, 매설된 구조물에 대해 충분한 조사를 통해 위치 및 숫자를 명백히 해야 한다.

c. 계약상대자는 본 사업과 관련하여 기존 구조물의 증축, 개축 또는 철거가 필요할 때 이를설계에 반영하여야 한다.

(15) 공사비와 예산

a. 계약상대자는 용역 수행시 추정 공사비를 지속적으로 검토하고 발주기관과 협의하여 적정 예산의 수립 및 관리에 노력해야 한다.

b. 개산 견적과 별도로 상세 견적은 계약서에 의하고, 이때 계약상대자는 설계 용역이 진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사 범위, 시공 중 예상되는 추가 발생 비용, 기존 시설의 일시 이동 비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을종합하여야 한다.

(16) 설계 자문 (필요시)

a. 설계자문위원회의 위원은 중앙위원회, 지방위원회, 특별위원회, 다른 발주기관의 설계자문위원회 또는 관계 시민단체가 추천하는 자 및 당해 분야의 전문가 중에서 필요하다고 인정될 때에는 위원을 사안별로 임명 또는 위촉할 수 있다.

b. 설계자문은 건설공사의 안전과 시공의 적정성 등 설계의 타당성을 사전에 검토하여 부실설계를 방지함을 목적으로 한다.

c. 설계자문위원회의 운영에 필요한 비용은 당 시행부서가 별도로 확보한다.

d. 설계자문위원회의 운영은 설계 등 용역의 착수단계, 기본계획, 실시설계 및 성과품 작성단계에 걸쳐 설계자문위원회의 자문을 받는 것으로 한다.

c. 계약상대자는 본 설계자문위원회의 설계 자문 내용에 대하여 특별한 사유가 없는 한 그 결과를 설계에 반영하는 등 필요한 조치를 하여야 하며, 이에 따른 용역 내용의 변경 등 의 발생할 경우에는 발주기관과 협의하여 정한다.

d. 기타 설계자문위원회의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항은 발주기관이 정한다.

(17) 발주기관의 중간 검토

계약상대자는 다음과 같은 발주기관의 중간 검토에 필요한 사항을 설계 용역의 공정에반영하여야 한다. 단, 검토 기간은 과업수행계획서 제출시 발주기관과 협의하여 정한다.

계약상대자는 중간 검토에 필요한 제반 서류를 제출하고 인․허가 및 승인 절차를 거쳐 다음 단계로 설계를 진행하며, 서류의 제출에 있어 별도의 비용이 발생할 경우는 발주기관과 협의하여 결정한다.

a. 목 적 : 용역 감독 공무원의 전문성을 보완하고 과업수행 용역회사 종사원의 타업무

수행을 방지하고 관련 부서간 사전 협조로 용역 성과품의 품질 향상

b. 대 상 : 모든 설계 용역

- 시행 방법 : 설계 용역 발주 시 검토 위원을 위촉하여 용역 수행 진도에 따라 4단계로 구분 검토

- 과업수행계획서 제출시 : 용역착수시

* 사업 추진 계획, 지반 조사 등 기초 자료 조사 계획 적정 여부

* 참여 인력의 기술 능력, 외주 집행 계획 적정 여부 등

* IBS, 자연에너지(태양열 등)의 환경친화형 설계에 따른 공사비용 검토

c. 초기 단계 (공정 20%) : 기본계획시

-  종사자의 용역 사업 이해도

- 각종 조사 자료의 적정 여부

- 기본계획안의 타당성 및 대안 검토 적정 여부

-  각종 설계안의 경제성, 시공성, 적정여부

d. 중간 단계 (공정 50%) : 실시설계시

-  각종 설계 기준 적용 적정 여부

-  기본계획안 및 비교안 검토시 세부 사항 검토 적정 여부

-  공사중 발생할 수 있는 유해환경(소음, 먼지 등)에 대한 보호대책여부

-  각종 설계안의 경제성, 시공성, 적정 여부

e. 마무리 단계 (공정 90%) : 성과품작성시

- 구조 등 각종 계산 적정 여부

-  관련 법규 및 시방서 내용 부합 여부 등

f. 검토 위원 구성 : 5급 이상 관련 부서 공무원 3～5명 정도

(검토 단계에 따라 필요시 외부 전문가 1～2명 추가)

g. 주관 부서 : 용역 시행 부서

2.1 조사 및 자료수집

1) 현지답사

:  계약상대자는 현지 답사하여 현지조건에 계획시설물이 적합한 지를 확인하여야 한다.

2.3 기본설계 단계

계약상대자는 사전 조사 및 기본계획 단계에서 발주기관에 제출․승인된 결과에 의하여 다음과 같이 기본설계를 수행해야 한다.

(1) 기본 개념이 기본계획 단계에서 결정되지 않았다면, 계약상대자는 사업 프로그램을 평가하고, 3가지 이상(또는 발주기관이 승인키 위하여 요구되는 합리적인 수량)의 기본설계안을 준비하여 발주기관이 선택할 수 있도록 하여야 한다. 이들은 지역 지구에 따른 건축 법규 분석과 추정 공사비 산출을 포함한다.

(2) 외벽, 지붕, 구조, 설비 시스템과 배치, 방향, 지형 등에 대한 여러 가지 대안들을 제공해야한다.

(3) 설계 요구 조건(Design Criteria)을 만족해야 한다.

1) 용역 내용

(1) 정보 수집 및 준비

a. 설정되는 조건의 파악

b. 현지 조사 : 사전 조사에 의한 각종 조사 자료의 수집

c. 유사 사례 조사

d. 관계법령 조사

e. 관련 기관 또는 부서와의 협의

d. 일정표 조정

f. 각종 협의

(2) 조건 설정

a. 설계 조건의 설정

- 요구 성능 확인

- 법령 및 기타 제약 조건의 정리

- 안전 성능의 설정

- 공사 예산의 파악

b. 설계 방침의 설정

- 설계 개념의 확립

- 개략 시방서의 설정

- 사용 재료 및 기기 등의 설정

(3) 비교 및 검토

a. 성능면에서의 기능의 검토

b. 설계 이념․의장 및 구조 형식 등의 검토

c. 계획을 실행하기 위한 공사비의 검토

d. 계획을 실행하기 위한 시공성의 검토

e. 시방, 구조 방식, 설비 방식 등의 종합적 검토

f. 유지관리상의 검토

g. 사용 기기, 재료 등의 검토

(4) 종합화

a. 기능 배치 계획의 책정

b. 공간 구성 계획서의 책정

c. 공사비 배분 계획의 책정

d. 동선 계획의 책정

e. 방재 계획의 책정

f. 시설 배치 계획의 책정

g. 평면, 입면, 단면 계획의 책정

h. 구조 계획의 책정

i. 내외 환경 계획(조명, 소음, 방진, 공조 등)의 책정

j. 조경 계획의 책정

k. 각종 설비(전기, 급배수, 위생, 소화, 공조, 환기, 특수설비 등)계획의 책정

l. 에너지 절약 계획의 책정

m. 각종 계획의 종합 조정

2) 착수 회의

(1) 사업 관련 분야의 대표자 회의는 용역 착수시 개최되어야 하고, 이때 대지 현황, 설계 기준 또는 자료, 계약 조건 등과 같은 모든 중요한 사항들이 토의되어야 한다.

(2) 계약상대자는 과업수행 점검표와 공정 계획, 각 단계별 일정 등을 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

3) 용역 범위의 승인

: 착수 회의시 계약상대자의 용역 범위에 대하여 토의하고 계약 조건에 따라 발주기관의 승인을 받는다.

4) 제출 도면

: 제출 도면은 설계용역관리편람 제3권 건축분야(2011. 12. 서울특별시) 성과품작성기준에 의거 성과품을 작성하여 제출한다.

5) 업무 수행 절차

(1) 계약상대자는 과업수행에 요구되는 중간 검토용 보고서를 도식 또는 서술 형식으로 발주기관에 제출하여 승인을 받는다.

(2) 문제 발생시 발주기관과 긴밀히 협의하여 해결하고 구술에 의한 의사 결정 또는 지시는 반드시 회의 결과로서 문서화시킨다.

(3) 계약상대자는 발주기관에 의해 소집되는 업무 회의에 참석하고 성과품을 승인요청서와 함께 제출한다.

2.4 실시설계단계

계약상대자는 기본계획 및 기본설계를 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 건설공사의 실시설계를 실시하여야 한다.

(1) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 당해 시설물의 유지관리에 필요한 비용․인력․장비 등 유지관리방법을 제시한다.

(2) 굴착이 수반되는 경우에는 굴착시 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전 관리에 관한 사항이 충분히 검토․반영되도록 한다.

(3) 공사기간 부족으로 부실공사가 발생하지 아니하도록 태풍․혹서․혹한 등으로 인한 작업 불가 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

(4) 기본설계도서와 공사비 산출서가 발주기관에 의해 승인되고 실시설계의 착수가 지시되면, 계약상대자는 발주기관의 공사계약에 요구되는 도서를 준비해야 한다.

(5) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 구조 계산서, 공사비 내역서, 발주기관이 승인하는 공사 공정표와 입찰을 실시하기 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

(6) 도면과 시방서는 이용자수와 행태를 고려한 공간 요구 조건을 충족시키기 위해서 필요한 모든 정보를 포함하여야 한다. 또한 주어진 범위 내에서 입찰자들의 완벽한 건설공사 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량 산출에 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 한다.

(7) 계약상대자는 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로 발주기관에 제시하고 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우에 도면을 수정한다.

1) 용역 내용

(1) 정보 수집 및 준비

a. 설정되는 조건의 상세한 파악 (조건의 파악)

b. 현지 상세 조사 및 확인

c. 사용 재료 및 기기 등에 관한 조사 및 확인

d. 특수 공법 부분의 상세 조사

e. 각종 법령 수속에 대한 협의

f. 일정표 조정

g. 담당 협의

(2) 조건 설정

a. 기본설계에 의한 설계 조건의 상세한 설정

- 각 부분의 요구 성능의 확인

- 법령, 기타 제약 조건의 각 부분 파악

- 각종 하중 조건 및 해석 수법 설정

- 각 설비의 요구 성능의 확인

b. 공사비의 파악

c. 기본설계에 의한 설계 방침의 전개

d. 기기류의 배치 및 사용 방식의 결정

e. 배관, 배선 등의 계통 및 경로의 설정

(3) 비교․검토

a. 각 부분 기능의 검토

b. 공간 표현의 검토

- 형태의 검토

- 사용 재료의 검토

c. 공사비의 검토

d. 시공 기술의 검토

e. 사용 기기 및 사용 재료의 검토

f. 각종 설비 방식의 검토

g. 유지관리에 관한 검토

h. 관계법령 등의 조합 및 검토

(4) 종합화

a. 외부 공간 설계

b. 내부 공간 설계

c. 평면, 단면, 입면 및 상세설계

d. 각 부분 사용 재료 및 시방의 설정

e. 방재 설계

f. 색채 계획의 책정

g. 공사비 계산과의 조정

h. 응력 해석 및 구조 설계

i. 각종 설비의 설계

j. 사용 재료, 사용 기기 및 사양의 결정

k. 각종 설계 등의 조정

2) 착수 회의

(1) 사업 관련 분야의 관계자 회의를 통해 설계자의 공정과 계획 및 기본설계도서의 이해에 대한 주요한 결정을 토의하여 최종 실시설계도서 준비에 착수한다. 계약상대자의 공정 계획의 검토, 초기 계획의 제안을 통해 용역 계약에서 의도하는 모든 부분을 명확히 이해되도록 한다.

(2) 계약상대자는 대지를 검토하고 조사하여 필요한 자료를 제공한다.

3) 용역 범위의 승인

:  모든 용역 업무 범위는 발주기관에 승인을 받고, 성과품을 승인요청하기 전 ‘승인용’표식과 필요 자료를 제출해야 한다.

4) 최종 현장 방문

:  사업 관련 분야의 대표자들은 최종 도서 승인요청 전 30일내 현장을 방문하여야 한다.　최종 현장 방문 중 재검토해야 될 사항은,

(1) 대지의 사용자 (거주자)

(2) 공사에 영향을 미치는 조건

(3) 자재 야적장, 현장 사무소, 기타 공사 관련 지원 시설

(4) 공사 계약에 반영되지 않은 새로운 사항의 기존 시설 철거 또는 신축

(5) 기존 공급 시설

(6) 건물의 기능 가동에 필요한 기간 요구 사항

5) 최종 공사 계약 서류의 준비

:  계약상대자는 최종 성과품을 발주기관에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 최종 설계도서는 설계용역관리편람 제3권 건축분야(2011. 12. 서울특별시) 성과품작성기준 및 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토해양부고시)에 의한다.

6) 도면의 분야별 협업 및 조정

: 설계의 각 분야간 간섭되는 부분은 계약상대자가 책임을 지고 협업․조정하여야 한다.

(1) 계약상대자는 정확한 축척, 기계 장비의 교체, 복도 및 기타 필요한 면적을 나타내는 종합적인 단면 계획을 수행한다.

(2) 부적절한 도면이나 설계도서 간의 간섭은 계약상대자가 책임진다. 계약상대자는 입찰단계,시공단계, 발주기관에 의한 추가 또는 보완되는 도면을 작성한다.

7) 시방서

:  계약상대자는 실시설계 전 발주기관의 내부 시방서 기준에 의하거나 계약상대자가 합리적으로 검토․작성하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

8) 색채와 재료 견본

계약상대자는 색채와 재료의 견본을 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다 또한, 재료의 지정색은 주변과의 색상조화를 고려하고, 색채계획은 전체적인 색상(외부 및 실내마감재)이 조화가 이루어지도록 계획한다.

(1) 외부 마감 재료 계획

(2) 내부 마감 재료 계획

(3) 색채 계획

9) 공사비 산출

(1) 계약상대자는 실시설계를 진행하면서 지속적으로 공사비를 검토하고 변경이 필요할 때는 발주기관에 자문 또는 승인을 받는다. 만약 공사비 한계를 초과할 경우 계약상대자는 비용절감을 검토하여야 하고, 예상 범위 내에 들도록 의견을 제출하여 승인을 받아야 한다.

(2) 계약상대자는 총 공사비 산출서를 작성하여 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다.

10) 업무 수행 절차

(1) 계약상대자는 용역 기간과 공정에 대하여 발주기관에 검토․승인을 요청하여야 한다.

(2) 계약상대자는 의문 사항이 발생시 발주기관과 긴밀히 협의하여 해결하여야 한다.

(3) 계약상대자는 업무 진행에 필요하거나 발주기관에 의해 소집되는 업무 회의에 참석해야 한다.

2.5 별도 추가 업무

건축사법에 의한 기본업무 외 아래와 같은 업무도 본 설계용역에 포함한다.

1) 설계관련 추가 업무

: 건축허가 신청서 작성 이외의 대관청 신청, 수속대리 업무

2) 공사발주 지원 업무

: 공사발주 및 계약을 위한 협력

3) 설계감리 업무

(1) 원설계(의도) 반영여부 확인 및 검토

(2) 현장에서 제기된 시공도서의 문제점에 대한 검토 및 원설계를 유지하는 범위 내에서의 해결 방안

3. 기술지침

3.1 공통 사항

1) 기본개념

:  서울시립과학관 천체관측실은 단순히 기술적 측면을 중시하는 것에 그치지 않고 이용자들을위한 기본 개념 등을 정확히 파악하여 계획되어야 하며 특히 다음 사항을 고려하여 설계한다.

(1) 공공성의 확보 (그곳에서 행해지는 업무나 제공되는 서비스의 공공성 및 건축 공간의 이용 특성면에서의 공공성)

(2) 다양하고 변화가 많은 시민요구의 반영을 위한 공간의 확장성, 융통성의 고려

(3) 지역시민들의 호기심을 유발할 수 있는 입지성과 상징성의 향상

2) 방재 설계지침

(1) 구조 안전성의 확보

기존 건축구조 검토 및 구조보강 설계작업을 통하여 증축부분의 구조안전성을 확보한다.

(2) 화재에 대한 안전성 확보

천정 및 벽체 등의 내장은 불연재료 또는 준불연재료를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

3) 기타 지침

(1) 사용 연한에 관한 고려

a.  사용 연한의 확보

- 사용 기능을 검토하여 요구되는 용도, 기능의 확보에 대응할 수 있도록 한다.

- 계획에 있어서는 장기적인 사용 기간을 상정하여 사용 조정 및 용도 변경에도 대응 가능토록 필요에 따라 어느 정도의 융통성을 고려한다.

b. 내구성의 확보

- 사용 연한 내 그 기능을 확보할 수 있도록 건축 구조, 설비 및 건축 비(非)구조 부재의 합리적인 내구성의 향상에 노력한다.

- 건축 구조(구조체)에 있어서는 건축물의 내용 기간에 대규모 수선이 이루어지지 않도록 내구성 향상에 특별히 고려하고 건축 설비 및 건축 비(非)구조 부재에 있어서는 건축물의 사용 기간에 수차의 대규모 수선이 필요하며, 균형있는 수선 주기를 고려하여 합리적인 내구성을 확보할 수 있도록 한다.

(2) 건설공사의 부실 방지를 위한 조치 (시설물안전관리에관한특별법 제35조)

a. 시설물은 기능, 경제적 측면 및 환경과의 조화를 고려하여 공중의 위험을 발생시키지 아니하는 안전한 구조를 가지도록 설계, 시공 및 감리되어야 한다.

b. 시설물을 설계하는 자는 국토해양부령이 정하는 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대 시설을 설계에 포함시켜야 한다.

c. b항의 규정에 의하여 설계를 하는 경우에는 국토해양부령이 정하는 바에 따라 당해 시설물의 유지관리에 필요한 비용․인력․장비 등 시설물의 유지관리방법을 제시하여야 한다.

d. 유지관리부대시설

- 유지관리 계단 및 난간

- 유지관리 통로

- 기타 유지관리에 필요한 부대시설

e. 유지관리방법

- 유지관리장비

- 유지관리조직

- 매년 소요되는 유지관리비용

- 안전점검 시의 점검 항목 및 점검 방법

- 기타 유지관리에 필요한 사항 등

(3) 비용에 대한 고려

a. 설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대시설 등이 제시되어야 한다.

b. 각 시설에 관해 공사비의 적정한 배분을 고려한다.

c. 사후 유지관리비 등의 경제성이 비교․검토되어야 한다.

(4) 기성 규격제품 사용의 촉진

쓰이는 재료는 국산 자재를 사용함을 최대한 고려하고 KS제품을 우선적으로 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정토록 한다. 단, 외국산 자재 사용시에는 선정 사유 및 근거 자료를 제시하고 사후 관리시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요 자재는 발주기관과 협의 후 채택한다.

4) 설계 세부지침

(1) 사용환경의 향상

본 증축공사 부분의 사용용도는 천체관측실이며, 사용자들에게 최적의 환경 및 기능성을제공할 수 있도록 설계한다.

(2) 단 열

a. 지붕, 외벽 및 필로티 등의 상부 거실 등의 바닥 슬래브 단열을 고려한다.

b. 창, 출입구 등의 개구부 및 외기에 접하는 바닥의 단열을 고려한다.

(3) 결 로

a. 외벽 결로 방지를 배려함과 동시에 외부에 면하는 마감면 등의 결로의 저감, 결로수 등의 처리를 고려한다.

b. 외벽에 면하는 실런트 등의 결로 방지를 도모한다.

c. 이외에 일반적인 열교 방지를 고려한다.

(4) 채광, 조명

자연광의 유효한 이용을 검토하고, 천장, 벽 마감재 및 색채의 선정은 조명 효과에 대해 고려한다.

3.2. 분야별 설계지침

1) 기본 지침

(1) 설계 용역의 착수시 설계자와 모든 관계자가 당해 설계 용역의 목적에 대하여 분명한 인식과 확인을 하여야 한다. 왜냐하면 설계 용역의 목적은 모든 뒤따르는 설계의 결정에 기본이 되고, 우선순위에 의한 판단 기준이 되기 때문이다.

(2) 내부 공간 계획은 사용자 및 대중들의 동선이 명확하여야 하며, 기능적으로 연계되고 효율적이며, 수용되는 제반 활동의 특성에 따른 소요 공간이 제공되어야 하며, 체계적인 가구배치가 가능하도록 거실이 구성․계획되어야 한다. 공급과 처리 공간은 서비스의 필요조건을 고려하여 체계적이고 효율적으로 배치하여야 하며, 부적절한 서비스의 배치(예를 들면 수배관과 공조 기기가 전기관계실로부터 인입되지 말아야 하는 등)로 인하는 것과 같은 간섭과 잠재적 위험이 제거되어야 한다.

(3) 내부 마감 재료는 건물의 특성과 공간 및 활동에 부합하여야 하며, 영구적이고, 내구적이며,유지 보수가 용이하고, 대중의 사용에 적합하여야 한다.

(4) 신체 장애자의 출입은 관련 법규정에 따라야 하며, 편리하게 계획되어야 한다.

(5) 계약상대자는 치수, 재료, 건물 구성 요소의 설치와 관련하여 현재 건설 산업에서 사용되고 있는 표준적인 방법과 시공성을 채택하여 설계하여야 한다.

(6) 계약상대자는 수급으로 인하여 정상적인 공정을 방해하거나 공정 지연이 발생할 수 있는 건축 재료 또는 기타 요소로서 설계함을 피하여야 한다.

2) 건축설계지침 (해당부분 적용)

(1) 외부의 비(非)구조 부재

a. 외벽 및 마감은 지진시에 변형 또는 일정 기간 경과 후, 탈락하지 않는 재료 및 공법을 고려한다.

b. 2층 이상의 외벽 등에 타일(Tile)을 사용하는 경우는 다음 사항을 고려하여 탈락되거나 떨어져 나가지 않도록 한다.

c. 지붕 및 캐노피는 설해를 고려하고, 원칙적으로 빙설이 녹아 떨어지지 않는 형상이어야한다. 경사지붕 등은 도로, 인접지 및 부지내 통로와 시설물 사이에 충분한 간격을 두어 위험 방지에 노력한다.

d. 환기구 및 환기 갤러리는 외기의 역류 및 눈비가 들어오지 않도록 하기 위해 개폐 장치,후드(Hood) 등을 설치한다.

e. 루프 드레인의 수 및 구경은 최대 강수량 및 지붕 면적 등을 고려하여 여유를 둔다.

f. 필요에 따라 시설의 이용에 편리하도록 표지 체계(Signage)를 설계한다.

(2) 건축 계획 (해당부분 적용)

a. 건축허가 시점에서 관계법규(입법예고 포함)에 적합하여야 함.

b. 현장여건을 정확히 조사한 후 자연환경, 입지조건 등을 분석 계획에 반영할 것.

c. 건물 내외부 색상은 설계자 의도가 반영되도록 색상계획 수립하고 최적의 내부마감재를 적용할 것.

(3) 구조계획 (해당부분 적용)

a. 구조는 경제적이며 시공상 어려움이 없도록 설계하여야 하며 특수구조이거나 시공상 특수 공법이 필요한 경우에는 이에 대하여 객관적으로 인정할 수 있는 공인기관의 기술검토서를 첨부하여야 한다.

b. 장기, 단기하중 및 비틀림 방지등 구조체 변형에 충분히 대처할 수 있도록 설계할 것.

c. 증축부의 구조계획이 기존부와 일체가 되도록 설계할 것

d. 기존구조체에 하중이 증가되어 내력이 초과되는 구조부재는 시공성이 우수한 공법을 적용하여 보강설계를 수행할 것

e. 구조검토 및 보강설계기준은 KBC2016에 따라서 수행할 것

f. 구조계산서는 설계하중, 구조계획 평면도와 단면도, 보강방법에 대한 내용이 포함되어야 한다.

3) 기계 설비 설계지침 (해당부분 적용)

(1) 공기 조화, 냉난방 설비

a. 공조 조건별(부하 특성별, 사용 시간별, 방위별)로 구역을 분할 제어한다.

b. 냉난방 설비 장치의 용량 계산을 위한 외기 조건은 각 지역별로 위험률 2.5%를 적용함을 원칙으로 한다.

(2) 자동 제어 설비 (필요시)

공조, 냉난방 설비, 위생 설비 등 에너지 사용 설비에 대하여 에너지 절약 및 에너지 이용효율의 향상을 위해 중앙 관제식 자동 제어 시스템을 채택한다.

(3) 소화 및 방재설비

a. 소방기본법, 동법시행령 및 동법시행규칙, 시설기준규칙과 건축법 등을 기준으로 계획 설계한다.

b. 소방 시설은 건물의 용도 및 규모와 소화 대상물에 적합하게 조합하여 설계하도록 한다.

c. 각 설비는 중앙 방재 센터에서 조작 및 감시, 유도가 가능하도록 한다.

4) 전기설비 설계지침

(1) 기본계획 지침

a. 기존 전기,통신 배선을 파악하여 증축부분에 최적으로 설계할 것.

b. 유지 보수 및 안전관리에 역점을 둘 것

c. 에너지 절약에 역점을 둘 것

d. 장차 부하 변동에 따른 신축성이 있는 계통을 구성할 것

e. 고장이 적고 고장시 수리 교환이 용이한 구성으로 할 것

4. 성과품 작성 및 납품

4.1 일반사항

1) 계약상대자는 설계용역관리편람 제3권 건축분야(2011. 12. 서울특별시) 성과품작성기준에 의거 성과품을 작성하여 제출한다.

2) 설계예산서는 설계용역관리편람 제1권 공통분야(2011. 6. 서울특별시) 설계예산서(예)에 준하여 작성한다.

3) 모든 성과품의 인쇄는 발주기관의 승인을 득한 후 실시한다.

4) 저작권 귀속 및 하도급에 관한 사항설계 저작권과 관련한 제반사항은 저작권 관련법령이 정하는 바에 따르며, 참여기술자 확보가 자체적으로 어려울 경우 발주기관의 승인을 받아 시행한다.

4.2 성과품의 작성

1) 실시설계 보고서

(1) 보고서는 제출문과 참여기술자 명단을 수록한다.

(2) 발주기관의 지시사항, 설계자문회의 검토사항, 건설기술심의 지적사항 등에 대하여 내용, 조치 또는 설계반영 내용 등을 정리하여 보고서에 부록으로 삽입한다.

2) 구조계산서

(1) 구조계산서는 계산내용이 알기 쉬우며 정확하고 상세하게 정리되어 검토가 용이하게 작성되어야 한다. 특히 프로그램의 입․출력 자료는 모든 Case별로 이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함되어야 한다.

(2) 계산에 사용된 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 등을 정리하여 수록한다.

(3) 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 별책 작성한다. 출력자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 발주기관과 협의 후 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

(4) 구조계산시 주요 설계계수가 가정값인 경우 반드시 가정값임을 표시한다.

3) 설계도면

(1) 설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다.

(2) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

(3) 도면 하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

(4) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

(5) 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요설계조건, 시공시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

(6) 설계도면에는 관련도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련있는 도면들의 번호 및 도면명을표기한다.

(7) 모든 도면은 Cad System을 이용하여 작성하고 그 결과를 CD-Rom에 담아 제출한다.

(8) 설계용 도면은 도면 둘레의 훼손을 방지할 수 있도록 테이프를 부착하고 보관이 용이하도록 쟈켓트에 내장되어야 함

4) 설계예산서 (필요시 해당부분 적용)

(1) 설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서로 구별하되 단가산출서는 별책으로 작성한다.

(2) 설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재한다.

(3) 총괄내역서에는 제경비산출근거가 포함되어야 한다.

(4) 설계예산서는 설계용역 완료 30일전 해당월을 기준으로 작성하여야 한다.

(5) 노임기준은 당해연도 공사노임단가(대한건설협회)를 기준한다.

(6) 재료비는 정부구매물자 가격정보를 포함하여 3개 이상의 물가정보지를 참조하여 산출한다.

(7) 품셈은 당해연도 건설공사 표준품셈에 준한다.

(8) 중기손료 작성시의 외환환율은 해당년도 1월 3일자 기준 외환은행 전신환매도율을 기준으로 한다.

(9) 공사비 산출을 위한 견적서는 3개업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주기관과 상의하여 1개 또는 2개업체의 견적서를 기준으로 적용할 수 있다.

(10) 설계예산서는 회계예규 예정가격 작성기준에 의거 작성한다.

5) 인․허가 도서 작성

관계법규에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반 인․허가 요청용 도서를 작성한다.

6) 예정공정표 작성

관예정 공정표는 CPM/NETWORK 기법으로 설계원도 및 청사진에 작성하고, 별도로 A3규격으로 축소하여 제출한다.

7) 설계도서 검토

(1) 검토 방법

a. 설계시행 책임기술자가 검토

b. 먼저 각종계산서 확인 검토

c. 확인된 계산서와 도면 일치여부 검토

(2) 제출도면

a. 검토 및 수정완료 후 도면상에 검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고 수정 완료된 설계도서 및 검토도면 1부 제출

(3) 제출시기 : 중간검토 및 준공 시 제출

8) 기 타

(1) 수량산출서 작성시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

(2) 도면의 크기는 KS A 5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

4.3 성과품의 납품

1) 성과품 납품시기

(1) 성과품의 납품 및 납품 시기는 발주처와 별도로 협의한다.

(2) 최종성과품은 과업수행 종료일 3일 전까지 납품하여야 한다.

2) 성과품의 종류 및 납품부수

(1) 최종성과품 납품

성과품의 종류 및 소요부수 (필요시 별도협의)

※ 상기 설계도서와 함께 다음 내용을 제작하여 같이 제출한다.

◦ 설계도면(도면목록화일 및 한글폰트화일 포함)과 시방서는 CD-ROM 5조,

◦ 내역서(일위대가표, 단가산출서 포함) CD-ROM 3조는 조달청에서 "시설공사 응용프로그램으로 선정" 통보된(관보 제13264호 : '96. 3. 18) 프로그램으로 내역서를 작성한 후 CD

로 제출하고, 사용프로그램에 대하여는 발주기관과 수시 협의한다.

◦ 내역서 작성요령은 조달청에서 통보한 “건축공사 계약요청시 설계도서 작성요령(2002.1.8.)”에 따른다.

4.4 부속서류

다음과 같은 지침서는 과업내용서의 부속서류이다.

1) 설계용역관리편람 제3권 건축분야(2011. 12. 서울특별시)의

(1) 성과품 작성기준

(2) 과업수행계획서 작성기준

2) 설계용역관리편람 제1권 공통분야(2011. 6. 서울특별시)의

(1) 관련서식 표준양식

(2) 설계예산서(예)