목감천 홍수피해 방지를위한

7련수문 개량 세부 추진 계획

2020.10

서 울 특 별 시

(하천관리과)

목감천 홍수피해 방지를 위한

7련수문 개량 세부 추진 계획

【개봉1,2 펌프장 합리적 운영방안 수립 용역】결과에 도출된 목감천 홍수피해 방지를 위한 7련수문 개량 세부 추진계획을 수립하여 추진하고자 함

Ⅰ		관련근거

○ 개봉1,2 빗물펌프장 합리적 운영방안 수립 용역 보고서(2018.02)

○ 2020년 국가하천 유지보수 사업 일상감사 결과(2020.07)

○ 국가하천유지보수 사업시행 협의(2020.11)-국토부

Ⅱ		추진배경

○ 목감천 침수예방을 위한 안정적 수문 운영

(목감천 홍수 예방 및 역류 방지)

○ 목감천 감시체계 강화

(스마트 기술을 적용한 수문운영방식 구축)

○ 7련수문의 신속한 개폐를 통한 목감천 홍수관리 체계 구축

Ⅲ		사업대상

○ 사업대상

하천명	수문명	설치년도	위 치	규격	권양기 형식	비고
목감천	7련수문	1988.12	개봉동 189-2	6×6.5×7련	와이어로프

○ 현황사진

목감천

7련수문

개봉1펌프장

내수문

Ⅳ		문 제 점

○ 목감천 7련수문은 1988년 최초 설치된 이후 개량사업 없이 사용되어 32년 경과된 노후 하천 시설로 장기 사용에 따른 개.폐동작 불균형 발생

→ 7련수문 동작시 로프방식에 의한 좌.우 불균형 발생

○ 수문 조작방식이 수직하강 와이어로프 방식으로 홍수로 인한 목감천 역류발생 및 목감천 수위 상승으로 인한 7련수문 개.폐시 신속한 제어 불가

→ 목감천 홍수 발생시 7련수문 개.폐 및 목감천 배수를 위한 개봉1배수펌프장 유입수문(7련) 등 수문 동작시 약 1시간 소요(신속대응 불가)

Ⅴ		개선 방안

□ 목감천 침수예방을 위한 안정적 수문 운영을 위한 스마트 홍수

관리시스템 구축

○ 목감천 유역 특성을 감안한 7련수문 기능개선 추진

- 목감천 홍수방지를 위하여 기계식인 7련수문을 교체 개량하여 역류 발생시 신속한 동작이 가능

- 별도의 유압식 수문 신설보다는 기존 기존 목감천 7련수문 개량하여 추진

○ 기능개선(교체) 방향

구 분	개 선 안		비 고
	1안	2안
개 요	- 7련수문 교체 (설계용역 시 효율성, 경제성 분석 후 형식 선정) - 역류시 수문 개.폐조작 용이 및 자동제어 가능	- 역류방지용 유압식 제어용 수문 별도 신설
공 사 비	46억~54억	137억~160억
추 천	적용

※ 적용근거 : 개봉1,2 빗물펌프장 합리적 운영방안 수립용역 보고서 참고

(2018. 02)-구로구

□ 목감천 감시체계 강화

○ 목감천의 홍수예방을 위한 감시용 시스템 구성

- 현장감시 : CCTV 구축 및 추가설치

- 강수분석 : 강우량계(기존시설 연계)

- 수위분석 : 7련수문 내.외 및 안양천 수위 감시

- 유량분석 : 스마트 강우분석시스템 연계

□ 목감천 홍수관리 체계 구축

○ 7련수문의 신속한 개.폐기능 확보를 위한 스마트 기술 적용

- 스마트 현장제어 : 현장 RTU 적용

- 목감천 배수를 위한 제어설비 구축(기존시스템 연계 또는 개량)

→ 목감천의 특성상 안양천 수위와 목감천 내수위 수위 비교에 의한 7련수문 개.폐 및 배수펌프장 운영 체계 구축

○ 강우량, 수위, 유입량, 유출량 등 빅데이터를 통한 예측운영

→ 실시간 감시자료에 의한 데이터 분석

→ 수문 및 배수펌프장의 가동의 의사결정을 예측

→ 종합상황실의 현장 감시 기능 강화

Ⅵ		사업개요

○ 사업개요

- 사업기간 : ‘21. 04월 ~ ’22. 12월

- 기본 및 실시설계 : ‘21. 04월 ~ ’21. 07월

- 공사기간 : ‘22. 01월 ~ ’22. 12월

- 사업비 검토

구 분	금 액(백만원)	비 고
합 계	6,000
기본 및 실시설계	320	공사비 대가산출 방식
공 사 비	5,380	용역결과 적용
감 리 비	300	공사비 대가산출 방식

○ 세부내용

- 목감천 7련수문 전면 교체(6.0×6.5×7련)

- 권양기 교체(와이어로프식 → 유압식 또는 랙방식 등 검토 적용)

- 감시설비 : CCTV 설치

- 하천 데이터 수집 : 유량계, 수위, 강우량 등

- 스마트 시스템 : RTU 및 자동제어(스마트 홍수관리) 구측

- 모니터링 연계 : 종합상황실 연계

Ⅶ		사업추진 효과

○ 목감천 배수설비 기능강화 및 홍수방지 대책 마련

- 목감천은 하천의 폭이 좁고 유속이 빨라 하천 수위변동이 심하여 대규모 홍수피해가 발생하여 이를 방지하기 위한 방재설비를 마련

목 감 천 유 역 침 수 피 해 현 황
연도(년)	피해지역 구분	위 치	침수피해
1998	비도시지역	광명시 과림동, 옥길동	농경지 34.5ha
2001	도시지역	광명시 광명동	주거지 208.7ha
2011	도시지역	광명시, 구로구	74가구

→ 32년 경과되어 부식 정도가 심하고 동작속도가 늦은 불안전한 설비를 개량하여 신속하고 안전한 방재설비 확보

○ 목감천 배수설비 기능강화

- 배수설비의 다양한 정보통신(ICT), 수문상태(CCTV), 목감천 및 안양천의 하천수위, 강우량, 유출량 등을 종합감시하여 목감천 유역배제기능 강화

○ 국지성 집중호우에 효과적 대응

- 국지성 집중호우로 인한 신속한 배수기능을 확보할 수 있어 광명시 및 구로구 일대의 홍수피해 예방

○ 빅데이터를 활용한 목감천 홍수관리

→ 목감천 홍수관리를 위한 데이터 수집 및 향후 시스템 고도화

적용시 활용(AI 시스템)

Ⅷ		예산 확보 방안

○ 연차별 투자 계획(안)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	‘20	‘21	‘22	‘23	비고
투자비용	6,000	-	320	5,680	-

○ 사업비 조정

- 7련수문 설계용역 결과에 따라 효율성, 경제성 분석 후 사업비 조정

○ 재원확보 방안

- 【하천법】에 의거 국가하천으로 국가하천유지보수 일반예산(국비) 확보 추진

Ⅸ		추진경과 및 향후계획

○ ‘20. 6. 23. : ’20년 국가하천유지보수 추경예산 가내시

○ ‘20. 7. 06. : ’20년 국가하천유지보수 추경예산 내시

○ ‘20. 7. 22. : ’20년 국가하천유지보수사업 일상감사 결과 및 예산 교부

○ ‘20. 9. 03. : 국가하천 유지보수사업 시행에 따른 협의(스마트 홍수관리시스템 구축)

○ ‘20. 11. 13. : 국가하천 유지보수사업 시행에 따른 협의(세종시)

- 7련수문 개량 21년 시행

○ ‘21. 04월 : 목감천 7련수문 개량 기본 및 실시설계 용역 발주

○ ‘21. 07월 : 목감천 7련수문 개량 기본 및 실시설계 용역 준공

○ ‘22. 12월 : 목감천 7련수문 개량사업 준공.   끝.