	예산서 P.
충무초등학교 주변 원형관로 정비공사

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간	□연례반복, ☑2017.03 ~ 2017.09.
사업위치	중구 충무초등학교 주변(묵정동 26-16 ~ 장충동2가 173-5)
총사업비	총 2,150,000천원		[국비]	[시비]2,150,000천원	(보조율) %	[구비]
사업내용
	○	노후 하수관로 개량 및 정비
사업형태	☑직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타
사업시행주체	중구청

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	민간보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산
☑	□	□	□	□	□	□	□	☑
경상	투자
□	□

□ 재정사업 평가 결과
매우 우수	우수	보통	미흡	매우미흡	해당없음
□	□	□	□	□	☑

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	하상문 2133-3780	김재승 2133-3789	김일구 2133-3791

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2015년 본예산	2016본예산 (A)		2017예산(안) (B)	증감 (B-A)
								(B-A)*100/A
계						2,150,000	2,150,000	100%
시설비						2,150,000	2,150,000	100%

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2016년 본예산
시설비

과목구분	2017년 예산(안)
시설비
	○	하수관로 개량 D=600mm, L= 18m × 850천원/m = 15,300천원 D=800mm, L= 10m × 1,160천원/m= 11,600천원	=	26,900천원
	○	하수관로 보수보강(비굴착) D900 ~ D1,000mm, L=113m × 1,502천원/m = 169,700천원 □1.0×1.0~□2.5×2.3m, L=211m × 9,031천원/m = 1,905,500천원	=	2,075,200천원
	○	폐기물 처리비 및 이전비 47,900천원×1식 = 47,900천원	=	47,900천원

과목구분	증 감 사 유
시설비	신규사업(노후 하수관로 개량 및 정비)

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)                       (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계
시설비				2,150

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	중구 관내 충무초등학교 주변 건축물(학교, 주택)하부를 통과하는 30년이상된 노후·불량한 하수관로의 관거파손, 골재 노출과 이음부 이격 등 하수관로 정비가 시급한 지역으로 건축물 주변 지반 침하에 대한 안전사고를 미연에 방지하기위해 적기 정비 시행하여 사전에 재해를 예방하고 쾌적한 주민생활 환경을 조성

□ 사업근거
○	하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
○	우기대비 하수시설물 자체점검 실시(2016.4.)

□ 사업내용
○	위 치 : 중구 충무초등학교 주변(묵정동 26-16 ~ 장충동2가 173-5)
○	규 모 : 하수관로 개량 및 정비 - 굴 착 구 간 : 원형관로 ⇒ D=600 ~ 800mm, L=28m - 비굴착구간 : 원형관로 ⇒ D=900 ~ 1,000mm, L=113m 사각형거 ⇒ □1.0×1.0 ~ □2.5×2.3m, L=211m
○	사업기간 : 2017. 3 ~ 2017. 9.
○	사업내용 : 노후 하수관로 개량 및 정비
○	총사업비 : 2,150백만원(시설비 2,150백만원)

□ 사업계획(투자사업의 경우)
○	위 치 :
○	규 모 :
○	사업내용 :
○	소요예산(안) :

□ 추진경위
○	`16.04. : 충무초등학교 주변 하수관로 점검 요청 민원접수
○	`16.04. : 현황조사를 위한 맨홀신설(2개소) 및 시험터파기 시행
○	`16.04. : 자체 CCTV활용 정밀조사
○	`16.05. : 노후 하수관거 정비예산 요청(긴급)

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)
○	건축물(학교, 주택)하부 노후 및 불량한 하수관로 정비로 건축물 주변
	지반침하에 따른 안전사고 예방 및 하수도 기능 회복을 위해 정비가 필요함

□ 사업추진절차
○	집행절차
-		예산편성⇒ 공사발주 ⇒ 공사계약 ⇒ 공사시행 ⇒ 준공
○	계약체결
-		계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 적격심사 ⇒ 업체선정 ⇒ 계약체결

□ 2017년도 추진일정
사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계
공사설계 및 발주	2017.01~2017.03		공사설계 및 계약심사 등 사전절차 이행
공사시행	2017.01~2017.09	2,150,000천원	하수관거 보수보강 공사 추진

4		사 업 효 과

□   향후 기대효과

○	건축물(학교, 주택)하부 노후 및 불량한 하수관로 정비로 건축물 주변 지반침하에 따른 안전사고 예방
○	하수 누수 및 불명수 유입을 차단하여 토양오염 방지 및 처리장의 효율증대

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2013
2014
2015

참 고 자 료

▢ 위치도 및 조감도(현황도)

위 치 도
현 황 도